1241/2023-200773(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А47-10052/2023

г. Оренбург

04 октября 2023 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи 

Александрова А.А. рассмотрел в порядке упрощенного производства дело  по исковому заявлению  

публичного акционерного общества «Россети Волга», 

ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г.Саратов, филиал  «Оренбургэнерго» Центральное производственное отделение,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Энергостройинвест»,  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г.Оренбург  

о взыскании неустойки в общей сумме 180 019 руб. 15 коп. 

Дело рассматривается в порядке упрощенного производства в  соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации без вызова сторон, извещенных надлежащим  образом в соответствии с требованиями статьи 123 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).  

ПАО «Россети Волга» в лице филиала – «Оренбургэнерго»  обратилось в Арбитражный суд Оренбургской области с исковым  заявлением к обществу с ограниченной ответственностью  «Энергостройинвест» о взыскании неустойки по договору № 2230-002963  от 19.05.2022 в сумме 180 019 руб. 15 коп.  

Определением от 30.06.2023 Арбитражный суд Оренбургской  области в соответствии со статьей 227 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) признал возможным  рассмотреть спор в порядке упрощенного производства без вызова сторон  в соответствии со ст. 228 и предложил ответчику в срок до 26.07.2023  представить отзыв на заявление.  

В срок до 18.08.2023 стороны вправе были представить друг другу и  в арбитражный суд дополнительно документы, содержащие объяснения по  существу заявленных требований и возражений в обоснование своей  позиции.  

От ответчика письменный отзыв в материалы дела не поступил. 

Решение арбитражного суда по делу, рассматриваемому в порядке  упрощенного производства, принято путем подписания судьей  резолютивной части решения 23.08.2023 и размещения на официальном  сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети  "Интернет" согласно части 1 статьи 229 АПК РФ.  

Данное решение суда в виде резолютивной части от 23.08.2023  размещено на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 24.08.2023 согласно данным сайта  http://kad.arbitr.ru/.  

Указанным решением исковые требования удовлетворены в полном  объеме.  

По заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи  апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке  упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное  решение (часть 2 статьи 229 АПК РФ).  

29.09.2023 от ответчика в материалы дела поступила апелляционная  жалоба.  

При рассмотрении материалов дела судом установлены следующие  обстоятельства.  

19.05.2022 между ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» и ООО  «ЭнергоСтройИнвест» заключен договор № 2230-002963 на выполнение  работ «под ключ» по объекту «Строительство «ВЛ-10 кВ от опоры № 22  (ответвление на Р-1616) Л10кВ Си-16 ПС 110/35/10 кВ Соль-Илецкая и ТП  10/0,4 кВ» для нужд Центрального ПО филиала ПАО «Россети Волга»«Оренбургэнерго», по условиям пункта 2.1 которого Подрядчик обязуется  в соответствии с техническим заданием (приложение № 1) осуществить  разработку и согласование проектной и рабочей документации, выполнить  инженерно-геодезические изыскания, кадастровые, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту «Строительство «ВЛ-10  кВ от опоры № 22 (ответвление на Р-1616) Л10кВ Си-16 ПС 110/35/10 кВ  Соль-Илецкая и ТП 10/0,4 кВ» для нужд Центрального ПО филиала ПАО  «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» и сдать результат Заказчику, а  Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке,  предусмотренном Договором.  

На I этапе – выполнить предпроектное обследование, проведение  необходимых инженерногеодезических изысканий, разработка,  согласование и экспертиза с Заказчиком проектной и рабочей  документации (РД) в соответствии с требованиями нормативных  документов. Выполнение кадастровых работ (включая описание и  установление границ охранных зон объекта электроэнергетики). Проектная  документация должна быть согласована в требуемом объёме с Заказчиком.  

На II этапе – выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные  работы. Работы по данному этапу должны выполняться в полном  соответствии с утвержденным проектом.  

Согласно п. 3.1 договора выполнение работ и подготовка  Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по  календарному плану (Приложение № 2) с указанными в нем сроками  выполнения работ и иными мероприятиями, предусмотренными  техническим заданием (Приложение № 1).  

I-й этап Проектные, изыскательские и кадастровые работы (п. 3.2): 

3.2.1. Срок начала работ по I этапу – не позднее 5 календарных дней  со дня заключения договора.  

3.2.2. Срок окончания работ по I этапу – не позднее 90 календарных  дней со дня заключения договора.  

II-й этап Строительно-монтажные и пусконаладочные работы (п.  3.3):  

3.3.1. Начало – не позднее 2-х календарных дней с момента  подписания акта о выполнении проектно-изыскательных и кадастровых  работ.  

3.3.2. Срок завершения строительно-монтажных, пусконаладочных  работ – не позднее 14.02.2023 г.  

В силу п. 3.4 договора срок завершения работ по договору – не  позднее 28.02.2023 г.  

Сроком завершения строительно-монтажных, пусконаладочных  работ является дата подписания Заказчиком акта приёмки законченного  строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (по форме  приложения № 9).  

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата  утверждения Заказчиком акта ввода в эксплуатацию (акта приёмки  законченного строительством объекта приёмочной комиссией по  нетиповой форме КС-14).  

Пунктом 6.1 договора предусмотрена, что цена Договора является  ориентировочной и не может превышать 3 333 103 руб. 51 коп., кроме того  НДС (20%) 666 620 руб. 70 коп., всего с НДС (20%) цена договора не  может превышать 3 999 72 руб. 21 коп., и состоит из стоимости работ:  

по I этапу, не превышающей 140 618 руб. 05 коп., кроме того НДС  (20%) 28 123 руб. 61 коп., всего с НДС (20%) 168 741 руб. 66 коп., и  стоимости работ;  

по II этапу, не превышающей 3 192 485 руб. 46 коп., кроме того НДС  (20%) 638 497 руб. 09 коп., всего с НДС (20%) 3 830 982 руб. 55 коп.  

Согласно п. 11.2.6 договора датой выполнения работ по I этапу  является дата подписания Заказчиком акта о выполнении проектно-изыскательских и кадастровых работ.  

В соответствии с п. 11.3 договора сдача-приемка строительно-монтажных и пусконаладочных работ по II этапу осуществляется в  следующем порядке:  

11.3.1. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии со ст.  720 ГК РФ с оформлением актов выполненных работ по форме КС-2  

(приложение № 6) и справок о стоимости выполненных работ и затрат по  форме КС-3 (приложение № 7).  

11.3.2. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых  работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами  двусторонними актами промежуточной приемки ответственных  конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.  

11.3.3. Подрядчик обязан представить формы КС-2, КС-3 Заказчику  не позднее 1 числа отчетного месяца.  

Пунктом 15.2 договора предусмотрено, что при нарушении  договорных обязательств Подрядчик уплачивает Заказчику:  

- за несоблюдение срока сдачи работ (поставки материалов и  оборудования), указанного в календарном плане строительства  (реконструкции) объекта (приложение № 3), - пени в размере 0,1 процент  от стоимости невыполненных работ (непоставленных материалов и  оборудования) за каждый день просрочки до фактического исполнения  обязательства;  

- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях  (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или за задержку возмещения  расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, - пени в размере  0,1 процента от стоимости некачественно выполненных работ за каждый  день просрочки;  

- в случае невывоза (неполного вывоза) на день сдачи результата  работ Подрядчиком отходов и/или мусора, оставшихся после окончания  работ на территории проведения работ - штраф в трехкратном размере от  стоимости вывоза мусора;  

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от  принадлежащего ему имущества - пени в размере 0,2 процента от цены  Договора за каждые 10 (десять) дней просрочки до фактического  исполнения обязательства.  

- в случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении  привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего  предпринимательства в соответствии с п.4.21 настоящего Договора -  штраф в размере 0,1% от стоимости Договора;  

- в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по привлечению  к исполнению договора субподрядчиков из числа субъектов малого и  среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в  размере 0,1% от стоимости Договора.  

- за нарушение требований к составу и порядку ведения  исполнительной документации при строительстве, реконструкции,  капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования,  предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков  сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006) - штраф в  размере 0,1% от стоимости Договора за каждый выявленный случай, но  суммарно не более трехсот тысяч рублей.  

- за нарушение порядка ведения общего и (или) специального  журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции,  капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05- 2007) - штраф в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый  выявленный случай, но суммарно не более трехсот тысяч рублей.  

В обоснование заявленных требований истец ссылается на  следующие обстоятельства:  

Срок выполнения 1 этапа работ согласно п. 3.2 договора –  17.08.2022. Согласно пункту 11.2.6 договора Датой выполнения работ по I  этапу является дата подписания Заказчиком акта о выполнении проектно-изыскательских и кадастровых работ (дата подписания справки КС-3 –  23.03.2023), просрочка выполнения работ по первому этапу (с учетом  оплаты периода по 07.11.2022, платежное поручение № 1583 от 30.11.2022)  составила 136 дней, размер штрафных санкций с учётом указанной оплаты  – 22 948,87 руб.  

Стоимость 2 этапа работ по договору определяется укрупненным  расчетом стоимости строительства согласно пункту 6.1 договора и  составляет 3 830 982 руб. 55 коп., в том числе НДС. Срок выполнения 2  этапа работ согласно п. 3.2 договора – 14.02.2023. Порядок приёмки  выполненных работ по 2 этапу установлен пунктами 11.3.1-11.3.3 договора  (дата подписания справок КС-2, КС-3 – 27.03.2023), просрочка выполнения  работ по второму этапу составила 41 день. Размер штрафных санкций  составляет 157 070,28 рублей.  

Таким образом, общая сумма пени составила 180 019,15 руб. 

ПАО «Россети Волга» обратилось в арбитражный суд к обществу с  ограниченной ответственностью «Энергостройинвест» с заявлением о  выдачи судебного приказа задолженности в сумме 180 019 руб. 15 коп. –  неустойки по договору от 19.05.2022 № 2230-002963 на выполнение работ  «под ключ» по объекту «Строительство «ВЛ-10 кВ от опоры № 22  (ответвление на Р1616) Л10кВ Си-16 ПС 110/35/10 кВ Соль-Илецкая и ТП  10/0,4 кВ» для нужд Центрального ПО филиала ПАО «Россети Волга»«Оренбургэнерго», определением от 05.06.2023 судебный приказ от  30.05.2023 по делу № А47-8241/2023 отменен в связи с поступившими  возражениями должника.  

Указанные обстоятельства послужили основанием обращения в  арбитражный суд с рассматриваемым иском.  

Исследовав материалы дела, оценив представленные в материалы  дела доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд приходит к  следующим выводам.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса  Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства возникают из  оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также  из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не  предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и  

смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и  обязанности, в том числе из договоров и иных сделок.  

Договор считается заключенным, если между сторонами, в  требуемой в подлежащей случаях форме, достигнуто соглашение по всем  существенным условиям договора. Существенными являются условия о  предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых  актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а  также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон  должно быть достигнуто соглашение (пункт 1 статьи 432 ГК РФ).  

В силу статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона  (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)  определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется  принять результат работы и оплатить его.  

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда  указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По  согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены  также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные  сроки).  

В силу статей 702, 708 ГК РФ существенными условиями договора  подряда являются предмет договора, начальный и конечный сроки  выполнения работ.  

На основании статьи 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение  проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик,  изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую  документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик  обязуется принять и оплатить их результат.  

Как следует из материалов дела, 19.05.2022 между ПАО «Россети  Волга» - «Оренбургэнерго» и ООО «Энергостройинвест» заключен  договор № 2230-002963 на выполнение работ «под ключ» по объекту  «Строительство «ВЛ-10 кВ от опоры № 22 (ответвление на Р-1616) Л10кВ  Си-16 ПС 110/35/10 кВ Соль-Илецкая и ТП 10/0,4 кВ» для нужд  Центрального ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго», в  соответствии с условиями которого Подрядчик обязуется в соответствии с  техническим заданием (приложение № 1) осуществить разработку и  согласование проектной и рабочей документации, выполнить инженерно-геодезические изыскания, кадастровые, строительно-монтажные и  пусконаладочные работы по объекту «Строительство «ВЛ-10 кВ от опоры   № 22 (ответвление на Р-1616) Л10кВ Си-16 ПС 110/35/10 кВ Соль-Илецкая  и ТП 10/0,4 кВ» для нужд Центрального ПО филиала ПАО «Россети  Волга» - «Оренбургэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик  обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке,  предусмотренном Договором (п. 2.1 договора).  

Стороны согласовали существенные условия указанного договора,  приступили к его исполнению. Действительность и заключенность  указанного договора сторонами не оспаривались (часть 3.1 статьи 70 АПК  

РФ), в силу чего суд приходит к выводу о возникновении между сторонами  обязательственных правоотношений, вытекающих из данного договора  подряда.  

На основании пункта 1 статьи 307 ГК РФ в силу обязательства одно  лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора)  определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу,  уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а  кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.  

Согласно статье 309, пункту 1 статьи 310 ГК РФ обязательства  должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями  обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при  отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или  иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от  исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не  допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим  Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.  

В силу пункта 1 статьи 760 ГК РФ по договору подряда на  выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан:  выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными  данными на проектирование и договором; согласовывать готовую  техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с  заказчиком - с компетентными государственными органами и органами  местного самоуправления; передать заказчику готовую техническую  документацию и результаты изыскательских работ.  

Согласно статье 329 ГК РФ исполнение обязательств может  обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника,  поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами,  предусмотренными законом или договором.  

В силу пункта 1 статьи 330, статьи 331 ГК РФ неустойкой (штрафом,  пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма,  которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки  исполнения. Соглашение о неустойке должно быть совершено в  письменной форме независимо от формы основного обязательства.  Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения  о неустойке.  

В соответствии с п. 15.2 договора за несоблюдение срока сдачи работ  (поставки материалов и оборудования), указанного в календарном плане  строительства (реконструкции) объекта (приложение № 3), подрядчик  уплачивает заказчику пени в размере 0,1 процент от стоимости  невыполненных работ (непоставленных материалов и оборудования) за  каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.  

Таким образом, письменная форма соглашения о неустойке  соблюдена сторонами.  

По смыслу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих  требований и возражений.  

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на  которые ссылается сторона в обоснование своих требований или  возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо  не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из  иных доказательств, обосновывающих представленные возражения  относительно существа заявленных требований.  

Как следует из материалов дела и не оспаривается ответчиком,  общество с ограниченной ответственностью «Энергостройинвест»  нарушило сроки выполнения работ, обязательства по выполнению работ  по I и II этапу в сроки, указанные в договоре, не исполнило.  

Согласно расчету истца размер неустойки за период просрочки 

I этапа работ с 08.11.2022 по 23.03.2023 составил 22 948,87 руб., размер  неустойки за период просрочки I I этапа работ с 15.02.2023 по 27.03.2023  составил 157 070,28 руб.  

Общая сумма неустойки составила 180 019,15 руб.  

Представленный истцом расчет неустойки проверен арбитражным  судом первой инстанции и признан арифметически верным, конррасчет  неустойки ответчиком в материалы дела не представлен.  

При рассмотрении дела в суде первой инстанции общество с  ограниченной ответственностью «Энергостройинвест» не заявило  ходатайство об уменьшении размера неустойки в соответствии со статьей  333 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

При таких обстоятельствах, требования истца о взыскании неустойки  в общей сумме 180 019 руб. 15 коп. подлежат удовлетворению в полном  объеме.  

При цене иска 180 019 руб. 15 коп. размер госпошлины составил 

6 401 руб., истцом уплачена госпошлина в сумме 6400 руб. (платежное  поручение № 15764 от 21.06.2023).  

Расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6 400 руб. 00  коп. относятся на ответчика и подлежат взыскании в пользу истца.  

С ООО «Энергостройинвест» в доход Федерального Бюджета  подлежит взысканию госпошлина в сумме 1 руб. 00 коп.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования публичного акционерного общества «Россети  

Волга» удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  

«Энергостройинвест» в пользу публичного акционерного общества  «Россети Волга» неустойку в общей сумме 180 019 руб. 15 коп., а также  судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме  

6 400 руб. 00 коп. 

Исполнительный лист выдать взыскателю после обращения в  Арбитражный суд Оренбургской области с заявлением о выдаче  исполнительного листа.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Энергостройинвест» в доход Федерального Бюджета государственную  пошлину в сумме 1 руб. 00 коп., выдав справку.  

Решение подлежит немедленному исполнению. 

Составление мотивированного решения осуществляется только при  наличии письменного заявления лица, участвующего в деле и при условии  подачи данного заявления в течение пяти рабочих дней со дня размещения  резолютивной части на официальном сайте арбитражного суда.  

Решение арбитражного суда первой инстанции по делу,  рассмотренному в порядке упрощенного производства, может быть  обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый  арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня его  принятия через Арбитражный суд Оренбургской области.  

Решение, выполненное в форме электронного документа,  направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на  официальном сайте арбитражного суда в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее следующего дня  после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном  носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня  поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным  письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Судья А.А. Александров