10513_3782476  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А53-24859/2016

14 марта 2017 года

город Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи О.М. Брагиной,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания А.С.  Хатламаджияном,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело, возбужденное по иску муниципального  бюджетного учреждения здравоохранения Городской больницы скорой медицинской  помощи им. В.И. Ленина г. Шахты Ростовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Форсаж М» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

об обязании устранить недостатки по текущему ремонту и о взыскании штрафа в размере  27.547 руб. 46 коп.,  

при участии в судебном заседании: от истца – представитель Е.С. Лигута, по доверенности № 1 от 07.02.2017 г., от ответчика – представитель не явился. 

 Руководствуясь статьями 309, 310, 330, 333, 421 Гражданского кодекса Российской  Федерации, статьями 65, 110, 123, 156, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Форсаж М» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение одного месяца с даты вступления судебного  акта в законную силу безвозмездно устранить недостатки по текущему ремонту кровли  здания ЦСО, который осуществлялся в рамках исполнения договора № 531/15 от  09.10.2015 г., и выполнить следующие работы: демонтаж верхнего слоя наплавляемого  материала – 124 кв.м., огрунтовку оснований из бетона или раствора под  водоизоляционный кровельный ковер – 170 кв.м., устройство кровель плоских из  наплавляемых материалов в два слоя – 170 кв.м., устройство кровель плоских из  наплавляемых материалов в один слой – 124 кв.м.; обязать общество с ограниченной  ответственностью «Форсаж М» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение  одного месяца с даты вступления судебного акта в законную силу безвозмездно устранить  

недостатки по дополнительным работам по текущему ремонту кровли здания ЦСО,  который осуществлялся в рамках исполнения договора № 584/15 от 06.11.2015 г., и  выполнить следующие работы: демонтаж верхнего слоя наплавляемого материала – 37,5  кв.м., устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой – 37,5 кв.м.  

 Взыскать с общества с ограниченной «Форсаж М» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу муниципального бюджетного учреждения здравоохранения  Городской больницы скорой медицинской помощи им. В.И. Ленина г. Шахты Ростовской  области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 27.547 руб. 46 коп. штрафа; взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «Форсаж М» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу муниципального бюджетного учреждения здравоохранения  Городской больницы скорой медицинской помощи им. В.И. Ленина г. Шахты Ростовской  области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 8.000 руб. расходов по уплате  государственной пошлины.  

 Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

 Решение может быть обжаловано через суд, вынесший решение, в арбитражный  суд апелляционной инстанции в течение месяца с даты принятия решения, а также в  арбитражный суд кассационной инстанции в течение двух месяцев с даты вступления  решения по делу в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал  в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья О.М. Брагина