Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru 

http://www.kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Калининград

Дело №

А21-3979/2018

«26»

июня

2018 года

Резолютивная часть решения объявлена  

«21»

июня

2018 года

Решение изготовлено в полном объеме   

«26»

июня

2018 года

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.

при ведении протокола судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «Калининградтеплогазпроект» к  Неманскому городскому муниципальному унитарному предприятию «Теплосеть» о взыскании 2 844 500 рублей

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 доверенности

от ответчика: н/я

установил.

 Общество с ограниченной ответственностью «Калининградтеплогазпроект» обратилось в  суд с иском к Неманскому городскому муниципальному унитарному предприятию «Теплосеть» о взыскании задолженности по договору от 10.02.2017 года № 23-2016 в сумме 2 250 000 рублей, неустойки в  сумме 634 500 рублей.

В связи с  отсутствием возражений сторон суд перешел к рассмотрению дела в судебном заседании первой инстанции.

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 АПК РФ.Судом установлено.

Между сторонами заключен договор от 10.02.2017 года № 23-2016.

По условиям договора ООО «Калининградтеплогазпроект» (исполнитель)  обязалось разработать проектную и рабочую документацию по объекту: «Строительство газовой котельной по ул. Гагарина в г. Немане Калининградской области».

В соответствии с пунктом 2.1 договора общая стоимость работ составляет 4500000 рублей.

В соответствии с пунктом 2.2.1 договора на основании выставленного счета заказчик перечисляет исполнителю 50% от стоимости работ, указанной в пункте 2.1 договора, что составляет 2 250 000 рублей при передаче проектной документации на экспертизу.В соответствии с пунктом 2.2.2 договора окончательный расчет за работы производится в течение 5 календарных дней после подписания акта сдачи-приемки работ.

Дополнительно в календарном плане работ (приложение № 2 к договору) стороны согласовали, что проектная документация разрабатывается в течение 180 дней с момента предоставления заказчиком исходных данных, стоимость работ 2 250 000 рублей, рабочая документация разрабатывается в течение 20 календарных дней с момента получения положительного заключения экспертизы, стоимость работ 2 250 000 рублей.

В соответствии с пунктом 7.4 договора в случае нарушения обязательств в части оплаты принятых работ в сроки, согласованные в договоре, применяются санкции в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

В материалы дела представлены подписанный сторонами акт от 22.05.2017 года о сдаче и приемке работ на сумму 2 250 000 рублей, счет от 22.05.2017 года № 20 на сумму 2 250 000 рублей.

Согласно пояснениям представителя истца разработанная проектная документация заказчиком на государственную экспертизу не передавалась, требования заявлены по положениям пункта 2.2.1 договора. 

Из акта от 22.05.2017 года № 1 следует, что заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.

Доказательств оплаты работ суду не представлено.

Согласно расчету истца за период с 28.05.2017 года по 05.03.2018 года подлежит уплате неустойка в сумме 634 500 рублей. Расчет неустойки проверен судом. 

Возражений в отношении размера неустойки от ответчика не поступило.

Требования истца в заявленных суммах подлежат удовлетворению на основании положений статей 309, 310, 330 ГК РФ, положений договора.

Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Неманского городского муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» (ОГРН 

<

***>) с пользу общества с ограниченной ответственностью «Калининградтеплогазпроект» (ОГРН 

<

***>) основной долг в сумме 2 250 000 рублей, неустойку в сумме 634 500 рублей, в доход Федерального бюджета госпошлину в сумме 37 422,5 рублей.

Решение может быть обжаловано в  месячный срок в арбитражный апелляционный суд.

Судья                    О.Н.Шкутко