36/2023-309871(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А51-19028/2023

г. Владивосток

13 декабря 2023 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Буров А.В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ФОНД ПРИМОРСКОГО КРАЯ  "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  ПРИМОРСКОГО КРАЯ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬПСТРОЙ- ДВ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

р е ш и л:

Обязать ООО «Альпстрой-ДВ» в течение 20 календарных дней с момента  вступления настоящего решения в законную силу в рамках работ по устранению  допущенных недостатков при капитальном ремонте систем отопления и теплоснабжения,  горячего водоснабжения, холодного водоснабжения многоквартирного дома № 7 по ул.  Карла Маркса в г. Большой Камень выполнить следующие виды и объемы работ:  

П

озиция 

КС-2 

Вид работ по КС-2 (система отопления и  

теплоснабжения) 

Необхо

димый объем 

работ 

1 

Разборка трубопроводов из водогазопроводных  труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до  

100 мм 

134 мп 

2 

Разборка трубопроводов из водогазопроводных  труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до  

50 мм 

190 мп 

3 

Прокладка трубопроводов отопления и  газоснабжения из стальных бесшовных труб  

диаметром: 80 мм 

14 мп 

5 

Прокладка трубопроводов отопления и  газоснабжения из стальных бесшовных труб  

диаметром: 65 мм 

120 мп 

7 

Прокладка трубопроводов отопления и  газоснабжения из стальных бесшовных труб  

диаметром: 50 мм /применительно диаметром до 50мм/  

190 мп 

9 

Гидравлическое испытание трубопроводов  систем отопления, водопровода и горячего  

водоснабжения диаметром: до 50 мм  

190 мп 

10 

Гидравлическое испытание трубопроводов  систем отопления, водопровода и горячего  

водоснабжения диаметром: до 100 мм  

134 мп 

24 

Установка грязевиков наружным диаметром 

патрубков: до 89 мм 

1 шт 

58 

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021  

0,66 м2 

59 

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115  

0,66 м2 

54 

Изоляция изделиями из вспененного каучука,  вспененного полиэтилена трубопроводов наружным  

диаметром: до 160 мм трубками  

324 мп 

П

озиция  по КС-2  

Вид работ по КС-2 (система горячего  

водоснабжения) 

Необходим

ый объем работ  

28 

Установка фильтров диаметром: 50 мм  

1 шт 

29 

Фильтр магнитный муфтовый, ФММ-65  

/применительно dn 50/  

1 шт 

34 

Клапаны обратные пружинные ИГЛ /Eagle/,  

давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) размером 2  

1 шт 

П

озиция  по КС-2  

Вид работ по КС-2 (система холодного  

водоснабжения) 

Необходим

ый объем работ  

2 

Разборка трубопроводов из  водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм  

1 мп 

12 

Прокладка внутренних трубопроводов  водоснабжения и отопления из многослойных  полипропиленовых труб, из заранее собранных  

узлов, наружным диаметром: 25 мм  

1 мп 

2. Обязать ООО «Альпстрой-ДВ» в течение 20 календарных дней с момента  

вступления решения в законную силу в рамках работ по устранению допущенных  недостатков при капитальном ремонте системы отопления и теплоснабжения  многоквартирного дома № 21 по ул. Карла Маркса в  г. Большой Камень выполнить следующие виды и объемы работ:  

Поз

иция по  

КС-2  

Вид работ по КС-2 

Необходи

мый объем работ  

1 

Разборка трубопроводов из водогазопроводных  труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до  

100 мм 

155 мп 

2 

Разборка трубопроводов из водогазопроводных  труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до  

50 мм 

271 мп 

3 

Прокладка трубопроводов отопления и  газоснабжения из стальных бесшовных труб  

диаметром: 80 мм 

25 мп 

5 

Прокладка трубопроводов отопления и  газоснабжения из стальных бесшовных труб  

диаметром: 65 мм 

130 мп 

7 

Прокладка трубопроводов отопления и  газоснабжения из стальных бесшовных труб  

диаметром: 50 мм /прменительно диаметром до 50мм/  

271 мп 

9 

Гидравлическое испытание трубопроводов  систем отопления, водопровода и горячего  

водоснабжения диаметром: до 50 мм 

271 мп 

10 

Гидравлическое испытание трубопроводов  

систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм 

155 мп 

17 

Установка грязевиков наружным диаметром  

патрубков: до 89 мм 

1 шт 

70 

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021  

0,86 м2 

71 

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115  

0,86 м2 

54 

Изоляция изделиями из вспененного каучука,  

вспененного полиэтилена трубопроводов наружным 

диаметром: до 160 мм трубками  

426 мп 

Взыскать с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"АЛЬПСТРОЙ-ДВ" в пользу ФОНД ПРИМОРСКОГО КРАЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" расходы по  уплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей 00 копеек.  

Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в  течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в  Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со  дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом  рассмотрения апелляционной инстанции.  

Судья Буров А.В.