АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Краснодар                                                    Дело № А32-62685/2023

Резолютивная часть решения объявлена 23.04.2024

Полный текст судебного акта изготовлен 19.06.2024

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Баганиной С.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мысак О.В., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ" (350033, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР ГОРОД, ИМ. СУВОРОВА 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 16.06.2020, ИНН: 

<

***>) к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРКАС-СТРОЙ" (350010, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР ГОРОД, ЗИПОВСКАЯ 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.04.2010, ИНН: 

<

***>)  О ВЗЫСКАНИИ 6 766 870,41 руб. (отсрочка госпошлины); при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРОРА" (350020, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР ГОРОД, ИМ. ГАВРИЛОВА П.М. УЛИЦА, 117, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 01.06.2011, ИНН: 

<

***>, КПП: 231001001); при участии в заседании  представителей: истца –  ФИО1 директор;  ответчика. третьего лица  -    извещены, не явились

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ"  обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРКАС-СТРОЙ"  о взыскании 6 766 870,41 руб., убытков, а также штрафа в размере 1000,00 рублей, пени в сумме 37 003,34 руб.

Определением от 08.02.2024 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО "АВРОРА".

Истец  приобщил  к материалам дела документы, заявил ходатайство об уточнении исковых требований.

Ответчик    представил в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое заявление.

Суд исследовал письменные материалы дела.

В порядке ст. 163 АПК РФ в заседании объявлен перерыв до 15-00 час 23.04.2024. Сторонам направить письменные пояснения в отношении следующего: В деле два договора  генподряда с аналогичными условиями. В рамках одного из двух договоров сторонами подписаны УПД на генподрядные услуги по ставке 1% от  цены работ. Представить УПД на генподрядные услуги к обоим договорам.   Представить акт КС-2 на  9 млн. руб.,  расчет суммы долга за вычетом  услуг   генподряда. Информация о перерыве размещена на  официальном сайте Арбитражного суда Краснодарского края в сети Интернет по адресу: www.krasnodar.arbitr.ru.  После перерыва заседание продолжено. В связи с отсутствием сторон по окончании перерыва, аудиозапись судебного заседания не велась. От истца поступило   ходатайство об уточнении исковых требований с учетом замечаний суда.

Ходатайство рассмотрено и удовлетворено судом по правилам ст. 49 АПК РФ.

Дело рассматривается в порядке статьи  156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как следует из материалов дела, между ООО «Каркас-Строй» ИНН: 

<

***> (далее - генподрядчик) и ООО «Прайм» ИНН 

<

***> (далее - подрядчик) заключены договоры подряда № 5269/21-ДС от 01/09/2021 и № 5628/22-ШК от 29/04/2022, в соответствии с условиями п. 2.4 договора подряда №5269/21-ДС от 01/09/2021 промежуточные платежи производятся генподрядчиком в течение 60-ти банковских дней после подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), предоставления счетов-фактур на приобретаемые материалы, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства, выставления Подрядчиком счета на оплату, а также с учетом требований к приемке выполненных работ, предусмотренных в разделе 5.3. настоящего Договора. 

Все суммы промежуточных платежей, подлежащие к оплате, выплачиваются Генподрядчиком за минусом аванса и 5 (пяти) % в счет окончательного расчета между Сторонами. 

Также п. 2.5 договора подряда №5269/21-ДС от 01/09/2021 окончательная оплата за выполненные Работы, в размере 5 (пяти) % от стоимости выполненных Работ, производится Генподрядчиком в течение 60-ти банковских дней после подписания Сторонами окончательных Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), передачи Подрядчиком Генподрядчику исполнительной документации, необходимой для сдачи результата выполненных Работ в эксплуатацию, выставления Подрядчиком счета на оплату, а также выполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Договору. 

При окончательной оплате учитываются аванс, промежуточные платежи и, если необходимо, штрафы, предусмотренные по настоящему Договору. ООО «Прайм» все работы по договору подряда №5269/21-ДС от 01/09/2021, выполнены, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) Сторонами составлены и подписаны (прилагаются). 

Общая стоимость работ составила 24 063 077,18 рублей, из которых была произведена оплата на сумму – 17 968 169,66 рублей, сумма задолженности составила – 6 094 907,52 руб.

Между ООО «Прайм» и ООО «Каркас-Строй» составлен акт сверки взаимных расчетов за период: 01.09.2021 - 25.09.2023, в соответствии с которым на 25.09.2023 задолженность ООО «Каркас-Строй» в пользу ООО «Прайм» составляет 6 094 907,52 руб.

В соответствии с условиями п. 2.4 договора подряда №5628/22-ШК от 29/04/2022 оплата за выполненные работы производятся Генподрядчиком в течение 30-ти банковских дней после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства, выставления Подрядчиком счета на оплату, а также с учетом требований к приемке выполненных работ, предусмотренных в разделе 5.3. настоящего Договора. 

Все суммы промежуточных платежей, подлежащие к оплате, выплачиваются Генподрядчиком за минусом аванса и 5 (пятит) % в счет окончательного расчета между Сторонами. 

Также п. 2.5 Договора подряда №5628/22-ШК от 29/04/2022 окончательная оплата за выполненные Работы, в размере 5 (пяти) % от стоимости выполненных Работ, производится Генподрядчиком в течение 30-ти банковских дней после подписания Сторонами окончательных Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), передачи Подрядчиком Генподрядчику исполнительной документации, необходимой для сдачи результата выполненных Работ в эксплуатацию, выставления Подрядчиком счета на оплату, а также выполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Договору. 

При окончательной оплате учитываются аванс, промежуточные платежи и, если необходимо, штрафы, предусмотренные по настоящему Договору. 

ООО «Прайм» все работы по договору подряда №5628/22-ШК от 29/04/2022 выполнены, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) Сторонами составлены и подписаны.

Общая стоимость работ составила 14 218 947,00 руб. из которых произведена оплата на сумму – 13 653 549,00 рублей, сумма задолженности составила – 565 398,00 рублей. Между ООО «Прайм» и ООО «Каркас-Строй» составлен акт сверки взаимных расчетов за период: 29.04.2022 - 25.09.2023, в соответствии с которым на 25.09.2023 задолженность ООО «Каркас-Строй» в пользу ООО «Прайм» составляет 565 398 рублей.

18.10.2023 истцом в адрес ответчика направлена досудебная претензия, 29.10.2023 досудебная претензия получена ответчиком, однако требования не удовлетворены, задолженность не оплачена.

Уклонение генподрядчика от оплаты работ явилось основанием для обращения подрядчика с иском  в суд.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам ст. 71 АПК РФ, суд признал требования истца подлежащими удовлетворению на основании следующего.

Правоотношения сторон по договору от 16 октября 2020 № РК-ДП-964-20 регулируются положениями ст.ст.740 –759 ГК РФ о договоре строительного подряда. 

В соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений.

В соответствии со статьей 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса. 

Статья 711 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. 

Согласно положениям статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. 

Судом установлено, что  в  связи с тем, что произведен частичный зачет взаимных однородных требований на сумму 1 841 748 руб., а также  согласно УПД № 658 от 31.12.2021г., УПД № 31 от 31.01.2022г., УПД № 237 от 30.04.2022г., УПД № 268 от 31.05.2022г., ответчик удержал за услуги генподряда 1% от суммы выполненных работ в размере - 240 630,76 рублей. Сумма долга составила по договору №5269/21-ДС от 01.09.2021 в сумме 4 012 528,76 руб. и по договору №5628/22-ШК от 29.04.22 в сумме 559 744,02 руб.

Согласно части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права. 

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Поскольку доказательства уплаты долга не представлены, требование истца о взыскании долга по договору №5269/21-ДС от 01.09.2021 в размере 4 012 528,76 руб. и по договору №5628/22-ШК от 29.04.22 в размере 559 744,02 руб. заявлено правомерно, ответчиком не оспорено и подлежит удовлетворению.

Взыскание неустойки как способ защиты гражданских прав, прямо предусмотренный статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, по своей сути является реализацией одной из мер ответственности за нарушение обязательства.

Неустойкой (штрафом, пеней) признаётся определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (п. 1 ст. 330 ГК РФ).

В соответствии с пунктами 6.2 договоров подряда №5628/22-ШК от 29/04/2022  и № 5269/21-ДС от 01/09/2021 за нарушение сроков оплаты выполненных Работ Подрядчик вправе взыскать с Генподрядчика неустойку в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки.

Несвоевременая оплата задолженности послужила основанием для обращения истца с требованием о взыскании с ответчика неустойки по основаниям п. 6.2 договора   за каждый день просрочки по договору  № 5269/21-ДС от 01/09/2021  в размере 2 531 905,65 руб. за период с 02.08.2022 по 23.04.2024 (4012528,76х631дн.х0,1%) и по договору №5628/22-ШК от 29/04/2022   в размере 99 634,44 руб. за период с 29.10.2023 по 23.04.2024 ( 559744,02х178дн.х0,1%).

Поскольку факт нарушения ответчиком условий соглашения подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, требование истца о взыскании   неустойки по договору  № 5269/21-ДС от 01/09/2021  в размере 2 531 905,65 руб.  и по договору №5628/22-ШК от 29/04/2022   в размере 99 634,44 руб.  2024   подлежит удовлетворению с учетом уточнения.

Истец также просит суд продолжить начисление неустойки начиная по день фактической оплаты задолженности.

В соответствии с пунктом 65 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательства» по смыслу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристависполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника статья 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Кроме того, в соответствии с разъяснениями, изложенными пункте 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). 

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). 

При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки.

С учетом изложенного, суд считает требование о взыскании неустойки по день фактической оплаты суммы долга обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 49, 65, 110, 156, 167- 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд    

РЕШИЛ:

Удовлетворить ходатайство истца об уточнении расчета неустойки.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРКАС-СТРОЙ" (ИНН: 

<

***>) в пользу   ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ" (  ИНН: 

<

***>)  7 203 812,87 руб  в том числе задолженность  по договору №5269/21-ДС от 01.09.2021 в сумме 4 012 528,76 руб и 2 531905,65 руб неустойки,  задолженность по договору №5628/22-ШК от 29.04.22 и 99 634,44 руб неустойки .Взыскание неустойки производить с 24.03.2024 по день уплаты долга исходя из ставки 0,1% от суммы долга за каждый лень просрочки.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРКАС-СТРОЙ" (ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 59019  рублей государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд,  вынесший решение.

Судья                                                                                                          С.А. Баганина