Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения

04 апреля 2019 года.Дело № А56-7130/2019

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Золотаревой Я.В.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

истец: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 24" (адрес: Россия, 190013, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, дата регистрации: 28.03.1991, ИНН: 

<

***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Системы и связь" (адрес: Россия, 107113, 

<

...>; ОГРН: 

<

***>, дата регистрации: 19.08.2010, ИНН: 

<

***>);

о взыскании договорной неустойки в размере 127 353 рублей 73 копеек, начисленной с 01.02.2018 по 26.10.2018 (за 268 дней) на основании пункта 10.3 гражданско-правового договора от 15.11.2017 № 72/17 за просрочку исполнения подрядчиком (ответчиком) обязательств по устройству системы видеонаблюдения при капитальном ремонте здания истца по адресу: Санкт-Петербург, наб.Обводного канала, д.140, лит.А,

руководствуясь статьями 309, 310, 330, 331 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 37, 110, 112, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Системы и связь» в пользу Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 24» неустойку в размере 127 353 рублей 73 копеек и судебные расходы, состоящие из государственной пошлины в размере 4821 рубля.

Решение

 подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

Судья Золотарева Я.В.