4761/2023-253546(2) 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 http://www.spb.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-73084/2022

12 мая 2023 года

г. Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена 25 апреля 2023 года. Полный текст решения изготовлен 12 мая 2023 года. 

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области А.О.  Киселева  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью «Амурская буровая компания» (адрес: 675014,  

Россия, Амурская обл., город Благовещенск г.о., Благовещенск г., Благовещенск г., Трудовая ул., д.  

144/2, этаж 2, кабинет 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 16.03.2015, ИНН:  

2812170641) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Сант Восток» (адрес: 198095, город Санкт- 

Петербург, Маршала ФИО2 улица, дом 43, литер А, помещение 7Н, ОГРН: 

<

***>, Дата  

присвоения ОГРН: 10.07.2015, ИНН: 

<

***>) о расторжении договоров, при участии согласно протоколу судебного заседания 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Амурская буровая компания» (истец)  обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым  заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Сант Восток» (ответчик) с требованием о  расторжении договоров № 036/2018 от 31.07.2018, № 044/2019 от 11.03.2019.  

 Определением суда от 27.09.2022 исковое заявление принято к производству, возбуждено  производство по делу, назначено предварительное судебное заседание и основное судебное  разбирательство.  

 В судебном заседании от 28.02.2023 суд, руководствуясь статьями 135-137 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), определил считать дело  подготовленным и перешел к рассмотрению дела по существу в судебном заседании в соответствии с  определением о принятии иска к производству.  

 В судебном заседании от 25.04.2023 Истец поддержал исковые требования в заявленном  объеме.  

 Ответчик, извещенный о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом,  своего представителя не направил. В материалы дела поступил отзыв с возражениями.  

 Дело рассмотрено в порядке ч. 3 ст. 156 АПК РФ в отсутствие представителя Ответчика,  который извещен надлежащим образом, о чем в материалах дела имеются соответствующие  доказательства в соответствии с требованиями ст. 123 АПК РФ.  

 Исследовав и оценив материалы дела, в порядке, предусмотренном ст. 71 АПК РФ, суд  пришел к следующим выводам.  

 Согласно доводам Истца, 31.07.2018 года между ООО «Сант Восток» (Заказчик) и ООО  

«Амурская Буровая Компания» (Подрядчик) был заключен Договор № 036/2018 на выполнение  комплекса строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция ст. Ту Забайкальской ж.д.»,  согласно п. 1.1 которого «Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя субподряд на  строительство (реконструкцию) в 2018 году объекта: «Реконструкция ст. Ту Забайкальской ж.д.»  (далее - Объект, Работы).  

 Согласно п. 2.1 Договора № 036/2018 от 31.07.2018 «Общая стоимость Работ, подлежащих  выполнению Подрядчиком в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора, определена на основании  Ведомости договорной цены (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего  Договора и составляет: 107 727 266,00 (Сто семь миллионов семьсот двадцать семь тысяч двести  шестьдесят шесть рублей ноль копеек), кроме того НДС 18% - 19 390 907,88 (Девятнадцать  миллионов триста девяносто тысяч девятьсот семь рублей восемьдесят восемь копеек). Всего (с НДС  18%) - 127 118 173,88 (Сто двадцать семь миллионов сто восемнадцать тысяч сто семьдесят три рубля  восемьдесят восемь копеек).  

 Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком в текущем 2018 году, составляет: 107 727 266,00  (Сто семь миллионов семьсот двадцать семь тысяч двести шестьдесят шесть рублей ноль копеек),  кроме того НДС 18% - 19 390 907,88 (Девятнадцать миллионов триста девяносто тысяч девятьсот семь  рублей восемьдесят восемь копеек). Всего (с НДС 18%) - 127 118 173,88 (Сто двадцать семь  миллионов сто восемнадцать тысяч сто семьдесят три рубля восемьдесят восемь копеек)».  

 В последующем между ООО «Сант Восток» (Заказчик) и ООО «Амурская Буровая Компания»  (Подрядчик) был заключен Договор № 044/19 от 11.03.2019г на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция ст. Ту Забайкальской ж.д.», согласно п. 1.1 которого  «Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя субподряд на строительство (реконструкцию) в  2019году объекта: «Реконструкция ст. Ту Забайкальской ж.д.» (далее - Объект, Работы).  

 Согласно п. 2.1 Договора № 044/19 от 11.03.2019г: Общая стоимость Работ, подлежащих  выполнению Подрядчиком в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора, определена на основании  Ведомости договорной цены (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего  Договора и составляет: -178 376 510 ,00 (Сто семьдесят восемь миллионов триста семьдесят шесть  тысяч пятьсот десять рублей 00 копеек), кроме того НДС 20 % - 35 675 302,00 (тридцать пять  миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч триста два руб. 00 копеек). Всего (с НДС 20%)-214  051812,00 (Двести четырнадцать миллионов пятьдесят одна тысяча восемьсот двенадцать рублей, 00  копеек)  

 Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком в текущем 2019 году, составляет: -178 376  510,00 (Сто семьдесят восемь миллионов триста семьдесят шесть тысяч пятьсот десять рублей 00  копеек), кроме того НДС 20 % - 35 675 302,00 (тридцать пять миллионов шестьсот семьдесят пять  тысяч триста два руб. 00 копеек). Всего (с НДС 20%) -214 051812,00 (Двести четырнадцать миллионов  пятьдесят одна тысяча восемьсот двенадцать рублей, 00 копеек).  

 Согласно п.17.1 Договоров № 036/2018 от 31.07.2018 года и № 044/19 от 11.03.2019г: «Стороны  несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по  настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации».  

 При исполнении данного Договора ООО «СантВосток» нарушил следующие существенные  пункты договора:  

 1. Согласно п. 2.7Договоров № 036/2018 от 31.07.2018 года и № 044/19 от 11.03.2019г: «В  случае, если объемы финансирования будут уменьшены или увеличены ОАО «РЖД», Стороны  оформляют соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору об изменении  сроков, объемов работ и их стоимости».  

 - Между ООО «Сант Восток»(Подрядчик) и АО «РЖДстрой» (Генподрядчик) был заключен  договор № 15-18-01-2301 от 28.04.2018 на выполнение комплекса строительно- монтажных работ на  объекте «Реконструкция ст. Ту Забайкальской железной дороги». «Общая стоимость Работ,  подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора, оформлена в  виде Ведомости договорной цены (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего  Договора, составленной на основании данных технической части аукционной документации на  единицу измерения видов работ с учетом лимитируемых и прочих затрат, относящихся к деятельности  Подрядчика, и составляет: - 115 318 677,18 (Сто пятнадцать миллионов триста восемнадцать тысяч  шестьсот семьдесят семь рублей 18 копеек), кроме того НДС 18 % -20 757 361 ,89 (Двадцать  миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч триста шестьдесят один рубль 89 копеек), Всего (с НДС  18%) —136 076 039,07 (Сто тридцать шесть миллионов семьдесят шесть тысяч тридцать девять  

рублей 07 копеек).  

 Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком в текущем 2018 году, составляет: 115 318 677,18  (Сто пятнадцать миллионов триста восемнадцать тысяч шестьсот семьдесят семь рублей 18 копеек),  кроме того НДС 18 % -20 757 361,89 (Двадцать миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч триста  шестьдесят один рубль 89 копеек).  

 Всего (с НДС 1894) —136 076 039,07 (Сто тридцать шесть миллионов семьдесят шесть тысяч  тридцать девять рублей 07 копеек)».  

 К договору № 15-18-01-2301 от 28.04.2018 было подписано Дополнительное соглашение № 4  от 18.12.2018 об изменении (уменьшении) стоимости и объемов работ по договору; «Пункт 2.1  Договора № 15-18-01-2301 от 28.04.2018 г. изложить в следующей редакции:  

 «2.1. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком в 2018 году, по настоящему  договору составляет 44 039 230,00 (Сорок четыре миллиона тридцать девять тысяч двести тридцать  рублей 00 копеек), кроме того НДС (18 %) - 7 927 061,40 (Семь миллионов девятьсот двадцать семь  тысяч шестьдесят один рубль 40 копеек), всего с НДС (18 %) - 51 966 291,40 (Пятьдесят один миллион  девятьсот шестьдесят шесть тысяч двести девяносто один рубль 40 копеек)».  

 - Между ООО «Сант Восток» (Подрядчик) и АО «РЖДстрой» (Генподрядчик) был заключен  договор № 15-18-01-4994-3 от 28.11.2018 на выполнение комплекса строительно- монтажных работ на  объекте «Реконструкция ст. Ту Забайкальской железной дороги». «Общая стоимость Работ,  подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора, оформлена в  виде Ведомости договорной цены (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего  Договора, составленной на основании данных технической части аукционной документации на  единицу измерения видов работ с учетом лимитируемых и прочих затрат, относящихся к деятельности  Подрядчика, и составляет: «Стоимость работ по Объекту в соответствии с Ведомостью договорной  цены (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Дополнительного  соглашения, составляет 197 488 320,00 (Сто девяносто семь миллионов четыреста восемьдесят восемь  тысяч триста двадцать рублей 00 копеек), кроме того НДС (18 % 35 547 897,60 (Тридцать пять  миллионов пятьсот сорок семь тысяч восемьсот девяносто семь рублей 60 копеек), всего с учетом НДС  (18 % — 233 036 217,60 (Двести тридцать три миллиона тридцать шесть тысяч двести семнадцать  рублей 60 копеек).  

 К Дополнительному соглашению № 15-18-01-4994-3 от 29.11.2018 было подписано  Дополнение № 3 от 22.08.2019 об изменении (уменьшении) стоимости и объемов работ по договору.  «Пункт 2.1 Договора № 15-18-01-4994-3 от 29.11.2018г изложить в следующей редакции; «2.1. Общая  стоимость работ, выполняемых Подрядчиком в 2019 году, по настоящему договору составляет 154 854  810,00 (Сто пятьдесят четыре миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот десять рублей  ноль копеек), кроме того НДС (20 %) -30 970 962,00 (Тридцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч  девятьсот шестьдесят два рубля ноль копеек). Всего с НДС (20 %) -185 825 772,00 (Сто восемьдесят  пять миллионов восемьсот двадцать пять тысяч семьсот семьдесят два рубля ноль копеек)».  

 2. Согласно п. 4.1. Договоров № 036/2018 от 31.07.2018 года и № 044/19 от 11.03.2019 г. в  обязанности Заказчика входили обязательства:  

 4.1.1 Своевременно и должным образом выполнить принятые на себя обязательства в  соответствии с условиями настоящего Договора».  

 4.1.2 Предоставить Подрядчику, а также его субподрядным организациям возможность  доступа на территорию, находящуюся в ведении ОАО «РЖД» и предназначенную для производства  Работ, предусмотренных настоящим Договором.  

 Передать в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания настоящего Договора  Подрядчику по акту, подписанному Генподрядчиком ОАО «РЖД» и Заказчиком, на период  строительства объекта территорию строительной площадки для производства Работ, разрешение на  производство строительно-монтажных работ, иные необходимые разрешения, входящие в  обязанности Подрядчика.  

 4.1.3 При необходимости предоставить Подрядчику График поставки оборудования,  поставляемого Генподрядчиком ОАО «РЖД».  

 4.1.4 Принять выполненную Работу и оплатить Подрядчику установленную настоящим  Договором цену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.  

 Соответственно, при разрыве Договора между АО «РЖДстрой» и ООО «Сант Восток»  выполнение обязательств по исполнению Договора между ООО «АБК» и ООО «Сант Восток» стало  невозможным ввиду отсутствия доступа на объект проведения работ, а так же сдачи выполненных  

работ.  

 3. Согласно п.4.2. некоторыми из обязанностей Подрядчика являлись: «Подрядчик обязан:  

 4.2.3. Получать проектно-сметную документацию, а также иную разрешительную  документацию по фактическому месту нахождения исполнительного структурного подразделения от  Заказчика ООО «Сант Восток».  

 Подрядчик не вправе передавать проектную документацию третьим лицам без согласия  Заказчика в письменной форме».  

 При расторжении Договоров, заключенных между ООО «Сант-Восток» и АО «РЖДстрой»  ООО «Амурская буровая компания» была вынуждена передать проектно-сметную документацию  представителям АО «РЖДстрой», в лице СМТ-15, что подтверждается:  

 - Актом приема-передачи журналов на проведение работ на объекте: ст. Ту Забойкальской  железной дороги от 30.03.2020 г.;  

 - Актом приема-передачи технической (рабочей документации) по ст. Ту Збайкальской жд от  30.03.2020 г.;  

 - Актом приема-передачи сметной документации от 14.07.2020 г.; 

 - Реестром сертификатов, паспортов, протоколов лабораторных испытаний на оборудование,  передаваемое Заказчику от 20.02.2020 г.;  

 - Дополнение № 2 к реестру сертификатов, паспортов, протоколов лабораторных испытаний на  оборудование от 20.02.2020г, передаваемое Заказчику.  

 4. Согласно разделу 5. Договора: 

 п. 5.1. «Заказчик обязуется передать Подрядчику имеющуюся у него утвержденную проектно-сметную документацию по Объекту в одном экземпляре в течение 30 дней с даты подписания  настоящего Договора, и (или) с даты получения проектно-сметной документации от Заказчика».  

 п. 5.2. «Подрядчик не вправе отступить от согласованной и утвержденной проектной  документации без письменного согласия Заказчика.  

 Таким образом своевременное начало работ, а следовательно их своевременное окончание  было обусловлено исполнением со своей стороны встречных обязательств со стороны Подрядчика.  

 Вместе с тем сразу после заключения Договора № 036/2018 от 31.07.2018 г. со стороны  Заказчика начались нарушения исполнения встречных обязательств:  

 1. Заказчиком не осуществлялась передача до начала производства строительно-монтажных  работ Подрядчику в установленном порядке на период строительства Объекта Строительная площадка  по Акту передачи строительной площадки;  

 2. Не была передана в течение 30 дней с даты подписания настоящего Договора Подрядчику  необходимая проектно-сметная документация.  

 3. Подрядчик неоднократно в письменной форме уведомлял Заказчика о необходимости  несения дополнительных расходов, не включенных в проектно-сметную документацию а также об  иных препятствиях, способствующих приостановке работ (например отсутствие подъездных путей к  строительной площадке), а следовательно увеличению сроков выполнения работ:  

 - 13.08.2018 года в адрес ООО «Сант Восток» было направлено письмо № 26 о необходимости  с целью выполнения договорных обязательств предоставить специалиста с обозначением даты его  приезда, для передачи геодезической разбивочной основы (ГРО).  

 - 22.08.2018 года в адрес ООО «Сант Восток» было направлено письмо № 31 о том, что при  проверке локальных смет было выявлено, что переданные документы соответствуют первому кварталу  2018 года, с просьбой предоставить в ООО «Амурская буровая компания» актуализированные  локальные сметы  

 - 25.10.2018 года в адрес ООО «Сант Восток» было направлено письмо № 27 о невыполнении  пунктов протокола № НЗС-26/пр от 4 июля 2018 года, касающихся создания технических условий для  возможности беспрепятственного выполнения работ, что приведет к срыву графика выполнения  работ.  

 - 25.10.2018 года в адрес ООО «Сант Восток» было направлено письмо № 44 о том, что  04.07.2018 года состоялось совещание (протокол № НЗС-26/пр) под председательством заместителя  начальника Забайкальской железной дороги Г.А. ФИО3. В ходе совещания были рассмотрены  вопросы, без решения которых невозможно приступить к выполнению работ на объекте строительства  «Реконструкция станции Ту Забайкальской ж.д».  

 Из-за отсутствия у ООО «АБК» необходимых технических условий для своевременного  окончания выполнения работ в 2018 между ООО «АБК» направило ряд писем Заказчику:  

 - 04.02.2019 года в адрес ООО «Сант Восток» было направлено письмо № 4 с просьбой  предоставить: - Проект договора на 2019 год; - Утвержденный календарный план выполнения работ  на 2019 год; - Утвержденную ведомость договорной цены на 2019 год; - Приложение05.02.2019 года в адрес ООО «Сант Восток» было направлено письмо № 21 об увеличении объемов  скального грунта и его себестоимости.  

 - 05.02.2019 года в адрес ООО «Сант Восток» было направлено письмо № 45 с уведомлением,  что согласно рабочей документации 6987-ПЖ. Локальный сметный расчет № 00-02-02-03-01р идет  разночтение. ООО «АБК» просило рассмотреть и согласовать изменения стоимости скального грунта  в рамках действующего сметного расчета. Принять к расчету оплаты приобретение и доставку  скального грунта.  

 - 28.02.2019 года в адрес ООО «Сант Восток» было направлено письмо № 20, в котором ООО  «АБК» указывалось о необходимости корректировки расчета перевозимого грунта (объемы  занижены);  

 5. Согласно п. 7.1 Договоров № 036/2018 от 31.07.2018 года и № 044/19 от 11.03.2019 г.:  «Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить Работы по строительству (реконструкции)  Объекта строительными материалами, изделиями, конструкциями, необходимыми для выполнения  Работы в соответствии с проектной документацией. Заказчик может принять на себя обязательство по  обеспечению Объекта строительными материалами, изделиями, конструкциями в согласованные с  Подрядчиком сроки, в соответствии с номенклатурой, количеством и в порядке, указанными в  дополнительном соглашении к настоящему Договору. При этом стоимость Работ по настоящему  Договору подлежит соразмерному уменьшению на стоимость этих материалов, изделий,  конструкций».  

 Материалы, закупленные ООО «Амурская буровая компания» во исполнения Договоров №  036/2018 от 31.07.2018г и № 044/19 от 11.03.2019г были переданы по письму ООО «Сант Восток» № 04  от 13.01.2020г. представителю СМТ-15 ФИО4 в период с 20.01.2020г по 23.01.2020г., в  подтверждение приложены Транспортные накладные от 20.01.2019г, 21.01.2019г., 22.01.2019г.,  23.01.2019 г.  

 6. Согласно п. 10.1Договоров № 036/2018 от 31.07.2018 годаи № 044/19 от 11.03.2019г: «Сдача  выполненных Подрядчиком Работ осуществляется в следующем порядке. До 23-го числа отчетного  месяца Подрядчик представляет Заказчику завизированные инспектором технического надзора  Заказчика (ОАО «РЖД») Акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2,  Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, а также все  документы, подтверждающие фактическое выполнение (акты на скрытые работы, расчеты и другие  документы), оформленные в соответствии с приказом № 25Н от 29.12.2012 г. формами первичной  учетной документации, применяемых АО «РЖДстрой» (в действующей на момент проведения  расчетов редакции приказа). Акт о приемке выполненных работ составляется на основании Журнала  учета выполненных работ (форма № КС-6а). Выполненные объемы Работ должны быть  документально подтверждены Подрядчиком и в соответствующем порядке согласованы с  эксплуатирующим структурным подразделением ОАО «РЖД» (балансодержателем).  

 На стоимость выполненного за месяц и принятого Заказчиком объема Работ Подрядчик  предъявляет Заказчику счет-фактуру.  

 Данный пункт Договоров был неисполним, т.к. ООО «Сант Восток» не имел доступа и  отношения к объекту выполнения работ на ст. Ту ввиду расторжения Договоров № 15-18-01-2301 от  28.04.2018г. и № 15-18-01-4994 от 28.11.2018г. на выполнение комплекса строительно-монтажных  работ на объекте «Реконструкция ст. Ту Забайкальской железной дороги».  

 7. Так же нарушен п. 14.6 Договоров № 036/2018 от 31.07.2018 года и № 044/19 от 11.03.2019г:  «В случае принятия ОАО «РЖД» новых регламентирующих документов или внесения изменений в  существующие нормативные документы, влияющие на условия производства работ и/или на условия  реализации настоящего Договора, Генподрядчик вправе потребовать внесения соответствующих  изменений в настоящий Договор, что оформляется Сторонами соответствующим дополнительным  соглашением».  

 Между АО «РЖДстрой» и ООО «Сант Восток» было заключено 4 дополнительных  соглашения к Договору № 15-18-01-2301 от 28.04.2018, влияющие на условия производства работ  и/или на условия реализации настоящего Договора, так же АО «РЖДстрой» 12.11.2019 г. в адрес ООО  «Сант Восток» было направлено Уведомление № 2135 от 11.11.2019г о расторжении договора подряда,  что является существенным условием исполнения Договора № 036/2018от 31.07.2018 года,  

заключенного между ООО «Амурская буровая компания» и 000«Сант Восток».  

 Между АО «РЖДстрой» и ООО «Сант Восток» было заключено 3 Дополнения к  Дополнительному соглашению № 15-18-01-4994-3 от 29.11.2018г к Договору № 15-18-01-4994 от  28.11.2018г, влияющие на условия производства работ и/или на условия реализации настоящего  Договора, так же АО «РЖДстрой» 02.12.2019 г в адрес 000«Сант Восток» было направлено  Уведомление № 7753 от 29.11.2019 г об отказе от исполнения обязательств по Дополнительному  соглашению № 15-18-01-4994-3 от 28.11.2018г, что является существенным условием исполнения  Договора № 044/19от 11.03.2019 года, заключенного между ООО «Амурская буровая компания» и  000«Сант Восток».  

 11.03.2019 года между ООО «Сант Восток» (Заказчик) и ООО «Амурская Буровая Компания»  (Подрядчик) был перезаключен Договор № 044/2019 на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция ст. Ту Забайкальской ж.д.», согласно п. 1.1 которого  «Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя субподряд на строительство (реконструкцию) в  2019 году объекта: «Реконструкция ст. Ту Забайкальской ж.д.» (далее - Объект, Работы).  

 Условия о правах и обязанностях сторон остались в неизменном виде. Изменились сроки  выполнения работ- окончание работ: декабрь 2019 года и стоимость работ, которая на 2019 год  составила 178 376 510,00 рублей.  

 Однако со стороны ООО «Сант Востока» продолжалось бездействие по встречному  исполнению обязательств, не устранялись препятствия для выполнения работ ООО «АБК».  

 ООО «АБК» продолжало направлять в адрес ООО «Сант Востока» письма с просьбами  оказания содействия в строительстве в виде предоставления авансов на покупку материалов,  пересчета сметы и др.:  

 1. 13.03.2019 года в адрес ООО «Сант Восток» было направлено письмо № 49 с просьбой с  целью недопущения срыва сроков строительства выделить авансовые средства для приобретения  материалов и оборудования согласно сметных расчетов.  

 2. 15.03.2019 года в адрес ООО «Сант Восток» было направлено письмо № 65 с уведомлением  о технических ошибках при составлении сметы по объекту реконструкция ст.Ту с просьбой  применения транспортной схемы по доставке скального грунта согласно транспортной схемы по  устройству контрбанкета.  

 3. 29.05.2019 г. в связи с обнаружением новой ошибки в локальной смете в адрес ООО «Сант  Восток» было направлено письмо № 72, в котором сообщалось, что в локальном сметном расчете  пропущена установка и стоимость следующих оконных блоков.  

 4. 10.06.2019 года в адрес ООО «Сант Восток» было направлено письмо № 76 с уведомлением  о готовности предоставления информации по остаткам материалов-ТМЦ, приобретенных в 2018-2019  г.г. для выполнения работ по объекту «Реконструкция ст. Ту» на основании проведенной  инвентаризации от 04.06.2019 г.  

 5. 01.10.2019 года в адрес ООО «Сант Восток» было направлено письмо № 101, в котором  ООО «АБК» в кратчайшие сроки просило обеспечить поставку оборудования(перечень большой,  поэтому не цитируем, см. в письме от 01.10.2019 г. № 101).  

 6. 01.10.2019 года в адрес ООО «Сант Восток» было направлено письмо № 103, в котором  ООО «АБК» просило обратиться в проектную организацию по согласованию замены металлической  трубы на трубу гофрированную.  

 7. 16.10.2019 года в адрес ООО «Сант Восток» было направлено письмо № 104, в котором  ООО «АБК» сообщало о затоплении строительного участка летом 2019 года в связи с чем был утрачен  общий журнал работ и просило рассмотреть возможность выдачи дубликата.  

 8. 24.10.2019 года в адрес ООО «Сант Восток» было направлено письмо № 106, в котором  ООО «АБК» сообщало, что при использовании скального грунта была согласована стоимость 2040  рублей за один кубический метр, фактически стоимость скального грунта с доставкой до контрбанкета  на ст. Ту составляет 5 603 рубля. На 24.10.2019 г. ООО «АБК» уложило в тело контрбанкета 4200 мЗ,  понесенные затраты составляют 23 532 600 рублей, исходя из этого ООО «АБК» понесло убытки в  размере 14 964 600 рублей, которые ООО «АБК» просило компенсировать.  

 9. 31.10.2019 года в адрес ООО «Сант Восток» было направлено письмо № 107, в котором  ООО «АБК» просило внести корректировку или заключить доп.Соглашение по локальной смете.  

 10. 18.11.2019 года в адрес ООО «Сант Восток», начальника ДКРС Чита ФИО5., И.о.  управляющего филиала АО «РЖДстрой» ФИО6 было направлено письмо № 114, в котором  ООО «АБК» просило пересогласовать использование щебня для устройства строительной площадки  

на скальный грунт.  

 11. 03.12.2019 года в адрес ООО «Сант Восток» было направлено письмо № 117, в котором  ООО «АБК» указывало, что необходимости пересчета Локального сметного расчета стоимость  скального грунта за 1мЗ .  

 12. 10.12.2019 года в адрес ООО «Сант Восток» было также направлено еще одно письмо №  123, в котором ООО «АБК» указывало, что станция Ту находится в болотистой местности, доставка  материалов совместным способом крайне убыточна, и автомобильным способом тоже была  невозможна.  

 В связи с тем, что строительство затягивалось по не зависящим ООО «АБК» причинам,  10.12.2019 года в адрес ООО «Сант Восток» было направлено письмо № 120, в котором ООО «АБК» в  связи с задержкой финансирования по договору № 044/19 от 11 марта 2019 г. в нарушение графика  просило внести изменения в ч.б п.6.1 - «окончание работ: 29.02.2020 г.».  

 ООО «АБК» заявляло о готовности и технической возможности окончания работ в 2020 году и  просило подтвердить, что работы, выполненные ООО «Амурская буровая компания» в 2020 году  будут подтверждены и оплачены в полном объеме.  

 Однако вместо подтверждения готовности оплаты работ в 2020 году, а следовательно  готовности дальнейшего сотрудничества ООО «Сант Восток» в феврале 2020 года приняло Решение о  добровольной ликвидации, сведения о которой внесены в выписку из ЕГРЮЛ 12.02.2020 г., что ООО  «АБК» считает злоупотреблением правом, умышленным уходом от оплаты задолженности  контрагентам, в том числе в адрес ООО «АБК».  

 Как стало известно ООО "АБК", ООО "Сант Восток" 11.11.2019 года исх. № 2135 уведомлено  АО "РЖДстрой" о расторжении договора подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных  работ на объекте: "реконструкция ст. Ту Забайкальской ж.д."  

 На основании вышеизложенного следует отметить, что ООО "АБК" выполнял все условия  договора вопреки действиям ООО "Сант Восток" (не устранение в срок существенных обстоятельств  необходимых для исполнения договора), что в дальнейшем привело к убыткам ООО "АБК".  

 Пунктом 20.4 договора от 11.03.2019 г. установлено, подрядчик вправе требовать расторжение  настоящего договора в случаях:  

 - утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ по настоящему  договору.  

 Согласно доводам Ответчика, изложенным в отзыве на исковое заявление, между ООО  «Амурская Буровая Компания» (Подрядчик) и ООО «Сант Восток» (Заказчик) был заключен договор   № 036/2018 от 31.07.2018г. на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте  «Реконструкция ст. Ту Забайкальской ж.д.», согласно условиям которого заказчик поручает, а  подрядчик принимает на себя субподряд на строительство (реконструкцию) в 2018 году объекта:  «Реконструкция ст. Ту Забайкальской ж.д.». Согласно условиям указанного договора, срок окончания  работ установлен - декабрь 2018 г. ООО «Сант Восток» в рамках указанного договора в адрес ООО  «Амурская Буровая Компания» были перечислены денежные средства в общем размере 15 160 000,00  рублей. Однако, работы по договору № 036/2018 от 31.07.2018г. были выполнены лишь частично - на  общую сумму 13 794 791,18 рублей.  

Также между ООО «Амурская Буровая Компания» (Подрядчик) и ООО «Сант Восток»  (Заказчик) был заключен договор № 044/19 от 11.03.2019г. на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция ст. Ту Забайкальской ж.д.», согласно условиям которого  заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя субподряд на строительство (реконструкцию) в  2019 году объекта: «Реконструкиця ст. Ту Забайкальской ж.д.». Согласно условиям указанного  договора, срок окончания работ установлен - декабрь 2019 г. ООО «Сант Восток» в рамках указанного  договора в адрес ООО «Амурская Буровая Компания» были перечислены денежные средства в общем  размере 44 444 100,00 рублей. Однако, работы по договору № 044/19 от 11.03.2019г. были выполнены  лишь частично - на общую сумму 16 987 702,80 рублей.  

 20.01.2021 г. в адрес ООО «Амурская буровая компания» была направлена досудебная  претензия с заявлением об отказе от исполнения договоров № 044/19 от 11.03.2019 г. и № 036/2018 от  31.07.2018 г., а также требованием возврата полученных в качестве аванса по договору № 044/19 от  11.03.2019г. денежных средств в размере 27 456 397,20 рублей и уплаты штрафных санкций в  установленном договором размере за нарушение сроков выполнения работ.  

 Таким образом, указанной досудебной претензией от 20.01.2021 г. конкурсный управляющий  ООО «Сант Восток» в порядке статьи 102 и п. 3 статьи 129 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  

уже заявил об отказе от исполнения договоров № 044/19 от 11.03.2019 г. и № 036/2018 от 31.07.2018 г.  и, следовательно, они считаются расторгнутыми с даты получения досудебной претензии ООО  «Амурская буровая компания» - с 26.01.2021 г.  

 Исследовав и оценив каждое из представленных в дело доказательств в отдельности с точки  зрения относимости, допустимости и достоверности, а также достаточность и взаимную связь данных  доказательств в совокупности в соответствии с требованиями ст. 71 АПК РФ, суд счел требования не  подлежащими удовлетворению, в силу следующего  

 Статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в качестве оснований  возникновения гражданских прав и обязанностей указаны основания, предусмотренные законом и  иными правовыми актами, а также действия граждан и юридических лиц, которые хотя и не  предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского  законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии со статьей 307 ГК РФ  обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных  в настоящем Кодексе.  

 Согласно ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в  соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.  Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не  допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.  

 Как следует из положений ст. 450 ГК РФ, изменение и расторжение договора возможны по  соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором. По  требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только  при существенном нарушении договора другой стороной. Существенным признается нарушение  договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной  степени лишается того на что была вправе рассчитывать при заключении договора.  

 Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется  выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат  заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.  

 Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств,  указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать  возмещения убытков (п. 2 ст. 719 ГК РФ).  

 Как установлено п. 20.2 Договора № 044/2019 от 11.03.2019, Заказчик вправе в любое время до  сдачи объекта в эксплуатацию расторгнуть Договор, уведомив об этом Подрядчика. При этом  Заказчик вправе требовать передачи ему незавершенной работы с компенсацией Подрядчику  произведенных затрат и возмещением убытков, обусловленных прекращением настоящего договора, в  пределах разницы между ценой установленной Договором за всю работу, и частью цены,  выплаченной за выполненную Подрядчиком и принятую Заказчиком часть работы.  

 Аналогичное положение содержится в п. 20.2 Договора № 036/2018 от 31.07.2018. 

 Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от  06.11.2020 г. по делу А56-77239/2020 ООО «Сант Восток» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>;  198095, 

<

...>, лит. А, пом.7Н) признано банкротом  (ликвидируемый должник), открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден  ФИО7.  

 Согласно ст. 102 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Арбитражный управляющий в  течение трех месяцев с даты введения процедуры банкротства вправе отказаться от исполнения  договоров и иных сделок должника. Договор считается расторгнутым с даты получения всеми  сторонами по такому договору заявления арбитражного управляющего об отказе от исполнения  договора.  

 Согласно требованиям ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  

 Как установлено судом, досудебной претензией исх. № б/н от 20.01.2021, направленной в  адрес Истца, Ответчик в лице конкурсного управляющего отказался от исполнения договоров   № 044/2019 от 11.03.2019 и № 036/2018 от 31.07.2018.  

 Согласно РПО № 39401846200524 указанная претензия была получена стороной Истца  26.01.2021.  

 В силу ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему  убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании  

имеющихся в деле доказательств, никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее  установленной силы.  

 Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или  несовершения ими процессуальных действий (ч. 1 ст. 9 АПК РФ).  

 Таким образом, материалами дела установлено и подтверждено, что Ответчик в соответствии с  положениями п. 20.2 Договоров № 044/2019 от 11.03.2019, № 036/2018 от 31.07.2018 и ст. 102 ФЗ «О  несостоятельности (банкротстве)» воспользовался своим правом на односторонний отказ от  исполнения договоров, ввиду чего они считаются расторгнутыми с 26.01.2021.  

 Основания для удовлетворения заявленных исковых требований отсутствуют. 

 В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в  деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

 В связи с тем, что Истцом при подаче искового заявление было заявлено фактически два  самостоятельных требований о расторжении двух договоров, но оплата государственной пошлины  произведена только в отношении одного неимущественного требования, исковые требования  оставлены без удовлетворения, государственная пошлина в оставшейся части подлежит взысканию с  Истца в доход федерального бюджета.  

 Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

решил:

1. В удовлетворении исковых требований отказать.  

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Амурская буровая компания» в  

доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 рублей. 

 Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  

месяца со дня принятия 

 Судья Киселева А.О. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 13.03.2023 11:56:00

 Кому выдана Киселева Алла Олеговна