РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело №А40-48190/22-143-334

26 октября 2023 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена                                           19 октября 2023 года

Мотивированное решение изготовлено                                           26 октября 2023 года

 

Арбитражный суд города Москвы

в составе судьи Гедрайтис О.С.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

с использованием средств аудиозаписи

рассматривает в судебном заседании дело по иску ООО «СДК» (ИНН 

<

***>)

к ООО НПФ «ФИТО» (ИНН 

<

***>)

третье лицо: ООО ТК «НОВОЧЕБОКСАРСКИЙ» (ИНН 

<

***>)

о взыскании 8.231.520 руб. 27 коп.

 

при участии: 

от истца: ФИО2 дов. от 18.09.2022г.

от ответчика: ФИО3 дов. от 03.08.2022г.

от 3-его лица: не явка, извещен 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО «СДК» обратилось с исковым заявлением к ООО НПФ «ФИТО» о взыскании 8.231.520 руб. 27 коп. задолженности по договорам №61-НЧБ/1-СП от 29.04.2019г., №62-НЧБ/1-СП от 29.04.2019г., №73-НЧБ/1-СП 13.08.2019г., №24-НЧБ/2-СП от 11.07.2019г., №71-НЧБ/1-СП от 13.08.2019г.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО ТК «НОВОЧЕБОКСАРСКИЙ».

Представитель третьего лица, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства в порядке ст. 123 АПК РФ, в судебное заседание не явился.

Представитель истца поддержал требования в полном объеме, просил иск удовлетворить.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований по доводам представленного письменного отзыва.

Оценив материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований исходя при этом из следующего.

Как усматривается из материалов дела, 29.04.2019г. между ООО «СДК» (подрядчик) и ООО НПФ «ФИТО» (генподрядчик) заключен договор субподряда №61-НЧБ/1-СП на выполнение комплекса работ по внутрипллощадному благоустройству территории (устройство дорог, водоотводных лотков) на объекте Тепличный комплекс «Новочебоксарский».

Согласно п.2.1. указанного договора генподрядчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить комплекс по внутриплощадномубагоустройству территории (устройство дорог, во43доотводных лотков) на объекте тепличный комплекс «Новочебоксарский» площадью 22 га для выращивания овощей продукции защищенного грунта на территории Атлашевского сельского поселения чебоксарсого района Чувашской Республики (1 очередь (этап) строительства) в соответствии Ведомостью договорной цены (Приложение №1 к договору) в объеме Рабочей документации, указанной в Приложении №1-а к Договору) и в сроки установленные в Графике производства работ (Приложение №2 к договору).

В п.7.2.3. договора стороны указали, что надлежаще выполненные работы генподрядчик оплачивает подрядчику в течение пятнадцати дней со дня подписания генподрядчиком акта приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Подрядчик выполнил работы по данному договору на сумму в размере 42 137 646 руб. 76 коп., что подтверждается справками о стоимости выполненных работ (КС-3):от 24.07.2019 №1 на сумму 7 100 422,89 руб., от 15.08.2019 №2 на сумму 14 808 124,60 руб., от 28.11.2019 №3 на сумму 11 473 584,85 руб., от 03.04.2020 №4 на сумму 977 251,34 руб., от 10.07.2020 №5 на сумму 656 939,28 руб., от 23.08.2019 №1 на сумму 2 992 001,77 руб., от 30.12.2019 №2 на сумму 1 074 457.00 руб., от 19.03.2020 №3 на сумму 234 883,65 руб.

Письмом от 01.06.2021г. №121 (почтовый идентификатор 42801460007525) ООО «СДК» в ООО НПФ «ФИТО» направлено на подписание документы по дополнительным объемам, но указанные документы ООО НПФ «ФИТО» обратно ООО «СДК» не возвращены и мотивированного отказа также не предоставлено.

Данное документы получены ООО НПФ «ФИТО» 07.06.2021г.

Ответчику были направлены: дополнительное соглашение №5 от 01.09.2019г. к договору №61-НЧБ/1-СП от 29.04.2019г. на устройство водоотводного лотка под пожарным проездом - 2экз, локальная смета №8 на устройство водоотводного лотка под пожарным проездом на сумму 43 465,8 руб. - 2экз., акт КС-2 и справка КС-3 на сумму 43 465,8 руб. на устройство водоотводного лотка под пожарным проездом - в 2экз, дополнительное соглашение №6 от 01.09.2019г. к договору №61-НЧБ71-СП от 29.04.2019г. на устройство водоотводного лотка по погрузо-разгрузочной площадке Сервисного блока - 2экз., локальная смета №7 на устройство водоотводного лотка по погрузо-разгрузочной площадке Сервисного блока на сумму 50 954,12 руб- 2экз., акт КС-2 и справка КС-3 на сумму 50 954,12 руб. на устройство водоотводного лотка по погрузо-разгрузочной площадке Сервисного блока - в 2экз., дополнительное соглашение №7 от 01.09.2019г. к договору № 61-НЧБ/1-СП от 29.04.2019г. на укладку плит ПДП - 2экз., локальную смету №9 на укладку плит ПДП на сумму 194 935,82 руб. - 2экз., акт КС-2 и справка КС-3 на сумму 194 935,82 руб. на укладку плит ПДП - в 2экз., дополнительное соглашение №4 от 15.07.2019г. к договору №2 61-НЧБ/1-СП от 29.04.2019г. на перемещение грунта по парковкам 16.1 и 16.2- 2экз., локальная смета №1 на перемещение грунта по парковкам 16.1 и 16.2 на сумму 2 530 625,64руб - 2экз., акт КС-2 и справка КС-3 на сумму 2 530 625,64 руб. перемещение грунта по парковкам 16.1 и 16.2 - в 2экз.

Ответчиком произведена оплата в размере 37 351 782 руб. 12 коп. платежными поручениями: от 16.05.2019. №4930 на сумму 3 000 000 руб., от 21.05.2019г. №5111 на сумму 3 000 000 руб., от 29.05.2019г. №5358 на сумму 1 000 000 руб., от 06.06.2019г. №5677 на сумму 6 000 000 руб., от 19.06.2019г. №6092 на сумму 1 200 000 руб., от 20.06.2019г. №6191 на сумму 3 000 000 руб., от 21.06.2019г. №6253 на сумму 3 300 000 руб., от 26.06.2019 №6364 на сумму 8 000 000 руб., от 23.08.2019г. №8586 на сумму 2 200 000 руб., от 24.09.2019г. №9836 на сумму 2 000 000 руб., от 17.10.2019г. №10866 на сумму 590 059,77 руб., от 17.10.2019г. №10867 на сумму 642 401,68 руб., от 17.10.2019г. №10868 на сумму 409 940,23 руб., от 01.11.2019г. №11629 на сумму 1 000 000 руб., от 17.03.2020г. №2026 на сумму 1 020 734,15 руб., от 21.05.2020г. №3607 на сумму 223 139,47 руб., от 25.05.2020г. №3685 на сумму 141 414,50 руб., от 04.09.2020г. №6255 на сумму 400 000 руб., от 06.09.2021г. №4809 на сумму 224 092,32 руб.

Задолженность по данному договору составляет 4 785 864 руб. 64 коп.

29.04.2019г. между ООО НПФ «ФИТО» (генподрядчик) и ООО «СДК» (подрядчик) заключен договор субподряда №62-НЧБ/1-СП на выполнение работ по внутриплощадному благоустройству территории (устройство откосов) на объекте Тепличный комплекс «Новочебоксарский».

Согласно п.2.1 договора генподрядчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по внутриплощадному благоустройству территории (устройство откосов) на объекте Тепличный комплекс «Новочебоксарский» площадью 22 га для выращивания овощей продукции защищенного грунта на территории Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики (1 очередь (этап)строительства) в соответствии с ведомостью договорной цены (Приложение №1к договору) в объеме Рабочей документации, указанной в Приложении №1-а к Договору.

В п.7.2.3. указано, что надлежаще выполненные работы генподрядчик оплачивает Подрядчику в течении пятнадцати дней со дня подписания генподрядчиком акта приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Согласно условиям п. 6.2. договора цена договора является ориентировочной.

По данному Договору работы выполнены на сумму 10 994 919 руб. 65 коп.,  что подтверждается следующими справками о стоимости выполненных работ и затрат КС-3: от 24.07.2019 г. №1 на сумму 908 926,02 руб.; от 15.08.2019 г. №2 на сумму 411 844,11 руб.; от 30.10.2019 г. №3 на сумму 644 241,96 руб.; от 19.03.2020 г. №4 на сумму 14 572,80 руб.; от 12.10.2020 г. №5 на сумму 325 680 руб.; от 10.06.2020 г. №1 на сумму 299 150,31 руб.; от 30.10.2019 г. №1 на сумму 3 659 254,59 руб.; от 19.03.2020 г. №2 на сумму 272 335,90 руб.; от 12.10.2020 г. №3 на сумму 2 880 170.38 руб.; от 30.10.2019 г. №1 на сумму 141 858,90руб.

Письмом от 01.06.2021 г. №121 (почтовый идентификатор 42801460007525) ООО «СДК» в ООО НПФ «ФИТО» направлено на подписание документы по данному договору на сумму 1 436 884,68 руб., но указанные документы ООО НПФ «ФИТО» обратно ООО «СДК» не возвращены, мотивированного отказа не предоставлено.

Данное документы получены ООО НПФ «ФИТО» 07.06.2021г. Стороны в п.11.3. договора субподряда №62-НЧБ/1-СП от 29.04.2019 г. определили, что в течение 10 рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика документов указанных в п. 11.2. Договора, Генподрядчик обязан их рассмотреть и подписать, либо направить подрядчику мотивированный отказ от подписания вышеуказанных документов.

Также в указанном письме было указано, что в случае не подписания прилагаемых документов и не направления в наш адрес мотивированного отказа в семидневный срок с момента получения, прилагаемые документы будут считаться подписанными со стороны ООО НПФ «ФИТО».

Таким образом, указанные работы считаются принятыми.

Ответчику были направлены: акт КС-2 и справка КС-3 по дополнительному соглашению №2 от 08.08.2019г. к договору №62-НЧБ/1-СП от 29.04.2019г. на планировку территории на сумму 1 436 884,68руб - 2экз.

Генподрядчиком оплачено за выполненные работы 8 388 391 руб. 93 коп. платежными поручениями: от 16.05.2019г. №4931 на сумму 1 000 000 руб., от 24.09.2019г. №9835 на сумму 1 000 000 руб., от 17.10.2019г. №10864 на сумму 1 808 400 руб., от 17.10.2019г. №10865 на сумму 200 000 руб., от 17.10.2019г. № 10869 на сумму 254 731,62 руб., от 10.01.2020г. № 111 на сумму 612 029,86 руб., от 17.03.2020г. №2024 на сумму 667 891,86 руб., от 21.05.2020г. №3606 на сумму 13844.16 руб., от 25.05.2020г. №3686 на сумму 258 719.09 руб., от 16.07.2020г. №5076 на сумму 84 192,80 руб., от 10.01.2020г. № 115 на сумму 134 765,95 руб., от 28.12.2020. №8574 на сумму 309 396 руб., от 06.09.2021г. №4810 на сумму 695 912,55 руб., от 16.09.2021 №5085 на сумму 1 348 508,04 руб.

Таким образом, задолженность по данному договору составляет 2 606 527 руб. 72 коп.

13.08.2019г. между ООО НПФ «ФИТО» (генподрядчик) и ООО «СДК» (подрядчик) заключен договор субподряда №73-НЧБ/1-СП на выполнение работ по внутриплощадному благоустройству территории (второй этап благоустройства) на объекте Тепличный комплекс «Новочебоксарский».

Согласно п.2.1 договора генподрядчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по внутриплощадному благоустройству территории (второй этап благоустройства) на объекте Тепличный комплекс «Новочебоксарский» площадью 22 га для выращивания овощей продукции защищенного грунта на территории Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики (1 очередь (этап) строительства) в соответствии с ведомостью договорной цены (Приложение №1 к договору) в объеме Рабочей документации, указанной в Приложении №1-а к договору.

В п.7.2.3. указано, что надлежаще выполненные работы генподрядчик оплачивает подрядчику в течении пятнадцати дней со дня подписания генподрядчиком акта приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

По данному договору работы выполнены на сумму 17 989 375 руб. 03 коп., что подтверждается следующими справками о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3): от 03.04.2020 г. №1 на сумму 15 584 638,61 руб.; от 10.07.2020 г. №2 на сумму 211 169,97 руб.; от 08.07.2020 г. №1 на сумму 194 337,34 руб.; от 08.07.2020 г. №1 на сумму 95 798,88 руб.; от 02.07.2020 -№1 на сумму 1 396 128,57 руб., от 25.01.2021 №2 на сумму 507 301,66 руб.

Оплачено за выполненные работы генподрядчиком 17 781 647,56 руб. платежными поручениями: от 13.08.2019г. №8227 на сумму 2 000 000 руб., от 14.08.2019г. №8255 на сумму 2 000 000 руб., от 19.08.2019. №8740 на сумму 2 500 000 руб., от 05.09.2019г. №9026 на сумму 1 500 000 руб., от 12.09.2019г. №9417 на сумму 4 000 000 руб., от 10.10.2019г. №10328 на сумму.2 000 000 руб., от 16.07.2019г. №5062 на сумму 91 008,94 руб., от 16.07.2019г. №5061 на сумму 184 620,47 руб., от 16.09.2021г. №5083 на сумму 6 018,15 руб., от 01.11.2019г. № 1 1630 на сумму 1 000 000 руб., от 04.09.2019г. №8903 на сумму 2 500 000 руб.

Таким образом, задолженность по данному договору составляет 207 727 руб. 47 коп.

11.07.2019 г. между ООО НПФ «ФИТО» (генподрядчик) и ООО «СДК» (подрядчик) заключен договор субподряда №24-НЧБ/2-СП на выполнение работ по устройству фундаментов под ТП на объекте Тепличный комплекс «Новочебоксарский».

Согласно п.2.1 договора генподрядчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по устройству фундаментов под ТП на объекте Тепличный комплекс «Новочебоксарский» площадью 22 га для выращивания овощей продукции защищенного грунта на территории Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики (2 очередь (этап) строительства) в соответствии с ведомостью договорной цены (Приложение №1 к договору) в объеме Рабочей документации, указанной в Приложении №1-а к договору.

В п.7.2.3. указано, что надлежаще выполненные работы Генподрядчик оплачивает Подрядчику в течении пятнадцати дней со дня подписания Генподрядчиком акта приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

По данному договору работы выполнены на сумму 3 304 566,86 руб., что подтверждается следующими справками о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3):  от 10.07.2020 г. №1 на сумму 2 367 439,69 руб.; КС-3 от 24.02.2020 г. №2 на сумму 701 539,75 руб.

Письмом от 01.06.2021 г. №121 (почтовый идентификатор 42801460007525) ООО «СДК» в ООО НПФ «ФИТО» направлено на подписание документы по данному договору, но указанные документы ООО НПФ «ФИТО» обратно ООО «СДК» не возвращены и мотивированного отказа также не предоставлено.

Данное документы получены ООО НПФ «ФИТО» 07.06.2021г.

Стороны в п.11.3. договор субподряда №24-НЧБ/2-СП от 11.07.2019 определили, что в течение 10 рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика документов указанных в п. 11.2. договора. Генподрядчик обязан их рассмотреть и подписать, либо направить подрядчику мотивированный отказ от подписания вышеуказанных документов.

Также в указанном письме было указано, что в случае не подписания прилагаемых документов и не направления в наш адрес мотивированного отказа в семидневный срок с момента получения, прилагаемые документы будут считаться подписанными со стороны ООО НПФ «ФИТО».

Таким образом, указанные работы считаются принятыми.

В адрес генподрядчика направленны документы: дополнительное соглашение №1 от 12.07.2019г. к договору №24-НЧБ/2-СП от 11.07.2019г. на строительство фундаментов трансформаторных подстанций- 2экз., Приложение №1 к дополнительному соглашению  №1 на строительство фундаментов Трансформаторных подстанций- 2экз., локальную смету №1 к дополнительному соглашению №1 на строительство фундаментов Трансформаторных подстанций на сумму 235 587,72руб - 2экз., акт КС-2 и справка КС-3 на сумму 235 587,72руб. на дополнительные работы на строительство фундаментов Трансформаторных подстанций-2экз.

Оплачено за выполненные работы 2 915 530 руб. 47 коп. ответчиком платежными поручениями: от 18.07.2019г. №7176 на сумму 1 080 000 руб., от 24.09.2019г. №9845 на сумму 1 500 000 руб., от 17.10.2019г. №10888 на сумму 300 000 руб., от 16.09.2021г. №5084 на сумму 35 530.47 руб.

Таким образом, задолженность составляет 389 036,39 руб.

13.08.2019г. между ООО НПФ «ФИТО» (генподрядчик) и ООО «СДК» (подрядчик) заключен договор субподряда №71-НЧБ/1-СП на выполнение работ по внутриплощадному благоустройству территории. Устройство проездов и площадок Тип 2, Тип 3 на объекте Тепличный комплекс «Новочебоксарский».

Согласно п.2.1 договора генподрядчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по внутриплощадному благоустройству территории. Устройство проездов и площадок Тип 2, Тип 3 на объекте Тепличный комплекс «Новочебоксарский» площадью 22 га для выращивания овощей продукции защищенного грунта на территории Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики (1 очередь (этап) строительства) в соответствии с ведомостью договорной цены (Приложение №1 к Договору) в объеме Рабочей документации, указанной в Приложении №1-а к Договору.

В п.7.2.3. указано, что надлежаще выполненные работы Генподрядчик оплачивает подрядчику в течении пятнадцати дней со дня подписания генподрядчиком Акта приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

По данному договору работы выполнены на сумму 4 847 280,91 руб., что подтверждается следующими справками о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3): от 11.07.2019 г. №1 на сумму 4 763 075,51 руб.; КС-3 от 24.02.2020 г. №2 на сумму 84 205,40 руб.

Оплачено за выполненные работы 4 604 916,86 руб. платежными поручениями: от 06.09.2021г. №4812 на сумму 79 995.13  руб., от 10.01.2020г. №112 на сумму 634 923,73 руб., от 01.08.2019г. №7664 на сумму 850 000 руб., от 31.07.2019г. №7604 на сумму 300 000 руб., от 07.08.2019г. №8034 на сумму 1 300 000 руб., от 18.07.2019г. №7177 на сумму 1 439 998 руб.,

Таким образом, задолженность ООО НПФ «Фито» по данному договору составляет 242 364,05 руб.

Однако, ООО НПФ «ФИТО» окончательный расчет по договорам не произвело.

Исходя из общей суммы договоров, а также платежей, произведенных ООО НПФ «ФИТО», задолженность перед ООО «СДК» составила 8 231 520 руб. 27 коп.

В силу ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами.

ООО «СДК»  в материалы дела представлены надлежащие доказательства в обоснование требований о взыскании с ООО НПФ «ФИТО»  задолженности по оплате выполненных работ в сумме 8 231 520 руб. 27 коп. по договорам, которые ООО НПФ «ФИТО» не опровергнуты и не оспариваются.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда; при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе заказчик обязан немедленно заявить об этом подрядчику (ст.ст.702,720 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст.746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком строительных работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии названных указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со ст.711 ГК РФ.

В соответствии с  абз. 2 п. 4 ст.753 ГК РФ односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Пунктом 1 ст.329 ГК РФ установлено, что  исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе неустойкой (штрафом, пеней), которой, согласно п.1 ст.330 ГК РФ признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

ООО НПФ «ФИТО» заявило о ненадлежащем исполнении с указанием на просрочку ООО «СДК»  выполнения обязательств по договорам, расчетом начисленной неустойки в общей сумме 12.767.572 руб. 24 коп.

Ответчик, после предъявления иска, 14.03.2022г. направил на электронную почту истца уведомление о зачете пени исх. № 261-СТ от 14.03.2022г., а также посредством почты АО «Почта России» 15.03.2022г.

В соответствии с п. 21.3 договоров №24-НЧБ/2-СП, М61-НЧБ/1-СП, №62-НЧБ/1-СП, №73-НЧБ/1-СП любое уведомление по договору осуществляется в письменной форме в виде, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по адресу его места нахождения. Стороны признают надлежащим уведомлением направление письма по электронной почте на следующий адрес истца: Sdk2187femail.ru

Следовательно, направление уведомления о зачете по указанному адресу является надлежащим образом, направленным стороне.

В соответствии с п.3.1. договора №24-НЧБ/2-СП  от 11.07.2019г. стороны определили, что работы по договору должны были быть окончены в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты начало работ. Вместе с тем, в нарушение взятых на себя обязательств истец выполнил работы по договору с нарушением конечного срока, а именно работы были выполнены и сданы ответчику только 26.02.2021г., что подтверждается подписанным сторонами актом сдачи-приемки результата работ от 26.02.2021г.

В соответствии с п. 14.2. договора №24-НЧБ/2-СП от 11.07.2019г. за нарушение срока окончания работ истец выплачивает ответчику пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

Таким образом, пени за нарушение срока окончания работ по договору №24-НЧБ/2-СП от 11.07.2019г. составляют 1 830 730 руб. 04 коп.

Согласно п. 11.8 договора № 61 -НЧБ/1 -СП приемка выполненных работ оформляется актом сдачи-приемки результата работ.

В соответствии с п.3.1. договора №61-НЧБ/1-СП стороны определили, что работы по договору должны были быть окончены в течение шестьдесят рабочих дней с даты начала работ. Вместе с тем, в нарушение взятых на себя обязательств истец выполнил работы по договору с нарушением конечного срока, а именно работы были выполнены и сданы ответчику только 10.07.2020г., что подтверждается подписанным сторонами актом сдачи-приемки результата работ от 10.07.2020г.

Пунктом 14.2. договора №61-НЧБ/1-СП  от 29.04.2019г. установлено, что за  нарушение срока окончания работ истец выплачивает ответчику пени в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.

Таким образом, пени за нарушение срока окончания работ по договору №61-НЧБ/1-СП, подлежащие оплате истцом в пользу ответчика, составляют 315 146 руб. 91 коп.

11.06.2019г. сторонами было заключено дополнительное соглашение №1 к договору № 61-НЧБ/1-СП от 29.04.2019г.

В соответствии с п.4 дополнительного соглашения №1 к договору №61-НЧБ/1-СП от 29.04.2019г., стороны определили, что работы по дополнительному соглашению № 1 должны быть окончены в течение тридцать рабочих дней с момента заключения настоящего Дополнительного соглашения. Вместе с тем, в нарушение взятых на себя обязательств истец выполнил работы по договору с нарушением конечного срока, а именно работы были выполнены и сданы ответчику только 19.03.2020г., что подтверждается подписанным сторонами актом сдачи-приемки результата работ от 19.03.2020г.

В соответствии с п.14.2. договора №61-НЧБ/1-СП от 29.04.2019г. за нарушение срока окончания работ истец выплачивает ответчику пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

Таким образом, пени за нарушение срока окончания работ по дополнительном у соглашению №1 к договору №61-НЧБ/1-СП от 29.04.2019г., подлежащие оплате истцом в пользу ответчика, составляют 903 281 руб. 91 коп.

15.07.2019г. сторонами заключено дополнительное соглашение № 4 к договору №61-НЧБ/1-СП от 29.04.2019г.

В соответствии с п. 4 дополнительного соглашения №4 к договору №61-НЧБ/1-СП от 29.04.2019г., стороны определили, что работы по Дополнительному соглашению № 4 должны быть окончены в течение 30 (тридцать) рабочих дней с момента заключения настоящего Дополнительного соглашения. Вместе с тем, в нарушение взятых на себя обязательств истец выполнил работы по договору с нарушением конечного срока, а именно работы были выполнены и сданы ответчику только 26 февраля 2020 года, что подтверждается подписанным сторонами актом сдачи-приемки результата работ от 26 февраля 2020 года.

В соответствии с п.14.2. договора № 61-НЧБ/1-СП за нарушение срока окончания работ истец выплачивает ответчику пени в размере 0, % от цены договора за каждый день просрочки.

Таким образом, пени за нарушение срока окончания работ по дополнительному соглашению № 4 к Договору № 61-НЧБ/1-СП, подлежащие оплате истцом в пользу ответчика, составляют 1396 905 руб. 35 коп

01.09.2019г. стороны заключили дополнительное соглашение №5 к договору №61-НЧБ/1-СП  в соответствии с которым истец обязался выполнить дополнительные работы на устройство водоотводного лотка под пожарным проездом на Объекте: «Тепличный комплекс «Новочебоксарский» площадью 22 га для выращивания овощной продукции защищенного грунта на территории Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики» (1 очередь (этап) строительства) в соответствии с Ведомостью договорной цены (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 5) обшей стоимостью 43 465 руб. 80 коп.

Согласно п. 11.8 договора № 61-НЧБ/1-СП приемка выполненных работ оформляется актом сдачи-приемки результата работ.

В соответствии с п. 4 Дополнительного соглашения № 5, стороны определили, что работы по Дополнительному соглашению № 5 должны быть окончены в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты начала работ. Вместе с тем, в нарушение взятых на себя обязательств истец выполнил работы по договору с нарушением конечного срока, а именно работы были выполнены и сданы ответчику только 26 февраля 2020 года, что подтверждается подписанным сторонами актом сдачи-приемки результата работ от 26 февраля 2020 года.

Согласно п.14.2. договора № 61-НЧБ/1-СП за нарушение срока окончания работ истец выплачивает ответчику пени в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.

Таким образом, пени за нарушение срока окончания работ по Дополнительному соглашению № 5 к Договору № 61-НЧБ/1-СП, подлежащие оплате истцом в пользу ответчика, составляют 22 949 руб. 94 коп.

01.09.2019г. сторонами было заключено дополнительное соглашение №6 к договору №61-НЧБ/1-СП (далее по тексту -«Дополнительное соглашение № 6»), в соответствии с которым истец обязался выполнить дополнительные работы на устройство водоотводного лотка по погрузоразгрузочной площадке Сервисного блока на Объекте: «Тепличный комплекс «Новочебоксарский» площадью 22 га для выращивания овощной продукции защищенного грунта на территории Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики» ( 1 очередь (этап) строительства) в соответствии с Ведомостью договорной цены (Приложение № I к Дополнительному соглашению) общей стоимостью 50 954 руб. 12 коп., в том числе НДС 20%.

Согласно п. 11.8 договора №61-НЧБ/1-СП приемка выполненных работ оформляется актом сдачи-приемки результата работ.

Пунктом 4 Дополнительного соглашения № 6 установлено, что стороны определили, что работы по Дополнительному соглашению № 6 должны быть окончены в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента заключения настоящего Дополнительного соглашения. Вместе с тем, в нарушение взятых на себя обязательств истец выполнил работы по договору с нарушением конечного срока, а именно работы были выполнены и сданы ответчику только 26.02.2020г., что подтверждается подписанным сторонами актом сдачи-приемки результата работ от 26.02.2020г.

В соответствии с п.14.2. договора № 61-НЧБ/1-СП за нарушение срока окончания работ истец выплачивает ответчику пени в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.

Таким образом, пени за нарушение срока окончания работ по Дополнительному соглашению № 6 к договору № 61-НЧБ/1-СП, подлежащие оплате истцом в пользу ответчика, составляют 26 903 руб. 78 коп.

01.09.2019г. сторонами было заключено дополнительное соглашение №7 к договору № 61-НЧБ/1-СП, в соответствии с которым истец обязался выполнить дополнительные работы по укладке плит ПДП на Объекте: «Тепличный комплекс «Новочебоксарский» площадью 22 га для выращивания овощной продукции защищенного грунта на территории Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики» (1 очередь (этап) строительства) в соответствии с Ведомостью договорной цены (Приложение №I к дополнительному соглашению) общей стоимостью 194 935 руб. 82 коп., в том числе НДС 20%.

Согласно п.11.8 договора №61-НЧБ/1-СП приемка выполненных работ оформляется актом сдачи-приемки результата работ.

В соответствии с п. 4 дополнительного соглашения № 7, стороны определили, что работы по Дополнительному соглашению №7 должны быть окончены в течение пятнадцать календарных дней с даты начала работ. Вместе с тем, в нарушение взятых на себя обязательств истец выполнил работы по договору с нарушением конечного срока, а именно работы были выполнены и сданы ответчику только 26 февраля 2020 года, что подтверждается подписанным сторонами актом сдачи-приемки результата работ от 26 февраля 2020 года.

Согласно  п. 14.2. договора № 61-НЧБ/1-СП за нарушение срока окончания работ истец выплачивает ответчику пени в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.

Таким образом, пени за нарушение срока окончания работ по Дополнительному соглашению №7 к договору № 61-НЧБ/1-СП, подлежащие оплате истцом в пользу ответчика, составляют 102 924 руб. 53 коп.

Согласно п.11.8 договора №62-НЧБ/1-СП от 29.04.2019г. приемка выполненных работ оформляется актом сдачи-приемки результата работ.

В соответствии с п.3.1. договора №62-НЧБ/1-СП стороны определили, что работы по договору должны были быть окончены в течение шестьдесят три рабочих дней с даты начала работ. Вместе с тем, в нарушение взятых на себя обязательств истец выполнил работы по договору с нарушением конечного срока, а именно работы были выполнены и сданы ответчику только 12.10.2020г., что подтверждается подписанным сторонами актом сдачи-приемки результата работ от 12 октября 2020 года.

В соответствии с п. 14.2. договора № 62-НЧБ/1-СП за нарушение срока окончания работ истец выплачивает ответчику пени в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.

Таким образом, пени за нарушение срока окончания работ по договору №62-НЧБ/1-СП, подлежащие оплате истцом в пользу ответчика, составляют 1007 400 руб. 76 коп.

01.09.2019г. сторонами заключено дополнительное соглашение № 1 к Договору №62-НЧБ/1-СП

Согласно п.11.8 договора №62-НЧБ/1-СП приемка выполненных работ оформляется актом сдачи-приемки результата работ.

В соответствии с п. 4 Дополнительного соглашения № 1, стороны определили, что работы по Дополнительному соглашению №1 должны быть окончены в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения настоящего Дополнительного соглашения. Вместе с тем, в нарушение взятых на себя обязательств истец выполнил работы по договору с нарушением конечного срока, а именно работы были выполнены и сданы ответчику только 10.06.2020г., что подтверждается подписанным сторонами актом сдачи-приемки результата работ от 10.06.2020г.

В соответствии с п.14.2. договора № 62-НЧБ/1-СП за нарушение срока окончания работ истец выплачивает ответчику пени в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.

Таким образом, пени за нарушение срока окончания работ по Дополнительному соглашению № 1 к договору №62-НЧБ/1-СП, подлежащие оплате истцом в пользу ответчика, составляют 136 794 руб. 67 коп

01.09.2019г. сторонами заключено дополнительное соглашение № 2 к договору №62-НЧБ/1-СП.

В соответствии с п. 4 Дополнительного соглашения № 2, стороны определили, что работы по Дополнительному соглашению № 2 должны быть окончены в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения настоящего Дополнительного соглашения. Вместе с тем, в нарушение взятых на себя обязательств истец выполнил работы по договору с нарушением конечного срока, а именно работы были выполнены и сданы ответчику только 26.02.2021г., что подтверждается подписанным сторонами актом сдачи-приемки результата работ от 26.02.2021г.

На основании п.14.2. договора № 62-НЧБ/1-СП за нарушение срока окончания работ истец выплачивает ответчику пени в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.

Таким образом, пени за нарушение срока окончания работ по Дополнительному соглашению № 2 к договору № 62-НЧБ/1-С П, подлежащие оплате составляют 4 429 522 руб. 66 коп.

27.09.2019г. сторонами заключено дополнительное соглашение № 3 к Договору №62-НЧБ/1-СП.

В соответствии с п. 4 дополнительного соглашения № 3, стороны определили, что работы по Дополнительному соглашению № 3 должны быть окончены в течение 7 (семь) календарных дней с момента заключения настоящего Дополнительного соглашения. Вместе с тем, в нарушение взятых на себя обязательств истец выполнил работы по договору с нарушением конечного срока, а именно работы были выполнены и сданы ответчику только 30.10.2019г., что подтверждается подписанным сторонами актом сдачи-приемки результата работ от 30.10.2019г.

В соответствии с п.14.2. договора № 62-НЧБ/1-СП за нарушение срока окончания работ истец выплачивает ответчику пени в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.

Таким образом, пени за нарушение срока окончания работ по дополнительному соглашению № 3 к договору №62-НЧБ/1-СП составляет 3.546 руб. 47 коп.

 

13.08.2019г. между истцом и ответчиком был заключен договор №73-НЧБ/1-СП.

26.08.2019г. заключено дополнительное соглашение №1 к нему.

В соответствии с п. 4 Дополнительного соглашения № 1, стороны определили, что работы по Дополнительному соглашению № 1 должны быть окончены в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с 26.08.2019г. Вместе с тем, в нарушение взятых на себя обязательств истец выполнил работы по договору с нарушением конечного срока, а именно работы были выполнены и сданы ответчику только 25.01.2021г., что подтверждается подписанным сторонами актом сдачи-приемки результата работ от 25.01.2021г.

В соответствии с п.14.2. договора №73-НЧБ/1-СП за нарушение срока окончания работ истец выплачивает ответчику пени в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.

Таким образом, пени за нарушение срока окончания работ по Дополнительному соглашению № 1 к договору №73-НЧБ/1-СП, подлежащие оплате истцом составляет 2 514 579 руб. 14 коп

08.07.2020г. сторонами заключено дополнительное соглашение № 2 к Договору №73-НЧБ/1-СП, цена которого составляет 194 337 руб. 34 коп.

В соответствии с п. 4 Дополнительного соглашения № 2, стороны определили, что работы по Дополнительному соглашению № 2 должны быть окончены в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с 01.10.2019г. Вместе с тем, в нарушение взятых на себя обязательств истец выполнил работы по договору с нарушением конечного срока, а именно работы были выполнены и сданы ответчику только 08.07.2020г., что подтверждается подписанным сторонами актом сдачи-приемки результата работ от 08.07.2020г.

В соответствии с п.14.2. договора № 73-НЧБ/1-СП за нарушение срока окончания работ истец выплачивает ответчику пени в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.

Таким образом, пени за нарушение срока окончания работ по Дополнительному соглашению № 2 к договору № 73-НЧБ/1-СП, подлежащие оплате истцом в пользу ответчика, составляют 51 499 руб. 40 коп.

08.07.2020г. сторонами заключено дополнительное соглашение № 3 к договору №73-НЧБ/1-СП.

В соответствии с п. 4 Дополнительного соглашения № 3, стороны определили, что работы по Дополнительному соглашению № 3 должны быть окончены в течение пятнадцати календарных дней с 01.10.2019г. Вместе с тем, в нарушение взятых на себя обязательств истец выполнил работы по договору с нарушением конечного срока, а именно работы были выполнены и сданы ответчику только 08.07.2020г., что подтверждается подписанным сторонами актом сдачи-приемки результата работ от 08 июля 2020 года.

В соответствии с п.14.2. договора № 73-НЧБ/1-СП за нарушение срока окончания работ истец выплачивает ответчику пени в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.

Таким образом, пени за нарушение срока окончания работ по дополнительному соглашению №3 к договору №73-НЧБ/1-СП составляют 25 386 руб. 70 коп.

Общий размер неустойки составляет 12.767.572 руб. 24 коп.

Представленный истцом расчет неустойки, оценивается судом как правильный и не противоречащий закону.

Расчет судом перепроверен, арифметически и методологически выполнен правильно.

Суд также не усматривает несоразмерности между подлежащей взысканию суммой неустойки и последствиями нарушения ответчиком своих обязательств.

В соответствии со ст. 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

На основании изложенного у истца перед ответчиком образовалась задолженность по оплате неустойки.

Поскольку ответчиком на основании ст.410 ГК РФ был произведен зачет взаимных однородных требований, обязательство ООО НПФ «ФИТО» по оплате задолженности перед ООО «СДК» является прекратившимся.

В связи с чем, оснований для удовлетворения исковых требований у суда не имеется.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Признак допустимости доказательств предусмотрен положениями ст. 68 АПК РФ.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины распределены в порядке ст.110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 309, 310, 330,702,711,720,746,753 ГК РФ, ст. ст. 110, 123, 156, 167-170, 176 АПК РФ, суд        

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований, отказать.

Взыскать ООО «СДК» (ИНН 

<

***>)  в доход Федерального бюджета РФ  расходы  по оплате  госпошлины в размере  64 158руб.00коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                                                          О.С. Гедрайтис