10458_4089348  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-30649/16

01 августа 2017 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Новожилова М.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

 рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

Администрации Белокалитвинского района Ростовской области (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «РОСДОРСТРОЙ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

третье лицо: временный управляющий ООО «РОСДОРСТРОЙ» ФИО2  

об обязании устранить недостатки работ, передать исполнительную документацию  

Руководствуясь статьями 110,156,167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «РОСДОРСТРОЙ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в месячный срок со дня вступления решения суда в  

законную силу устранить недостатки работ, выполненных по муниципальному контракту  

от 16.08.2013 № 2013.135066 путем выполнения следующих работ: 

фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной 4см (по проезжей части по  

кольцу) – 400 м2; 

укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами (при  

устройстве оголовки водопропускной тубы диаметром 0,7м на ПК13+20) – 10м2/1,87м3;  

заделка трещин в асфальтобетонного покрытии с расчисткой и заливкой битумом –  

900 м; разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,1м – 1072,8 м.п.; 

разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1м – (1:3) 508  м.п.;  

устройство присыпных обочин из асфальтогранулята и щебня – 2654,3 м2,  

посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7 x  

0,7 м – 33 шт., 

укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав  механизированным способом 10300 кв.м,  

укрепление обочин асфальтогранулятом (лом асфальтобетона) -240,58 т. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «РОСДОРСТРОЙ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в месячный срок со дня вступления решения суда в  законную силу передать Администрации Белокалитвинского района Ростовской области  исполнительную документацию по объекту: «Строительство межпоселковой  автомобильной дороги «Подъезд от а/д ММ 61-89 «Подъезд от а/д «г. Белая Калитва (от  а/д г. Белая Калитва-х. Апанасовка-п. Тацинский) к х.ФИО3» к х. Дороговский», а  именно: общий журнал работ, журнал входного контроля на материалы и конструкции,  журнал бетонных работ, журнал укладки асфальтобетонной смеси, акты  освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования скрытых конструкций,  паспорта качества и сертификаты соответствия, протоколы результатов лабораторных  испытаний, реестры на исполнительную документацию.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РОСДОРСТРОЙ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 12000 руб.  государственной пошлины.  

 Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано через суд, вынесший решение, в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо- Кавказского округа, в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в  законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

 Судья М.А. Новожилова