И М Е Н Е М   Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Москва                                                                                            Дело  № А40-97080/22-151-719

28.02.2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 24.01.2023 года

Решение в полном объеме изготовлено 28.02.2023 года

 

Арбитражный суд города Москвы в составе

Судьи Вольской К.В.

при ведении протокола помощником судьи Е.О. Поддубным

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по исковому заявлению ООО «ИНСТАЛЛ» (ОГРН 1187746824759)

к ответчику ООО «СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ» (ОГРН 1197746750992)

о взыскании 4 093 857,86 руб.

при участии

от истца: Парадник М.А. по доверенности от 09.11.2021

от ответчика: представитель не явился 

 

У С Т А Н О В И Л:

С учетом уточнений требований в порядке ст. 49 АПК РФ, иск заявлен о взыскании:

- задолженности по Договору подряда №02/2021 от 19.03.2021г, включая дополнительное соглашение №1 от 07 апреля 2021 года и дополнительное соглашение №2 от 19 апреля 2021 года в размере 1 535 208,51 (Один миллион пятьсот тридцать пять тысяч двести восемь рублей) 51 копейка, а именно: основной долг по оплате выполненных истцом работ в сумме 1 397 698  рублей  00 копеек,  пени за просрочку исполнения обязательства по оплате принятых работ в сумме 69 884 рублей  90 копеек, неустойку в виде процентов за неправомерное удержание денежных средств, уклонения от их возврата, рассчитанных по правилам ст. 395 ГК РФ  за период с 01.01.2022 по 05.05.2022 - 67 625 рублей 61 копейка; неустойку в виде процентов за неправомерное удержание денежных средств, уклонения от их возврата, рассчитанных по правилам ст. 395 ГК РФ на сумму основного долга 1397698,00 рублей за период с 06.05.2022 по дату фактического исполнения

- задолженности по Договору подряда №05/2021 от 07.04.2021г.,  включая дополнительное соглашение №1 от 07 июля 2021 года в размере 1 078 494,02 (Один миллион семьдесят восемь тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 02 копейки, а именно: основной долг по оплате выполненных истцом работ в сумме 981 891 рублей  99 копеек,  пени за просрочку исполнения обязательства по оплате принятых работ в сумме 49 094 рубля 60 копеек, неустойку в виде процентов за неправомерное удержание денежных средств, уклонения от их возврата, рассчитанных по правилам ст. 395 ГК РФ  за период с 01.01.2022 по 05.05.2022   - 47507 рублей 43 копейки; неустойку в виде процентов за неправомерное удержание денежных средств, уклонения от их возврата, рассчитанных по правилам ст. 395 ГК РФ на сумму основного долга 981 891 рублей  99 копеек. за период с 06.05.2022 по дату фактического исполнения

- задолженности по Договору подряда № 06/2021 от 15.04.2021г. в размере 1 480 155,33 (Один миллион четыреста восемьдесят тысяч сто пятьдесят пять) рублей 33 копейки, а именно: основной долг по оплате выполненных истцом работ в сумме 1 347 576 рублей  00 копеек,  пени за просрочку исполнения обязательства по оплате принятых работ в сумме 67378 рублей 80 копеек, неустойку в виде процентов за неправомерное удержание денежных средств, уклонения от их возврата, рассчитанных по правилам ст. 395 ГК РФ  за период с 01.01.2022г по 05.05.2022г - 65200 рублей 53 копейки; неустойку в виде процентов за неправомерное удержание денежных средств, уклонения от их возврата, рассчитанных по правилам ст. 395 ГК РФ на сумму основного долга 1 347 576 рублей  00 копеек. за период с 06.05.2022 по дату фактического исполнения.

В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу.

Представитель истца требования поддержал в полном объеме.

Надлежащим образом извещенный представитель ответчика в судебное заседание не явился, в порядке ст. 156 АПК РФ суд считает возможным провести судебное заседание в его отсутствие.

Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Между Истцом ООО «ИНСТАЛЛ» (ИНН 7728446347 /КПП 775101001), являющимся Подрядчиком, и Ответчиком ООО «СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7713473267 / КПП 771301001), являющимся Заказчиком, в числе прочих подрядных договоров были заключены:

? Договор подряда №02/2021 от 19.03.2021г, включая дополнительное соглашение №1 от 07 апреля 2021 года и дополнительное соглашение №2 от 19 апреля 2021 года на выполнение комплекса работ по монтажу металлоконструкций на объекте “Строительство спортивных объектов ФАУ МО РФ ЦСКА”, расположенных по адресу: г. Москва, ул. 3-я Песчаная, д. 2", далее при отдельном упоминании - “Договор подряда №02/2021” (Приложение 4);

? Договор подряда №05/2021 от 07.04.2021г.,  включая дополнительное соглашение №1 от 07 июля 2021 года на выполнение комплекса работ по монтажу металлоконструкций на объекте “Строительство спортивных объектов ФАУ МО РФ ЦСКА”, расположенных по адресу: г. Москва, ул. 3-я Песчаная, д. 2", далее при отдельном упоминании - “Договор подряда №05/2021”  (Приложение 5);

? Договор подряда № 06/2021 от 15.04.2021г. на выполнение комплекса работ по монтажу металлоконструкций на объекте “Строительство спортивных объектов ФАУ МО РФ ЦСКА”, расположенных по адресу: г. Москва, ул. 3-я Песчаная, д. 2, “Крытый  спортивный комплекс", далее при отдельном упоминании - “Договор подряда №06/2021”  (Приложение 6 ), при совместном упоминании - “Договор/ договоры подряда”.

Согласно условиям Договоров подряда Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить собственными и при необходимости, привлеченными силами комплекс работ по монтажу металлоконструкций на объекте «Строительство центра скалолазания, расположенных по адресу: г. Москва, ул. 3-я Песчаная, д. 2 (далее - Работы), в соответствии проектно-технической документацией шифр ГП1-КР2.2  и локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к Договорам подряда), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную  договором цену.

Договора заключены путем направления скан-копий, подписанного договора с каждой стороны на заранее согласованные электронные почты сторон (п 12.4. Договора подряда), а также акцептированы оплатой авансовых платежей со стороны Заказчика (Приложения 10-19 к иску ) и выполнением работ со стороны Подрядчика.

Заказчик обязан (п. 4.2.1. Договоров подряда) Передать Подрядчику строительную площадку для выполнения работ, указанных в п. 1.1 Договора подряда, и проектную документацию, в необходимом для выполнения работ, объеме. Подрядчик выполняет весь комплекс Работ, указанных в п.1.1. Договора в течение 21 календарного дня с момента передачи проектной документации, строительной площадки и металлоконструкций на Объекте. (п.3.1. Договоров подряда)

Приблизительная цена каждого Договора подряда определена в п. 2.1 на основании Приложения №1 к договорам, а именно:

2.1 по Договору подряда №02/2021 составляет 1 737 252,00 (Один миллион семьсот тридцать семь тысяч двести пятьдесят два) рубля 00 копеек, в.т.ч. НДС 20%, а также по Дополнительному соглашению №1 от 07 апреля 2021 года к Договору подряда №02/2021 от 19.03.2021 г. - 240 500,00 (Двести сорок тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%; а также по Дополнительному соглашению №2 от 19 апреля 2021 года к Договору подряда № 02/2021 от 19.03.2021г - 154 140,00 (Сто пятьдесят четыре тысячи сто сорок) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 20%

2.2 по Договору подряда №05/2021 от 07.04.2021г. приблизительная цена работ составляет 2.725.080,00 (Два миллиона семьсот двадцать пять тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%, а также по Дополнительному соглашению №1 от 07 июля 2021 года к Договору подряда № 05/2021 от 07.04.2021г. - 288 500,00 (Двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 20%;

2.3 по Договору подряда № 06/2021 от 15.04.2021г. приблизительная цена работ составляет  2.144.208,00 (Два миллиона сто сорок четыре тысячи двести восемь) рублей 00 копеек , в т.ч. НДС 20%

Порядок принятия и оплаты работ

Согласно условиям п. 2.2. Договора подряда Заказчик должен произвести первый авансовый платеж в установленном договором размере в течение 3-х рабочих дней со дня подписания каждого из договоров подряда. Датой перечисления аванса считается списание денежных средств со специального счета Заказчика, указанного в Договоре. Ответчик неоднократно допускал просрочку оплаты аванса.

Авансовые платежи по Договору подряда №02/2021 от 19.03.2021г от совершены тремя платежными поручениями (30.03.21, 19.04.21, 11.06.21) на общую сумму 847 450,00 рублей (Приложение 10-12 к иску)

Авансовые платежи по Договору подряда №05/2021 от 07.04.2021г совершены четырьмя платежными поручениями (15.04.21, 16.04.21, 29.04.2021 и 01.07.21) на общую сумму 1.300.000,00 рублей (Приложение 13-16 к иску)

Авансовые платежи по Договору подряда №06/2021 от 07.04.2021г совершены тремя платежными поручениями (21.04.21, 10.06.21, 10.06.21) на общую сумму 780 000,00 рублей (Приложение 17-19 к иску)

Согласно условиям п. 2.3. Договора подряда окончательный расчет за выполненные работы осуществляется на основании подписанных и подтвержденных Заказчиком, актов сдачи выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), технической и исполнительной документации в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания вышеуказанных документов, с учётом ранее уплаченного аванса, на основании выставленного Подрядчиком счета. Датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств с отдельного счета Заказчика.

После завершения Работ, Подрядчик письменно извещает Заказчика (3.2. Договора подряда) о готовности Работ к сдаче-приемке. ООО «ИНСТАЛЛ» письменно известило ООО «Стальспецстрой» о готовности работ к сдаче-приемке работ 18.08.2021г. ценным письмом с описью вложения (Приложение 20). Согласно РПО №11963362010659 документы получены ООО «Стальспецстрой» 20.08.2021г. (Приложение 21)

Стороны определили, что сдача-приемка Работ осуществляется посредством подписания Сторонами двустороннего Акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по унифицированной форме КС-3, передачи исполнительной документации, являющихся основанием для оплаты работ по договору. (п.3.3  и 4.2.2. Договоров подряда)

Унифицированная форма КС-2 является Актом о приемке выполненных работ. На основании данных Акта о приемке выполненных работ заполняется Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Применение унифицированных форм первичной учетной документации регламентируется "Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации", утвержденным Минфином Российской Федерации от 29 июля 1998 г. N 34н. С 1 января 2013 г. формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, не являются обязательными к применению. Вместе с тем обязательными к применению продолжают оставаться формы документов, используемых в качестве первичных учетных документов, установленные уполномоченными органами в соответствии и на основании других федеральных законов (например, кассовые документы). (Информация Минфина России № ПЗ-10/2012 "О вступлении в силу с 1 января 2013 г. Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете").

Акты выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ с учетом аванса по Договорам подряда и дополнительным соглашениям направлены в адрес ООО «Стальспецстрой» 06 августа 2021г по электронной почте stalspecstroy@bk.ru  (Приложение 22 к иску), а также ценным письмом с описью вложения. Согласно РПО №10884162000361 документы получены ООО «Стальспецстрой» 13.08.2021г. (Приложение 23, 24)

По условиям п 12.4. Договоров подряда Стороны признают юридическую силу электронных сообщений (писем) и считают переписку по электронной почте надлежащим образом отправленной (полученной) корреспонденцией. Электронные письма, направленные с электронного адреса stalspecstroy@bk.ru, считаются соответственно исходящими от Заказчика (или направленными Заказчику). Электронные письма, направленные с электронного адреса install.jf@gmail.com, считаются соответственно исходящими от Подрядчика (или направленными Подрядчику).

Истец ООО "ИНСТАЛЛ" 01 сентября 2021 года направил исполнительную документацию по Договорам подряда в электронном виде, что подтверждается перепиской между сторонами. (Приложение 25 к иску) Какого-либо особого порядка передачи исполнительной документации стороны не установили. Претензии по переданной документации в адрес Истца не поступали.

Истец ООО "ИНСТАЛЛ" выполнил работы по Договорам подряда в следующем объеме (Расчет исковых требований, пени и неустойки в приложении 3):

3.1.      по Договору подряда №02/2021 от 19.03.2021г согласно актам КС-2,КС-3 №1 от 04.08.2021г. на сумму 1 850 508,00 (Один миллион восемьсот пятьдесят тысяч пятьсот восемь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%; по Дополнительному соглашению№1 от 07 апреля 2021 года  к Договору подряда №02/2021 от 19.03.2021 г. согласно КС-2,КС-3 №1 от 04.08.2021г. на сумму 240 500,00 (Двести сорок тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%; по Дополнительному соглашению №2 от 19 апреля 2021 года  к Договору подряда № 02/2021 от 19.03.2021г согласно КС-2,КС-3 №1 от 04.08.2021г. на сумму 154 140,00 (Сто пятьдесят четыре тысячи сто сорок) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 20%. (Приложения 26-31 к иску)

С зачетом полученного аванса в размере 847 450,00 рублей задолженность ответчика ООО «Стальспецстрой» по Договору подряда № 02/2021 от 19.03.2021г, включая Дополнительные соглашения №1 и №2, по оплате выполненных работ составляет 1 397 698,00 (Один миллион триста девяносто семь тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%.

3.2.      по Договору подряда №05/2021 от 07.04.2021г. согласно актам КС-2,КС-3 №1 от 04.08.2021г. на сумму 1 993 391,99 (Один миллион девятьсот девяносто три тысячи триста девяносто один) рубль 99 копеек, в т.ч. НДС 20%; по Дополнительному соглашению №1 от 07 июля 2021 года к Договору подряда № 05/2021 от 07.04.2021г. согласно КС-2,КС-3 №1 от 04.08.2021г. на сумму  288 500,00 (Двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей,00 коп., в т.ч. НДС 20% (Приложения 32-35 к иску);

С зачетом полученного аванса в размере 1 300 000,00 рублей задолженность ответчика ООО «Стальспецстрой» по Договору подряда № 05/2021 от 07.04.2021г., включая Дополнительное соглашение №1,  по оплате выполненных работ составляет 981 891,99 (Девятьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот девяносто один) рубль 99 копеек, в т.ч. НДС 20%

3.3.      по Договору подряда № 06/2021 от 15.04.2021г. согласно КС-2,КС-3 №1,от 04.08.2021г. на сумму 2 127 576,00 (Два миллиона сто двадцать семь тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% (Приложения 36 к иску);

С зачетом полученного аванса в размере 780 000,00 рублей задолженность ответчика ООО «Стальспецстрой» по Договору подряда № 06/2021 от 15.04.2021г. по оплате выполненных работ составляет 1 347 576,00 (Один миллион триста сорок семь тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 20%

В соответствии с положениями п.1 ст. 711, ст. 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором, при условии принятия работ Заказчиком.

Согласно п. 4.2.2. Договоров подряда Заказчик обязуется принять выполненные работы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Подрядчика уведомления о завершении работ. Заказчик в указанный срок обязуется подписать акт приемки выполненных работ (форма КС-2) или в тот же срок представить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. В противном случае работы по настоящему договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком к оплате.

По истечении срока, указанного в пункте 3.3. Договоров подряда, при отсутствии мотивированного отказа от приемки Работ, Работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта выполненных Работ. (п.3.7 Договора).

В установленные сроки Ответчик ООО «Стальспецстрой» не подписал Акты сдачи-приемки выполненных работ, не направил мотивированный отказ с перечнем замечаний к устранению.

Претензий к объему, срокам и качеству выполненных работ до направления актов выполненных работ и досудебной претензии с требованием оплаты от ответчика не поступали.

Согласно п. 3.7 Договоров подряда, а также в соответствии с нормами п. 4 ст. 753 ГК РФ при отсутствии мотивированного отказа к подписанию акта выполненных работ ООО «ИНСТАЛЛ» приняло акты КС-2 №1 (Акт о приемке выполненных работ), КС-3 №1 (справка о стоимости выполненных Работ) от 04.08.2021г.  в одностороннем порядке 31 августа 2021 года.

На основании п. 2.3 Договоров подряда оплата производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Акта выполненных работах (КС-2) и справки о стоимости работ (КС-3). По состоянию на дату подачи иска ответчик ООО «Стальспецстрой» оплату не произвел.

Заказчик обязуется оплатить выполненные Подрядчиком работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором. (п. 4.2.4. Договора подряда), а именно в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания вышеуказанных документов, с учётом ранее уплаченного аванса.

Договором подряда (п. 5.5) установлено, что в случае несвоевременной оплаты Заказчиком платежей, согласно пункта 2.4. Договора, Заказчик обязуется уплатить неустойку в размере 0,1% от не перечисленной суммы в установленный Договором срок за каждый день просрочки, но не более 5 (пять) % от цены суммы просроченного платежа.

На этом основании Истец произвел расчет договорных пени  (Расчет исковых требований, пени и неустойки в приложении 3 к иску). Стороны установили срок действия договора - до 31 декабря 2021 г., а в части исполнения своих обязательств – до их полного исполнения.

Вышеизложенные обстоятельства послужили основаниями для обращения в суд.

Удовлетворяя требования в части, суд принимает во внимание положения ст. 8, 10, 12, 309, 310, 330, 421, 431, 702, 708, 711, 720, 726, 746, 753 Гражданского кодекса, а также отмечает следующее.

По результатам исследования материалов дела, судом установлено, что дополнительные соглашения к договорам не подписаны, следовательно, в данной части сторонами существенные условия договора не согласованы, работы по ним не приняты, в связи с чем, удовлетворению требования по взысканию задолженности по дополнительным соглашениям – не подлежат.

Поскольку цена работ по каждому договору приблизительная (определена в п. 2.1 на основании Приложения №1 к договорам), при этом ответчиком объемы работ не оспорены, а материалами дела подтверждается факт направления исполнительной документации, а также в нарушение ст. 726 ГК РФ не представлены доказательства невозможности использования результата работ без исполнительной документации, суд находит обоснованными и подлежащими удовлетворению требования истца по взысканию задолженности в сумме 3 044 025, 99 руб., из которых:

- по договору №02/2021 от 19.03.2021 – 1 003 058 руб.;

- по договору №05/2021 от 07.04.2021 – 693 391, 99 руб.;

- по договору №06/2021 от 15.04.2021 – 1 347 576 руб.

В остальной части требований суд отказывает.

Рассмотрев расчеты неустойки, суд признает их методологически и  арифметически не верными, с учетом частичного удовлетворения требований.

Судом произведен перерасчет, в соответствии с которым:

- по договору №02/2021 от 19.03.2021 на сумму 1 003 058 руб. за период с 01.09.2021 по 31.12.2021 размер неустойки составит 50 152, 90 руб.;

- по договору №05/2021 от 07.04.2021 на сумму 693 391 руб. за период с 01.09.2021 по 31.12.2021 размер неустойки составит 34 669, 55 руб.;

- по договору №06/2021 от 15.04.2021 на сумму 1 347 576 руб. за период с 01.09.2021 по 31.12.2021 размер неустойки составит 67 378, 80 руб.

В остальной части требований суд отказывает.

Отказывая в удовлетворении требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами с их последующим начислением по день фактической оплаты, суд учитывает буквальное толкование условий договора (ст. 421 и 431 ГК РФ) по ст. 7 договоров: «…исполнения своих обязательств – до их полного исполнения».

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленных требований, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, находит заявленные требования подлежащими удовлетворению в части.

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 8, 10, 12, 309, 310, 330, 421, 431, 702, 708, 711, 720, 726, 746, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 4, 8, 9, 27, 64-68, 71, 75, 110, 112, 167-171, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л :

Взыскать с ООО «СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ» (ОГРН 1197746750992) в пользу ООО «ИНСТАЛЛ» (ОГРН 1187746824759) задолженность в размере  3 044 025 руб. 99 коп., неустойку в размере 152 201 руб. 25 коп., судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 23 422 руб., а также расходы по оплате госпошлины в размере 33 938 руб.

В остальной части отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                                                   К.В. Вольская