Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2-4, г. Калининград, 236016

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru

http://www.kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Калининград                                                                         дело № А21-14204/2023

«20»   февраля  2024 года

Резолютивная часть решения оглашена  20.02.2024г. 

Решение изготовлено в полном объеме  20.02.2024г.

 

      Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Гениной С.В., при ведении  протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества  «Калининградгазификация» к муниципальному предприятию «Калининградтеплосеть» городского округа «Город Калининград» о взыскании задолженности, 

при участии: по протоколу,

установил:

акционерное общество  «Калининградгазификация» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>; адрес: 

<

...>; далее –Общество, истец) обратилось с иском к муниципальному предприятию «Калининградтеплосеть» городского округа «Город Калининград» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 236022, 

<

...>, далее – Предприятие, ответчик) о взыскании задолженности в  размере  7 386 977,52 руб. по  договору  о подключении (технологическом присоединении) №17/20-176-2019/ИП объекта капитального строительства к сети газораспределения от 15.03.2019г. (далее – Договор), с учетом уточненных в порядке ст. 49 АПК РФ исковых требований, принятых судом к рассмотрению.

       Истец настаивал на удовлетворении требований по основаниям,  изложенным в иске.

       Ответчик иск не признал, представил отзыв, ссылается на то, что  акт о подключении (технологическом присоединении) сторонами не подписан, что исключает возможность взыскания заявленной суммы.

       Из  материалов дела следует, что по договору о подключении (технологическом присоединении) №17/20-176-2019/ИП объекта капитального строительства к сети газораспределения от 15.03.2019г. Истец принял на себя обязательства по подключению (технологическому   присоединению)   объекта   капитального   строительства   - котельной, расположенной по адресу: 

<

...> КН ЗУ 39:15:110630:572   (далее   -   объект   капитального   строительства),   к   сети газораспределения, а МП «Калининградтеплосеть» приняло на себя обязательства по  обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению), а также оплате услуг по подключению (технологическому присоединению).

      В соответствии с дополнительным соглашением №3 к Договору Предприятие обязано внести плату за подключение объекта капитального строительства в размере 36 934 887 руб. 60 коп, в т.ч. НДС 20%.

        Ответчик внес на расчетный счет Общества 29 547 910 руб. 08 коп.; оставшаяся часть денежных средств в размере 7 386 977 руб. 52 коп.  по условиям Договора подлежит оплате в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о технологическом включении (технологическом присоединении).

        Вместе с тем, ссылаясь на Постановление Правительства РФ №1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»  от 13.09.2021 (далее - Правила №1547), Общество обратилось с настоящим иском.

        Выслушав представителей сторон, изучив их доводы и возражения, суд считает, что иск подлежит удовлетворению.

       Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг (п. 1 ст. 781 ГК РФ).

       Согласно п. 1 ст. 424 ГК РФ в предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного самоуправления.

       В соответствии со ст. 23.2 Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (далее - ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации") и пп. "з" п. 4 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 N 1021 (далее - Основные положения N 1021), государственному регулированию на территории Российской Федерации подлежит плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину.

      Размер платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину, устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету размера данной платы и (или) размеров данных стандартизированных тарифных ставок, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.

      Согласно п. 59 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314 (далее - Правила подключения N 1314), подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

      В силу п. 87 Правил подключения N 1314 в случае, если размер платы за технологическое присоединение зависит от технических параметров, указанных в проектной документации, и (или) устанавливается впоследствии органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по индивидуальному проекту при заключении договора о подключении, в договоре о подключении указывается предварительный размер платы за технологическое присоединение, определяемый исходя из действующих на тот момент стандартизированных тарифных ставок, определяющих размер платы за технологическое присоединение, и предварительных технических параметров подключения (технологического присоединения). При этом расчет предварительного размера платы за технологическое присоединение является обязательным приложением к договору о подключении. Впоследствии размер платы в договоре о подключении корректируется путем заключения дополнительного соглашения, в частности, для случая, когда размер платы за технологическое присоединение устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по индивидуальному проекту, - после утверждения размера платы за технологическое присоединение таким органом.

       На основании п. 69 Правил подключения N 1547 в случае нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) исполнитель, выполнивший мероприятия согласно подп. "а" п. 72 настоящих Правил, то есть осуществивший действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения, вправе требовать от заявителя исполнения обязательства по внесению платы за подключение (технологическое присоединение) в соответствии с договором о подключении и по истечении 10 рабочих дней со дня нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) направить в адрес заявителя уведомление с требованием внести 100 процентов платы за подключение (технологическое присоединение), а заявитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения такого уведомления исполнить требование исполнителя. Указанная обязанность исполняется заявителем без внесения изменений в договор о подключении и вне зависимости от последующего выполнения иных мероприятий, предусмотренных договором о подключении.

       В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

        Из материалов дела следует и не оспаривается сторонами, что истец свои обязательства по Договору выполнил в полном объеме, о чем свидетельствует акт приемки законченного строительством объекта газораспределения от 19.06.2023г., обязательства Предприятия не исполнены.

 

В рассматриваемом случае ответчик нарушил срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), что позволяет истцу в силу п. 69 Правил подключения N 1547 требовать от заявителя внесения 100 процентов платы за подключение (технологическое присоединение).

     Государственная пошлина в соответствии со ст.110 АПК РФ подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

      Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л :

Взыскать с   муниципального предприятия «Калининградтеплосеть» городского округа «Город Калининград» в пользу акционерного общества  «Калининградгазификация»  задолженность  по  договору  о подключении (технологическом присоединении) №17/20-176-2019/ИП объекта капитального строительства к сети газораспределения от 15.03.2019г. в  размере  7 386 977,52 руб.  и  государственную пошлину в размере 59 935 руб. 

        Решение может быть обжаловано  в течение  месяца  со дня  принятия в Тринадцатом арбитражном апелляционном  суде.

 

                   Судья                                                                            С.В. Генина