РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-258693/21-170-1749

г. Москва

11 июля 2022 г.

Резолютивная часть решения объявлена 10 июня 2022года

Полный текст решения изготовлен 11 июля 2022 года

Арбитражный суд в составе судьи Ереминой И. И., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

ООО "ЕВРОТРАНС" (117246, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРЕМУШКИ ВН.ТЕР.Г., НАУЧНЫЙ ПР-Д, Д. 10, ЭТАЖ 1, ОФИС 738, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 10.08.2017, ИНН: 

<

***>)

к ООО "СПЕЦТЕХ" (105187, МОСКВА ГОРОД, 1-Я ИЗМАЙЛОВСКОГО ЗВЕРИНЦА УЛИЦА, ДОМ 19А, СТРОЕНИЕ 12, ПОМ 1 КОМ 6, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 27.11.2017, ИНН: 

<

***>)

о взыскании денежных средств в размере 1 224 000 руб.

третье лицо:

ООО "РККА" (129090, МОСКВА ГОРОД, ТРОИЦКАЯ УЛИЦА, 5, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 05.12.2011, ИНН: 

<

***>)

в заседании приняли участие:

от истца –  ФИО2 по дов. от 08.02.2021 г.

от ответчика – ФИО3 ком. Директор

от 3 лица – не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

ООО "ЕВРОТРАНС" (далее истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "СПЕЦТЕХ"  ( далее  ответчик)  о взыскании денежных средств в размере 1 224 000 руб.

  Истец поддержал исковые требования в полном объеме, сослался на доводы, изложенные в иске и представленные доказательства.

Ответчик иск оспорил по доводам, изложенным в отзыве и дополнительных объяснениях по делу.

Третье лицо,  надлежащим образом извещенный о времени и месте проведения судебного разбирательства по делу в порядке статей 121-123 АПК РФ,  в судебное заседание не явился. В силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. При таких обстоятельствах, дело рассмотрено в его  в порядке статьи 156 АПК РФ.

Выслушав представителей сторон, исследовав имеющиеся в деле доказательства, арбитражный суд находит заявленные требования по делу не подлежащими  удовлетворению по следующим основаниям.

           Как следует из материалов дела, 25 февраля 2021 года между ООО «СпецТех», в лице генерального директора ФИО4, действующего на основании Устава и ООО «ЕВРОТРАНС», в липе генерального директора ФИО5, действующего на основании Устава, был подписан договор на оказание транспортных услуг № 25/02-21, предметом которого является оказание ООО «ЕВРОТРАНС» автотранспортных услуг.

           По мнению истца, им  исполнены все обязательства по договору в полном объеме, в срок, установленный договором. По состоянию на 14.10.2021 год задолженность ООО «СпецТех» перед ООО «ЕВРОТРАНС» составляет сумму в размере 1 224 000 рублей

  В целях  соблюдения обязательного досудебного урегулирования спора, истец направил в адрес ответчика претензию,   однако ответчик оставил данную претензию без удовлетворения. 

           От ответчика в материалы дела поступил отзыв, из которого следует, что  ответчик не согласен с  исковыми требованиями, просит в их удовлетворении отказать  по доводам изложенным в отзыве.

          Судом рассмотрены доводы искового заявления и отзыва и считает, что исковые  требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

             25 февраля 2021 года между ООО "ЕВРОТРАНС" (перевозчик) и ООО "СПЕЦТЕХ" (заказчик) был заключен договор перевозки № 25/02-21 , согласно которому исполнитель принял на себя обязательство по оказанию услуг: перевозки сыпучих материалов (Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами, код ФККО 8 11 100 01 49 5, класс опасности V ) с объекта Заказчика расположенного по адресу: город Москва, поселение Филимонковское, кадастровый номер 77:17:0000000:10047, на полигон расположенный по адресу: г. Москва, поселение Рязановское, поселок Знамя Октября, а Заказчик обязался принять и оплатить оказанные услуги на условиях, предусмотренных настоящим договором.

           Согласно пункту 1.1 Договора подряда Подрядчик обязуется своими силами и материалами выполнить работы по экскавации грунта с последующим размещением на полигоне, по объекту «Пожарное депо на 4 машиноместа, поселение Филимонковское» (далее – Объект) в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и в объеме работ в 3 соответствии с Проектной и Рабочей документацией, Сметным расчетом (Приложение № 1 к Договору).

Согласно пункту 1.2 Договора подряда выполняемые по настоящему договору работы выполняются в целях исполнения государственного (муниципального) контракта от 18.12.2020 г. № ЭА-18/12/20-1ГК, заключенного Заказчиком с Департаментом развития новых территории города Москвы на основании результатов осуществления способом закупки аукциона в электронной форме, реестровый № закупки 0173200001420001566.

           Согласно пункту 2.1 договора въезд на территорию Заказчика и получение груза          водителем Перевозчика производится на основании правильно и разборчиво заполненного путевого листа, имеющего дату выдачи, штамп и печать Перевозчика, и при предъявлении водителем документа, удостоверяющего личность (водительского удостоверения или паспорта).

           Согласно пункту 2.1.7 договора все машины должны быть оснащены системой глонас и КИП с возможной перемещение отходов ОССиГ. Перевозчик обязан предоставить по требованию Заказчика заверенные копии путевых листов, подтверждающие перемещение груза по указанному в п.1.1 Договора маршруту.

        Согласно пункту 2.2.4 договора Заказчик обеспечивает нахождение ответственных за приемку груза на объектах и правильное, и чёткое оформление товарно-транспортных документов, заверяя их штампом.

         Согласно пункту 3.1 договора оплата услуг исполнителя осуществляется заказчиком за фактически вывезенный объем грунта в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на банковский счет Перевозчика, реквизиты которого указаны в разделе 8 Договора, на основании надлежаще оформленных и подписанных сторонами Актов о приемке выполненных работ, Счета-фактуры, Счета на оплату.

         Тарифы на автотранспортные и другие услуги определяются в Протоколе согласования договорных цен (приложении №1 к настоящему Договору).

          Согласно пункту 3.3 договора Заказчик производит выплату аванса от Цены указанной в Счете в следующем порядке и сроки: - в размере 20% от Цены указанной в Счете, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора; - в размере 30% от Цены указанной в Счете, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком документов(Реестров оказанных услуг) подтверждающих, что Перевозчиком оказаны услуги на 50 %.

         Зачет авансовых платежей осуществляется ежемесячно пропорционально объёмам выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ в течение соответствующего отчетного периода.

         Счет выставляется Перевозчиком, на основании Заявки Заказчика.

         Согласно пункту 3.5 договора Заказчик оплачивает выполненные и сданные услуги в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты подписания актов.

         Согласно пункту 4.2 договора за просрочку платежа Заказчик по требованию Исполнителя уплачивает пеню из расчета три процента от суммы долга за каждый день просрочки, за оказанные услуги сверх предоплаты.

         В соответствии со статьей785 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.

          Отношения сторон регулирует Закон от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Подтверждением заключения договор перевозки считается транспортная накладная (далее – ТН). Ее форма установлена Прав илами перевозок грузов автомобильным транспортом, которые утверждены постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. № 272 (далее – Правила). ТН – обязательный первичный документ (ст. 3, п. 2 ст. 9 Закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

           Документом, подтверждающим факт реального оказания предусмотренных договором услуг по перевозке грузов, является транспортная накладная, и представленный Истцом акт приемки услуг не может заменять данные накладные, поскольку не содержит всех необходимых сведений о перевозках груза (дату, маршрут, наименование и количество перевозимых грузов). Акт не восполняет полноту сведений, которые указываются в ТН. В нем отсутствует информация об измерителях и содержании хозяйственных операций, в том числе конкретные даты оказания услуг, номера автомобилей, на которых осуществлялась перевозка грузов, фамилии лиц, осуществлявших перевозку грузов, количестве перевозимого груза. (Определение ВАС РФ от 23.05.2013 года №ВАС-5803/13 ).

           В отношении автотранспортных услуг – услуг спецтехники и строительно-дорожных машин, услуг по осуществлению грузоперевозок, включая погрузку и разгрузку, оказание подобных услуг может подтверждаться путевыми листами, на которых стоит либо подпись представителя заказчика, либо его печать.

          Договор перевозки груза №25/02-21 от 25 февраля 2021 года. Заключен в целях исполнения Ответчиком Договора подряда № 2-2021 от 24 февраля 2021 года заключенного между ООО «Строй Групп» (Заказчик) и ООО «СпецТех»(Подрядчик) на выполнение работ по экскавации грунта с последующим размещением на полигоне.

          Согласно пункту 2.1 Договора подряда Оплата по Договору осуществляется за фактически вывезенный объем грунта, на основании надлежаще оформленных и подписанных сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС 3), счетов-фактур, счетов и при наличии исполнительной документации согласно , документов, подтверждающих исполнение условий договора в сфере обращения с ОСС, заключенного между отходополучателем, отходоперевозчиком, отходопроизводителем (акты выполненных работ, акты оказанных услуг, акты приема-передачи ОСС), в объеме и в отношении видов ОСС, которые соответствуют информации, находящейся в АИС "ОССиГ".

           В целях исполнения Ответчиком Договора подряда № 2-2021 от 24 февраля 2021 года заключенного между ООО «Строй Групп» (Заказчик) и ООО «СпецТех»(Подрядчик) на выполнение работ по экскавации грунта с последующим размещением на полигоне, заключен Договор оказания услуг по обращению с отходами № 21-02/21 от 24 февраля 2021 года между ООО «Строй Групп» (Заказчик), ООО «РККА» (Исполнитель) и ООО «СпецТех» (Плательщик).

          Согласно пункту 1.2 Договора оказания услуг по обращению с отходами № 21-02/21 24 февраля 2021 года Отходы завозятся Заказчиком с объекта, расположенного по адресу: г. Москва, поселение Филимонковское вид отхода – материал V класса опасности для окружающей природной среды код по ФККО 8 11 100 01 49 5 в объеме согласно расчетной ведомости, (переводной коэффициент составляет K=1,8, согласно проектно-сметной документации предоставленной Заказчиком). Согласно пункту    

           Приложение №1 К договору № 21-02/21 от «24» февраля 2021 г. стороны согласовали следующее количество отходов, передаваемых для целей утилизации 8 100 тонн.

        В рамках исполнения Ответчиком Договора подряда № 2-2021 от 24 февраля 2021 года заключенного между ООО «Строй Групп» (Заказчик) и ООО «СпецТех»(Подрядчик) на выполнение работ по экскавации грунта с последующим размещением на полигоне, заключен Договор № 2108-ГМ от 24 февраля 2021 года на выполнение АО НИЦ «Строительная экспертиза» комплекса работ по проведению исполнительной геодезической съемки при выполнении работ по устройству котлована и экскавации грунта на объекте по адресу: г. Москва, поселение Филимонковское.

         Согласно технического отчета АО НИЦ «Строительная экспертиза» по результатам геодезической съемки и подсчету объемов земляных масс по устройству котлована под пожарное депо на 4 машино-места по адресу: г Москва, пос. Филимонковское общий объем извлеченных земляных масс составил 4324,7 м3, что с учетом переводного коэффициента K=1,8 составляет 7784,46 тонны = 4324,7 м3* K=1,8.

         02.03.2021 года подрядчик составил и передал заказчику по Договору 2-2021 от 24.02.2021:  КС-2, КС-3 №1 от 02.03.2021г.,Счет фактура №104 от 02.03.2021г., за отчетный период 25.02.2021- 02.03.2021, согласно п. 3 акта КС-2 №1 от 02.03.2021г. Объем перевезенного грунта до базы утилизации составил 2 250 м3.

        25.05.2021года подрядчик составил и передал заказчику письмо исх.№01/25/05-2021 от 25.05.2021года , приложением к которому являлись следующие документы по Договору 2-2021 от 24.02.2021: КС-2 №2 от 20.04.2021г., КС-3 №2 от 20.04.2021г.,Счет фактура №220 от 20.04.2021г., Счет №224 от 20.04.2021г, за отчетный период 03.03.2021- 20.04.2021, согласно п. 3 акта КС-2 №2 от 20.04.2021г. Объем перевезенного грунта до базы утилизации составил 2074,7 м3. 

 Согласно акту полигона ООО «РККА» №01 от 20.04.2021г., содержащий данные, полученные с контрольно-измерительных пунктов, находящиеся в АИС "ОССиГ", принят отход код фкко 81110001495 грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами в объеме 7784,46т. С объекта: Пожарное депо на 4 машиноместа по адресу: 

<

...> по договору №21-02/21 от 24.02.2021; Оригиналы талонов отходополучателя- ООО «РККА» в дипазоне номеров СТ 120829- СТ 121064 В 1 экз.. Технический отчет АО НИЦ «Строительная Экспертиза».

             В соответствии с п.3 требований постановления Правительства Москвы от 12 мая 2021 года №602-ПП «О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 26 августа 2020 г. №1386-ПП и от 26 августа 2020 №1387-ПП» основаниями для оплаты выполненных отходопроизводителем (Ответчиком) до вступления в силу настоящего постановления работ и услуг в области обращения с отходами строительства и сноса (далее - ОСС) в рамках исполнения государственных контрактов (договоров) являются документы, подтверждающие исполнение условий договора в сфере обращения с ОСС, заключенного между отходополучателем, отходоперевозчиком, отходопроизводителем (акты выполненных работ, акты оказанных услуг, акты приема-передачи ОСС, талоны или другие документы, подтверждающие объем и (или) массу перемещенных ОСС и расстояние их транспортировки).

          Тарифы на автотранспортные и другие услуги определены в Протоколе согласования договорных цен (приложении №1 к настоящему Договору), цена перевозки за м3,в т.ч. НДС 20% составляет 380 руб.00 коп.

           Стоимость фактически оказанных услуг по договору составляет 4324,7 м3.* 380 руб.00 коп.= 1 643 397,40 руб.00 коп.

          Ответчиком перечислен аванс за оказанные услуги п/п 6 от 25.02.2021 на сумму 400 000,00 руб., п/п 84 от 26.02.2021 г. на сумму 150 000, 00 руб., п/п 93 от 02.03.2021 г. на сумму 850 000,00 руб, п/п 107 от 04.03.2021 г. на сумму 150 000 руб., с назначением платежа « Аванс за 5 Транспортные услуги по вывозу грунта объект Пожарное депо , пос. Филимонковское, кад.номер 77:17:0000000:10047, дог. 25/02-21 от 25.02.2021».

           Согласно пункту 3.1 договора оплата услуг исполнителя осуществляется заказчиком за фактически вывезенный объем грунта в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на банковский счет Перевозчика, реквизиты которого указаны в разделе 8 Договора, на основании надлежаще оформленных и подписанных сторонами Актов о приемке выполненных работ, Счета-фактуры, Счета на оплату. 

Истец надлежаще оформленные документы не предоставил.

В подтверждение факта оказания услуг истцом в материалы дела представлены копии накладных.

Суд относится к данным доказательствам критически, поскольку представленные документы не являются путевыми листами как согласовано сторонами в п.  2.1.1 Договора и  не содержат информации, которая позволила бы идентифицировать услуги, а именно: не указаны транспортные средства, водители, показания одометра, дата и время предрейсового контроля и медицинского осмотра водителя, дата и время выпуска на линию и возвращения , масса груза, адреса загрузки и выгрузки, отсутствует подпись представителя заказчика и отметки грунтопринимающей организации и т.д.

Документов, подтверждающих сдачу грунта на полигон истцом также не представлено.

           В соответствии с пунктом 1 статьи 785 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить перевозчику груза установленную плату.

Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей отправителю груза транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз, предусмотренного соответствующим транспортным уставом или кодексом).

Поскольку надлежащих доказательств исполнения обязательств на заявленную истцом сумму в материалы дела не представлено, суд признает исковые необоснованными и подлежащими отклонению в полном объеме.

Остальные доводы и доказательства, приведенные и представленные лицами, участвующими в деле, суд исследовал, оценил и не принимает ко вниманию в силу их малозначительности и/или безосновательности, а также в связи с тем, что по мнению суда, они отношения к рассматриваемому делу не имеют и (или) не могут повлиять на результат его рассмотрения. 

Расходы по госпошлине возлагаются на истца в соответствии со ст. 110 АПК РФ. 

Руководствуясь ст.ст. 8, 11, 12, 307-310, 314,  421, 431, 779, 784, 785, 790 ГК РФ ГК РФ, ст.ст. 4, 9, 27, 28, 64-69, 70-75, 110, 123, 156, 167-171, 176, 181 АПК РФ, суд  

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья:

И.И. Еремина