Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-47912/2018

24 января 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  15 января 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  24 января 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "РУСЬ" (адрес:  Россия 197183, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул СОФЬИ КОВАЛЕВСКОЙ 3/1/ЛИТ. Н/ПОМ. 8, ОГРН:  1097847306963);

ответчик: закрытое акционерное общество "БАЗЭЛЦЕМЕНТ-ПИКАЛЕВО" (адрес:  Россия 187602, г ПИКАЛЕВО, ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл БОКСИТОГОРСКИЙ р-н, ш СПРЯМЛЕННОЕ 1, ОГРН:  1086612002487);

о взыскании 1923400.00

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 03.04.18, ФИО3 выписка из ЕГРЮЛ, 

- от ответчика: ФИО4 по доверенности от 01.12.18, ФИО5, по доверенности от 28.12.18, 

установил:

ООО "РУСЬ" предъявило иск к ООО "БАЗЭЛЦЕМЕНТ-ПИКАЛЕВО" и после уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ просит взыскать 2 171 400 руб. 00 коп. задолженности по оплате выполненных работ на основании договора №10 от 15.05.15.

Ответчик иск отклонил, ссылаясь на то, что доставка заказчику путепередвигателя (далее – ПРМ) не произведена.

Судом установлено:

Между сторонами был заключен договор №10 от 15.05.15 на проведение работ по ремонту колесных пар грузовых вагонов, тепловозов, электровозов, а также агрегатов тепловозов и думпар, ремонту двигателей.

Согласно п.2.1 договора общая сумма договора определяется путем суммирования стоимости всех согласованных сторонами работ.

Согласно протоколу согласования договорной цены (приложение к договору) стоимость работ по ремонту ПРМ составляет 1 923 400 руб. 00 коп. 

Срок выполнения работ – 35 дней с даты подписания акта передачи ПРМ по форме ТУ-162.

Заказчик – ответчик производит 100% оплату после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по счету исполнителя в течении 10 банковских дней.

Истец – исполнитель выполнил работы по ремонту ПРМ на общую сумму 1 923 400 руб. 00 коп., что подтверждается подписанным сторонами актом сдачи-приемки выполненных работ №1 от 24.01.18.

Оплата до настоящего времени ответчиком не произведена.

Проведение дополнительных работ на сумму 248 000 руб. 00 коп. сторонами не согласовано.

Дополнительное соглашение на эти работы сторонами не подписано.

Суд считает, что отказ ответчика от оплаты работ на сумму 1 923 400 руб. 00 коп. является необоснованным, так как противоречит условиям договора и ст. 711 ГК РФ.

Истец не отказывается осуществить транспортировку ПРМ заказчику, после оплаты работ.

В части требования оплаты дополнительных работ на сумму 248 000 руб. 00 коп. исковые требования удовлетворению не подлежат.

Расходы по государственной пошлине в размере 32 234 руб. 00 коп. относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 309, 310, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "БАЗЭЛЦЕМЕНТ-ПИКАЛЕВО" в пользу общества с ограниченной ответственностью "РУСЬ" 1 923 400 руб. 00 коп. задолженности и 32 234 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.