Арбитражный суд Калининградской области Рокоссовского ул., д. 2-4, г. Калининград, 236016 E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru http://www.kaliningrad.arbitr.ru Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А21-10037/2018

г. Калининград

24 октября 2019  

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать ООО «СК «Ралекс» в течение восьми дней со дня вступления решения суда в законную  

силу устранить за счет собственных средств дефекты работ, выполненные по гражданско- правовому договору № 0135200000513001525-0304804-01 от 09.01.2014 г. на выполнение работ  

по капитальному ремонту поликлинического отделения в г. Краснознаменске Государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Краснознаменская  центральная районная больница» по адресу: Калининградская область, г.Краснознаменск,  ул.Калининградская, д.З, выявленные в рамках гарантийного срока:  

2-й этаж поликлиники (холл, кабинеты № 17-26); 

- устранить дефект № 2: торцевая часть холла (оконные блоки), растрескивание и отслаивание  

от основания стены отделки оконных откосов из гипсоплиты (Приложение 1, фото 5-9);  - устранить дефект № 3: слева от входа в каб. № 18 (по плану № 8) - пустоты в настенной плитке  

(4 шт.), вываливание фуги (Приложение 1, фото 10,11); - устранить дефект № 4: напротив каб. № 21 (по плану № 18) напольная плитка - выслаивание фуги в стыковочных швах (Приложение 1, фото 12); - устранить дефект № 5: справа от входа в холл (по плану № 1) - 4 настенные плитки, растрескивание (Приложение 1, фото 13-18); 

- устранить дефект № 6: справа от входа в каб. № 23 (по плану № 20) -растрескивание настенной  

плитки (Зшт.) (Приложение 1, фото 19-22); слева от каб. № 24 (по плану № 21) на колонне  угловая плитка отслаивается от стены (Приложение 1, фото 23);  

Лестница с первого этажа на третий поликлиники (в стационарное отделение): 

- устранить дефект № 7: 3 марш (5,7 ступени) высыпание фуги, отслаивание и разрушение  ступеней (Приложение 1, фото 25-27);  

- устранить дефект № 8: 4 марш (4,5 ступени) высыпание фуги, отслаивание и разрушение  ступеней (Приложение 1, фото 28-31);  

- устранить дефект № 9: 3 этаж (вход в стационарное отделение с лестницы поликлиники -  

дверной проем) настенная плитка отслаивается вместе с гипсоплитой от основания дверного  проема (Приложение 1, фото 32-38);  

2-й этаж главный корпус-холл, кабинеты №№ 27-50: 

- устранить дефект № 10: вход в приемную главного врача (по плану № 71) -напольная плитка  высыпание фуги в стыковочных швах, отслаивание напольной плитки за счет пустот, пустота  простукивается (Приложение 1, фото 39-41);  

- устранить дефект № 11: слева от входа в кабинет № 30 (по плану № 68) -настенная плитка вся  стена «гуляет» S=10x5,5 плиток (Приложение 1, фото 42-45);  

- устранить дефект № 12: слева от входа в кабинет № 50 (по плану № 11) - до двери туалета вся  настенная плитка «гуляет» и хрустит» S=5x6 плиток (Приложение 1, фото 46);  

- устранить дефект № 13: слева от входа в кабинет № 33 (по плану № 61) -3,4 настенные плитки  пустоты, вываливаются (Приложение 1, фото 47;  

- устранить дефект № 14: вправо от входа в каб. № 33 (по плану № 61) весь проем настенной  плитки пустота, отходят от основания стены (Приложение 1, фото 48,49);  

Главный корпус конференц-зал (2 этаж) - по плану № 16: - устранить дефект № 15: напротив каб. № 46 (по плану № 15) напольная плитка - 4 шт. 

(высыпание фуги в местах стыка, пустоты, хруст) (Приложение 1, фото 50,51);  

- устранить дефект № 16: напротив лифта - 3 ряда (напольная плитка -хруст, высыпание фуги в  местах стыка) S=10x3 плиток (Приложение 1, фото 52-55);  

1 этаж поликлиники: 

- устранить дефект № 18: кабинет ЭКГ напротив регистратуры (в коридоре помещения № 5  

плану этажа в левом дальнем углу от входа в настенной плитке высыпание фуги) (Приложение  1, фото 60);  

Главный корпус — 1 этаж: 

- устранить дефект № 19: кабинет физиопроцедурная (по плану № 70) -отслоение напольной  

плитки от основной поверхности пола по всей площади кабинета (Приложение 1, фото 61-63);  - устранить дефект № 20: напротив рентген кабинета № 7 (по плану № 77) -угол напольной  

плитки раскрошен, в результате пустоты (Приложение 1, фото 64); Вестибюль главного корпуса (1 этаж-гардероб) - по плану № 14: 

- устранить дефект № 23: колонны -отслоение от основания стены декоративной штукатурки по  всей площади (Приложение 1, фото 71-75).  

Взыскать с ООО «СК «Ралекс» в пользу Государственного бюджетного учреждения  здравоохранения Калининградской области «Краснознаменская центральная районная  больница» 6000 руб. в возмещение расходов по государственной пошлине.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца с даты его принятия в Тринадцатый  арбитражный апелляционный суд.  

Судья Т.В.Пахомова