АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е  Резолютивная часть

Дело № А63-20525/2017

г. Ставрополь

21 декабря 2017 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Кузьминой М.Н., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Амиргамзаевой  Т.В., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление  

 акционерного общества «ЛИМБ», г. Санкт-Петербург, ОГРН 1027807591239, ИНН  7814033551,  

к федеральному казенному учреждению «Управление федеральных автомобильных дорог  «Кавказ» Федерального дорожного агентства», г. Пятигорск, ОГРН 1022601610680,  

ИНН 2632041647, 

 об изменении Плана-графика Приложение № 2 к государственному контракту № 190 от  30.10.2015, заключенному между АО «ЛИМБ» и ФКУ «Управление федеральных  автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства», изложении его в  следующей редакции: 1 этап - Проведение работ в целях государственной регистрации права  оперативного управления на участки: а/д Р-217 «Кавказ» км 209+400 - км359+360, км368+167 -  км382+000, км 400+600 - км 405+460; Р-217 «Кавказ» на участке Подъезд к г. Ставрополь км  0-км 30+100, км 0-10+800, км 43+400-км 55+500; а/д Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь»  км 391+341 - км574+000; Р-217 «Кавказ» км 497+340 - км 563+000, Подъезд г. Владикавказ  от Р-217 «Кавказ» км 0+500 – км 4+500, км 21+050 - км 28+350 А-163 Подъездная дорога от  автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» к аэропорту г. Владикавказ км 0 - км 4+529; Подъезд к  

г. Черкесск от М-29 «Кавказ» км 0 - км 27+330; Р-217 «Кавказ» на участке обход п.  Иноземцево км 0 - км 6+870. Стоимость: 21 599 463,05 руб. (85% Контракта).  

Срок выполнения работ: Начало - с даты подписания государственного контракта,  предоставление результата работ Заказчику (окончание работ) 13 декабря 2015 года;  

2 этап - Выполнение работ по уточнению границ земельных участков с кадастровыми  номерами 26:33:000000:9, 26:33:240301:139, 15:00:0000030:1 (под  

автомобильными дорогами Р-217 «Кавказ» км368+167 - км 382+000 и Р-217 «Кавказ» км  497+340 - км 563+000) на основании решений судов. Стоимость: 3 811 669,95 руб. (15%  Контракта).  

Срок выполнения работ: Начало - с даты подписания государственного контракта,  предоставление результата работ Заказчику (окончание работ) 01 декабря 2019 года,  

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд   

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить в полном объеме. 

 Изменить План-график Приложение № 2 к государственному контракту № 190 от  30.10.2015, заключенному между АО «ЛИМБ» и ФКУ «Управление федеральных  автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства», изложить его в  следующей редакции:  

 1 этап - Проведение работ в целях государственной регистрации права оперативного  управления на участки: а/д Р-217 «Кавказ» км 209+400 - км359+360, км368+167 - км382+000,  км 400+600 - км 405+460; Р-217 «Кавказ» на участке Подъезд к г. Ставрополь км 0-км 30+100,  км 0-10+800, км 43+400-км 55+500; а/д Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь» км 391+341 -  км574+000; Р-217 «Кавказ» км 497+340 - км 563+000, Подъезд г. Владикавказ от Р-217  «Кавказ» км 0+500 – км 4+500, км 21+050 - км 28+350 А-163 Подъездная дорога от  автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» к аэропорту г. Владикавказ км 0 - км 4+529; Подъезд к  

г. Черкесск от М-29 «Кавказ» км 0 - км 27+330; Р-217 «Кавказ» на участке обход п.  Иноземцево км 0 - км 6+870. Стоимость: 21 599 463,05 руб. (85% Контракта).  

Срок выполнения работ: Начало - с даты подписания государственного контракта,  предоставление результата работ Заказчику (окончание работ) 13 декабря 2015 года;  

2 этап - Выполнение работ по уточнению границ земельных участков с кадастровыми  номерами 26:33:000000:9, 26:33:240301:139, 15:00:0000030:1 (под  

автомобильными дорогами Р-217 «Кавказ» км 368+167 -км 382+000 и Р-217 «Кавказ» км  497+340 - км 563+000) на основании решений судов. Стоимость: 3 811 669,95 руб. (15%  Контракта).  

 Срок выполнения работ: Начало - с даты подписания государственного контракта,  предоставление результата работ Заказчику (окончание работ) 01 декабря 2019 года,  

 Взыскать с федерального казенного учреждения «Управление федеральных  автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства», г. Пятигорск, ОГРН  1022601610680, ИНН 2632041647, в пользу акционерного общества «ЛИМБ», г. Санкт- Петербург, ОГРН 1027807591239, ИНН 7814033551, в возмещение расходов по оплате  государственной пошлины 6 000 руб.  

 Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

 Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского  края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его  

принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа  в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно  было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья М.Н.Кузьмина