63/2020-83382(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (р е з о л ю т и в н а я ч а с т ь)

Дело № А13-9861/2020

город Вологда

27 августа 2020 года

 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Вологодской области  

р е ш и л:

внести в договор на выполнение строительно-монтажных работ на  объекте «Замена участка напорной канализации d=600мм по ул. Ветошкина от  ул. Яшина до дома ул. Ветошкина, 111» от 25.05.2020 № 32009108527/6-ЭК  изменение, изложив пункт 4.1 договора в следующей редакции:  

«4.1. Сроки выполнения работ по договору: до 27.08.2020». 

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.  

Судья Е.В. Дегтярева  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 21.05.2020 5:34:41

 Кому выдана Дегтярева Елена Викторовна