Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2-4, г. Калининград, 236016

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru

http://www.kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

город Калининград                                                                     Дело № А21-4719/2018

«19»   сентября  2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 19.09.2018.  

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Надежкиной М.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Акционерного общества «Норд Вест Флот Компани»  

к        Обществу с ограниченной ответственностью «СК «Северо-Запад»  

третье лицо: Администрация города Мурманска 

об      обязании выполнить техусловия 

 

при участии в заседании:  

от истца – ФИО2 по доверенности от 13.04.2018,  

от ответчика – не явился, извещен;  

установил:

Акционерное общество «норд-Вест Ф.К.» (ОГРН 

<

***>) обратилось в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «СК «Северо-Запад» (ОГРН 

<

***>) об обязании выполнить технические условия на вынос резервной КЛ-6 кВ Ф-2-5 от ТП-5 из-под пятна застройки до границы земельного участка с кадастровым номером 51:20:000:2015:2229.  

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Администрация города Мурманска.

Определением суда от 18.06.2018 в связи с реорганизацией в форме присоединения произведена замена истца на Акционерное общество «Норд Вест Флот Компани» (ОГРН 

<

***>). 

В настоящем заседании суда истец на иске настаивал.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте заседания суда, в процесс не явился, заявлений, ходатайств суду не направил.

Заслушав пояснения истца, исследовав доказательства по делу и дав им оценку в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд установил  следующее.

Ответчик письмом от 31.03.2017 обратился к истцу с просьбой выдать технические условия (техническое задание) по выносу кабеля 6кВ от ТП-5 до границы земельного участка 51:20:000:2015:2229 из-под пятна застройки. 

Истцом разработаны и выданы ответчику запрошенные технические условия от 17.04.2017 № 34, предусматривающие вынос резервной КЛ из-под пятна застройки. 

Далее, истцом были обнаружены повреждения на протяжении всей линии КЛ от ТП-5, возникшие в результате проведения ответчиком земляных работ.

Ответчик восстановил резервную линию, однако, её вынос из-под пятна застройки не осуществил, что послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в суд. 

Суд признал иск подлежащим удовлетворению исходя из следующего.   

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (пункт 1 статьи 310 ГК РФ). 

Материалами дела подтверждено принятие ответчиком на себя обязательств по выполнению технических условий ответчика от 17.04.2017 № 34. 

Судя по ходатайствам, приложенным к делу, обоснованность требований истца ответчиком не оспаривается. 

Судебное разбирательство по делу неоднократно откладывалось с целью предоставления сторонам времени урегулировать спор мирным путем. 

В последнем определении от 15.08.2018 суд рекомендовал ответчику окончательно урегулировать спор и завершить требуемые от него работы. 

По состоянию на 19.09.2018 ответчиком не представлено доказательств выполнения техусловий.

По правилам части 2 статьи 9 АПК РФ ответчик несет риск наступления неблагоприятных последствий, вызванных несовершением требуемых от него процессуальных действий. 

Истец настаивал на разрешении спора по существу. 

При таких обстоятельствах суд удовлетворяет иск в полном объеме. 

Срок для выполнения техусловий истец определил в течение двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. Суд считает этот срок достаточным и разумным.

Расходы истца по уплате госпошлины по правилам статьи 110 АПК РФ относятся на ответчика. 

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление удовлетворить.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «СК «Северо-Запад» в двухмесячный срок со дня вступления в законную силу настоящего решения суда выполнить технические условия на вынос резервной КЛ-6 кВ Ф-2-5 от ТП-5 из-под пятна застройки до границы земельного участка с кадастровым номером 51:20:000:2015:2229. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СК «Северо-Запад» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Норд Вест Флот Компани» расходы по уплате госпошлины в размере 6 000 руб. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                           М.Н. Надежкина