ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-15992/2024

Дело № А40-238110/23

г. Москва

18 апреля 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 08 апреля 2024 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 18 апреля 2024 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Новиковой Е.М.,

судей Порывкина П.А., Фриева А.Л.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Платоновым Д.М.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ГЛАВПРОМСТРОЙ" на решение Арбитражного суда г. Москвы от «26» января 2024 года по делу № А40-238110/23 по иску ООО "ГЛАВПРОМСТРОЙ" (ИНН 

<

***> , ОГРН 

<

***> ) к ООО "АК-СИСТЕМА" (ИНН 

<

***> , ОГРН 

<

***> ) о взыскании

При участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен,

от ответчика: ФИО1 по выписке из ЕГРЮЛ, 

ФИО2 по доверенности от 10.01.2022.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью " ГЛАВПРОМСТРОЙ" (далее – истец) обратилось в суд исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "АК-СИСТЕМА" (далее – ответчик) о взыскании неосвоенного аванса в размере 22 283 471 руб. 19 коп., неустойки в размере 3 449 974 руб. 65 коп., задолженности по оплате работы крана и электроэнергии в размере 303 863 руб. 75 коп.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 26.01.2024 исковые требования удовлетворены частично: с ООО "АКСИСТЕМА" в пользу ООО "ГЛАВПРОМСТРОЙ" взысканы  задолженность в размере 258 939 (Двести пятьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать девять) руб. 88 коп., пени в размере 3 449 974 (Три миллиона четыреста сорок девять тысяч девятьсот семьдесят четыре) руб. 65 коп., расходы по оплате госпошлины в размере 21 820 (Двадцать одна тысяча восемьсот двадцать) руб. 90 коп. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Истец не согласился с выводами суда, обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить по мотивам, изложенным в жалобе.

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции судебного акта проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии с главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Истец в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о дате и времени рассмотрения, апелляционная жалоба рассматривалась в его отсутствие в соответствии с ст. 121, 123, 156 АПК РФ.

Представитель ответчика против доводов апелляционной жалобы возражал по основаниям, изложенным в отзыве на апелляционную жалобу, просил оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Выслушав объяснения представителя ответчика, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для изменения или отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 15.12.2020 между ООО «ГПС» (Генеральный подрядчик) и ООО «АК-система» (Подрядчик) заключен Договор строительного подряда № 054-ВЛН/ГПС-АКС/2020. 

Пунктом 2.1 Договора, Стороны согласовали, что Генеральный подрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства: выполнить комплекс строительно-монтажных работ по монтажу систем вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации на Объекте: объект коммунального назначения, расположенного по адресу: 

<

...>, и сдать результат Работ Генеральному подрядчику. 

Согласно пункту 4.1 Договора, Цена Работ по Договору является твердой, изменению не подлежит, если иное не установлено Договором и составляет 34 499 746 (Тридцать четыре миллиона четыреста девяносто девять тысяч семьсот сорок шесть) рублей 49 копеек, в том числе НДС 20 % (далее по тексту - Цена Работ), при этом: Любое изменение налогов, стоимости Материалов, эксплуатации машин, Оборудования, а также стоимости работ привлекаемых Субподрядчиков, произошедшее после подписания настоящего Договора не является основанием для изменения Цены Работ (за исключением случаев увеличения НДС), так как данные изменения (потенциальные расходы/инфляционные риски) включены в Цену Работ. 

Подрядчик выполняет работы по проектной документации выданной Генеральным подрядчиком со штампом «В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ». 

В случае изменения в проектной документации будет подписано Дополнительное соглашение, что может повлиять на стоимость Работ. 

Цена Работ включает в себя вознаграждение Подрядчика и все затраты Подрядчика по выполнению порученных Работ на условиях Договора в том числе, но не ограничиваясь изложенным в указанном пункте. 

В силу п. 5.1 договора за выполненные и принятые объемы Работ, оплата производится по выставленному Подрядчиком счету, согласно Актам о приемке выполненных работ по п. 2.1 (по форме Приложения № 4 к Договору) и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат (по форме Приложения № 7 к Договору), не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания Генеральным подрядчиком указанных в настоящим пункте актов, предоставления Генеральному подрядчику счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере налогообложения и счета на оплату, а применительно к Работам, указанным в п. 2.10 Договора, предоставления дополнительно справок и необходимой Исполнительной документации. 

Размер платежа определяется следующим образом: сумма, указанная в Акте о приемке выполненных работ по п. 2.1 (по форме Приложения № 4 к Договору), уменьшается на 5 % (пять процентов) в качестве суммы Гарантийного обеспечения, а также уменьшается на часть суммы ранее перечисленного аванса, приходящегося на объем выполненных Работ, указанных в Акте о приемке выполненных работ по п. 2.1 (по форме Приложения № 4 к Договору).

Согласно п. 5.2 договора 5 % (пять процентов) от суммы, указанной в каждом Акте о приемке выполненных работ по п. 2.1., являются суммой Гарантийного обеспечения. 

Общая сумма Гарантийного обеспечения по Договору составляет 5% (пять процентов) от Цены Работ. 

Указанная сумма Гарантийного обеспечения в соответствии со статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации является иным способом обеспечения надлежащего выполнения обязательств Подрядчика по Договору и/или в связи с ним, включая, но не ограничиваясь указанным, исполнение Подрядчиком любых своих обязательств по Договору, в том числе связанных с его заключением и/или исполнением и/или прекращением и/или расторжением и/или односторонним отказом от его исполнения. 

Указанная сумма Гарантийного обеспечения выплачивается в следующем порядке: 

3% (три процента) от каждой суммы, указанной в Акте о приемке выполненных работ по п. 2.1 уплачивается Генеральным подрядчиком Подрядчику по истечении одного года с даты подписания Сторонами Акта окончательной сдачи-приемки работ по форме Приложения № 6 к Договору. 

Указанная в настоящем абзаце выплата производится в указанный в настоящем абзаце срок, при условии выставления Подрядчиком соответствующего счета Генеральному подрядчику, а также при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору; 

2% (два процента) от каждой суммы, указанной в Акте о приемке выполненных работ по п. 2.1уплачивается Генеральным подрядчиком Подрядчику по истечении пяти лет с даты подписания Сторонами Акта окончательной сдачи-приемки работ по форме Приложения № 6 к Договору.

 Указанная в настоящем абзаце выплата второй (оставшейся) части Гарантийного обеспечения производится при условии полного и надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Договору на дату такой выплаты. 

В случае расторжения Договора по любым основаниям и/или отказа любой из Сторон от его исполнения в одностороннем внесудебном порядке, Гарантийное обеспечение в любом из таких случаев выплачивается в срок, не ранее пяти лет с даты расторжения Договора, но в любом случае не ранее и при условии наступления следующих событий: получения Генеральным подрядчиком счета на оплату, передачи Подрядчиком Генеральному подрядчику результатов Работ, выполненных надлежащим образом и с надлежащим качеством, Исполнительной документации, Эксплуатационной документации и иной документации в рамках исполнения обязательств по Договору, осуществления Сторонами полной сверки взаиморасчетов без каких-либо разногласий, выполнения Подрядчиком всех законных требований Генерального подрядчика по Договору и/или в связи с его исполнением, и/или в связи с его расторжением. 

На Гарантийное обеспечение проценты в любом случае не начисляются. Подрядчик и Генеральный подрядчик соглашаются, что Генеральный подрядчик вправе в любое время зачесть сумму Гарантийного обеспечения и/или ее часть в счет оплаты суммы любой задолженности Подрядчика по Договору и/или любой ее части, и/или любых других платежей, включая неустойки и/или штрафы и/или, которые должны быть уплачены Подрядчиком Генеральному подрядчику, а также в счет оплаты Подрядчиком суммы по возмещению любого ущерба, причиненного Генеральному подрядчику, и сумм, которые Генеральный подрядчик потратит на устранение недостатков и/или дефектов и/или недоделок и расходов им сопутствующих. Генеральный подрядчик письменно уведомляет Подрядчика о таком зачете путем направления соответствующего уведомления. 

В случае отправки уведомления по почте оно будет считаться полученным Подрядчиком по истечении 5 (Пяти) календарных дней с даты его отправки Генеральные подрядчиком, подтвержденной почтовым штемпелем. 

В соответствии с п. 5.3 договора ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Подрядчик представляет Генеральному подрядчику Акты о приемке выполненных работ по п. 2.1 (по форме Приложения № 4 к Договору), составленные в соответствии со Структурой цены Работ по п. 2.1 Договора (Приложение № 3) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме Приложения № 7 к Договору), счета -фактуры, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ, отчеты, предусмотренные п. 8.47 Договора, а также Исполнительную документацию на предъявляемые к приемке Работы и необходимые для оплаты счета. 

При оформлении Актов о приемке выполненных работ по п. 2.1 (по форме Приложения № 4), справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме Приложения № 5), Подрядчик учитывает Классификацию объектов строительства, разработанную и утвержденную Генеральным подрядчиком, а также кодовые обозначения, присвоенные отдельным объектам строительства. 

По каждому отдельному виду Работ, указанных в первичных документах Подрядчиком, отражается цифровой/буквенный код, в соответствии с Классификацией. Информация для оформления первичных документов в соответствии с указанными требованиями, направляется Генеральным подрядчиком Подрядчику в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора. Генеральный подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов рассматривает и оформляет представленные документы или направляет мотивированный отказ. 

Мотивированным основанием для отказа в оформлении данных документов, помимо прочего, является непредставление или неполнота представленного отчета, указанного в пункте 8.47 Договора, отступления в оформлении представленных документов от требований действующего законодательства в сфере бухгалтерского и налогового учета и/или Договора. 

Генеральный подрядчик в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания им указанных выше документов производит соответствующую оплату по Договору. 

В силу п. 5.4 договора платежи производятся Генеральным подрядчиком на расчетный счет Подрядчика в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре. 

В случае изменения реквизитов, Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) календарных дней с даты изменения реквизитов письменно предупредить об этом Генерального подрядчика, в противном случае Подрядчик самостоятельно несет риск вызванный таким не предупреждением. Генеральный подрядчик оплачивает авансовый платеж в размере 30 % от суммы договора, что составляет 10 349 923 (Десять миллионов триста сорок девять тысяч девятьсот двадцать три) рубля 95 копеек, в т.ч. НДС 20%, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. 

При получении аванса Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней предоставить Генеральному подрядчику счет-фактуру на аванс и отразить ее в книге продаж. Дополнительные авансовые платежи производятся по соглашению сторон (в соответствии с поданной Подрядчиком заявкой и обоснованием его необходимости). Зачет аванса производится пропорционально объемам выполненных работ (п. 5.7 договора). 

В случае расторжения настоящего Договора не отработанный аванс должен быть возвращен Генеральному подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней (п. 5.8 договора). 

В силу п. 6.1, 6.2 и 6.3 договора дата начала Работ через 5 (пять) рабочих дней с даты получения аванса. Дата окончания Работ через 60 (Шестьдесят) рабочих дней с даты начала выполнения работ. 

Подрядчик обязуется выполнить все Работы, в соответствии с Графиком производства строительно-монтажных работ (Приложение № 1 к Договору). 

Во исполнение вышеуказанного условия Договора, ООО «ГПС» в адрес ООО «АК-Система» перечислило в размере 28 570 320 руб. 15 коп., что подтверждается следующими платежными поручениями: № 1067 от 16.12.2020 на сумму 1 008 616 руб., № 1131 от 25.12.2020 на сумму 1 829 701 руб. 98 коп., № 14 от 13.01.2021 на сумму 7 511 606 руб. 97 коп., № 674 от 17.05.2021 на сумму 3 500 000 руб., №760 от 27.05.2021 на сумму 985 582 руб. 17 коп., № 872 от 09.06.2021 на сумму 5 020 460 руб. 30 коп., № 11239 от 27.08.2021 на сумму 688 767 руб., № 11273 от 31.08.2021 на сумму 2 35 424 руб. 93 коп., № 11296 от 01.09.2021 на сумму 641 161 руб. 80 коп., № 11514 от 28.09.2021 на сумму 800 000 руб., № 12160 от 16.11.2021 на сумму 500 000 руб., № 12236 от 22.11.2021 на сумму 1 200 000 руб., № 12405 от 03.12.2021 на сумму 600 000 руб., № 12531 от 13.12.2021 на сумму 1 000 000 руб., № 12680 от 17.12.2021 на сумму 700 000 руб., № 377 от 22.12.2021 на сумму 130 000 руб. 

Истец указывает, что ООО «АК-Система» в адрес ООО «ГПС» было сдано работ на общую сумму 6 286 848 руб., 96 коп., в подтверждение чего представил акты: КС-3 № 1 от 12.08.2021 на сумму 6 286 848 руб., 96 коп. 

Истец указывает, что сумма неосвоенного аванса выглядит следующим образом: 28 570 320,15 - 6 286 848,96 = 22 283 471, 19 руб. 

Пунктом 6.1 установлено, что Дата начала Работ - через 5 рабочих дней с даты получения аванса (т.е 20.01.2021). 

Пунктом 6.2 установлено, что Дата окончания Работ - через 60 рабочих дней с даты начала выполнения работ (т.е 16.04.2021). 

Между тем, истец указывает, что по состоянию на 14.08.2023 работы, предусмотренные Договором, не выполнены и не сданы. 

17.08.2023 ООО «ГПС» в адрес ООО «АК-система» было направлено уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора № 054-ВЛН/ГПСАКС/2020 от 15.12.2020, что подтверждается почтовой квитанцией и описью вложения (идентификатор 12503984220280, получено 24.08.2023), договор расторгнут с 24.08.2023. 

Пунктом 8.4 договора установлено, что Подрядчик обязан организовать охрану Материалов и Оборудования, обеспечить за свой счет содержание и уборку Строительной площадки и прилегающей к ней территории, а так же чистоту выезжающего транспорта. 

ООО «ГПС» в адрес ООО «АК-Система» были выставлены следующие счета на оплату на общую сумму 303 863 руб., 75 коп.: № 40 от 31.01.2021 г., на сумму 9 859 руб., 03 коп., (эл., энергия) № 53 от 28.02.2021 г., на сумму 20 966 руб., 70 коп., (эл., энергия) № 92 от 31.03.2021 г., на сумму 34 340 руб., 00 коп., (трансп., мусор) № 91 от 01.04.2021 г., на сумму 19 666 руб., 14 коп., (эл., энергия) № 129 от 01.04.2021 г., на сумму 1 218 руб., 32 коп., (раб., крана) № 143 от 30.04.2021 г., на сумму 89 065 руб., 16 коп., (раб., крана) № 148 от 30.04.2021 г., на сумму 8 593 руб., 56 коп., (эл., энергия) № 214 от 30.06.2021 г., на сумму 6 245 руб., 28 коп., (эл. энергия) № 248 от 01.07.2021 г., на сумму 6 862 руб., 86 коп., (эл. энергия) № 467 от 31.10.2021 г., на сумму 22 663 руб., 37 коп., (эл. энергия) № 468 от 30.11.2021 г., на сумму 39 279 руб., 46 коп., (эл. энергия) № 201 от 10.01.2022 г., на сумму 35 325 руб., 13 коп., (эл. энергия) № 207 от 31.01.2022 г., на сумму 9 598 руб., 74 коп., (эл. энергия). 

Поскольку ООО «ГПС» отказалось от исполнения договора и договор расторгнут, истец указывает, что ООО «АК-Система» без правовых оснований удерживает сумму неосвоенного аванса в размере 22 283 471 руб. 19 коп., неустойку                  3 449 974 руб. 65 коп., а также 303 863 руб. 75 коп. за электроэнергию и работу крана. 

В адрес ООО «АК-система» было направлено уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора с требованием вернуть неосвоенный аванс, уплатить неустойку, а так же уплатить возмещения за работу крана и электроэнергию, что подтверждается почтовой квитанцией и описью вложения (идентификатор 6 12503984220280, письмо получено 24.08.2023), претензия была оставлена без ответа и удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца с требованиями в суд.

Арбитражный апелляционный суд согласен с выводами суда первой инстанции, в связи с чем полагает обоснованным частичное удовлетворение исковых требований в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пунктом 1 статьи 708 ГК РФ установлено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Согласно пункту 1 статьи 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В силу пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Согласно пункту 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 января 2000 года N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" принятие работ свидетельствует о потребительской ценности произведенных работ и желании ими воспользоваться, возврат выполненных работ и использованных при их исполнении материалов невозможен, следовательно, заявленное исковое требование подлежит удовлетворению, а понесенные подрядчиком затраты - компенсации. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями (статья 309 ГК РФ).

При этом односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ)

В соответствии с п. 1 ст. 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Пунктом 3 статьи 450 ГК РФ предусмотрено, что в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным. Согласно п. 2 ст. 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются.

В соответствии с п. 4 ст. 453 ГК РФ стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон. В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Согласно п. 5.3 Договора Подрядчик представляет Генеральному подрядчику Акты приемки выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат, составленные в соответствии со Структурой цены Работ (Приложение№3), исполнительную документацию, счет для оплаты, а Генеральный подрядчик в течение 10 рабочих дней рассматривает и оформляет представленные документы либо направляет мотивированный отказ. 

Акт о приемке выполненных работ №2 от 24.11.2022 (КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 24.11.2022 (КС-3) на сумму 24 041 808,93 руб. направлены в адрес Генерального подрядчика почтой 28.11.2022 и получены адресатом 30.11.2022, мотивированного отказа на Акт приемке выполненных работ №2 от 24.11.2022 не поступало. 

Исполнительная документация передана по актам представителю Генерального подрядчика, что подтверждается материалами дела. 

Выполнение работ подтверждается подписанными сторонами Актами освидетельствования скрытых работ, накладными, сертификатами на оборудование, исполнительными геодезическими схемами, актами испытаний оборудования. 

При отсутствии мотивированных возражений, по условиям п. 5.3 Договора, работы на сумму 24 041 808,93 руб. считаются принятыми без замечаний. Кроме того, Объект по адресу 

<

...> - паркинг ЖК «Семеновский парк» введен в эксплуатацию, информация об этом размещена на сайте застройщика                        ООО «РГ-Девелопмент» 14.03.2022 (https://rg-dev.ru/press/news/2022/775/). 

Претензий к качеству работ выполненных ООО «АК-Система» не предъявлялось, доказательств выполнения работ другими подрядчиками не представлено. 

Таким образом, на момент направления 17.08.2023 Уведомления об отказе от договора и возврате аванса работы были выполнены, а сумма аванса 22 597 816,64 руб. полностью зачтена в счет оплаты выполненных работ, как указано в Справке о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 24.11.2022 (КС-3). 

В ответ на Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора и претензию в адрес ООО «ГПС» был направлен ответ с приложением повторно копий документов о сдаче работ, проекта акта окончательной сдачи-приемки результата работ, которые вручены истцу 18.09.2023. 

Проект Итогового Акта окончательной сдачи-приемки результата работ от 25.11.2022 был направлен почтой в адрес Генерального подрядчика 06.02.2023 и вручен адресату по данным Почты России 09.02.2023, ответа не поступало. 

С учетом объема выполненных работ, как верно указано судом первой инстанции, требование о возврате аванса противоречит нормам ст. 453,717, 1102 ГК РФ. 

В связи с существенным подорожанием материалов и оборудования в 2021 году ООО «АК-Система» уведомило об этом ООО «ГПС» письмом исх. №397/07-21 от 13.07.2021 и предложило согласовать новую Структуру цены Работ по Договору, предложило расчет сметной стоимости работ. 

Вместе с тем, между сторонами не согласована иная цена работ. 

Также материалами дела установлено, что ООО «ГПС» в адрес ООО «АК-Система» были выставлены следующие счета на оплату на общую сумму 303 863 руб., 75 коп.: № 40 от 31.01.2021 г., на сумму 9 859 руб., 03 коп., (эл., энергия) № 53 от 28.02.2021 г., на сумму 20 966 руб. 70 коп., (эл., энергия) № 92 от 31.03.2021 г., на сумму 34 340 руб., 00 коп., (трансп., мусор) № 91 от 01.04.2021 г., на сумму 19 666 руб., 14 коп., (эл., энергия) № 129 от 01.04.2021 г., на сумму 1 218 руб., 32 коп., (раб., крана) № 143 от 30.04.2021 г., на сумму 89 065 руб. 16 коп., (раб., крана) № 148 от 30.04.2021 г., на сумму 8 593 руб., 56 коп., (эл., энергия) № 214 от 30.06.2021 г., на сумму 6 245 руб. 28 коп., (эл. энергия) № 248 от 01.07.2021 г., на сумму 6 862 руб. 86 коп., (эл. энергия) № 467 от 31.10.2021 г., на сумму 22 663 руб. 37 коп., (эл. энергия) № 468 от 30.11.2021 г., на сумму 39 279 руб. 46 коп., (эл. энергия) № 201 от 10.01.2022 г., на сумму 35 325 руб. 13 коп., (эл. энергия) № 207 от 31.01.2022 г., на сумму 9 598 руб. 74 коп., (эл. энергия). Между тем, УПД № 201 от 10.01.2022 г. на сумму                                                     35 325 руб. 13 коп. и № 207 от 31.01.2022 г. на сумму 9 598 руб. 74 коп. не подписаны ответчиком, доказательств их направления в материалах дела не имеется. 

Вместе с тем, доказательств предоставления услуг по электроэнергии по актам № 201 от 10.01.2022 на сумму 35 325 руб. 13 коп. и № 207 от 31.01.2022 на сумму                        9 598 руб. 74 коп. не представлено. 

Учитывая изложенное, судом первой инстанции обоснованно удовлетворены исковые требования о взыскании задолженности на сумму 258 939,88 руб.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Пунктом 14.6 Договора установлено, что в случае нарушения Подрядчиком срока производства всех Работ, указанного в пункте 6.2 Договора, Подрядчик, начиная с первого дня, следующего, за днем истечения установленного Договором срока исполнения, уплачивает Генеральному подрядчику за каждый день просрочки пени в размере 0,1% от цены работ, но не более 10% от Цены работ. 

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств в части срока выполнения работ, истец начислил ответчику неустойку в размере                                                   3 449 974 руб. 65 коп. за период с 17.04.2021 по 16.08.2023 с учетом ограничения, установленного п. 14.6 договора. Расчет судом проверен, признан верным. Ответчиком о применении ст. 333 ГК РФ не заявлено, доказательств несоразмерности не представлено. 

Учитывая отсутствие правовых обоснований и доказательств, свидетельствующих о несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу,  что исковые требования в части взыскания неустойки подлежат удовлетворению в размере                           3 449 974 руб. 65 коп.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, направлены на переоценку обжалуемого судебного акта, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения суда.

Фактические обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения спора по существу, установлены судом на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, отвечающих признакам относимости, допустимости и достаточности.

Судом первой инстанции дана надлежащая оценка всем имеющимся в деле доказательствам, оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта не имеется.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены принятого судебного акта, арбитражным апелляционным судом не установлено.

Апелляционная жалоба заявителя удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 26.01.2024 по делу                           №А40-238110/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа. 

Председательствующий судьяЕ.М. Новикова

СудьиП.А. Порывкин

                                                                                                          А.Л. Фриев