96/2019-145386(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

резолютивная часть

дело № А73-16671/2018

г. Хабаровск

24 сентября 2019 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе:  

судьи Дюковой С.И. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Муниципального  казенного учреждения «Управление капитального строительства города  Комсомольска-на-Амуре» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место  нахождения: 681000, 

<

...>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Стройдормонтаж» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 680013, 

<

...>)  

третьи лица, не заявляющее самостоятельных требований относительно  предмета спора, Общество с ограниченной ответственностью «Гильдия  современных проектов», Общество с ограниченной ответственностью  «Комсомольский-на-Амуре трест инженерно - строительных изысканий  «Комсомольсктисиз», КГБУ «Единая Государственная экспертиза проектной  документации и результатов инженерных изысканий Хабаровского края»  

об обязании устранить недостатки, о взыскании 43 890 840 руб. 40 коп. 

 Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Стройдормонтаж»  в течение тридцати дней с момента вступления решения в законную силу  безвозмездно устранить недостатки строительно-монтажных работ по  

муниципальному контракту № 4т от 12.05.2017 г. на выполнение работ по  реконструкции объекта капитального строительства «Автодорога от  перекрестка Комсомольского шоссе – проспект Победы до ул. Пермской с  подходом к площадке ТОСЭР» с соблюдением требований проектной  документации, СП 78.13330.2012, СП 71.13330.2017, а именно:  

- выполнить демонтаж асфальтобетонного покрытия дороги 

(асфальтобетон мелкозернистый марки-1 тип «А» горячий плотный на  вязком битуме БНД90/130 по ГОСТ 9128-2009) толщиной h=0.05 м на  участках дороги  

ПК 0+20 (площадь разрушения - 3 кв. м) ПК 1 (площадь разрушения - 3 кв. м) ПК 2 (площадь разрушения - 150 кв. м) ПК 2+30 (площадь разрушения - 14 кв. м) ПК 3 (площадь разрушения - 30 кв. м) ПК 6+50 (площадь разрушения - 10 кв. м) ПК 7+50 (площадь разрушения - 40 кв. м) ПК 10 (площадь разрушения - 70 кв. м) ПК 10+90 (площадь разрушения - 80 кв. м) ПК 13 (площадь разрушения - 70 кв. м) ПК 15 (площадь разрушения - 60 кв. м) ПК 16+90 (площадь разрушения - 50 кв. м) 

С последующим восстановлением в соответствии с проектной  документацией шифр 4-2016-Р-00-АД по объекту;  

- восстановить асфальтобетонное покрытие тротуаров в соответствии с  проектной документацией шифр 4-2016-Р-00-АД по объекту в местах  примыкания к откосу (асфальтобетон мелкозернистый марки-II тип «Б»  горячий плотный на вязком битуме БНД 90/130 по ГОСТ 9128-2009)  толщиной h =0.05м: от ПК-0 до ПК 16+90 по правой и левой стороне дороги;  

- восстановить откосы в соответствии с проектной документацией  шифр 4-2016-Р-00-АД по объекту — от ПК-0 до ПК 16+90 по правой и левой  стороне дороги;  

- выполнить работы по замене повреждённой тактильной плитки: 

 квадратные рифы 500*500 мм — 103 шт. на участках ПК9+20 по левой  стороне дороги и ПК9+80 по правой стороне дороги (автобусные остановки),  диагональные рифы 500*500 мм — 188 шт., продольные рифы 500*500 мм —  63 шт.  

На участках: ПК 0; ПК 9+50; ПК 10 (по левой стороне дороги); ПК 10 + 90  (по правой стороне дороги пересечение с ул. Лучевая); ПК11 + 90  (пересечение с ул. Озерная); ПК 13 (пересечение с ул. Каспийская); ПК 14  (пересечение с ул. Черноморская); ПК 15 (пересечение с ул. Каховская); ПК  16+10 (по левой стороне дороги) 16+82 (по левой стороне дороги);  

- выполнить работы по замене повреждённого бордюрного камня БР  100.30.15— 2 шт. - на участке ПК9+20 по левой стороне дороги (автобусная  остановка);  

- установить отсутствующие люки дождеприемные — 6 шт. на  участках дороги ПК 0 (ДК1, ДК 53); ПК1+70 по правой стороне дороги (ДК  2); ПК2 по левой стороне дороги (ДК 52); ПК2+55 по правой стороне дороги  (ДК 3); ПКЗ по левой стороне дороги (ДК 51).  

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  «Стройдормонтаж» в пользу Муниципального казенного учреждения  «Управление капитального строительства города Комсомольска-на-Амуре»  неустойку за нарушение сроков выполнения отдельных этапов и конечного  срока выполнения работ в размере 41 388 564 руб. 51 коп., неустойку за  нарушение срока предоставления обеспечения исполнения контракта в  размере 2 502 276 руб. 02 коп.  

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  «Стройдормонтаж» в доход федерального бюджета государственную  пошлину в сумме 200 000 руб. 00 коп.  

 Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения.  

 Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

 Судья С.И. Дюкова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 04.04.2019 8:26:56

Кому выдана Дюкова Светлана Ивановна