АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть объявлена 04.10.2022 г.)

Дело № А82-6618/2022

г. Ярославль

26 октября 2022 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Бессоновой И.Ю. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Газтеплосервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Альянс-Строй" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о   взыскании   1995397.00  руб.

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строй Профит»

при участии:

от истца – ФИО2 – без полномочий

от ответчика – не явились

от третьего лица – не явились

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Газтеплосервис" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Альянс-Строй" о взыскании 1 995 397 руб. задолженность по оплате выполненных работ.

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 09.06.2022 г. к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строй Профит».

Истец явку уполномоченного представителя в судебное заседание не обеспечил.

Ответчик в судебное заседание не явился, определение суда о принятии иска к производству, направленное по юридическому адресу ответчика, возвращено отделением почтовой связи без вручения с отметкой «истек срок хранения». Ответчик извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания в порядке ст. 123 АПК РФ, письменный отзыв на иск не направил.

Третье лицо в заседание не явилось, извещено.

В судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв до 04.10.2022 г. до 11 час. 00 мин.

Информация о перерыве размещена на официальном сайте суда.

После перерыва судебное заседание продолжено без участия представителей сторон.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

16.04.2018 г. между обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Альянс-Строй" /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Газтеплосервис" /Подрядчик/ заключен договор подряда № Н18-002-04, согласно п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.5 которого Подрядчик выполняет поставку газового оборудования согласно проекта газификации 14-481-43/21-ГСВ, выполненного ЗАО НПВО «НГС-оргпроектэкономика», на строящемся многоквартирном жилом доме, находящимся по адресу: 

<

...>, именуемому в дальнейшем «Объект», а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленное оборудование. Стоимость и перечень оборудования согласованы Приложением № 1 настоящего Договора. Подрядчик принимает на себя выполнение работ по монтажу внутреннего газопровода, включая прокладку по фасаду здания, поквартирную разводку с монтажом запорной арматуры, газоиспользующего оборудования (Приложение № 2) на Объекте. Монтаж Подрядчик выполняет по нормам и правилам применяемых в данной сфере деятельности согласно проекта газификации 14-481-43/21-ГСВ, выполненного ЗАО НПВО «НГС-оргпроектэкономика», а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Стоимость и объем работ согласованы Приложением № 2 настоящего Договора. Подрядчик принимает на себя выполнение работ по монтажу системы дымоудаления и воздухопритока для газовых котлов, включая поставку элементов системы на Объекте. Монтаж Подрядчик выполняет по нормам и правилам применяемых в данной сфере деятельности согласно проекта газификации 14-481-43/21-ГСВ, выполненного ЗАО НПВО «НГС-оргпроектэкономика», а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Стоимость и объем элементов системы и работ согласованы Приложения № 3 настоящего Договора. Стоимость работ, материалов и оборудования по настоящему Договору составляет 1918 600 (один миллион девятьсот восемнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, включая НДС 18%, и конкретизируется в Протоколах согласования договорной цены (Приложениям № 1,2. 3). Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 3-х рабочих дней после подписания и на основании актов выполненных работ форм КС-2 и КС-3. Подрядчик вправе приостановить работы до поступления на его расчетный счет указанной оплаты.

Во исполнение условий заключенного договора истцом выполнены согласованные работы, результат работ сдан ответчику, им принят, не оплачен. 

23.04.2018 г. между обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Альянс-Строй" /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Газтеплосервис" /Подрядчик/ заключен договор подряда № Н18-003-04, согласно п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.5 которого Подрядчик выполняет поставку газового оборудования согласно проекта газификации 14-481-43/40-ГСВ, выполненного ЗАО НПВО «НГС-оргпроектэкономика», на строящемся многоквартирном жилом доме, находящимся по адресу: 

<

...>, именуемому в дальнейшем «Объект», а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленное оборудование. Стоимость и перечень оборудования согласованы Приложением № 1 настоящего Договора. Подрядчик принимает на себя выполнение работ по монтажу внутреннего газопровода, включая прокладку по фасаду здания, поквартирную разводку с монтажом запорной арматуры, газоиспользующего оборудования (Приложение № 2) на Объекте. Монтаж Подрядчик выполняет по нормам и правилам применяемых в данной сфере деятельности согласно проекта газификации 14-481-43/40-ГСВ, выполненного ЗАО НПВО «НГС-оргпроектэкономика», а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Стоимость и объем работ согласованы Приложением № 2 настоящего Договора. Подрядчик принимает на себя выполнение работ по монтажу системы дымоудаления и воздухопритока для газовых котлов, включая поставку элементов системы на Объекте. Монтаж Подрядчик выполняет по нормам и правилам применяемых в данной сфере деятельности согласно проекта газификации 14-481-43/40-ГСВ, выполненного ЗАО НПВО «НГС-оргпроектэкономика», а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Стоимость и объем элементов системы и работ согласованы Приложения № 3 настоящего Договора. Стоимость работ, материалов и оборудования по настоящему Договору составляет 2 738 404 рублей 00 копеек, включая НДС 18%, и конкретизируется в Протоколах согласования договорной цены (Приложениям № 1,2. 3). Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 3-х рабочих дней после подписания и на основании актов выполненных работ форм КС-2 и КС-3. Подрядчик вправе приостановить работы до поступления на его расчетный счет указанной оплаты.

Во исполнение условий заключенного договора истцом выполнены согласованные работы, результат работ сдан ответчику, им принят, не оплачен. 

07.10.2019 г. между обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Альянс-Строй" /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Газтеплосервис" /Подрядчик/ заключен договор подряда № 19-009-10, согласно п.п. 1.1, 1.2, 3.1, 3.5 которого Подрядчик принимает на себя выполнение работ по монтажу внутреннего газопровода, включая прокладку по фасаду здания, поквартирную разводку с монтажом запорной арматуры, газоиспользующего оборудования (Приложение № 1) на Объекте. Монтаж Подрядчик выполняет по нормам и правилам применяемых в данной сфере деятельности согласно проекта газификации 14-481-43/48-ГСВ, выполненного ЗАО НПВО «НГС-оргпроектэкономика», а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Стоимость и объем работ согласованы Приложением № 2 настоящего Договора. Подрядчик принимает на себя выполнение работ по монтажу системы дымоудаления и воздухопритока для газовых котлов на Объекте. Монтаж Подрядчик выполняет по нормам и правилам применяемых в данной сфере деятельности согласно проекта газификации 14-481-43/48-ГСВ, выполненного ЗАО НПВО «НГС-оргпроектэкономика», а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Стоимость и объем элементов системы и работ согласованы Приложения № 3 настоящего Договора. Стоимость работ, материалов и оборудования по настоящему Договору составляет 1116 260 (один миллион сто шестнадцать тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 20%, и конкретизируется в Протоколах согласования договорной цены (Приложениям № 1, 2). Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 3-х рабочих дней после подписания и на основании актов выполненных работ форм КС-2 и КС-3. Подрядчик вправе приостановить работы до поступления на его расчетный счет указанной оплаты.

Во исполнение условий заключенного договора истцом выполнены согласованные работы, результат работ сдан ответчику, им принят, не оплачен. 

Претензией №35/11 от 22.11.2021 г. истец предлагал ответчику оплатить образовавшуюся задолженность. Претензия направлялась в адрес ответчика ценным письмом с описью вложения. 

Отсутствие оплаты денежных средств послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Изучив материалы дела, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

Исходя из положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.  

В  силу ч.1 ст. 702 ГК РФ  по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.  

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику. 

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  

Факт исполнения принятых на себя договорных обязательств со стороны истца и принятия результатов работы ответчиком подтверждается материалами дела, а именно актами № 00000000037 от 05.07.2018 г., № 00000000049 от 26.10.2018 г., № 00000000046 от 15.10.2018 г., № 00000000039 от 06.07.2018 г., № 000000000 от 28.12.2018 г., № 00000000038 от 15.10.2018 г., № 00000000066 от 30.11.2019 г., № 00000000048 от 30.09.2019 г., № 00000000013 от 13.02.2020 г., № 00000000006 от 22.01.2020 г., № 00000000037 от 10.08.2020 г., ответчиком не оспаривается. 

Возражения ответчиком не заявлены, отзыв на иск не представлен.

С учетом произведенных оплат (относимых к рассматриваемым договорам) сумма долга составила  1 995 397 руб. 

При имеющихся обстоятельствах требования истца о взыскании стоимости выполненных работ в сумме 1 995 397 руб. являются обоснованными,  подлежат удовлетворению. 

Истцом заявлено требование о возмещении расходов на оплату юридических услуг в сумме 30 000 руб.

В соответствии со ст. 106 Арбитражного процессуального кодекса РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Согласно ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Согласно пункту 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек.

Наличие расходов на оказание юридических услуг (судебных расходов) истец подтверждает договором возмездного оказания услуг от 01.03.2022 г., платежным поручением № 263 от 18.03.2022 г. на сумму 30 000 руб.

Факт несения расходов истцом подтверждается представленными в материалы дела документами.

Ответчиком не заявлено суду о чрезмерности понесенных расходов.

Согласно п. 20 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 N 82 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" при определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут приниматься во внимание, в частности: время, которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения и сложность дела.

Как разъяснено в п.11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 111 АПК РФ, часть 4 статьи 1 ГПК РФ, часть 4 статьи 2 КАС РФ). Вместе с тем в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон (статьи 2, 35 ГПК РФ, статьи 3, 45 КАС РФ, статьи 2, 41 АПК РФ) суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер. 

В пункте 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" разъяснено, что разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства. 

Определяя разумный предел расходов на оплату юридических услуг, суд принимает во внимание время, которое могло быть затрачено на подготовку материалов, сложившуюся в регионе стоимость указанных услуг, степень участия представителя в процессе и степень подготовленности материалов представителем, сложность дела, цену иска.  

С учетом объема и содержания оказанных представителем услуг, качества подготовки материалов дела, отсутствия доказательств чрезмерности расходов, суд считает заявленные расходы разумными, требование - подлежащим удовлетворению. При этом суд учитывает, что представитель готовил необходимые процессуальные документы, представлял доказательства, в полной мере пользовался процессуальными правами, предоставленными законом, нес процессуальные обязанности.

Таким образом, размер расходов на оплату услуг представителя в сумме 30 000 руб. суд признает обоснованным.

В силу ст. 110 АПК РФ госпошлина по делу подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Альянс-Строй" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Газтеплосервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 1 995 397 руб. задолженность, 30 000 руб. в возмещение расходов на оплату услуг представителя. 

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Альянс-Строй" в доход федерального бюджета 32 954 руб. государственной пошлины. 

Исполнительный лист выдать по истечении 10-дневного срока со дня вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, ( через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

 

Судья

И.Ю. Бессонова