АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Краснодар                                                                                            Дело № А32-25335/2022

Резолютивная часть решения оглашена 04.10.2022

Полный текст судебного акта изготовлен 30.10.2022

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи С.А Баганиной, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи О.В Мысак, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Перинатальный центр города Армавира» Министерства здравоохранения Краснодарского края (ИНН 

<

***>), Краснодарский край, г. Армавир к обществу с ограниченной ответственностью «Активстрой»(ИНН 

<

***>), Краснодарский край, г. Армавир 

- об обязании (с учетом уточнения)  выполнить гарантийные обязательства по устранению выявленных недостатков  в течение гарантийного  срока на выполненные работы по «Капитальному ремонту «Замена оконных блоков главного   корпуса»;

- взыскании   штрафа в размере 85 000 руб., определенном согласно постановлению № 1042:( 1000 рублей за каждый факт, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно) за каждый день неисполнения обязательств, а также 3 400 рублей расходов по уплате госпошлины,

УСТАНОВИЛ:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Перинатальный центр города Армавира» Министерства здравоохранения Краснодарского края   (далее – истец,   ГБУЗ «ПЦ» МЗ КК) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Активстрой»   (далее – ответчик,   ООО «Активстрой») об обязании выполнить гарантийные обязательства по устранению недостатков,   взыскании   штрафа.

В настоящее судебное заседание представители истца и ответчика не явились.

Из материалов дела следует, что   корреспонденция истца, судебная корреспонденция   направлялась      по юридическому адресу    ответчика, сведения о котором предоставлены в выписке из ЕГРЮЛ. Направленная в адрес ответчика по  юридическому  адресу заказная почтовая корреспонденция возвращена с отметкой почтового отделения об истечении срока хранения. 

В соответствии с частью 1 ст. 165.1. ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 67 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» статья 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное (пункт 68 указанного постановления Пленума).

Действуя  разумно и добросовестно, ответчик  должен было организовать прием почтовой корреспонденции по юридическому адресу организации, внесенному в ЕГРЮЛ или принять меры к информированию почтового отделения связи по месту нахождения о необходимости пересылки почтовой корреспонденции по фактическому адресу своего местонахождения (пункт 46 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 N 221).

Ответчик  в силу ст.165.1 ГК РФ,  ст.123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, надлежащим образом извещен о времени и месте рассмотрения дела в суде первой инстанции.    

Дело рассматривается по правилам ст.156 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, между ГБУЗ «ПЦ» МЗ КК ( заказчик) и ООО «Активстрой» (подрядчик) по итогам проведения электронных аукционов   заключены следующие контракты на выполнение работ «Капитальный ремонт «Замена оконных блоков главного корпуса», расположенного по адресу: 

<

...>: 

-Контракт № 51.2019 от 19.12.2019г.; 

-Контракт  №59.2019  от 18.12.2019г.; 

-Контракт № 50.2019 от 19.12.2019г.; 

-Контракт №34.2020 от 17.08.2020г.

По условиям контракта № 51.2019 от 19.12.2019 подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика работы Капитальный ремонт «Замена оконных блоков главного корпуса», расположенного по адресу: 

<

...>» (операционный блок 4 этажа, гинекологическое отделение 4 этаж, ЦСО, КДЛ) (приложение к контракту №1,4,5) (далее - работы) и передать их заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и размере, установленном настоящим контрактом, за счет средств субсидий на осуществление государственными учреждениями капитального ремонта. Идентификационный код закупки 19 32302000995230201001 0058 004 0000 000 (пункт 1.1 контракта № 51.2019).

Согласно пункту 3.1 контракта № 51.2019 цена контракта (стоимость работ) составляет 315 531   рублей 62 копейки, в том числе НДС не облагается (на основании ст. 346.11 НК РФ).

Согласно пункту 9.1 контракта № 51.2019 качество работ, выполняемых по настоящему контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям и требованиям настоящего контракта, изложенным в технической документации, на протяжении гарантийного срока.

Пунктом 9.2 контракта № 51.2019 установлено, что на выполненные работы подрядчик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данные виды работ. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания  сторонами документа о приемке выполненных работ.

В соответствии с пунктом 9.3 контракта № 51.2019 заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата выполненных работ, в течение установленного гарантийного срока. Подрядчик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, в том числе замену товара, используемого в результате выполненных работ, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Согласно пункту 9.4 Контракта № 51.2019 при выявлении Заказчиком недостатков выполненных работ составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) выполненных работ, согласования порядка и сроков их устранения, подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Пунктом 9.5 Контракта № 51.2019 стороны согласовали, что  течение гарантийного срока прерывается на время, в течение которого объект, на котором подрядчиком выполнялись работы, предусмотренные настоящим контрактом, не мог эксплуатироваться вследствие выявленных Заказчиком недостатков, возникших по вине подрядчика.

Истец указывает, что работы ответчиком выполнены в полном объеме, членами приемочной комиссии в составе представителей  заказчика и подрядчика подписан акт приема (экспертизы) № 1  от 23.12.2019 на сумму 315 531,62 руб. 

Платежным   поручением № 295705 от 30.12.2019  на сумму 315 531,62 руб заказчиком   произведена оплата   выполненных работ в полном объеме.

Период гарантийного срока на выполненные работы после подписания акта приема (экспертизы) исчисляется с 24.12.2019 по 23.12.2022.

25.02.2022 по адресу электронной почты подрядчика, указанной в   контракте для целей переписки, заказчик направил  извещение с приглашением для участия в осмотре и составлении акта о выявленных недостатках. Подрядчик от явки на осмотр уклонился.

В течение гарантийного срока Заказчиком выявлены следующие недостатки выполненных работ и составлен акт № 1 от 01.03.2022г. фиксирующий недостатки (дефекты) выполненных работ, подписанный членами комиссии, а именно:

1) В КДЛ около кабинета микросканирования заедает поворотно-откидной механизм пластикового окна;

2) В гинекологическом отделении в палате № 2 трещины на оштукатуренных- отшпаклеванных откосах;

3) В гинекологическом отделении в палате № 4 в боксе № 2 трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

4) В гинекологическом отделении в палате № 4 в боксе № 1 трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

5) В гинекологическом отделении в палате № 3 в боксе № 1 трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах.

Акт вручен заказчику 03.03.2022, что подтверждается подписью получателя с проставлением оттиска печати общества.

недостатки   ответчиком не были устранены.

По условиям контракта № 59.2019 от 18.12.2019 подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы Капитальный ремонт «Замена оконных блоков главного корпуса», расположенного по адресу: 

<

...>» (отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей, отделение патологии беременных) (приложение №1,4,5 к контракту) (далее - работы) и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и размере, установленном настоящим контрактом, за счет средств субсидий на осуществление государственными учреждениями капитального ремонта. Идентификационный код закупки 19 32302000995230201001 0058 001 0000 000 (пункт 1.1 контракта № 59.2019).

Согласно пункту 2.1 контракта № 59.2019 цена контракта (стоимость работ) составляет 257 529 рублей 60 копеек, в том числе НДС не облагается (на основании ст. 346.11 НК РФ).

Согласно пункту 9.1 Контракта № 59.2019 качество работ, выполняемых по настоящему контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям и требованиям настоящего контракта, изложенным в технической документации, на протяжении гарантийного срока.

Пунктом 9.2 Контракта № 59.2019 установлено, что на выполненные работы Подрядчик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данные виды работ. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ.

В соответствии с пунктом 9.3 контракта № 59.2019 заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата выполненных работ, в течение установленного гарантийного срока. Подрядчик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, в том числе замену товара, используемого в результате выполненных работ, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Согласно пункту 9.4 контракта № 59.2019 при выявлении заказчиком недостатков выполненных работ составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) выполненных работ, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Пунктом 9.5 контракта № 59.2019 стороны согласовали, что течение гарантийного срока прерывается на время, в течение которого объект, на котором Подрядчиком выполнялись работы, предусмотренные настоящим контрактом, не мог эксплуатироваться вследствие выявленных заказчиком недостатков, возникших по вине Подрядчика.

Истец указывает, что работы ответчиком выполнены в полном объеме, членами приемочной комиссии в составе представителей  заказчика и подрядчика подписан акт приема (экспертизы) № 1  от 23.12.2019 на сумму 257 529,60 руб.

Платежным  поручением   № 301377 от 30.12.2019   Заказчиком   произведена оплата за выполненные работы в полном объеме.

Период Гарантийного срока на выполненные работы после подписания акта приема (экспертизы) продолжается  с 24.12.2019 года по 23.12.2022 года.

25.02.2022 по адресу электронной почты подрядчика, указанной в   контракте для целей переписки, заказчик направил  извещение с приглашением для участия в осмотре и составлении акта о выявленных недостатках. Подрядчик от явки на осмотр уклонился.

В течение гарантийного срока Заказчиком выявлены недостатки выполненных работ и составлен акт № 2 от 01.03.2022г. фиксирующий недостатки (дефекты) выполненных работ, а именно:

1) В отделении патологии беременных в столовой образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

2) В отделении патологии беременных в смотровой образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

3) В отделении патологии беременных в кабинете старшей медицинской сестры образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

4) В отделении патологии беременных в палате № 11 бокса № 2 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

5) В отделении патологии беременных в помещении распределения подачи кислорода образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

6) В отделении патологии беременных в столовой образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

7) В отделении патологии беременных на посту образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах и заедает поворотно -откидной механизм пластикового окна;

8) В отделении патологии беременных в комнате приема пищи образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

9) В отделении патологии беременных в палате № 10 в боксе № 16 и № 17 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

10) В отделении патологии беременных в палате № 9 в боксе № 14 и № 15 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

11) В отделении патологии беременных в палате № 8 в боксе № 13 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

12) В отделении патологииноворожденных в детской палате образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

13) В отделении патологииноворожденных в палате № 1 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

14) В отделении патологии новорожденных в палате № 2 в боксе № 1 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах и заедает поворотно-откидной механизм пластикового окна;

15) В отделении патологии новорожденных в палате № 3 в боксе № 1 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах и заедает поворотно-откидной механизм пластикового окна;

16) В отделении патологии новорожденных в палате № 4 в боксе № 1 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах.

Акт вручен заказчику 03.03.2022, что подтверждается подписью получателя с проставлением оттиска печати общества.

Недостатки    ответчиком не были устранены.

По условиям контракта № 50.2019 от 19.12.2019 подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по объекту: Капитальный ремонт «Замена оконных блоков главного корпуса», расположенного по адресу: 

<

...>» (акушерское обсервационное отделение 3 этаж, отделение новорожденных 2 этаж) (Приложение 1,4,5) (далее - работы) и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и размере, установленном настоящим контрактом, за счет субсидий на осуществление государственными учреждениями капитального ремонта. Идентификационный код закупки 19 32302000995230201001 0058 003 0000 000 (пункт 1.1 контракта № 50.2019).

Согласно пункту 2.1 контракта № 50.2019 цена контракта (стоимость работ) составляет 302 500 (триста две тысячи пятьсот рублей 02 копейки) рублей 02 копейки, в том числе НДС не облагается (на основании ст. 346.11 НК РФ).

Согласно пункту 9.1 Контракта № 50.2019 качество работ, выполняемых по настоящему контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям и требованиям настоящего контракта, изложенным в технической документации, на протяжении гарантийного срока.

Пунктом 9.2 Контракта № 50.2019 установлено, что на выполненные работы Подрядчик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данные виды работ. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ.

В соответствии с пунктом 9.3 Контракта № 50.2019 заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата выполненных работ, в течение установленного гарантийного срока. Подрядчик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, в том числе замену товара, используемого в результате выполненных работ, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Согласно пункту 9.4 Контракта № 50.2019 при выявлении Заказчиком недостатков выполненных работ составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) выполненных работ, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Пунктом 9.5 Контракта № 50.2019 стороны согласовали, что течение гарантийного срока прерывается на время, в течение которого объект, на котором Подрядчиком выполнялись работы, предусмотренные настоящим контрактом, не мог эксплуатироваться вследствие выявленных Заказчиком недостатков, возникших по вине Подрядчика.

Истец указывает, что работы ответчиком выполнены в полном объеме, членами приемочной комиссии в составе представителей  заказчика и подрядчика подписан акт приема (экспертизы) № 1  от 23.12.2019 на сумму 302 500,02 руб

Платежным  поручением № 301376 от 30.12.2019   Заказчиком   произведена оплата за выполненные работы в полном объеме в сумме 302 500,02 руб.

Период Гарантийного срока на выполненные работы после подписания акта приема (экспертизы) продолжается с 24.12.2019 по 23.12.2022.

25.02.2022 по адресу электронной почты подрядчика, указанной в   контракте для целей переписки, заказчик направил  извещение с приглашением для участия в осмотре и составлении акта о выявленных недостатках. Подрядчик от явки на осмотр уклонился.

В течение гарантийного срока Заказчиком выявлены следующие недостатки выполненных работ и составлен акт № 3 от 01.03.2022г. фиксирующий недостатки (дефекты) выполненных работ, а именно:

1) В Акушерско-обсервационном отделении в палате № 24 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

2) В Акушерско-обсервационном отделении в палате № 22 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах и заедает поворотно-откидной механизм пластикового окна;

3) В Акушерско-обсервационном отделении в палате № 21 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

4) В Акушерско-обсервационном отделении в палате № 20 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

5) В Акушерско-обсервационном отделении в палате № 19 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

6) В Акушерско-обсервационном отделении на посту образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

7) В Акушерско-обсервационном отделении в палате № 24 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

8) В Акушерско-обсервационном отделении в палате № 14 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

9) В Акушерско-обсервационном отделении в палате № 13 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

10) В Акушерско-обсервационном отделении в палате № 12 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

11) В Акушерско-обсервационном отделении в палате № 11 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

12) В Акушерско-обсервационном отделении в палате № 9 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

13) В Акушерско-обсервационном отделении в палате № 6 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

14) В Акушерско-обсервационном отделении в палате № 5 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

15) В Акушерско-обсервационном отделении в палате № 3 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

16) В Акушерско-обсервационном отделении в палате № 2 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

17) В Акушерско-обсервационном отделении в палате № 1 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

18) В Акушерско-обсервационном отделении в палате № 4 заедает поворотно-откидной механизм пластикового окна;

19) В Акушерско-обсервационном отделении в палате новорожденных заедает поворотно-откидной механизм пластикового окна;

20) В Акушерско-обсервационном отделении в сестринской новорожденных заедает поворотно-откидной механизм пластикового окна.

Акт вручен заказчику 03.03.2022, что подтверждается подписью получателя с проставлением оттиска печати общества.

однако,  недостатки   ответчиком не были устранены.

По условиям контракта № 34.2020 от 17.08.2020  подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по Капитальному ремонту «Замена оконных блоков главного корпуса», расположенного по адресу: 

<

...>» (далее - работы) и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и размере, установленном настоящим контрактом, за счет средств Субсидии на осуществление государственными учреждениями капитального ремонта. Идентификационный код закупки 20 32302000995230201001 0023 001 4332 244 (пункт 1.1 контракта № 34.2020).

Согласно пункту 2.1 контракта № 34.2020 цена контракта (стоимость работ) составляет 2 600 400.92 (два миллиона шестьсот тысяч четыреста рублей 92 копейки), в том числе НДС не предусмотрен (на основании ст. 346.11 НК РФ).

Согласно пункту 9.1 Контракта № 34.2020 качество работ, выполняемых по настоящему контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям и требованиям настоящего контракта, изложенным в технической документации, на протяжении гарантийного срока.

Пунктом 9.2 Контракта № 34.2020 установлено, что на выполненные работы Подрядчик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данные виды работ. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ.

В соответствии с пунктом 9.3 Контракта № 34.2020 заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата выполненных работ, в течение установленного гарантийного срока. Подрядчик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, в том числе замену товара, используемого в результате выполненных работ, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Согласно пункту 9.4 Контракта № 34.2020 при выявлении Заказчиком недостатков выполненных работ составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) выполненных работ, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Пунктом 9.5 Контракта № 34.2020 стороны согласовали, что течение гарантийного срока прерывается на время, в течение которого объект, на котором Подрядчиком выполнялись работы, предусмотренные настоящим контрактом, не мог эксплуатироваться вследствие выявленных Заказчиком недостатков, возникших по вине Подрядчика.

В ходе исполнения контракта заказчик направлял подрядчику претензионные письма №1054 от 30.10.2020г., №1074 от 09.11.2020г., № 1152 от 30.11.2020г., № 1197 от 14.12.2020г., № 1213 от 29.12.2020г., № 61 от 01.02.2021г., б/н от 08.02.2021г., № 202 от 16.03.2021г., № 234 от 29.03.2021г., № 320 от 28.04.2021г., № 452 от 29.06.2021г, указывая подрядчику на    нарушение срока исполнения контракта.

14.09.2020г в адрес подрядчика направлено уведомление об одностороннем отказе от исполнения контракта № 917   из-за нарушения срока исполнения обязательств. Решение заказчиком было отменено в связи с тем, что ООО «АКТИВСТРОЙ» приступил к выполнению работ по замене оконных блоков главного корпуса.

Работы  по контракту № 34.2020 от 17.08.2020   подрядчиком выполнены не в полном объеме.

Сторонами  подписаны и заказчиком оплачены:

1) Акт № 1 от 22.12.2020 года на сумму 1 216 847,00 рублей; оплачен 29.12.2020 платежное поручение № 399126 от 29.12.2020г.;

2) Акт № 2 от 12.03.2021 года на сумму 930 044,00 рублей; оплачен 22.03.2021 платежное поручение № 405052 от 22.03.2021 г.;

3) Акт № 3 от 23.08.2021 года на сумму 240 932,00 рублей;  оплачен 06.09.2021 платежное поручение № 492592 от 06.09.2021 г.

Дополнительным соглашением от 20.10.2021 контракт расторгнут сторонами в части оставшихся  невыполненными работ на сумму 212 577,92 руб.

Период Гарантийного срока на выполненные работы после подписания акта приема (экспертизы) от   24.12.2020     № 1 от 22.12.2020г.  продолжался с 24.12.2020 по 23.12.2023. 

25.02.2022 по адресу электронной почты подрядчика, указанной в   контракте для целей переписки, заказчик направил  извещение с приглашением для участия в осмотре и составлении акта о выявленных недостатках. Подрядчик от явки на осмотр уклонился.

Заказчиком в гарантийный период выявлены недостатки:

1) В гинекологическом отделении в смотровом кабинете образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

В гинекологическом отделении в санитарной комнате образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

2) В гинекологическом отделении в палате № 6 в боксе № 1 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

3) В гинекологическом отделении в палате № 6 в боксе № 2 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

4) В гинекологическом отделении в палате № 6 в боксе № 3 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

5) В гинекологическом отделении на посту № 2 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

6) В гинекологическом отделении в кабинете старшей медицинской сестры образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

7) В гинекологическом отделении в палате № 5 в боксе № 1 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах и заедает поворотно-откидной механизм пластикового окна;

8) В гинекологическом отделении в комнате отдыха образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

9) В гинекологическом отделении в коридоре около двери на балкон со стороны столовой образовались щель между окном и дверью;

10) В гинекологическом отделении в коридоре около двери на балкон со стороны отделения заедает поворотно-откидной механизм пластикового окна;

11) В гинекологическом отделении в коридоре около кабинета заведующего трещина на стеклопакете;

12) В гинекологическом отделении в обортной трещина на стеклопакете;

13) В гинекологическом отделении на лестничных клетках со стороны ДЭС (7 дверь) образовались трещины на оштукатуренных- отшпаклеванных откосах

14) отделении в палате № 5 в боксе № 2 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах и заедает поворотно-откидной механизм пластикового окна;

15) В гинекологическом отделении в столовой образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

Период Гарантийного срока на выполненные работы после подписания акта приема (экспертизы) от 12.03.2021   № 2  исчисляется  с 12.03.2021 года по 11.03.2024 года. В  гарантийный срок заказчиком выявлены недостатки  :

1) В отделении анестезиологии-реанимации в процедурном кабинете образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

2) В отделении анестезиологии-реанимации в рентгеновском кабинете пробит подоконник с момента установки его ООО «АктивСтрой» и заедает поворотно-откидной механизм пластикового окна;

3) В отделении анестезиологии-реанимации в ординаторской заедает поворотно-откидной механизм пластикового окна;

4) В отделении патологии беременных в палате № 3 бокс № 2 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

5) В отделении патологии беременных в палате № 1 бокс № 1 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

6) В отделении патологии беременных в палате № 1 бокс № 2 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

7) В отделении патологии беременных в палате № 1 бокс № 3 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

8) В отделении патологии беременных в бокс № 1 заедает поворотно-откидной механизм пластикового окна;

9) В отделении новорожденных в коридоре около санитарной комнаты образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

10) В отделении новорожденных в палате № 14 в боксе № 21 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

11) В отделении новорожденных в палате № 12 в боксе № 1 образовались щели в окне;

12) В отделении новорожденных в палате № 11 в боксе № 1 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

13) В отделении новорожденных в палате № И в боксе № 2 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

14) В отделении новорожденных в палате №11 в боксе № 3 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

15) В отделении новорожденных в палате № 10 в боксе № 2 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

16) В акушерско-физиологическом отделении в смотровой № 2 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

17) В акушерско-физиологическом отделении в кабинете сестры – хозяйки образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

18) В акушерско-физиологическом отделении в кабинете старшей акушерки образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

19) В акушерско-физиологическом отделении в палате № 9 в боксе № 2 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах и заедает поворотно-откидной механизм пластикового окна;

20) В акушерско-физиологическом отделении в палате № 9 в боксе № 1 Образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

21) В акушерско-физиологическом отделении в палате № 8 в боксе № 1 Образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

22) В акушерско-физиологическом отделении в палате № 8 в боксе № 2 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

23) В акушерско-физиологическом отделении в палате № 7 в боксе №1 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

24) В акушерско-физиологическом отделении в палате № 6 в боксе №1 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

25) В акушерско-физиологическом отделении в палате № 6 в боксе № 2образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

26) В акушерско-физиологическом отделении в палате № 5 в боксе № 1 Образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

27) В акушерско-физиологическом отделении в палате № 5 в боксе № 2 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

28) В акушерско-физиологическом отделении в палате № 2 в боксе № 2 образовались трещины на оштукатуренных-отшпаклеванных откосах;

Период Гарантийного срока на выполненные работы после подписания акта приема (экспертизы) от 03.09.2021   № 3  продолжался с 03.09.2021   по 02.09.2024.

Выявив  недостатки выполненных работ, заказчик составил акт № 4 от 01.03.2022г. фиксирующий недостатки (дефекты) выполненных работ, экземпляр  которого  вручен заказчику 03.03.2022, что подтверждается подписью получателя с проставлением оттиска печати общества.

По Акту № 3 от 23.08.2021   на сумму 240 932,00 рублей   недостатков не выявлено.

01.03.2022 истец вручил  ответчику   претензию с требованием устранить выявленные недостатки, а именно: 

1. В процедурном кабинете, на первом этаже главного корпуса на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

2. Рентгеновском кабинете необходимо выполнить регулировку створки, также пробит подоконник (необходимо заменить подоконник);

3. Ординаторская необходимо выполнить регулировку створки, также пробит подоконник (необходимо заменить подоконник);

Отделение паталогии беременных:

1. В столовой на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

2. В смотровой, на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

3. В кабинете старшей на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

4. В палате № 11 бокс №2 на оконном блоке 420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

5. В помещении распределении подачи кислорода на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

6. Пост необходимо выполнить регулировку створки, на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

7. В комнате приема пищи, на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

8. В палате № 10 бокс 16,17 на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

9. В палате № 9 бокс 14,15 на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

10. В палате № 8 бокс 13 на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

11. В палате № 3 бокс 2 на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

12. В палате № 1 бокс 1, 2, 3 на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса, в боксе №1 необходимо выполнить регулировку створки;

Лаборатория

В коридоре возле кабинете микро сканирования необходимо выполнить регулировку створки;

2 этаж Отделение новорождённых:

1. Окно в коридоре возле санитарной комнаты на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

2. В палате № 14 в боксе № 2 наоконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

3. Палата №21 на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

4. Палата №20 на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

5. Палата №19 на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

6. Пост на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

7. Палата №14 на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

8. Палата №13 на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

9. Палата №12 на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

10.Палата №11 на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

11. Палата №9 на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

12. Палата №6 на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

13. Палата №5 на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

14. Палата №1,2 на оконном откосе появились трещины (необходимо выполнить расчистку трещины, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса);

15. Палата новорожденных необходимо выполнить регулировку створки;

16. В сестринской необходимо выполнить регулировку створки;

17. Палата №3 на оконном откосе появились трещины (необходимо выполнить расчистку трещины, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса);

18. Палата №4 необходимо выполнить регулировку створки.

Отделение патологии новорожденных:

19. В детской палате на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360 мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

3. В палате №12 в боксе №1 из щелей окна сильно дует (необходимо выполнить регулировку створки);

4. В палате №11 в боксе №1,2,3 на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

5. В палате №10 в боксе №2 на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

Акушерское физиологическое отделение

6. В смотровой №2 на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

7. В кабинете сестры хозяйки на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

8. В кабинете старшей акушерки на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

9. В палате №9 в боксе №2 необходимо выполнить регулировку створки, на оконных откосах появились трещины (необходимо выполнить расчистку трещины, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса);

10. В палате №9 в боксе №1 на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

11. В палате №8 в боксе №1,2 на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

12. В палате №7 в боксе №1 на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

13. В палате №6 в боксе №1,2 на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

14. В палате №5 в боксе №1,2 на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

15. В палате №2 в боксе №2 на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

3-й этаж Акушерско обсервационное отделение:

1. Палата №24 на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

20. Палата №1 в боксе №1 на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

21. Палата №2 в боксе №1 необходимо выполнить регулировку створки на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

22. Палата №3 в боксе №1 необходимо выполнить регулировку створки на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

23. Палата №4 в боксе №1 на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

4 этаж (Гинекологическое отделение)

1. В палате №2 на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

2. В палате №4 в боксе №2 на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

3. В палате №4 в боксе №1 на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

4. В палате №3 в боксе №1 на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса, необходимо заменить стеклопакет;

5. В палате №3 в боксе №1 на оконном блоке 1420* 1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

6. В смотровом кабинете 2 паста на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

7. В санитарной комнате на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

8. В палате №6 в боксе №1,2,3 на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

9. На посту №2 на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

10. В кабинете старшей медсестры на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360 мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

11.Палата №5 в боксе № 1,2 необходимо выполнить регулировку створки на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску.

12. В столовой на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

13. В комнате отдыха на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

14. В коридоре возле двери на балкон со стороны отделения необходимо выполнить регулировку створки;

15. В коридоре возле кабинета заведующего трещина на стеклопакете (необходимо заменить стеклопакет);

16. В абортной трещина на стеклопакете (необходимо заменить стеклопакет);

17. На лестничных клетках со стороны ДЭС (7 дверь) на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса.

Ответ на претензию  подрядчик заказчику не направил.

Возражения в отношении полученных актов о недостатках работ от 01.03.2022 заказчику не предоставил.

30.03.2022 заказчик вручил подрядчику извещение о недостатках и пригласил подрядчика явиться в трехдневный срок для осмотра и фиксации. 

Подрядчик на осмотр не явился.

04.04.2022 заказчик составил в одностороннем порядке акты  недостатков (дефектов) выполненных работ по каждому из четырех заключенных контрактов и приложил их к претензии от 04.04.2022 с требованием об устранении недостатков, направленной по юридическому адресу подрядчика.

Кроме того,  истец начислил подрядчику штраф за нарушение обязательств по  контракту № 34.2020 от 17.08.2020   , руководствуясь тем, что согласно пункта 6.7 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере 1000 рублей, определенном согласно Постановлению № 1042: а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

Согласно расчету истца сумма штрафа составила 85 000 руб.

В претензии от 04.04.2022 заказчик потребовал от подрядчика уплатить штраф.

Уклонение ответчика от исполнения требований изложенных в претензии, послужило основанием для обращения в суд.

Ответчик отзыв в материалы дела не направил, исковые требования не опроверг, каких либо иных документальных доказательств, свидетельствующих об опровержении доводов истца в материалы дела не представил.

Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК РФ, суд признал исковые требования истца подлежащими частичному удовлетворению на основании следующего.

Спорные правоотношения   возникли из контрактов на выполнение подрядных работ, в силу чего подлежат  правовому регулированию общими нормами обязательственного права части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, нормами главы 37 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, а так же специальному регулированию нормами Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Закон №44-ФЗ). 

В соответствии с положениями статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации, подрядные строительные работы (статья 740 Гражданского кодекса Российской Федерации), проектные и изыскательские работы (статья 758 Гражданского кодекса Российской Федерации), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату. 

В соответствии с положениями статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.   

По правилам ст.740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Подписание актов выполненных работ (услуг) свидетельствует о потребительской ценности для ответчика полученного результата, желании им воспользоваться и устанавливает обязанность уплатить денежные средства. 

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации, качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода. 

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации, если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями. 

В соответствии с положениями пункта статьи 722 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721). 

В соответствии с положениями статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с    иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397). Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или после его приемки в течение гарантийного срока, а если он не установлен, - разумного срока, но не позднее двух лет (для недвижимого имущества - пяти лет) со дня приемки результата работы, заказчик вправе по своему выбору осуществить одно из предусмотренных в статье 723 настоящего Кодекса прав либо потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами. В соответствии с положениями пункта 3 статьи 724 Гражданского кодекса Российской Федерации, заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока. 

В соответствии с положениями статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений. 

Бремя доказывания надлежащего качества  выполненных работ в гарантийный срок в силу ст.65 АПК РФ лежит на подрядчике.

В соответствии с пунктом 5 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации при возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. 

По смыслу данной нормы допустимым доказательством при разрешении спора по качеству выполненных работ является заключение эксперта; иные доказательства могут лишь свидетельствовать о наличии между сторонами спора по качеству работ. В случае если такое ходатайство не поступило или согласие не было получено, оценка требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом положений статьи 65 АПК РФ о бремени доказывания исходя из принципа состязательности, согласно которому риск наступления последствий несовершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле (часть 2 статьи 9 АПК РФ). 7 А32-41718/2021 

Суд  предлагал обсудить вопрос о проведении судебной экспертизы. 

Ответчиком ходатайство о проведении судебной экспертизы не заявлено; исковые требования надлежащими доказательствами не опровергнуты. 

Согласно отраженному в постановлении от 06.03.2012 N 12505/11 правовому подходу Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, с точки зрения состязательности как основы судопроизводства в арбитражном суде нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения. 

Исследовав конкретные обстоятельства настоящего дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности  и во взаимной связи  в их совокупности ,  суд пришел к выводу о доказанности недостатков работ выполненных ответчиком. Наличие со стороны подрядчика устранить недостатки и совершить действия, указанные истцом в иске с учетом ходатайства об уточнении.

В соответствии   со ст.174 АПК РФ при принятии решения, обязывающего организацию совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения может указать руководителя или иное лицо, на которых возлагается исполнение решения, а также срок исполнения.

Суд  признает разумным и  достаточным срок  устранения недостатков  продолжительностью  30 рабочих дней с момента вступления решения в законную силу.

За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств контракта № 34.2020 от 17.08.2020  , заказчик предъявил ко взысканию  штраф в размере 85000 руб., указывая, что согласно пункта 6.7 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере 1000 рублей, определенном согласно Постановлению № 1042: а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

Согласно расчету истца сумма штрафа составила 85 000 руб.

Между тем, истцом  не учтено следующее.

Согласно  пункту 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. 

Согласно прямому указанию контрактного законодательства, штраф не может применяться в случаях просрочки исполнения обязательств. 

Вместе с тем,   из содержания искового заявления следует, к взысканию предъявлен именно штраф, рассчитанный исключительно за нарушение срока устранения недостатков в выполненных работах. 

Поскольку условиями  контракта № 34.2020 от 17.08.2020 исключается применение ответственности в виде штрафа за просрочку исполнения обязательств, постольку оснований для удовлетворения иска у суда не имеется. Действительно ответчиком доказательств выполнения работ, соответствующих требованиям государственного контракта № 34.2020 от 17.08.2020, не представлено.  Но в настоящем случае основания для взыскания штрафа отсутствуют, поскольку имеется просрочка исполнения обязательства. Такой правовой подход выражен в постановлениях Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда по делам № А32-8145/2022, А32-16750/2022.

При этом истец не заявлял о взыскании пени за просрочку выполнения работ. В иске в этой части следует отказать.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При подаче иска истцом уплачено 3400 руб за рассмотрение требования имущественного характера. Данные расходы возмещению не подлежат.

Обязанность по уплате госпошлины за рассмотрение требования неимущественного характера на сумму 6000 руб следует возложить на ответчика.

Руководствуясь статьями 49, 65, 70, 106, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Активстрой»(ИНН 

<

***>) в  срок 30 рабочих дней с даты вступления решения в законную силу устранить недостатки  работ    по «Капитальному ремонту «Замена оконных блоков главного корпуса, расположенного по адресу: 

<

...>»:

 Отделение реанимации:

1.В процедурном кабинете, на первом этаже главного корпуса на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

2.Рентгеновском кабинете необходимо выполнить регулировку створки, также пробит подоконник (необходимо заменить подоконник);

3.Ординаторская необходимо выполнить регулировку створки;

Отделение патологии беременных

1.В столовой на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

2.В смотровой,  на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

3.В кабинете старшей на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

4.В палате №11 бокс №2 на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

5.В помещении распределении подачи кислорода на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

6.Пост необходимо выполнить регулировку створки, на оконном блоке 1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

7.В комнате приема пищи, на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

8.В палате № 10 бокс 16,17 на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

9.В палате № 9 бокс 14,15 на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

10.В палате № 8 бокс 13 на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

11.В палате № 3 бокс 2 на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

12. В палате № 1 бокс 1, 2, 3 на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса, в боксе №1 необходимо выполнить регулировку створки;

Лаборатория

В коридоре возле кабинете микро сканирования необходимо выполнить регулировку створки;

2 этаж

Отделение новорождённых

1.Окно в коридоре возле санитарной комнаты на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

2.В палате №14 в боксе №2 на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

3.В палате №12 в боксе №1 из щелей окна сильно дует (необходимо выполнить регулировку створки);

4.В палате №11 в боксе №1,2,3 на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

5.В палате №10 в боксе №2 на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

Акушерское физиологическое отделение

6.В смотровой №2 на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

7.В кабинете сестры хозяйки на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

8.В кабинете старшей акушерки на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

9.В палате №9 в боксе №2 необходимо выполнить регулировку створки, на оконных откосах появились трещины (необходимо выполнить расчистку трещины, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса);

10.В палате №9 в боксе №1 на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

11.В палате №8 в боксе №1,2 на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

12.В палате №7 в боксе №1 на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

13.В палате №6 в боксе №1,2 на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

14.В палате №5 в боксе №1,2 на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

15.В палате №2 в боксе №2 на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

3этаж

Акушерско обсервационное отделение

1.Палата №24 на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

2.Палата №22 необходимо выполнить регулировку створки, на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

3.Палата №21 на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

4.Палата №20 на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

5.Палата №19 на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

6.Пост на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

7.Палата №14 на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

8.Палата №13 на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

9.Палата №12 на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

10.Палата №11 на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

11.Палата №9 на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

12.Палата №6 на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

13.Палата №5 на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

14.Палата №1,2 на оконном откосе появились трещины(необходимо выполнить расчистку трещины, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса);

15.Палата новорожденных необходимо выполнить регулировку створки;

16.В сестринской необходимо выполнить регулировку створки;

17.Палата №3 на оконном откосе появились трещины(необходимо выполнить расчистку трещины, установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса);

18.Палата №4 необходимо выполнить регулировку створки.

Отделение патологии новорожденных

19.В детской палате на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

20.Палата №1 в боксе №1 на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

21.Палата №2 в боксе №1 необходимо выполнить регулировку створки на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

22.Палата №3 в боксе №1 необходимо выполнить регулировку створки на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

23.Палата №4 в боксе №1 на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

4 этаж 

(Гинекологическое отделение)

1.В палате №2 на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

2.В палате №4 в боксе №2 на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

3.В палате №4 в боксе №1 на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

4.В палате №3 в боксе №1  на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса, необходимо заменить стеклопакет;

5.В палате №3 в боксе №1 на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

6.В смотровом кабинете 2 паста на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

7.В санитарной комнате на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

8.В палате №6 в боксе №1,2,3 на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

9.На посту №2 на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

10.В кабинете старшей медсестры на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

11.Палата №5   в боксе №1,2  необходимо выполнить регулировку створки на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску.

12.В столовой на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

13.В комнате отдыха на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса;

14.В коридоре возле двери на балкон со стороны отделения необходимо выполнить регулировку створки;

15.В коридоре возле кабинета заведующего трещина на стеклопакете (необходимо заменить стеклопакет);

16.В обортной трещина на стеклопакете (необходимо заменить стеклопакет);

17.На лестничных клетках со стороны ДЭС (7 дверь) на оконном блоке  1420*1760 выполнить расчистку трещины шириной 360мм , установить армирующую сетку, зашпаклевать и выполнить окраску откоса.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Активстрой»(ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6000 руб госпошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший решение.

Судья      С.А. Баганина