Именем Российской Федерации

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

26. 08. 2022 года.                                                          Дело № А40-52529/22-43-371

Резолютивная часть решения объявлена 23. 08. 2022 года.

Решение изготовлено в полном объеме 26. 08. 2022 года.

Судья Арбитражного суда г. Москвы ФИО1, единолично,

протокол судебного заседания вёл помощник судьи Гусейнова К.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

АО " Российские космические системы " (ОГРН 

<

***>)

к ООО " ФГ "Диамант " (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 1 183 342 руб. 44 коп. – суммы неотработанного аванса, пени, процентов за пользование чужими денежными средствами, проценты за пользование чужими денежными средствами по день фактической уплаты суммы неотработанного аванса,

с участием представителей: от истца – ФИО2, доверенность № 354 от 17.05.2021 г., ФИО3, доверенность № 239д от 28.05.2022 г., от ответчика – не явился.

Изучив имеющиеся в деле документы, заслушав представителя, арбитражный суд

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  :

Иск заявлен о взыскании 1 183 342 руб. 44 коп. – суммы неотработанного аванса, пени, процентов за пользование чужими денежными средствами, проценты за пользование чужими денежными средствами по день фактической уплаты суммы неотработанного аванса, на основании статей 309, 310, 395  ГК РФ.

Истец направил в судебное заседание представителей, которые поддержали предъявленный иск по основаниям изложенным в исковом заявлении; не согласились с доводами ответчика против иска, изложенным в отзыве на исковое заявление по основаниям изложенным в возражениях на отзыв ответчика, возражали против удовлетворения ходатайства ответчика об оставлении искового заявления без рассмотрения, указывая на необоснованность ходатайства, представили истребованные судом и дополнительные документы; предъявили подлинники документов, имеющихся в деле в виде копий, каких-либо ходатайств не заявили.

Ответчик не направил представителя в судебное заседание, о времени и месте судебного заседания извещен в установленном порядке, в соответствии со статьями 121-124 АПК РФ; представил по электронной почте отзыв на исковое заявление, в котором иск в заявленной сумме не признал, заявил ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения; истребованные судом документы, опровергающие иск не предъявил; расчет истца оспорил по основаниям изложенным в отзыве без представления какого-либо контррасчёта; каких-либо ходатайств не заявил.

Ходатайство ответчика об оставлении искового заявления без рассмотрения, принимая во внимание возражения истца, имеющиеся в деле документы и обстоятельства дела. по мнению суда, следует оставить без удовлетворения за необоснованностью и недоказанностью в связи с отсутствием оснований предусмотренных ст. 148 АПК РФ (ссылок ответчика на какое либо основание предусмотренное ст. 148 АПК РФ в ходатайстве не имеется). 

Дело рассмотрено в соответствии с порядком предусмотренным ст. 156 АПК РФ, по имеющимся в деле документам, представленным истцом и ответчиком, в отсутствие представителя ответчика.

Суд, с учетом изложенных истцом и ответчиком обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела документами, пришел к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства:

Между АО «Российские космические системы» (Заказчик, Истец) и ООО ФГ «Диамант» (Исполнитель, Ответчик) заключен договор от 20.02.2021 № У-6502/21/12.

Согласно п. 1.1 Договора, Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту помещения склада № 1 по адресу: Московская область, Щелковский район, пос. Свердловский, филиал «Осеево» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и Локальной сметой (Приложение № 2 к Договору).

Цена Договора составляет 2 698 370 руб. (п. 2.1. Договора).

Во исполнение п. 2.2.1. Договора Истец перечислил Ответчику аванс в размере 30% от цены Договора, что составило 809 511,00 рублей (платежное поручение от 10.03.2021 № 5426).

В соответствии с п. 4.1 Договора, срок выполнение работ составляет 30 рабочих дней с момента подписания Договора и выплаты аванса.

Таким образом, Ответчик обязан выполнить работы по ремонту помещения склада № 1 в срок до 21.04.2021.

В нарушение ст. 309, 310 ГК РФ Ответчик не исполнил обязанность по качественному выполнению работ в установленный срок.

В соответствии с п. 2 ст. 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно   к  исполнению   договора  подряда  или   выполняет  работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Заказчик направил в адрес Исполнителя уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора от 12.08.2021 № РКС 29-218 в связи с ненадлежащим исполнением обязательств со стороны ООО ФТ «Диамант» (далее - Уведомление).

Согласно Уведомлению, Договор считается расторгнутым через 10 дней с даты уведомления Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора.

В соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК РФ Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Исходя  из смысла указанной  нормы, обязательства из неосновательного обогащения возникают при одновременном наличии трех условий: факту приобретения или сбережения имущества, то есть увеличения стоимости  собственного  имущества приобретателя, присоединения к нему новых ценностей или сохранение того  имущества, которое по всем законным основаниям неминуемо должно было выйти из состава его имущества; приобретение или сбережение имущества за  счет другого лица, а также отсутствие правовых оснований приобретения или сбережения имущества одним лицом за  счет другого.

Поскольку договор между сторонами расторгнут, работы по договору Ответчиком не выполнены, то основания для удержания суммы авансового платежа отсутствуют .

Доводы Ответчика не принимаются судом, в нарушение положений ст. 65 АПК РФ Ответчиком в материалы дела не предоставлены доказательства частичной оплаты задолженности по договору от 20.02.2021 № У6502/21/12, неустойки за просрочку исполнения обязательств и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Требование истца о взыскании неотработанного аванса в сумме 809 511 руб. 00 коп. – законное и обоснованное, подтверждено, имеющимися в деле документами, представленными истцом, не оспорено и не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

В соответствии с ч. 2 ст. 1107 ГК РФ « На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств».

Пунктом 1 статьи 395 ГК РФ предусмотрена ответственность за неисполнение денежного обязательства, в соответствии с которой, за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. 

Требование истца о взыскании процентов в сумме 31 138 руб. 45 коп. - законное, обоснованное, подтверждено имеющимися в деле документами, представленными истцом, не оспорено и не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению в соответствии с представленным истцом расчетом.

Требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами из расчёта ключевой ставки Банка России за соответствующие периоды от 809 511 руб. 00 коп. за каждый день просрочки платежа в период с 01.03.2022 г. по день фактической уплаты суммы неотработанного аванса, также подлежит удовлетворению, поскольку в соответствии с п. 3 ст. 395 ГК РФ, проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок, в соответствии с  п. 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

За нарушение установленных Договоров сроков окончания работ Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки (п. 7.1. Договора)

Пеня за нарушение сроков исполнения обязательств по Договору за период с 22.04.2021 по 26.08.2021 составляет 342 692,99 руб.

Требование истца о взыскании пени в сумме 342 692 руб. 99 коп. –законное и обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле документами, расчетом, представленными истцом, не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению. 

Расходы по уплате госпошлины, в соответствии со статьями 110, 112 АПК РФ, относятся на Ответчика. 

В соответствии с изложенным, на основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 328, 329-331, 395, 401, 420-424, 431-434, 450, 452, 453, 702, 709, 711, 720, 740, 746, 753, 1102, 1103, 1107 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 81, 110, 112, 121-124, 148, 155, 156, 159, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л  :

Ходатайство ответчика об оставлении искового заявления без рассмотрения оставить без удовлетворения.

Взыскать с ООО " ФГ "Диамант " (ОГРН 

<

***>) в пользу АО " Российские космические системы " (ОГРН 

<

***>) 1 183 342 руб. 44 коп., в том числе: 809 511 руб. 00 коп. – суммы неотработанного аванса, 342 692 руб. 99 коп. – пени, 31 138 руб. 45 коп. - процентов, проценты за пользование чужими денежными средствами из расчёта ключевой ставки Банка России за соответствующие периоды от 809 511 руб. 00 коп. за каждый день просрочки платежа в период с 01.03.2022 г. по день фактической уплаты суммы неотработанного аванса и расходы по уплате госпошлины в сумме 24 833 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

 

Судья

ФИО1