АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 1, https://krasnoyarsk.arbitr.ru/

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Именем Российской Федерации

 

25 апреля 2024 года

 

Дело № А33-5318/2024

 

Руководствуясь статьями 15, 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

отказать в удовлетворении ходатайства публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные решения» о рассмотрении настоящего дела по общим правилам искового производства.

Исковые требования удовлетворить.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение календарного месяца со дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.8149.22 от 01.08.2022, осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя объекта «опора двойного назначения», расположенного (который будет располагаться) по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Елены Стасовой, в границах кадастрового квартала 24:50:0100486, в точке присоединения:

I точка присоединения: максимальная мощность 15 кВт.

Линия (0,4)                    Проектируемая

Ячейка ТП                     Присоединение ЛЭП № 6

ТП                                   ТП 3231

ПС                                  ПС № 126 «Радиотехническая» 110/10 кВ

Основной источник питания: ПС № 126 «Радиотехническая» 110/10 кВ

Резервный источник питания: отсутствует.

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт;

- категория надежности третья;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует;

включая мероприятия согласно Техническим условиям № 8000514897:

- выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласование со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством;

- определить проектом необходимость установки автоматического выключателя 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП 3231;

- от РУ 0,4 кВ ТП 3231 до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, запроектировать и построить ЛЭП 0,4 кВ. Способ прокладки линии, марку и сечение провода определить проектом.

Удовлетворить ходатайство публичного акционерного общества «Россети Сибирь» о снижении неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации частично в части снижения судебной неустойки, оснований для применения статьи 333 ГК РФ к договорной неустойке суд не усматривает.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные решения» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 21 436,87 руб. договорной неустойки за период с 03.02.2023 по 20.02.2024, а также пени с 21.02.2024 по день фактического исполнения обязательства из расчета 55,97 руб. за каждый день просрочки и 8000 руб. судебных расходов по уплате госпошлины.

В случае неисполнения решения суда в полном объёме в течение календарного месяца со дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные решения» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебную неустойку в размере 1000 руб. за каждый день неисполнения решения суда по настоящему делу до фактического исполнения решения суда.

В остальной части в удовлетворении требования о взыскании судебной неустойки отказать.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя.

 

Судья

ФИО1