АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

 

 

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-661/2024

г. Чебоксары

15 марта 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 12.03.2024.

Полный текст решения изготовлен 15.03.2024.

 

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Юрусовой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Столяровой Е.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Чувашлифт", ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Россия 428024, г. Чебоксары, Чувашская Республика-Чувашия, пр. Мира д. 58, оф. 1

к обществу с ограниченной ответственностью "Стройтех", ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Россия 428034, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, ул. Филиппа Лукина д. 5, помещ. 13

о взыскании 5854033 руб. 84 коп.,

без участия сторон, 

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Чувашлифт" обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Стройтех" о взыскании 5854033 руб. 84 коп., в том числе: 4362519 руб. 70 коп. долга, 1491514 руб. 14 коп. неустойки за период с 23.06.2022 по 19.01.2024.

Иск обоснован неисполнением ответчиком обязательств по оплате выполненных истцом строительно-монтажных работ за период с мая 2022 года по сентябрь 2023 года в рамках договора подряда от 25.03.2022 № 01-12-01/22.    

Истец, надлежаще извещенный о времени и месте судебного заседания, явку представителя в судебное заседание не обеспечил.

Ответчик, надлежаще извещенный о времени и месте судебного заседания, явку представителя в судебное заседание не обеспечил; отзыв суду не представил. 

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителей сторон.

Изучив материалы дела, суд установил следующее. 

Обществом с ограниченной ответственностью "Стройтех" (генподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Чувашлифт" (подрядчик) заключен договор подряда от 25.03.2022 № 01-12-01/22, согласно условиям которого подрядчик по заданию генподрядчика принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ в соответствии с приложением № 1 к настоящему договору на объекте: "Многоквартирный жилой дом с предприятиями обслуживания (позиция 83). Завершение строительства", расположенный на земельном участке с кадастровым номером 21:01:030102:253, площадью 3216 кв.м, по адресу: 

<

...>. Идентификатор объекта р-14445" (л.д. 10-13).

В соответствии с пунктом 1.4 работы по настоящему договору выполняются в рамках договора от 21.02.2022 № 1СМР/р-14445 на выполнение работ по завершению строительства объекта "Многоквартирный жилой дом с предприятиями обслуживания (позиция 83). Завершение строительства", расположенный на земельном участке с кадастровым номером 21:01:030102:253, площадью 3216 кв.м, по адресу: 

<

...>. Идентификатор объекта р-14445", заключенного заказчиком в некоммерческой организацией  "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Чувашской Республике" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

Согласно пункту 3.1 договора сроки выполнения работ:

- начало демонтажных работ: в течение трех рабочих дней с даты подписания договора. Продолжительность демонтажных работ составляет двадцать рабочих дней;

- начало выполнения монтажных работ: с момента подписания акта готовности строительной части. Продолжительность монтажных работ составляет 25 рабочих дней  для каждого лифта;

- начало выполнения пусконаладочных работ: с даты подписания акта готовности лифта к производству механико-регулировочных и пусконаладочных работ (ГОСТ 22845-2018 "Лифты электрические. Монтаж и пусконаладочные работы" Приложение Е). Продолжительность пусконаладочных работ составляет пятнадцать рабочих дней для каждого лифта;

- организация проведения полного технического освидетельствования лифта составляет пять рабочих дней для каждого лифта, после готовности лифта к проведению данному виду работ;

- регистрация декларации соответствия лифта составляет пять рабочих дней для каждого лифта, после готовности лифта к проведению данному виду работ;

- сроки выполнения могут быть согласованы сторонами путем подписания графика производства работ.

Стоимость поручаемых подрядчику работ по настоящему договору является фиксированной и составляет 3991040 (Три миллиона девятьсот девяносто одна тысяча сорок) руб., в том числе НДС 20% - 665173 руб. 33 коп., согласно "Протокола согласования договорной цены на комплекс работ" – Приложение № 1 к договору (пункт 6.1 договора).

Согласно пункту 1 дополнительного соглашения от 16.12.2022 № 1 к договору подряда от 25.03.2022 № 01-12-01/22 внесены изменения в пункт 6.1 договора в следующей редакции: "Стоимость поручаемых подрядчику работ по настоящему договору является фиксированной и составляет 4084119 (Четыре миллиона восемьдесят четыре тысячи сто девятнадцать) руб. 70 коп., в том числе НДС 20% - 680686 руб. 62 коп., согласно "Протокола согласования договорной цены на комплекс работ" – Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1 к договору подряда от 25.03.2022 № 01-12-01/22" (л.д. 14).

Согласно пункту 1 дополнительного соглашения от 03.03.2023 № 2 к договору подряда от 25.03.2022 № 01-12-01/22 внесены изменения в пункт 6.1 договора в следующей редакции: "Стоимость поручаемых подрядчику работ по настоящему договору является фиксированной и составляет 4240119 (Четыре миллиона двести сорок тысяч сто девятнадцать) руб. 70 коп., в том числе НДС 20% - 706686 руб. 62 коп., согласно "Протокола согласования договорной цены на комплекс работ" – Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 2 к договору подряда от 25.03.2022 № 01-12-01/22" (л.д. 15). 

Согласно пункту 1 дополнительного соглашения от 13.04.2023 № 3 к договору подряда от 25.03.2022 № 01-12-01/22 внесены изменения в пункт 6.1 договора в следующей редакции: "Стоимость поручаемых подрядчику работ по настоящему договору является фиксированной и составляет 4362519 (Четыре миллиона триста шестьдесят две тысячи пятьсот девятнадцать) руб. 70 коп., в том числе НДС 20% - 727086 руб. 62 коп., согласно "Протокола согласования договорной цены на комплекс работ" – Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 3 к договору подряда от 25.03.2022 № 01-12-01/22" (л.д. 16).

Пунктом 6.4 договора установлено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится генподрядчиком поэтапно в течение пятнадцати банковских дней со дня подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акта выполненных работ (форма КС-2) перечислениями денежных средств на расчетный счет подрядчика.

В подтверждение выполнения предусмотренных договором работ истец представил суду оформленные сторонами документы:

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 31.05.2022 № 1 и справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3) от 31.05.2022 № 1 на сумму 855324 руб. (л.д. 17-18);

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 31.01.2023 № 2 и справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3) от 31.01.202 № 1 на сумму 1550016 руб. (л.д. 19-20);

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 28.02.2023 № 3 и справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3) от 28.02.2023 № 3 на сумму 541336 руб. 25 коп. (л.д. 21-22);

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 31.03.2023 № 4 и справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3) от 31.03.2023 № 1 на сумму 710500 руб. 25 коп. (л.д. 23-24);

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 30.04.2023 № 5 и справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3) от 30.04.2023 № 5 на сумму 426943 руб. 20 коп. (л.д. 25-26);

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 30.09.2023 № 6 и справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3) от 30.09.2023 № 6 на сумму 278400 руб. (л.д. 27-28).

Претензией от 07.12.2023 истец потребовал от ответчика оплаты выполненных работ на сумму 4362519 руб. 70 коп., а также неустойку за период с 23.06.2022 по 07.12.2023 в размере 1303925 руб. 80 коп. (л.д. 29-30).

Оставление претензии ответчиком без рассмотрения послужило основанием для обращения с настоящим иском в арбитражный суд.

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

На основании пункта 1 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В пункте 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (пункт 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат ответчиком подписаны без возражений относительно объема и качества проведенных работ. 

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства, суд считает доказанным факт выполнения работ по договору подряда на общую сумму 4362519 руб. 70 коп.

Ответчик сумму долга не оспорил, в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства уплаты долга суду не представил.

При указанных обстоятельствах суд считает требование истца о взыскании с ответчика долга в сумме 4362519 руб. 70 коп. обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По смыслу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ) (пункт 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств"). 

Согласно пункту 7.2 договора в случае нарушения генподрядчиком срока оплаты выполненных подрядчиком работ, генподрядчик выплачивает подрядчику пени в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения своего обязательства.

Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате работ подтверждено материалами дела и ответчиком не оспаривается.

Факт нарушения срока оплаты товара ответчик не опровергнул.  

Следовательно, требование истца в части взыскания неустойки является правомерным. 

Проверив расчет неустойки за период с 23.06.2022 по 19.01.2024 в размере 1491514 руб. 14 коп., суд признает его арифметически верным и обоснованным.  

            Расходы по государственной пошлине, подтвержденные платежным поручением от 23.01.2024 № 64 на сумму 52270 руб., суд относит на ответчика по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Руководствуясь статьями 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить.

            Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройтех" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Чувашлифт" 5854033 (Пять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи тридцать три) руб. 84 коп., в том числе: 4362519 (Четыре миллиона триста шестьдесят две тысячи пятьсот девятнадцать) руб. 70 коп. долга, 1491514 (Один миллион четыреста девяносто одна тысяча пятьсот четырнадцать) руб. 14 коп. неустойки за период с 23.06.2022 по 19.01.2024.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройтех" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Чувашлифт" 52270 (Пятьдесят две тысячи двести семьдесят) руб. расходов по государственной пошлине.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Чувашской Республики-Чувашии в течение месяца с момента его принятия.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья

Н.В. Юрусова