АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Краснодар                                                                                          Дело № А32-2222/2019

Резолютивная часть решения объявлена 05.06.2019

Полный текст судебного акта изготовлен 21.06.2019

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Баганиной С.А., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Поляшевой Л.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску  общества с ограниченной ответственностью «Форвард-Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Краснодар к обществу с ограниченной ответственностью «КубаньПожСервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Краснодар о взыскании 261 956, 46 руб., а также 8239 рублей расходов по уплате госпошлины, при участии в судебном заседании представителя – ФИО1,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Форвард-Строй» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «КубаньПожСервис» о взыскании 261 956, 46 рублей неустойки, а также 8 239 рублей расходов по уплате госпошлины.

От ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства, ходатайства и отзыв не поступили.

Поскольку на стадии подготовки дела к судебному разбирательству установлен характер спорного правоотношения и определены обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела по существу, представленных в дело доказательств достаточно для рассмотрения спора по существу,  возражения против продолжения рассмотрения дела в судебном заседании не поступили, суд завершил подготовку дела к судебному разбирательству, завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание арбитражного суда первой инстанции. 

Истец пояснил, что платежи имели место 16.07.2018, 30.07.2018, 17.08.2018 на сумму 740 081,71 рублей, а также 28.12.2018 на сумму 72 751,21 рублей в счет оплаты по факту выполненных работ, представил копии актов приемки  выполненных работ и платежных поручений о выплате аванса. В заседании объявлялся перерыв до 17-00 час 05.06.2019  Информация о перерыве размещена на  официальном сайте Арбитражного суда Краснодарского края в сети Интернет по адресу: www.krasnodar.arbitr.ru. После перерыва заседание продолжено. Дело рассматривается по правилам ст.156 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, между ООО «Форвард-Строй» (Генподрядчик) и ООО «КубаньПожСервис» (Подрядчик) заключен договор подряда № КШ/3-4этап-НЭС-0,4кВт от 11.07.2018 в отношении объекта - многоэтажные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Красных Партизан, 1/3 в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара» 4 этап.

По условиям договора (п. 1.1 договора) подрядчик в соответствии с проектом, условиями настоящего договора и сметным расчетом (приложение № 1) выполняет работы по устройству наружных электрических сетей 0,4 кВт, освещения  на объекте и сдает результат работ, а генподрядчик принимает результат работ и оплачивает его.

Подрядчик обязуется выполнить работу «под ключ» с использованием своих материалов и изделий, в соответствии с рабочей документацией и требованиями строительных норм, правил и регламентов, включая возможные работы, определенно не упомянутые, но неотделимые от указанных выше и необходимые для полного завершения указанной работы.

В понятие "работа" включаются расходы и затраты Подрядчика на:

- фонд оплаты труда основных и вспомогательных рабочих; -эксплуатацию   необходимых   машин,   механизмов   и   строительного   оборудования   (грузоподъемные

механизмы, опалубка, строительные леса, лебедки, станки, электроинструмент и т.п.);

- основные, расходные и вспомогательные материалы и приспособления, технологически необходимые для выполнения работ (кроме материалов поставки Генподрядчика (далее «давальческие материалы»);

-  временные здания и сооружения, необходимые для размещения и обслуживания персонала Подрядчика и производства работ, предусмотренных настоящим договором

- накладные расходы;

- налоги и сборы, связанные с деятельностью Подрядчика;

- сметную прибыль; -непредвиденные и прочие затраты,  связанные с выполнением исчерпывающего комплекса основных,

вспомогательных и сопутствующих технологически работ, и операций, результатом которого является основной физический объем соответствующего вида работ, предусмотренного настоящим договором;

- перебазировку строительной техники и строительного оборудования на объект и с объекта;

- пуско-наладочные работы (ПНР);

-  сдача готовых инженерных систем в Ростехнадзоре и представление Заказчику актов готовности (актов допуска).

Подрядчик сдает результат Работы, а Генподрядчик принимает результат Работы и оплачивает его.

Работы, предусмотренные настоящим договором, выполняются иждивением подрядчика (п. 1.2 договора).

По соглашению сторон с момента подписания договора и подписания Акта передачи строительной площадки генподрядчик оплачивает подрядчику аванс в размере 390 000 рублей, в том числе НДС 18 % 59 491 (пятьдесят девять тысяч четыреста девяносто один) рубль 52 копейки (п. 2.2 договора). 

В соответствии с п 3.1 договора подрядчик приступает к выполнению работ после подписания договора, передачи по акту генподрядчиком подрядчику строительной площадки для выполнения работ и перечисления авансового платежа, указанного в п. 2.2. договора. 

Срок выполнения работ 20 календарных дней ( п 3.2  договора). 

Относительно ответственности по договору стороны договорились, что за нарушение сроков выполнения Работ по Договору или этапов Работ, согласно графика (Приложение№2) по вине подрядчика генподрядчик вправе взыскать с подрядчика неустойку в размере 0,1 % от стоимости просроченного объема работ за каждый день просрочки (п 7.1 договора).

Кроме того, при невыполнении объемов работ, предусмотренных графиком производства работ по вине подрядчика, генподрядчик вправе приостановить финансирование работ до устранения подрядчиком допущенного отставания.

За нарушение сроков оплаты выполненных работ подрядчик вправе взыскать с Генподрядчика неустойку в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки (п. 7.2 договора).

В случае неоднократного выявления брака в процессе выполнения подрядчиком работ, не соблюдения сроков устранения недостатков при приемке работ, а также нарушение сроков выполнения работ (срок начала работы, промежуточные сроки, срок окончания работ) более 14 (четырнадцать) календарных дней по вине подрядчика, Генподрядчик в одностороннем порядке вправе расторгнуть настоящий Договор. В" этом случае подрядчик в 10 (десяти) - дневный срок со дня направления уведомления о расторжении настоящего договора возмещает Генподрядчику затраты по устранению допущенного брака, а также иные убытки и упущенную выгоду. При этом Генподрядчик имеет право взыскать штраф в размере 10 % (Десяти процентов) от суммы неисполненных подрядчиком работ по Договору (п. 7.9 договора). 

Пунктом 8.2 договора установлено, что генподрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор во внесудебном одностороннем порядке и потребовать от подрядчика возмещения причиненных убытков, письменно уведомив об этом подрядчика, в следующих случаях:

а) В случае не предоставления подрядчиком документов, указанных в п. 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.22 настоящего Договора;

б) В случае нарушения подрядчиком, по его вине, сроков выполнения работ (срок начала работы, промежуточные сроки, срок окончания работ), предусмотренных договором, на 14 (четырнадцать) календарных дней, по причинам, не зависящим от Генподрядчика;

в) В отношении подрядчика имеется вступивший в законную силу судебный акт или решение иного государственного органа, имеющее силу исполнительного документа и действие которого не прекращено в течение тридцати рабочих дней с момента его принятия, о взыскании с подрядчика денежных средств, либо содержащее иные имущественные требования (в том числе арест имущества подрядчика), которые могут привести к невозможности дальнейшего исполнения подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору;

г) подрядчик письменно не известил Генподрядчика о своей реорганизации, либо в отношении Подрядчика происходит его реорганизация или передача всех, или существенной части его активов другому юридическому лицу, если решения о реорганизации или передаче активов не содержат правопреемства в отношении прав и обязанностей по настоящему Договору;

д) В отношении подрядчика возбуждено дело о признании его несостоятельным (банкротом) или введена соответствующая процедура банкротства, либо возбуждено дело о его ликвидации.

е)   В случае выявленного нарушения технологии производства работ, предусмотренной проектом и действующими техническими регламентами. Под нарушением понимается отступление от технологии производства работ, создающее опасность как в процессе выполнения работ, так и при дальнейшей эксплуатации объекта.

Указанные в пункте 8.2. настоящего договора случаи признаются Сторонами бесспорным и очевидным нарушением подрядчиком своих обязательств (п. 8.3 договора).

В случае расторжения настоящего договора по причинам, указанным в п.п. 7.9-7.10. настоящего договора или в случае отказа подрядчика выполнить предусмотренный настоящим договором объем Работ (кроме расторжения договора в случае нарушения Заказчиком обязанности оплаты), Подрядчик обязуется оплатить Генподрядчику неустойку в размере 10% от стоимости невыполненных подрядчиком работ (п. 8.5 договора).

Дополнительным соглашением № 1 от 19.07.2018 к договору стороны определили, что подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы, не оговоренные ранее сторонами, в соответствии с сметным расчетом (приложение №1) являющимся неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения ( п. 1). Стоимость выполняемых работ, указанных в п. 1 настоящего соглашения равна 500 408 (пятьсот тысяч четыреста восемь) рублей 56 копеек, в том числе НДС 18 % 76 333 (семьдесят шесть тысяч триста тридцать три) рубля 51 копейка (п. 2). По соглашению сторон Заказчик оплачивает подрядчику аванс 100 081 (сто тысяч восемьдесят один) рубль 71 копейка (п. 3). Срок выполнения работ по настоящему договору 11 (одиннадцать) календарных дней. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно (п. 4). Во всем остальном, стороны руководствуются положениями договора подряда № КП1/3-4этап-НЭС-0,4кВт от 11.07.2018 г. ( п. 5).

Стороны также заключили дополнительное соглашение № 2, пунктом 2 определили что дополнительное соглашение № 1 от 19.07.2018г. к договору подряда № КШ/3-4этап-НЭС-0,4кВт от 11.07.2018 г. остается неизменным.

Актом передачи строительной площадки к производству работ от 11.07.2018 генподрядчик передал, а подрядчик принял строительную площадку под выполнение работ по договору подряда № КП1/3-4этап-НЭС-0,4кВт от 11.07.2018 при строительстве «Многоэтажные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Красных Партизан, 1/3 в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара» 4 этап.

Письмом от 19.11.2018 истец уведомил  ответчика об одностороннем расторжении договора в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ с указанием на то, что договор считается расторгнутым по истечении 10 календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о расторжении.

В соответствии с отметкой о получении письмо вручено нарочно генеральному директору ООО «КубаньПожСервис» от 26.12.2018.

Полагая договор расторгнутым с 06.0.12019, истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением. 

Определениями от 22.01.2019, 18.03.2019 суд предлагал ответчику представить  доказательства исполнения обязательств либо отсутствия вины,  мотивированный и документально подтвержденный отзыв на заявленные требования с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу в исковом заявлении.

Ответчик процессуальную обязанность не исполнил, мотивированный отзыв не представил, возражений относительно иска не заявил. 

Ходатайств о проведении судебной экспертизы стороны не заявили.

Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК РФ, суд признал исковые требования подлежащими удовлетворению на основании следующего.

Спорные правоотношения по своей правовой природе возникли из договора подряда, в силу чего подлежат  правовому регулированию общими нормами обязательственного права части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, нормами главы 37 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 401 ГК РФ определено, что лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности).

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику (п. 1 ст. 703 ГК РФ). 

На основании ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (п. 1 ст. 708 ГК РФ).

Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором (п. 2 ст. 708 ГК РФ). 

Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков (п. 3 ст. 708 ГК РФ). 

Положениями ст. 715 ГК РФ установлено, что заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность (п. 1 ст. 715 ГК РФ), если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (п. 2 ст. 715 ГК РФ); если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков (п. 3 ст. 715 ГК РФ).

В соответствии со ст. 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Как следует из материалов дела, и не оспаривается сторонами п. 2.2 договора установлена выплата аванса в размере 740 081,71 рублей, который был выплачен подрядчику 17.08.2018.

Дополнительным соглашением № 1 стороны определили период выполнения работ сроком 11 дней с даты выплаты аванса, т.е. с 17.08.2018 по  28.08.2018.

Таким образом, 29.08.2018 начался период просрочки выполнения работ.

Письмом об отказе от договора генподрядчик уведомил подрядчика о том, что договор считается расторгнутым по истечении 10 календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о расторжении.

Ввиду того, что письмо об отказе от договора вручено 26.12.2018, а последний день десятидневного срока выпадает на 04.01.2019, то с учетом правил ст. 193 ГК РФ договор прекратился с 10.01.2019. С указанной даты начисление неустойки производится истцом неправомерно, без правовых оснований. Период просрочки составил 135 дней. 

При таких обстоятельствах требования истца подлежат частичному удовлетворению в размере 260 846,48 рублей ввиду неправильного определения периода начисления неустойки за нарушение срока выполнения работ.

Согласно статье 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. 

Статьей 110 АПК РФ предусмотрено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. 

При подаче иска истцом уплачено 8 239 рублей государственной пошлины. 

Поскольку требования удовлетворены частично, расходы истца подлежат возмещению пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований (99,58%) на сумму 8 204,40 рублей. 

Руководствуясь статьями 65, 70,   106, 110, 156, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КубаньПожСервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Краснодар, в пользу   общества с ограниченной ответственностью «Форвард-Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Краснодар   260 846,48 руб.  неустойки, а также 8204,4 руб.   расходов по уплате госпошлины.

В остальной части иска отказать

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд,  вынесший решение.

Судья      С.А. Баганина