АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-22138/2024

г. Владивосток

20 января 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена  10 января 2025 года. 

Полный текст решения изготовлен  20 января 2025 года.

            Арбитражный суд  Приморского края в составе судьи  Бурова А.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём  Ли К.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску   общества с ограниченной ответственностью "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ -1 "   (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к  Администрации Лесозаводского городского округа  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании  

при участии в заседании:

стороны не явились, извещены;

установил:

общество с ограниченной ответственностью "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ -1 "    обратилось в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к  Администрации Лесозаводского городского округа  о взыскании неустойки (пени) в размере 965 611,35 рублей.

Истец и ответчик, надлежащим образом извещенные о месте и времени проведения предварительного судебного заседания, в суд не явились; от истца поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

В соответствии со статьей 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) предварительное судебное заседание проведено в отсутствие указанных лиц.

Признав дело подготовленным к судебному разбирательству, с учётом того, что ответчик, уведомленный о возможности перехода в судебное заседание не заявил возражений относительно рассмотрения дела в его отсутствие, суд, руководствуясь статьей 137 АПК РФ, завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное разбирательство в суде первой инстанции.

Исковые требования мотивированы нарушением ответчиком исполнения обязательств по оплате.

Ответчик против удовлетворения требований возражал, заявил о применении ст. 333 ГК РФ.

Оценив представленные доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд установил следующее.

Между Администрацией Лесозаводского городского округа (Заказчик) и ООО «Дальневосточная строительная компания – 1» (Подрядчик) были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту и текущему содержанию автомобильных дорог на территории Лесозаводского городского округа Приморского края (ЛГО).

ООО «ДСК-1» выполнило свои обязательства по контрактам, Администрация Лесозаводского городского округа обязательства по оплате работ выполнила несвоевременно, а именно:

1. Муниципальный контракт №56 от 02.03.2023.

Предмет контракта: обязательства по выполнению работ по ремонту автомобильной дороги ул. Челюскина, Лесозаводск Приморского края (п.1.1 контракта).

Срок выполнения работ: начало выполнения работ 15.03.2023 год – окончание работ 31.07.2023 год в соответствии с Графиком выполнения работ (п.1.2 контракта).

Цена контракта: 38 661606,98 рублей

Цена 1 этапа исполнения контракта составляет 1 117 719,34 руб.

Цена 2 этапа исполнения контракта составляет 768 046,47 руб.

Цена 3 этапа исполнения контракта составляет 35 112 219,78 руб.

Цена 4 этапа исполнения контракта составляет 1663621,39 руб. (п.2.2 контракта).

Заказчик обязан оплачивать результаты выполненных по Контракту работ в размерах, установленных Контрактом, графиком оплаты выполненных по Контракту работ с учетом Графика выполнения работ (отдельных этапов исполнения Контракта) в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе (п.2.7 и 3.1.2 контракта).

Заказчик в день окончания приемки подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, либо формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа (п.5.9 контракта).

Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком (п.5.13 контракта).

ООО «ДСК-1» выполнило обязательства по контракту, что подтверждается:

1. Актом о приемке выполненных работ от 02.05.2023 года (1 этап),

2. Актом о приемке выполненных работ 15.05.2023 года (2 этап),

3. Актом о приемке выполненных работ от 04.08.2023 года (3 этап),

4. Актом о приемке выполненных работ от 07.09.2023 года (4 этап), подписанными без замечаний.

Администрация ЛГО осуществила оплату выполненных работ в следующие сроки:

Эл.документ в структурированной форме (№», дата)

Сумма по документу (в руб)

Дата приемки (п.5.13 контракта)

Срок оплаты не позднее (п.2.7 контракта)

Оплата (№», дата п/п)

Сумма оплаты (в руб)

Акт от 02.05.2023

1117719,34

03.05.2023

16.05.2023

492135 от 12.05.2023

33531,58

636335 от 30.05.2023

1084187,76

Акт от 15.05.2023

768046,47

13.06.2023

22.06.2023

875900 от 28.06.2023

23041,39

161091 от 20.07.2023

745005,08

Акт от 04.08.2023

35112219,78

28.08.2023

06.09.2023

461324 от 30.08.2023

1053366,59

660629 от 22.09.2023

34058853,19

Акт от 07.09.2023

1663621,39

12.09.2023

21.09.2923

572718 от 13.09.2023

49908,64

781579 от 10.10.2023

1613712,75

ИТОГО

38661606,98

38661606,98

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства (п.7.3 контракта).

ООО «ДСК-1» произведено Администрации начисление неустойки в общем размере 245983,62 руб. за период со 17.05.2023 по 10.10.2023.

2. Муниципальный контракт №57 от 02.03.2023.

Предмет контракта: обязательства по выполнению работ по ремонту автомобильной дороги ул. Ленинская, Лесозаводск Приморского края (п.1.1 контракта).

Срок выполнения работ: начало выполнения работ 01.06.2023 год - окончание работ 20.07.2023 год в соответствии с Графиком выполнения работ (п.1.2 контракта).

Цена контракта: 23 138166,45 рублей

Цена 1 этапа исполнения контракта составляет 20 988 063,69 руб.

Цена 2 этапа исполнения контракта составляет 1 912 703,08 руб.

Цена 3 этапа исполнения контракта составляет 237 399,68 руб. (п.2.1 контракта).

Заказчик обязан оплачивать результаты выполненных по Контракту работ в размерах, установленных Контрактом, графиком оплаты выполненных по Контракту работ с учетом Графика выполнения работ (отдельных этапов исполнения Контракта) в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе (п.2.7 и 3.1.2 контракта).

Заказчик в день окончания приемки подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, либо формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. (п.5.9 контракта).

Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком (п.5.13 контракта).

ООО «ДСК-1» выполнила свои обязательства по контракту, что подтверждается:

1.    Актом о приемке выполненных работ от 16.06.2023 года (1 этап),

2.    Актом о приемке выполненных работ 11.07.2023 (2 этап),

3.    Актом о приемке выполненных работ от 07.09.2023 года (3 этап).

Администрация ЛГО осуществила оплату выполненых работ в следующие сроки:

Эл.документ в структурированной форме (№», дата)

Сумма по документу (в руб)

Дата приемки (п.5.13 контракта)

Срок оплаты не позднее (п.2.7 контракта)

Оплата (№», дата п/п)

Сумма оплаты (в руб)

Акт от 16.06.2023

20 988 063,69

14.07.2023

25.07.2023

158290 от 19.07.2023

629641,91

161092 от 20.07.2023

0,28

328743 от 10.08.2023

20358421,49

Акт от 11.07.2023

1 912 703,08

01.08.2023

10.08.2023

283512 от 07.08.2023

57381,09

431689 от 24.08.2023

1855321,99

Акт от 07.09.2023

237 399,68

12.09.2023

21.09.2023

572720 от 13.09.2023

7121,99

781581 от 10.10.2023

230277,69

ИТОГО

23 138166,45

23 138166,44

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства (п. 7.3, 7.7 контракта).

ООО «ДСК-1» произведено начисление Администрации ЛГО неустойки по муниципальному контракту №57 от 02.03.2023 г в общем размере 103711,45 руб. за период с 26.07.2023 по 11.10.2023.

3.Муниципальный контракт №58 от 02.03.2023.              

            Предмет контракта: обязательства по выполнению работ по ремонту автомобильной дороги ул. Григоренко, Лесозаводск Приморского края (п.1.1 контракта).

Срок выполнения работ: начало выполнения работ 01.06.2023 год - окончание работ 31.07.2023 год в соответствии с Графиком выполнения работ (п.1.2 контракта).

Цена контракта: 19167465,26 рублей

Цена 1 этапа исполнения контракта составляет 1144703,87 руб.

Цена 2 этапа исполнения контракта составляет 3376519,61 руб.

Цена 3 этапа исполнения контракта составляет 14646241,78 руб. (п.2.1 контракта).

Заказчик обязан оплачивать результаты выполненных по Контракту работ в размерах, установленных Контрактом, графиком оплаты выполненных по Контракту работ с учетом Графика выполнения работ (отдельных этапов исполнения Контракта) в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе (п.2.7 и 3.1.2 контракта).

Заказчик в день окончания приемки подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, либо формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. (п.5.9 контракта).

Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком (п.5.13 контракта).

ООО «ДСК-1» выполнило свои обязательства по контракту, что подтверждается:

1.        Актом о приемке выполненных работ от 16.06.2023 года (1 этап),

2.        Актом о приемке выполненных работ 16.06.2023 (2 этап),

3.        Актом о приемке выполненных работ от 04.08.2023 года (3 этап). Администрация ЛГО осуществила оплату выполненных работ в следующие сроки:

Эл.документ в структурированной форме (№», дата)

Сумма по документу (в руб)

Дата приемки (п.5.13 контракта)

Срок оплаты не позднее (п.2.7 контракта)

Оплата (№», дата п/п)

Сумма оплаты (в руб)

Акт от 16.06.2023

1144703,87

20.06.2023

29.06.2023

875902от 28.06.2023

34341,12

711169 от 29.09.2023

1110362,75

Акт от 16.06.2023

3376519,61

20.06.2023

29.06.2023

875901 от 28.06.2023

101295,59

711171 от 29.09.2023

3275224,02

Акт от 04.08.2023

14646241,78

28.08.2023

06.09.2023

461325 от 30.08.2023

439387,25

660627 от 22.09.2023

14206854,53

ИТОГО

19167465,26

19167465,26

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства (п. 7.3, 7.7 контракта).

ООО «ДСК-1» произведено начисление Администрации неустойки в общем размере 229391,05 руб. за период с 30.06.2023 по 22.09.2023.

4.        Муниципальный контракт №73 от 28.02.2023.

Предмет контракта: обязательства по выполнению работ по повышению уровня безопасности дорожного движения г.Лесозаводск (установка дорожных знаков) (п.1.1 контракта). Срок выполнения работ: 28.02.2023 по 15.03.2023 года (п.1.2 контракта). Цена контракта: 343549,20 руб. (п.2.2 контракта).

Оплата по контракту осуществляется за счет средств бюджета ЛГО путем безналичного перечисления денежных средств в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ (п.2.4, 2.5 контракта).

ООО «ДСК-1» выполнило свои обязательства по контракту, что подтверждается Актом КС-2 №1 и Справкой КС-3 №1 от 14.03.2023, подписанными без замечаний.

Администрация ЛГО осуществила оплату выполненных работ в следующие сроки:

Акт КС-2 (№, дата)

Сумма по Акту КС-2 (в руб.)

Срок оплаты не позднее (п.2.4 контракта)

Оплата (№, дата п/п)

Сумма оплаты (в руб.)

Акт КС-2 №1 от 14.03.2023

343549,20

28.03.2023

6262 от 20.03.2023

100000

75360 от 28.03.2023

100000

110327 от 31.03,2023

1543549,20

ИТОГО

343549,20

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства (п. 4.6, 4.7 контракта).

ООО «ДСК-1» произведено начисление Администрации неустойки в размере 107,66 руб. за период с 29.03.2023 по 31.03.2023.

5.        Муниципальный контракт №100 от 17.03.2023.

            Предмет контракта: обязательства по выполнению работ по установке бортового камня на автомобильной дороге ул.Григоренко г.Лесозаводск (п.1.1 контракта).

Срок выполнения работ: 01.06.2023 по 20.06.2023 года (п.1.2 контракта).

Цена контракта: 598517,64 руб. (п.2.2 контракта).

Оплата по контракту осуществляется за счет средств бюджета ЛГО путем безналичного перечисления денежных средств в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ (п.2.4, 2.5 контракта).

ООО «ДСК-1» выполнило обязательства по контракту, что подтверждается Актом КС-2 №1 и Справкой КС-3 №1 от 17.04.2023, подписанными без замечаний.

Администрация осуществила оплату выполненных работ в следующие сроки:

Акт КС-2 (№, дата)

Сумма по Акту КС-2

(в руб.)

Срок оплаты не позднее (п.2.4 контракта)

Оплата (№, дата п/п)

Сумма оплаты (в руб.)

Акт КС-2 №1 от 17.04.2023

598517,64

02.05.2023

491210 от 12.05.2023

17955,53

636334 от 30.05.2023

580562,11

ИТОГО

598517,64

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства (п. 4.6, 4.7 контракта).

ООО «ДСК-1» произведено начисление Администрации неустойки в размере 4108,82 руб. за период с 03.05.2023 по 30.05.2023.

6.        Муниципальный контракт №101 от 17.03.2023.

Предмет контракта: выполнение работ по разработке технического задания и локально ресурсного сметного расчета по ремонту водопропускной системы через автомобильную дорогу по ул.Свердлова г.Лесозаводск (п.1.1 контракта).

Срок выполнения работ: со дня подписания контракта по 30.03.2023 года (п.4.1 контракта).

Цена контракта: 150000 руб. (п.3.2 контракта).

Оплата по контракту осуществляется за счет средств бюджета ЛГО путем безналичного перечисления денежных средств в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ (п.3.1, 3.6, 3.7 контракта).

ООО «ДСК-1» выполнило свои обязательства по контракту, что подтверждается Актом КС-2 №1 и Справкой КС-3 №1 от 20.03.2023, подписанными без замечаний.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства (п.8.7 контракта).

ООО «ДСК-1» произведено начисление Администрации неустойки в размере 750 руб. за период с 30.03.2023 по 25.04.2023.

7.        Муниципальный контракт №130 от 14.04.2023.

Предмет контракта: обязательства по выполнению работ по ямочному ремонту автомобильных дорог на территории Лесозаводского городского округа Приморского края в 2023 г.(п.1.1 контракта).

Срок выполнения работ: с момента подписания по 30.04.2023 года (п.3.1 контракта). Цена контракта: 2272704,02 рублей (п.2.1 контракта).

Оплата Заказчиком выполненных работ производится не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ (п.2.6 контракта).

Заказчик в день окончания приемки подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, либо формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. (п.5.5 контракта).

ООО «ДСК-1» выполнило обязательства по контракту, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ от 25.04.2023, подписанным без замечаний.

Администрация осуществила оплату выполненных работ в следующие сроки:

Эл.документ в структурированной форме (№», дата)

Сумма по документу (в руб)

Дата приемки (п.5.13 контракта)

Срок оплаты не позднее (п.2.7 контракта)

Оплата (№», дата п/п)

Сумма оплаты (в руб)

Акт от 25.04.2023

2272704,02

26.04.2023

10.05.2023

634949 от 30.05.2023

500000

646190 от 31.05.2023

500000

654342 от 01.06.2023

300000

890931 от 29.06.2023

972704,02

ИТОГО

2272704,02

2272704,02

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства (п. 7.3, 7.7 контракта).

ООО «ДСК-1» произведено начисление Администрации неустойки в общем размере 18933,81 руб. за период с 11.05.2023 по 29.06.2023.

8.        Муниципальный контракт №148 от 21.04.2023.

Предмет контракта: выполнение работ по повышению уровня безопасности дорожного движения г.Лесозаводск (установка дорожных знаков) согласно описанию объекта закупки в 2023 г. (п.1.1 контракта).

Срок выполнения работ: 21.04.2023 по 03.05.2023 года (п.1.2 контракта).

Цена контракта: 48925,45 руб. (п.2.2 контракта).

Оплата работ производится Заказчиком по факту выполнения работ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ (п.2.4 контракта).

ООО «ДСК-1» выполнило обязательства по контракту, что подтверждается: Актом КС-2 №1 и Справкой КС-3 №1 от 02.05.2023, подписанными без замечаний.

Администрация осуществила оплату выполненных работ в следующие сроки:

Акт КС-2 (№, дата)

Сумма по Акту КС-2

(в руб.)

Срок оплаты не позднее (п.2.4 контракта)

Оплата (№, дата п/п)

Сумма оплаты (в руб.)

Акт КС-2 №1 от 02.05.2023

48925,45

18.05.2023

698499 от 07.06.2023

48925,45

ИТОГО

48925,45

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства (п. 4.6, 4.7 контракта).

ООО «ДСК-1» произведено начисление Администрации неустойки в размере 244,63 руб. за период с 19.05.2023 по 07.06.2023.

9.        Муниципальный контракт №161 от 30.03.2023.

Предмет контракта: обязательство на выполнение работ по прокладке водоотводных сооружений по ул.Челюскина г.Лесозаводск (п.1.1 контракта).

Срок выполнения работ: 01.06.2023 по 30.07.2023 года (п.1.2 контракта).

Цена контракта: 599620,12 руб. (п.2.2 контракта).

Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ (п.2.6, 2.8 контракта).

ООО «ДСК-1» выполнило обязательства по контракту, что подтверждается Актом КС-2 №1 и Справкой КС-3 №1 от 30.07.2023, подписанными без замечаний.

Администрация осуществила оплату выполненных работ в следующие сроки:

Акт КС-2 (№, дата)

Сумма по Акту КС-2

(в руб.)

Срок оплаты не позднее (п.2.8 контракта)

Оплата (№, дата п/п)

Сумма оплаты (в руб.)

Акт КС-2 №1 от 30.07.2023

599620,12

08.08.2023

710545 от 29.09.2023

599620,12

ИТОГО

599620,12

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства (п. 4.6, 4.7 контракта).

ООО «ДСК-1» произведено начисление Администрации неустойки в размере 12292,20 руб. за период с 09.08.2023 по 29.09.2023.

10. Муниципальный контракт №162 от 30.03.2023.                                 

Предмет контракта: обязательство на выполнение работ по устройству водопропускного лотка по ул.Челюскина г.Лесозаводск (п.1.1 контракта).

Срок выполнения работ: 01.06.2023 по 30.07.2023 года (п.1.2 контракта).

Цена контракта: 594002,62 руб. (п.2.2 контракта).

Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ (п.2.6, 2.8 контракта).

ООО «ДСК-1» выполнило обязательства по контракту, что подтверждается Актом КС-2 №1 и Справкой КС-3 №1 от 30.07.2023, подписанными без замечаний.

Администрация осуществила оплату выполненных работ в следующие сроки:

Акт КС-2 (№, дата)

Сумма по Акту КС-2

(в руб.)

Срок оплаты не позднее (п.2.8 контракта)

Оплата (№, дата п/п)

Сумма оплаты (в руб.)

Акт КС-2 №1 от 30.07.2023

594002,62

08.08.2023

710546 от 29.09.2023

594002,62

ИТОГО

594002,62

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства (п.4.6, 4.7 контракта).

ООО «ДСК-1» произведено начисление Администрации неустойки в размере 12177,05 руб. за период со 09.08.2023 по 29.09.2023.

11.    Муниципальный контракт №156 от 02.05.2023.

Предмет контракта: обязательства по выполнению работ по ремонту пешеходной зоны по ул.Ленинская г.Лесозаводска (п.1.1 контракта).

Срок выполнения работ: начало работ 01.06.2023 - окончание работ 30.06.2023 года (п. 1.2 контракта).

Цена контракта: 1904674,48 рублей (п.2.1 контракта).

Заказчик обязан оплачивать результаты выполненных по Контракту работ в размерах, установленных Контрактом, графиком оплаты выполненных по Контракту работ с учетом Графика выполнения работ (отдельных этапов исполнения Контракта) в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе (п.2.7 и 3.1.2 контракта).

Заказчик в день окончания приемки подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, либо формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. (п.5.9 контракта).

Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком (п.5.13 контракта).

ООО «ДСК-1» выполнило обязательства по контракту, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ от 10.05.2023, подписанным без замечаний.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства (п. 7.3 контракта).

ООО «ДСК-1» произведено начисление Администрации неустойки в общем размере 16165,92 руб. за период с 16.06.2023 по 20.07.2023.

12. Муниципальный контракт №157 от 02.05.2023.

Предмет контракта: обязательства по выполнению работ по ремонту автомобильной дороги по ул.Белова г.Лесозаводска (п.1.1 контракта).

Срок выполнения работ: начало работ 15.06.2023 - окончание работ 30.07.2023 года (п.1.2 контракта).

Цена контракта: 24204431,59 рублей

Цена 1 этапа исполнения контракта составляет 21412631,43 руб.

Цена 2 этапа исполнения контракта составляет 2630358,86 руб.

Цена 3 этапа исполнения контракта составляет 161441,30 руб. (п.2. 1 контракта).

Заказчик обязан оплачивать результаты выполненных по Контракту работ в размерах, установленных Контрактом, графиком оплаты выполненных по Контракту работ с учетом Графика выполнения работ (отдельных этапов исполнения Контракта) в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе (п.2.7 и 3.1.2 контракта).

Заказчик в день окончания приемки подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, либо формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. (п.5.9 контракта).

Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком (п.5.13 контракта).

ООО «ДСК-1» выполнило свои обязательства по контракту, что подтверждается:

1.        Актом о приемке выполненных работ от 17.07.2023 года (1 этап),

2.        Актом о приемке выполненных работ 25.07.2023 года (2 этап),

3.        Актом о приемке выполненных работ от 07.09.2023 года (3 этап).

     Администрация осуществила оплату выполненных работ в следующие сроки:

Эл.документ в структурированной форме (№», дата)

Сумма по документу

(в руб.)

Дата приемки (п.5.13 контракта)

Срок оплаты не позднее (п.2.7 контракта)

Оплата (№», дата п/п)

Сумма оплаты (в руб)

Акт от 17.07.2023

21412631,43

22.08.2023

п 31.08.2023

446563 от 28.08.2023

145000

9

452579 от 29.08.2023

497378,94

711170 от 29.09.2023

20770252,49

Акт от 25.07.2023

2630358,86

04.09.2023

507992 от 06.09.2023

78910,77

13.09.2023

660628 от 22.09.2023

2551448,09

Акт от 07.09.2023

161441,30

12.09.2023

21.09.2023

572717 от 13.09.2023

4843,24

781582 от 10.10.2023

156598,06

ИТОГО

24204431,59

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства (п.7.3 контракта).

ООО «ДСК-1» произведено начисление Администрации неустойки общем размере 260142,81 руб. за период с 01.09.2023 по 10.10.2023.

13. Муниципальный контракт №171 от 10.05.2023.

Предмет контракта: выполнение работ по благоустройству придомовой территории дома №36 по ул.Калининская г.Лесозаводск (п.1.1 контракта).

Срок выполнения работ: 24.05.2023 по 24.06.2023 года (п.3.1 контракта). Цена контракта: 475183,46 руб. (п.2.1 контракта).

Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ (п.2.6, 2.8 контракта).

ООО «ДСК-1» выполнило обязательства по контракту, что подтверждается Актом КС-2 №1 и Справкой КС-3 №1 от 12.09.2023 года, подписанными без замечаний.

Администрация осуществила оплату выполненных работ в следующие сроки:

Акт КС-2 (№, дата)

Сумма по Акту КС-2 (в руб.)

Срок оплаты не позднее (п.2.8 контракта)

Оплата (№, дата п/п)

Сумма оплаты (в руб.)

Акт КС-2 №1 от 12.09.2023

475183,46

21.09.2023

660455 от 22.09.2023

14255,50

769777 от 06.10.2023

460927,96

ИТОГО

475183,46

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства (п. 7.3 контракта).

ООО «ДСК-1» произведено начисление Администрации неустойки в размере 3002,21 руб. за период с 22.09.2023 по 06.10.2023.

14. Муниципальный контракт №186 от 20.05.2023.

Предмет контракта: выполнение работ по ремонту кольцевой развязки по ул.Григоренко г.Лесозаводск (п.1. 1 контракта).

Срок выполнения работ: 20.05.2023 по 15.06.2023 года (п.1.2 контракта).

Цена контракта: 599714,28 руб. (п.2.2 контракта).

Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ (п.2. 6, 2.8 контракта).

ООО «ДСК-1» выполнило обязательства по контракту, что подтверждается Актом КС-2 №1 и Справкой КС-3 №1 от 15.06.2023, подписанными без замечаний.

Администрация осуществила оплату выполненных работ в следующие сроки:

Акт КС-2 (№, дата)

Сумма по Акту КС-2

(в руб.)

Срок оплаты не позднее (п.2.8 контракта)

Оплата (№, дата п/п)

Сумма оплаты (в руб.)

Акт КС-2 №1 от 15.06.2023

599714,28

29.06.2023

283513 от 07.08.2023

17991,43

431687 от 24.08.2023

581722,85

ИТОГО

599714,28

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства (п. 4.6, 4.7 контракта).

ООО «ДСК-1» произведено начисление Администрации неустойки в размере 9627,72 руб. за период с 30.06.2023 по 24.08.2023.

15. Муниципальный контракт №189 от 25.05.2023.

Предмет контракта: выполнение работ по установке дорожных знаков по ул.Григоренко г.Ле-созаводск (п.1. 1 контракта).

Срок выполнения работ: 01.06.2023 по 30.07.2023 года (п.1.2 контракта).

Цена контракта: 94732,33 руб. (п.2.2 контракта).

Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ (п.2.6, 2.8 контракта).

ООО «ДСК-1» выполнило обязательства по контракту, что подтверждается Актом КС-2 №1 и Справкой КС-3 №1 от 12.09.2023, подписанными без замечаний.

Администрация осуществила оплату выполненных работ в следующие сроки:

Акт КС-2 (№, дата)

Сумма по Акту КС-2

(в руб.)

Срок оплаты не позднее (п.2.8 контракта)

Оплата (№, дата п/п)

Сумма оплаты (в руб.)

Акт КС-2 №1 от 12.09.2023

94732,33

21.09.2023

875999 от 18.10.2023

2841,97

153457 от 10.11.2023

91890,36

ИТОГО

94732,33

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства (п. 4.6, 4.7 контракта).

ООО «ДСК-1» произведено начисление Администрации неустойки в размере 2097,72 руб. за период с 22.09.2023 по 10.11.2023.

16. Муниципальный контракт №160 от 01.06.2023.

Предмет контракта: обязательства на выполнение дополнительных работ по муниципальному контракту №58 от 02.03.2023 (п.1.1 контракта).

Срок выполнения работ: 01.06.2023 по 30.07.2023 года (п.1.2 контракта).

Цена контракта: 588494,08 руб. (п.2.2 контракта).

Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ (п.2.6, 2.8 контракта).

ООО «ДСК-1» выполнило обязательства по контракту, что подтверждается Актом КС-2 №1 и Справкой КС-3 №1 от 1 4.06.2023, подписанными без замечаний.

Администрация осуществила оплату выполненных работ в следующие сроки:

Акт КС-2 (№, дата)

Сумма по Акту КС-2

(в руб.)

Срок оплаты не позднее (п.2.8 контракта)

Оплата (№, дата п/п)

Сумма оплаты (в руб.)

Акт КС-2 №1 от 14.06.2023

588494,08

23.06.2023

875899 от 28.06.2023

17654,82

711168 от 29.09.2023

570839,26

ИТОГО

588494,08

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства (п. 4.6, 4.7 контракта).

ООО «ДСК-1» произведено начисление Администрации неустойки в размере 18593,37 руб. за период с 24.06.2023 по 29.09.2023.

17. Муниципальный контракт №229 от 01.06.2023.

Предмет контракта: обязательства на выполнение работ по оборудованию искусственными неровностями пешеходных переходов, расположенных по ул.Ленинская г.Лесозаводск (п.1.1 контракта).

Срок выполнения работ: 01.06.2023 по 30.07.2023 года (п.1.2 контракта).

Цена контракта: 388468,74 руб. (п.2.2 контракта).

Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ (п.2.6, 2.8 контракта).

ООО «ДСК-1» выполнило обязательства по контракту, что подтверждается Актом КС-2 №1 и Справкой КС-3 №1 от 12.09.2023, подписанными без замечаний.

Администрация осуществила оплату выполненных работ в следующие сроки:

Акт КС-2 (№, дата)

Сумма по Акту КС-2

(в руб.)

Срок оплаты не позднее (п.2.8 контракта)

Оплата (№, дата п/п)

Сумма оплаты (в руб.)

Акт КС-2 №1 от 12.09.2023

388468,74

21.09.2023

710548 от 29.09.2023

22654,06

35072 от 25.10.2023

376814,68

ИТОГО

388468,74

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства (п. 4.6, 4.7 контракта).

ООО «ДСК-1» произведено начисление Администрации неустойки в размере 5592,14 руб. за период с 22.09.2023 по 25.10.2023.

18. Муниципальный контракт №210 от 19.06.2023.

Предмет контракта: обязательства по выполнению работ по ремонту автомобильной дороги по ул.Макарова г.Лесозаводска (п.1.1 контракта).

Срок выполнения работ: начало работ с момента заключения контракта - окончание работ 25.07.2023 года (п. 1.2 контракта).

Цена контракта: 6061058,29 рублей

Цена 1 этапа исполнения контракта составляет 620667,60 руб.

Цена 2 этапа исполнения контракта составляет 5440390,69 руб. (п.2.1 контракта).

Оплата Заказчиком выполненных работ осуществляется в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет, оплата производится в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ (п.2. 4 и 2.6 контракта).

Заказчик в день окончания приемки подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, либо формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. (п.5.12 контракта).

Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком (п.5.16 контракта).

ООО «ДСК-1» выполнило обязательства по контракту, что подтверждается:

1.      Актом о приемке выполненных работ от 17.07.2023 года (1 этап),

2.      Актом о приемке выполненных работ от 07.09.2023 года (2 этап).

Администрация осуществила оплату выполненных работ в следующие сроки:

Эл.документ в структурированной форме (№, дата)

Сумма по документу (в руб)

Дата приемки (п.5.13 контракта)

Срок оплаты не позднее (п.2.7 контракта)

Оплата (№, дата п/п)

Сумма оплаты (в руб)

Акт от 17.07.2023

620667,60

23.08.2023

02.09.2023

4465632 от 28.08.2023

18620,03

711167 от 29.09.2023

602047,57

Акт от 07.09.2023

5440390,69

06.10.2023

17.10.2023

792296 от 10.10.2023

163211,72

35073 от 25.10.2023

5277178,97

ИТОГО

6061058,29

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства (п. 7.3 контракта).

ООО «ДСК-1» произведено начисление Администрации неустойки в общем размере 22689,17 руб. за период с 03.09.2023 по 25.10.2023.

Направленная в адрес Администрации претензия от 09.04.2024 № 1/24 об уплате неустойки оставлена ответчиком без удовлетворения, что явилось основанием для обращения истца в суд с настоящими исковыми требованиями.

Оценив представленные доказательства в соответствии со статьями 65, 71 АПК РФ, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению на основании следующего.

В соответствии со статьями 329, 330 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой - определенной законом или договором денежной суммой, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с частью 5 статьи 34 Закона N 44-ФЗ, в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Факт нарушения обязательств по своевременной оплате подтверждается материалами дела, соглашение о неустойке сторонами достигнуто, в связи с чем, суд признает обоснованным требование истца о взыскании неустойки.

Представленный истцом расчет неустойки судом проверен, признан обоснованным и арифметически верным, в  связи с чем требование о взыскании с ответчика  неустойки  подлежит удовлетворению в полном объеме.

Рассматривая заявление ответчика о применении статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам.

Согласно статье 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Таким образом, снижение неустойки судом возможно только в одном случае  явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения права. Явная несоразмерность неустойки должна быть очевидной.

Степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из обстоятельств конкретного дела, как того требуют положения статьи 71 АПК РФ.

Согласно определению Конституционного Суда РФ от 14.03.2001 №80-О снижение судом неустойки на основании статьи 333 ГК РФ является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому в части первой статьи 333 ГК РФ речь идет не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», если должником является коммерческая организация снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 71 Постановления).

В силу пункта 73 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7  бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика.

Для применения статьи 333 ГК РФ суд должен располагать данными, позволяющими установить явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства. Под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства ГК РФ предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.

Ответчик, заявляя о снижении неустойки по правилам статьи 333 ГК РФ, учитывая компенсационную природу неустойки, не представил в материалы дела доказательства чрезмерности неустойки последствиям нарушения ответчиком обязательств. Итоговая сумма неустойки обусловлена периодом просрочки исполнения обязательства самим ответчиком, в связи с чем суд не находит правовых оснований для применения положений статьи 333 ГК РФ.

В силу статьи 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

р е ш и л:

Взыскать с Администрация Лесозаводского городского округа в пользу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ - 1" 965611,35 руб. санкций, 53281,00 руб. государственной пошлины.

Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции.

Судья                                                                                      Буров А.В.