АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-2785/2020

17 марта 2021 года

город Омск

Резолютивная часть решения объявлена 10 марта 2021 года. Полный текст решения изготовлен 17 марта 2021 года.

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Храмцова К.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Трассервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 644065, 

<

...>, каб. 203) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 620109, 

<

...>)

о взыскании 2 199 714 руб. 40 коп., 

и по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй» к обществу с ограниченной ответственностью «Трассервис» 

при участии в деле третьих лиц: общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания на Рабкоровской» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 644010, 

<

...>), товарищества собственников жилья «Марс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 644010, 

<

...>), акционерного общества «Омскэлектро» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 644027, 

<

...>), общества с ограниченной ответственностью «Теплоход» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 644112, 

<

...>), индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 307550726200175), индивидуального предпринимателя ФИО3 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 316554300097850), индивидуального предпринимателя ФИО4 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 318554300018425), индивидуального предпринимателя ФИО5 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 317554300050891), индивидуального предпринимателя ФИО6 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 319554300072227), индивидуального предпринимателя ФИО7 (ИНН 

<

***>, ОГНИП 307550714500089), индивидуального предпринимателя ФИО8 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 317554300103270), индивидуального предпринимателя ФИО9 (ИНН 

<

***>, ОРНИП 316554300144650), индивидуального предпринимателя ФИО10 (ИНН 

<

***>, ОГНИП 319554300001430), индивидуального предпринимателя ФИО11 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 318554300058131), индивидуального предпринимателя ФИО12 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 304550507200226), общество с ограниченной ответственностью «Профессионал» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 644034, 

<

...>), общество с ограниченной ответственностью «Автостройресурс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 620076, 

<

...> стр. 55, офис 204), общество с ограниченной ответственностью «Комплектсервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 454004, 

<

...>), индивидуального предпринимателя ФИО13 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 318554300065615), общества с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Универсал» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 644024, 

<

...> П).

о взыскании 1 707 314 руб.,

в заседании суда приняли участие:

от истца - адвокат Пишина Ю.В. по доверенности от 21.08.2020,

от ответчика – до перерыва адвокат Истомин Г.Н. по доверенности от 01.12.2020, директор ФИО14, после перерыва – не явились, извещены

от третьих лиц – не явились, извещены

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Трассервис» (далее - ООО «Трассервис», истец) обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй»  (далее - ООО «Квантор-Строй», ответчик) о взыскании 2 199 714 руб. 40 коп., из которых 2 042 446 руб. - основной долг по договору на предоставление транспортных средств и спецтехники № 52 от 05.07.2019, 157 268 руб. 40 коп. - пени за период с 03.12.2019, а также за период с 17.02.2020 по день фактической оплаты задолженности из расчета 0,1% за каждый день, взыскании        35 418 руб. расходов по уплате государственной пошлины. 

Определением суда от 25.02.2020 исковое заявление принято к производству судьи Воронова Т.А.

ООО «Квантор-Строй» обратилось в арбитражный суд со встреченным исковым заявлением о взыскании 1 707 314 руб.  

Определением суда от 26.05.2020 встречный иск принят к рассмотрению.

Определением от 07.07.2020 произведена замена состава суда, дело № А46-2785/2020  передано на рассмотрение судье К.В. Храмцову.

Определением суда от 03.11.2020 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания на Рабкоровской», товарищество собственников жилья «Марс», акционерное общество «Омскэлектро», общество с ограниченной ответственностью «Теплоход», индивидуальный предприниматель ФИО2, индивидуальный предприниматель ФИО3, индивидуальный предприниматель ФИО4, индивидуальный предприниматель ФИО5, индивидуальный предприниматель ФИО6, индивидуальный предприниматель ФИО7, индивидуальный предприниматель ФИО8, индивидуальный предприниматель ФИО9, индивидуальный предприниматель ФИО10, индивидуальный предприниматель ФИО11, индивидуальный предприниматель ФИО12.

Определением суда от 11.02.2021 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено, общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Универсал».

В судебном заседании, открытом 04.03.2021, в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 10.03.2021. Информация о перерыве размещена на сайте Арбитражного суда Омской области.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал, встречные исковые требования полагает необоснованными.

Представители ответчика в судебном заседании до перерыва исковые требования не признали, встречные исковые требования поддержали.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующее.

04.06.2019  года между Департаментом городского хозяйства Администрации города Омска (Главный распорядитель бюджетных средств) и обществом с ограниченной ответственностью  Управляющая организация «Универсал» (Получатель) заключено Соглашение о предоставлении из бюджета города Омска субсидии на финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, предметом которого является предоставление из бюджета города Омска в 2019 году субсидии в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с проведением капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Омск, Ленинградская площадь, д. 6. По условиям Соглашения Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Главному распорядителю бюджетных средств как получателю средств бюджета города Омска, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на цели, указанные в разделе I Соглашения, в следующем размере 10 724 983 руб. 20 коп. по коду БК 907 0501 015015434F 813 245.01.01 0136.000 01.03.9612.02.12. Субсидия предоставляется в соответствии с Положением о предоставлении субсидии при выполнении Получателем следующих условий:1) осуществление Получателем деятельности по управлению и (или) обслуживанию многоквартирных домов;2) предоставление Получателем документов, указанных  в пункте 7 Положения о предоставлении субсидии; 3) согласование перечня видов работ и объема затрат по капительному ремонту, подлежащих финансированию за счет Субсидий, с Главным распорядителем бюджетных средств; 4) наличие проектно – сметной (сметной) документации на капитальный ремонт, составленной в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативно-технических документов, согласованной с департаментом финансов и контроля Администрации города Омска (за исключением проведения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевого маршрута  в городе Омске, на которых планируется выполнить капительный ремонт в целях подготовки к проведению в 2019 году в городе Омске XVI Форума межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации), а в случаях проведения капитального ремонта многоквартирных домов вдоль гостевого маршрута – прошедшей соответствующую экспертизу сметной документации в лицензированной организации, в том числе с учетом федеральных единичных расценок; 5) отсутствие у получателя субсидии просроченной  (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом города Омска. Получатель должен соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, требованиям, указанным в пункте 6 Положения о предоставлении субсидии. Получатель выражает согласие: на осуществление Главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим Субсидию, Контрольно-счетной палатой города Омска и департаментом финансов и контроля Администрации города Омска проверок соблюдения им условий, целей, порядка ее предоставления; на осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирных домов вдоль гостевого маршрута организациями, привлеченными Главным распорядителем бюджетных средств по договору для указанных целей. Контрольно счетная  палата города Омска имеет право проводить проверки соблюдение условий получения субсидий Получателем в рамках осуществления контроля за деятельностью Главного распорядителя бюджетных средств. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на расчетный или корреспондентский счет Получателя, открытый Получателю в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете города Омска на 2019 год на вышеуказанные цели при условии зачисления на лицевой счет Главного распорядителя бюджетных средств соответствующего объема финансовых средств. Субсидия в размере 30 процентов от суммы, определенной Соглашением, перечисляется в качестве аванса на расчетный или корреспондентский счет Получателя, открытый Получателю в учреждениях  Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее 10 рабочего дня с момента заключения Соглашения Главным распорядителем бюджетных средств. Окончательный расчет осуществляется не позднее 10 рабочего дня с момента окончания проверки предоставленных актов приемки выполненных работ (формы КС-2), справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3), подписанных представителем организации, привлеченной Главным распорядителем бюджетных средств по договору на осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирных домов вдоль гостевого маршрута и лицами, уполномоченными действовать о имени Получателя, в соответствии с приложением № 1 к Соглашению.

На аналогичных условиях заключены соглашения: 

- от 31.05.2019 между Департаментом городского хозяйства Администрации города Омска (Главный распорядитель бюджетных средств) и обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Универсал» (Получатель) о предоставлении из бюджета города Омска субсидии на финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, предметом которого является предоставление из бюджета города Омска в 2019 году субсидии в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с проведением капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>;

- от 03.06.2019 между Департаментом городского хозяйства Администрации города Омска (Главный распорядитель бюджетных средств) и обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Универсал» (Получатель) о предоставлении из бюджета города Омска субсидии на финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, предметом которого является предоставление из бюджета города Омска в 2019 году субсидии в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с проведением капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>;

- от 03.06.2019 между Департаментом городского хозяйства Администрации города Омска (Главный распорядитель бюджетных средств) и обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Универсал» (Получатель) о предоставлении из бюджета города Омска субсидии на финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, предметом которого является предоставление из бюджета города Омска в 2019 году субсидии в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с проведением капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>;

- от 04.06.2019 между Департаментом городского хозяйства Администрации города Омска (Главный распорядитель бюджетных средств) и обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Универсал» (Получатель) о предоставлении из бюджета города Омска субсидии на финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, предметом которого является предоставление из бюджета города Омска в 2019 году субсидии в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с проведением капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Омск, Ленинградская площадь, д. 2;

- от 07.06.2019 между Департаментом городского хозяйства Администрации города Омска (Главный распорядитель бюджетных средств) и обществом с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Ленинское» (Получатель) о предоставлении из бюджета города Омска субсидии на финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, предметом которого является предоставление из бюджета города Омска в 2019 году субсидии в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с проведением капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Омск, проспект К. Маркса, д. 50;

- от 21.06.2019 между Департаментом городского хозяйства Администрации города Омска (Главный распорядитель бюджетных средств) и обществом с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Ленинское» (Получатель) о предоставлении из бюджета города Омска субсидии на финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, предметом которого является предоставление из бюджета города Омска в 2019 году субсидии в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с проведением капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>;

- от 21.06.2019 между Департаментом городского хозяйства Администрации города Омска (Главный распорядитель бюджетных средств) и обществом с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Ленинское» (Получатель) о предоставлении из бюджета города Омска субсидии на финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, предметом которого является предоставление из бюджета города Омска в 2019 году субсидии в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с проведением капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>;

- от 21.06.2019 между Департаментом городского хозяйства Администрации города Омска (Главный распорядитель бюджетных средств) и обществом с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Ленинское» (Получатель) о предоставлении из бюджета города Омска субсидии на финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, предметом которого является предоставление из бюджета города Омска в 2019 году субсидии в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных спроведением капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>;

- от 26.06.2019 между Департаментом городского хозяйства Администрации города Омска (Главный распорядитель бюджетных средств) и обществом с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Ленинское» (Получатель) о предоставлении из бюджета города Омска субсидии на финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, предметом которого является предоставление из бюджета города Омска в 2019 году субсидии в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с проведением капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>;

- от 06.06.2019 между Департаментом городского хозяйства Администрации города Омска (Главный распорядитель бюджетных средств) и обществом с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Ленинское» (Получатель) о предоставлении из бюджета города Омска субсидии на финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, предметом которого является предоставление из бюджета города Омска в 2019 году субсидии в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с проведением капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>;

- от 01.07.2019 между Департаментом городского хозяйства Администрации города Омска (Главный распорядитель бюджетных средств) и Товариществом собственников жилья «Марс» (Получатель) о предоставлении из бюджета города Омска субсидии на финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, предметом которого является предоставление из бюджета города Омска в 2019 году субсидии в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с проведением капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>;

- от 27.05.2019 между Департаментом городского хозяйства Администрации города Омска (Главный распорядитель бюджетных средств) и обществом с ограниченной ответственностью  «Управляющая компания на Рабкоровской» (Получатель) о предоставлении из бюджета города Омска субсидии на финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, предметом которого является предоставление из бюджета города Омска в 2019 году субсидии в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с проведением капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>;

- от 28.05.2019 между Департаментом городского хозяйства Администрации города Омска (Главный распорядитель бюджетных средств) и обществом с ограниченной ответственностью  «Управляющая компания на Рабкоровской» (Получатель) о предоставлении из бюджета города Омска субсидии на финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, предметом которого является предоставление из бюджета города Омска в 2019 году субсидии в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с проведением капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>;

- от 28.05.2019 между Департаментом городского хозяйства Администрации города Омска (Главный распорядитель бюджетных средств) и обществом с ограниченной ответственностью  «Управляющая компания на Рабкоровской» (Получатель) о предоставлении из бюджета города Омска субсидии на финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, предметом которого является предоставление из бюджета города Омска в 2019 году субсидии в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с проведением капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>;

- от 28.05.2019 между Департаментом городского хозяйства Администрации города Омска (Главный распорядитель бюджетных средств) и обществом с ограниченной ответственностью  «Управляющая компания на Рабкоровской» (Получатель) о предоставлении из бюджета города Омска субсидии на финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, предметом которого является предоставление из бюджета города Омска в 2019 году субсидии в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с проведением капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>;

- 31.05.2019 между Департаментом городского хозяйства Администрации города Омска (Главный распорядитель бюджетных средств) и обществом с ограниченной ответственностью  «Управляющая компания на Рабкоровской» (Получатель) о предоставлении из бюджета города Омска субсидии на финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, предметом которого является предоставление из бюджета города Омска в 2019 году субсидии в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с проведением капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>;

- от 04.06.2019 между Департаментом городского хозяйства Администрации города Омска (Главный распорядитель бюджетных средств) и обществом с ограниченной ответственностью  «Управляющая компания на Рабкоровской» (Получатель) о предоставлении из бюджета города Омска субсидии на финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, предметом которого является предоставление из бюджета города Омска в 2019 году субсидии в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с проведением капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Омск, Ленинградская площадь, д. 3;

- от 04.06.2019 между Департаментом городского хозяйства Администрации города Омска (Главный распорядитель бюджетных средств)   с ограниченной ответственностью  «Управляющая компания на Рабкоровской»(Получатель) о предоставлении из бюджета города Омска субсидии на финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, предметом которого является предоставление из бюджета города Омска в 2019 году субсидии в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с проведением капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Омск, Ленинградская площадь, д. 1;

- от 03.06.2019 между Департаментом городского хозяйства Администрации города Омска (Главный распорядитель бюджетных средств)   с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилищник 1»(Получатель) о предоставлении из бюджета города Омска субсидии на финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, предметом которого является предоставление из бюджета города Омска в 2019 году субсидии в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с проведением капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>;

- от 23.12.2019 между Департаментом городского хозяйства Администрации города Омска (Главный распорядитель бюджетных средств) и акционерным обществом «Омскэлектро» (Получатель) №  907-865/2019 о предоставлении из бюджета города Омска субсидии на финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, предметом которого являетсяпредоставление из бюджета города Омска в 2019 году субсидии в целях финансового обеспечения затрат Получателя, на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, в которых на дату приватизации первого жилого помещения требовалось оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества, проведение которого осуществляется в рамках государственных программ Омской области, по адресам согласно приложению № 1 к соглашению. 

14.10.2019 между товариществом собственников жилья «Марс» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй» (подрядчик) заключен договор № 1/19, в соответствии с условиями которого заказчик поручает подрядчику выполнить собственными силами, средствами и из своих материалов работы по капитальному ремонту фасада МКД, обязуется принять и оплатить за счет средств полученных заказчиком по соглашению надлежащим образом выполненные подрядчиком работы в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем Договоре, но не ранее, чем заказчиком будут получены денежные средства по соглашению в полном объеме, а подрядчик обязуется выполнить порученные заказчиком работы с надлежащим качеством в объеме и сроки, предусмотренные договором. Дата начала работ: 14.10.2019 г., дата окончания работ: до 03.11.2019 г., место выполнения работ: 

<

...>. Стоимость работ согласована сторонами на дату заключения договора в размере, предусмотренном в Приложении № 1 Договора и составляет 1 498 062 руб. 65 коп. с возможной корректировкой сметной стоимости. Стоимость работ включает все затраты подрядчика, так или иначе связанные с выполнением работ на объекте, в соответствии с условиями настоящего договора, в том числе, но не только: затраты на производство строительно-монтажных работ с учетом стоимости материалов, конструкций, изделий, систем и оборудования, а также прочие затраты (в том числе на демонтажные работы, пуско-наладочные работы); затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала подрядчика, доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования, необходимых для начала производства работ; затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки/ремонтной площадки на объекте; оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим договором; затраты, связанные с обеспечением подрядчика персоналом, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование; затраты, связанные с получением подрядчиком всех свидетельств, лицензий, разрешений, допусков, необходимых для выполнения им обязательств по договору; риски удорожания материалов, ресурсов; затраты, связанные с обеспечением подрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства работ на Объекте; иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим Договором. 

11.10.2019 между акционерным обществом «Омскэлектро» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй» (подрядчик) заключен договор № 312-63/19, в соответствии с условиями которого заказчик поручает подрядчику выполнить работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома в объеме и сроки, предусмотренные договором, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение одного календарного дня с даты внесения заказчиком авансового платежа. Окончание выполнения работ- до 29 октября 2019 года. Место выполнения работ: многоквартирный дом № 42 по проспекту Карла Маркса в     г. Омске. Стоимость работ согласована сторонами на дату заключения договора в размере, предусмотренном в Приложении № 1 договора и составляет 3 060 141 руб. 60 коп., в том числе НДС (20%) – 510 023 руб. 60 коп.

11.10.2019 между акционерным обществом «Омскэлектро» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй» (подрядчик) заключен договор № 312-64/19, в соответствии с условиями которого заказчик поручает подрядчику выполнить работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома в объеме и сроки, предусмотренные договором, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение одного календарного дня с даты внесения заказчиком авансового платежа. Окончание выполнения работ - до 29 октября 2019 года. Место выполнения работ: многоквартирный дом № 44 по проспекту Карла Маркса в     г. Омске. Стоимость работ согласована сторонами на дату заключения договора в размере, предусмотренном в Приложении № 1 договора и составляет 5 074 112 руб. 40 коп., в том числе НДС (20%) – 845 685 руб. 40 коп.

11.10.2019 между акционерным обществом «Омскэлектро» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй» (подрядчик) заключен договор № 312-62/19, в соответствии с условиями которого заказчик поручает подрядчику выполнить работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома в объеме и сроки, предусмотренные договором, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение одного календарного дня с даты внесения заказчиком авансового платежа. Окончание выполнения работ - до 29 октября 2019 года. Место выполнения работ: многоквартирный дом № 50 по проспекту Карла Маркса в    г. Омске. Стоимость работ согласована сторонами на дату заключения договора в размере, предусмотренном в Приложении № 1 договора и составляет 3 060 141 руб. 60 коп., в том числе НДС (20%) –510 023 руб. 60 коп.

03.10.2019 между акционерным обществом «Омскэлектро» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй» (подрядчик) заключен договор № 312-52/19, в соответствии с условиями которого заказчик поручает подрядчику выполнить работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома в объеме и сроки, предусмотренные договором, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение одного календарного дня с даты внесения заказчиком авансового платежа. Окончание выполнения работ - до 29 октября 2019 года. Место выполнения работ: многоквартирный дом № 69 по проспекту Карла Маркса в    г. Омске. Стоимость работ согласована сторонами на дату заключения договора в размере, предусмотренном в Приложении № 1 договора и составляет 4 953 889 руб. 20 коп., в том числе НДС (20%) – 825 648 руб. 20 коп.

30.10.2019 между акционерным обществом «Омскэлектро» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй» (подрядчик) заключен договор № 312-15/19, в соответствии с условиями которого заказчик поручает подрядчику выполнить работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома в объеме и сроки, предусмотренные договором, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение одного календарного дня с даты внесения заказчиком авансового платежа. Окончание выполнения работ - до 15 ноября 2019 года. Место выполнения работ: многоквартирный дом № 73 по проспекту Карла Маркса в     г. Омске. Стоимость работ согласована сторонами на дату заключения договора в размере, предусмотренном в Приложении № 1 договора и составляет 2 537 059 руб. 20 коп., в том числе НДС (20%) –422 843 руб. 20 коп.

30.10.2019 между акционерным обществом «Омскэлектро» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй» (подрядчик) заключен договор № 312-84/19, в соответствии с условиями которого заказчик поручает подрядчику выполнить работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома в объеме и сроки, предусмотренные договором, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение одного календарного дня с даты внесения заказчиком авансового платежа. Окончание выполнения работ - до 15 ноября 2019 года. Место выполнения работ: многоквартирный дом № 77 по проспекту Карла Маркса в    г. Омске. Стоимость работ согласована сторонами на дату заключения договора в размере, предусмотренном в Приложении № 1 договора и составляет 2 388 117 руб. 60 коп., в том числе НДС (20%) –398 019 руб. 60 коп.

28.10.2019 между акционерным обществом «Омскэлектро» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй» (подрядчик) заключен договор № 312-83/19, в соответствии с условиями которого заказчик поручает подрядчику выполнить работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома в объеме и сроки, предусмотренные договором, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение одного календарного дня с даты внесения заказчиком авансового платежа. Окончание выполнения работ - до 15 декабря 2019 года. Место выполнения работ: многоквартирный дом № 84 по проспекту Карла Маркса в     г. Омске. Стоимость работ согласована сторонами на дату заключения договора в размере, предусмотренном в Приложении № 1 договора и составляет 6 233 365 руб. 00 коп., в том числе НДС (20%) – 1 038 894 руб. 17 коп.

04.06.2019 между обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания на Рабкоровской» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй» (подрядчик) заключен договор № 04-06/2019-10, в соответствии с условиями которого заказчик поручает подрядчику выполнить собственными силами, средствами и из своих материалов работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные подрядчиком работы в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем Договоре, а подрядчик обязуется выполнить порученные заказчиком работы с надлежащим качеством в объеме и сроки, предусмотренные договором. Оплата по договору осуществляется за счет субсидий, предоставляемых из бюджета города Омска на финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта по соглашению № 907-60/2019 от 28.05.2019. Дата начала работ - 10.06.2019, дата окончания работ – до 30.09.2019, место выполнения работ: многоквартирный дом № 31 по ул. Ленина в г. Омске. Стоимость работ согласована сторонами на дату заключения договора в размере, предусмотренном в Приложении № 1 договора и составляет 6 470 918 руб. 40 коп., в том числе НДС (20%) – 1 078 486 руб. 40 коп.

04.06.2019 между обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания на Рабкоровской» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй» (подрядчик) заключен договор № 04-06/2019-11, в соответствии с условиями которого заказчик поручает подрядчику выполнить собственными силами, средствами и из своих материалов работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные подрядчиком работы в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем договоре, а подрядчик обязуется выполнить порученные Заказчиком работы с надлежащим качеством в объеме и сроки, предусмотренные договором. Оплата по договору осуществляется за счет субсидий, предоставляемых из бюджета города Омска на финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта по соглашению № 907-56/2019 от 28.05.2019. Дата начала работ - 10.06.2019, дата окончания работ – до 30.09.2019, место выполнения работ: многоквартирный дом № 43 по ул. Ленина в г. Омске. Стоимость работ согласована сторонами на дату заключения договора в размере, предусмотренном в Приложении № 1 договора и составляет 1 774 119 руб. 60 коп.

11.10.2019 между акционерным обществом «Омскэлектро» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй» (подрядчик) заключен договор № 312-66/19, в соответствии с условиями которого заказчик поручает подрядчику выполнить работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома в объеме и сроки, предусмотренные договором, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение одного календарного дня с даты внесения заказчиком авансового платежа. Окончание выполнения работ - до 31октября 2019 года. Место выполнения работ: многоквартирный дом № 1 по Ленинградской площади г. Омске. Стоимость работ согласована сторонами на дату заключения договора в размере, предусмотренном в Приложении № 1 договора и составляет 17 368 219 руб. 20 коп., в том числе НДС (20%)- 2 894 703 руб. 20 коп.

25.09.2019 между акционерным обществом «Омскэлектро» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй» (подрядчик) заключен договор № 312-47/19, в соответствии с условиями которого заказчик поручает подрядчику выполнить работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома в объеме и сроки, предусмотренные договором, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение одного календарного дня с даты внесения заказчиком авансового платежа. Окончание выполнения работ - до 31 октября 2019 года. Место выполнения работ: многоквартирный дом № 2 по Ленинградской площади в      г. Омске. Стоимость работ согласована сторонами на дату заключения договора в размере, предусмотренном в Приложении № 1 договора и составляет 10 146 900 руб. 00 коп., в том числе НДС (20%)-1 691 150 руб. 00 коп.

25.09.2019 между акционерным обществом «Омскэлектро» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй» (подрядчик) заключен договор № 312-49/19, в соответствии с условиями которого заказчик поручает подрядчику выполнить работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома в объеме и сроки, предусмотренные договором, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение одного календарного дня с даты внесения заказчиком авансового платежа. Окончание выполнения работ - до 31 октября 2019 года. Место выполнения работ: многоквартирный дом № 3 по Ленинградской площади в г. Омске. Стоимость работ согласована сторонами на дату заключения договора в размере, предусмотренном в Приложении № 1 договора и составляет 9 198 219 руб. 60 коп., в том числе НДС (20%) – 1 533 036 руб. 60 коп.

11.10.2019 между акционерным обществом «Омскэлектро» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй» (подрядчик) заключен договор № 312-65/19, в соответствии с условиями которого заказчик поручает подрядчику выполнить работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома в объеме и сроки, предусмотренные договором, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение одного календарного дня с даты внесения заказчиком авансового платежа. Окончание выполнения работ - до 31 октября 2019 года. Место выполнения работ: многоквартирный дом № 6 по Ленинградской площади в г. Омске. Стоимость работ согласована сторонами на дату заключения договора в размере, предусмотренном в Приложении № 1 договора и составляет 9 759 730 руб. 80 коп., в том числе НДС (20%) –1 626 621 руб. 80 коп.

21.10.2019 между акционерным обществом «Омскэлектро» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй» (подрядчик) заключен договор № 312-76/19, в соответствии с условиями которого заказчик поручает подрядчику выполнить работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома в объеме и сроки, предусмотренные договором, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение одного календарного дня с даты внесения заказчиком авансового платежа. Окончание выполнения работ - до 30декабря 2019 года. Место выполнения работ: многоквартирный дом № 6 по улице ФИО28 в         г. Омске. Стоимость работ согласована сторонами на дату заключения договора в размере, предусмотренном в Приложении № 1 договора и составляет 3 795 675 руб. 60 коп., том числе НДС (20%) –632 612 руб. 60 коп.

04.06.2019 между обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания на Рабкоровской» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй» (подрядчик)заключен договор № 04-06/2019-14, в соответствии с условиями которого заказчик поручает подрядчику выполнить собственными силами, средствами и из своих материалов работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные подрядчиком работы в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем договоре, а подрядчик обязуется выполнить порученные заказчиком работы с надлежащим качеством в объеме и сроки, предусмотренные договором. Оплата по договору осуществляется за счет субсидий, предоставляемых из бюджета города Омска на финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта по соглашению № 907-59/2019 от 28.05.2019. Дата начала работ - 10.06.2019, дата окончания работ – до 30.09.2019, место выполнения работ: многоквартирный дом № 4 по ул. ФИО29  в г. Омске. Стоимость работ согласована сторонами на дату заключения договора в размере, предусмотренном в Приложении № 1 договора и составляет 4 849 956 руб. 00 коп., в том числе НДС (20%) –808 326 руб. 00 коп.

03.07.2019 между обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Универсал» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй» (подрядчик) заключен договор № 03-07/2019-3, в соответствии с условиями которого заказчик поручает подрядчику выполнить собственными силами, средствами и из своих материалов работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные подрядчиком работы в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем договоре, а подрядчик обязуется выполнить порученные заказчиком работы с надлежащим качеством в объеме и сроки, предусмотренные договором. Оплата по договору осуществляется за счет субсидий, предоставляемых из бюджета города Омска на финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта по соглашению № 907-116/2019 от 03.06.2019. Дата начала работ - 03.07.2019, дата окончания работ – до 30.09.2019, место выполнения работ: многоквартирный дом № 26 по пр. Маркса в г. Омске. Стоимость работ согласована сторонами на дату заключения договора в размере, предусмотренном в Приложении № 1 договора и составляет 4 355 450 руб. 40 коп., в том числе НДС 20% в размере 725 908 руб. 40 коп.

03.07.2019 между обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания на Рабкоровской» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй» (подрядчик) заключен договор № 03-07/2019-4, в соответствии с условиями которого заказчик поручает подрядчику выполнить собственными силами, средствами и из своих материалов работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные подрядчиком работы в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем договоре, а подрядчик обязуется выполнить порученные заказчиком работы с надлежащим качеством в объеме и сроки, предусмотренные договором. Оплата по договору осуществляется за счет субсидий, предоставляемых из бюджета города Омска на финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта по соглашению № 907-160/2019 от 04.06.2019. Дата начала работ - 03.07.2019, дата окончания работ – до 30.09.2019, место выполнения работ: многоквартирный дом № 97 по ул. ФИО31 в г. Омске. Стоимость работ согласована сторонами на дату заключения договора в размере, предусмотренном в Приложении № 1 договора и составляет 3 220 390 руб. 60 коп., в том числе НДС (20%) –536 731 руб. 60 коп.

03.07.2019 между обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания на Рабкоровской» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй» (подрядчик) заключен договор № 03-07/2019-5, в соответствии с условиями которого заказчик поручает подрядчику выполнить собственными силами, средствами и из своих материалов работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные подрядчиком работы в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем договоре, а подрядчик обязуется выполнить порученные заказчиком работы с надлежащим качеством в объеме и сроки, предусмотренные договором. Оплата по договору осуществляется за счет субсидий, предоставляемых из бюджета города Омска на финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта по соглашению № 907-111/2019 от 31.05.2019. Дата начала работ - 03.07.2019, дата окончания работ – до 30.09.2019, место выполнения работ: многоквартирный дом № 99 по ул. ФИО31 в г. Омске. Стоимость работ согласована сторонами на дату заключения договора в размере, предусмотренном в Приложении № 1 договора и составляет 5 539 669  руб. 20 коп., в том числе НДС 20% в размере 922 778 руб.

04.06.2019 между обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания на Рабкоровской» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй» (подрядчик) заключен договор № 04-06/2019-12, в соответствии с условиями которого заказчик поручает подрядчику выполнить собственными силами, средствами и из своих материалов работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные подрядчиком работы в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем договоре, а подрядчик обязуется выполнить порученные заказчиком работы с надлежащим качеством в объеме и сроки, предусмотренные договором. Оплата по договору осуществляется за счет субсидий, предоставляемых из бюджета города Омска на финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта по соглашению № 907-57/2019 от 28.05.2019. Дата начала работ - 10.06.2019, дата окончания работ – до 30.09.2019, место выполнения работ: многоквартирный дом № 47 по ул. Ленина в г. Омске. Стоимость работ согласована сторонами на дату заключения договора в размере, предусмотренном в Приложении № 1 договора и составляет 3 007 040 руб. 40 коп., в том числе НДС 20% в размере 501 173 руб. 40 коп.

05 июля 2019 между обществом с ограниченной ответственностью «Трассервис» (исполнитель) и обществом с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй» (заказчик) заключен договор № 52 на предоставление транспортных средств и спецтехники (далее – договор № 52 от 05.07.2019), в соответствии с условиями которого исполнитель в соответствии с поручениями/заявками заказчика осуществляет подбор, организацию и предоставление ему за плату во временное пользование транспортные средства и спецтехнику с водителем для нужд заказчика. Поручения/заявки на предоставление техники заказчик может осуществлять как в письменной, так и в устной форме. В поручении/заявке заказчика на предоставление техники должны содержаться следующие сведения: вид транспортного средства/спецтехники, цель использования техники, местонахождение объекта для использования техники, продолжительность использования техники, место подачи техники, время подачи техники, контактное лица, выступающее от имени заказчика. Поручения/заявки могут быть направлены исполнителю любым незапрещенным законом способом, включая факс, электронную почту, телефонограмму и др. Приемка-сдача выполненных работ/оказанных услуг сторонами оформляются актом выполненных работ/оказанных услуг, направляемым исполнителем заказчику. Исполнитель обязан: организовывать и осуществлять от своего имени все необходимые действия для надлежащего оказания услуг в соответствии с требованиями настоящего договора; непосредственно после получения поручения/заявки заказчика на предоставлении техники обеспечить их прием и обработку с учетом требований п. 2.2 настоящего договора, принятие в работу, включающее в себя установление возможности и сроков предоставления запрашиваемой техники, а также непосредственное предоставление техники на объект; предоставлять технически исправную, чистую, годную к эксплуатации технику в сроки и место, указанные в поручении/заявке заказчика; обеспечить надлежащее обслуживание со стороны водителя; осуществлять оперативный контроль за надлежащим оказанием услуг, информировать заказчика обо всех обстоятельствах, влияющих на изменение нормального течения событий, для надлежащего  оказания услуг. Выполненные работы/оказанные услуги заказчик оплачивает исполнителю в течение 5 дней с момента выполнения работ/оказания услуг на основании выставленного исполнителем счета. Объем выполненных работ и затраченного на их выполнение рабочего времени отражается заказчиком в справке для расчета за выполненные работы по форме № ЭСМ-7. Цены на оказываемые исполнителем услуги определяются согласно прайс-листу (приложение 1) к настоящему договору в зависимости от типа и вида транспортного средства. В случае просрочки заказчиком оплаты за оказанные услуги, выполненные работы, подлежит начислению пеня в размере 0,1 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. При нарушении сроков оплаты свыше 15 дней пеня подлежит начислению в размере 0, 2 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. При нарушении сроков оплаты свыше 30 дней пеня подлежит начислению в размере 0, 3 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки (пункты 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 5.2, 5.4, 5.5, 6.2 договора) (том 6 л.д.35-37).

В свою очередь, в целях исполнения обязательств, предусмотренных договором       № 52 от 05.07.2019, ООО «Трассервис» заключило следующие договоры:

- договор на предоставление транспортных средств и спецтехники от 01.11.2017 № 6 с индивидуальным предпринимателем ФИО15 (том 9 л.д. 23-24);

- договор на предоставление транспортных средств и спецтехники от 03.01.2019 № 3 с индивидуальным предпринимателем ФИО16 (том 9 л.д. 25-26);

- договор на предоставление транспортных средств и спецтехники от 18.04.2019 № 5 с индивидуальным предпринимателем ФИО17 (том 9 л.д. 27-29);

- договор на предоставление транспортных средств и спецтехники от 20.06.2019       № 24 с обществом с ограниченной ответственностью «Теплоход» (том 9 л.д. 30-32);

- договор на предоставление транспортных средств и спецтехники от 29.05.2018       № 29/05/2018-1с обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-промышленная группа «Премьер» (том 9 л.д. 33-35);

- договор на предоставление транспортных средств и спецтехники от 37 от 01.08.2019 с индивидуальным предпринимателем ФИО2 (том 9. л.д. 36-38);

- договор на предоставление транспортных средств и спецтехники от 02.11.2017 № 13 с индивидуальным предпринимателем ФИО18 (том 9 л. 39-40);

- договор на предоставление транспортных средств и спецтехники от 08.11.2017 № 2 с индивидуальным предпринимателем ФИО12 (том 9 л.д. 41-42);

- договор на предоставление транспортных средств и спецтехники от 03.11.2017       № 20 с индивидуальным предпринимателем ФИО9 (том 9 лд. 43-44);

- договор аренды транспортного средства от 15.12.2017 б/н с индивидуальным предпринимателем ФИО19 (том 9 л.д. 45-48);

- договор на предоставление транспортных средств и спецтехники от 08.11.2018 № 3 с индивидуальным предпринимателем ФИО20 (том 9 л.д. 49-51);

- договор на предоставление транспортных средств и спецтехники от 28.06.2018 № 7 с обществом с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Центрстрой» (том 9 л.д. 52-53);

- договор на предоставление транспортных средств и спецтехники от 05.10.2018 № 3 с обществом с ограниченной ответственностью «Спецтранс»;

- договор на предоставление транспортных средств и спецтехники от 31.07.2018 № 3 с индивидуальным предпринимателем ФИО13 (том 9 л.д. 54-55);

- договор на предоставление транспортных средств и спецтехники от 01.11.2017       № 6 с индивидуальным предпринимателем ФИО21 (том 9 л.д. 58-59);

- договор на предоставление транспортных средств и спецтехники от 14.06.2018 № 1 с индивидуальным предпринимателем ФИО22 (том 9 л.д. 60-61);

- договор на предоставление транспортных средств и спецтехники от 16.03.2018 № 2 с индивидуальным предпринимателем ФИО4 (том 9 л.д. 62-63);

- договор на предоставление транспортных средств и спецтехники от 01.11.2017 № 6  с индивидуальным предпринимателем ФИО5 (том 9 л.д. 64-65);

- договор безвозмездного пользования автомобилем от 01.03.2018 г с индивидуальным предпринимателем ФИО4 (том 9 л.д. 66-69);

- договор на предоставление транспортных средств и спецтехники от 23.09.2019 № 4 с индивидуальным предпринимателем ФИО6 (том 9 л.д. 70-73);

- договор на предоставление транспортных средств и спецтехники от 06.07.2018 № 4 с индивидуальным предпринимателем ФИО11 (том 9 л.д. 74-75);

- договор на предоставление транспортных средств и спецтехники от 27.06.2018 № 3 с индивидуальным предпринимателем ФИО23 (том 9 л.д. 76-77);

- договор на предоставление транспортных средств и спецтехники от 19.02.2018 № 4 с индивидуальным предпринимателем ФИО7 (том 9 л.д. 78-79);

- договор на предоставление транспортных средств и спецтехники от 15.11.2017 № 6 с индивидуальным предпринимателем ФИО24 (том 9 л.д. 80-81);

- договор на предоставление транспортных средств и спецтехники от 08.12.2017 № 2 с индивидуальным предпринимателем ФИО8 (том 9 л.д. 82-83);

- договор на предоставление транспортных средств и спецтехники от 03.11.2017      № 16 с индивидуальным предпринимателем ФИО25 (том 9 л.д. 84-85);

- договор на предоставление транспортных средств и спецтехники от 09.11.2017 № 3 с индивидуальным предпринимателем ФИО26 (том 9 л.д. 86-87).

По утверждению истца, ООО  «Трассервис» исполнило свои обязательства надлежащим образом, оказав ответчику услуги по договору № 52 от 05.07.2019, что подтверждается представленными в материалы дела актами №№ 2867 от 12.07.2019,  2900 от 13.12.2019, 2920 от 15.07.2019, 2950 от 16.07.2019, 2991 от 19.07.2019, 3019 от 20.07.2019, 3038 от 22.07.2019, 3069 от 23.07.2019, 3089 от 24.07.2019, 3117 от 25.07.2019, 3131 от 26.07.2019, 3151 от 27.07.2019, 3160 от 28.07.2019, 3173 от 29.07.2019, 3208 от 30.07.2019, 3220 от 31.07.2019, 4153 от 16.09.2019, 4175 от 17.09.2019, 4195 от 18.09.2019, 4220 от 19.09.2019, 4246 от 20.09.2019, 4266 от 21.09.2019, 4277 от 22.09.2019, 4288 от 23.09.2019, 4311 от 24.09.2019, 4348 от 25.09.2019, 4360 от 25.09.2019, 4367 от 26.09.2019, 4410 от 27.09.2019, 4416 от 28.09.2019, 4427 от 29.09.2019, 4434 от 30.09.2019, 4467 от 01.10.2019, 4491 от 02.10.2019, 4512 от 03.10.2019, 4548 от 04.10.2019, 4556 от 05.10.2019, 4564 от 06.10.2019, 4579 от 07.10.2019, 4614 от 08.10.2019, 4645 от 09.10.2019, 4664 от 10.10.2019, 4548 от 04.10.2019, 4710 от 11.10.2019, 4717 от 12.10.2019, 4730 от 13.10.2019, 4746 от 14.10.2019, 4766 от 15.10.2019, 4792 от 16.10.2019, 4821 от 17.10.2019, 4847 от 18.10.2019, 4855 от 19.10.2019,4865 от 20.10.2019, 4884 от 21.10.2019, 4904 от 22.10.2019, 4921 от 23.10.2019, 4940 от 24.10.2019, 4963 от 25.10.2019, 4942 от 26.10.2019, 4977 от 27.10.2019, 4985 от 28.10.2019, 5010 от 29.10.2019, 5036 от 30.10.2019, 5046 от 31.10.2019, 5084 от 01.11.2019, 5096 от 21.11.2019, 5103 от 03.11.2019, 5107 от 04.11.2019, 5117 от 05.11.2019, 5136 от 06.11.2019, 2765 от 06.07.2019, 2817 от 10.07.2019,  представленными в материалы дела справками для расчетов за выполненные работы (услуги)  (том 1 л.д.10-156, том 2 л.д. 1-153, том 3 л.д. 1-165, том 4 л.д. 1-166, том 5 л.д. 1-165, том 6 л.д. 1-34, том 7 л.д. 12-148, том 8 л.д. 1-111) на общую сумму 12 217 086 руб.

Однако ответчик исполнял свои обязательства по оплате оказанных услуг по вышеуказанному договору ненадлежащим образом, в результате чего по расчету истца, у ООО «Квантор-Строй»  образовалась задолженность в сумме 2 042 446 руб.  

Направленная в адрес ответчика претензия с требованием произвести оплату задолженности оставлена ООО «Квантор-Строй»  без удовлетворения.

Указывая на ненадлежащее исполнение ООО «Квантор-Строй»  обязательств по оплате оказанных услуг по договору № 52 от 05.07.2019, ООО «Трассервис» обратилось с настоящим иском в арбитражный суд.

В свою очередь, полагая, что при осуществлении платежей по договору № 52 от 05.07.2019 ООО «Квантор-Строй»  допущена переплата, выразившаяся в оплате фактически неоказанных услуг, ООО «Квантор-Строй»  обратилось со встречными исковыми требованиями о взыскании 1 707 314 руб. неосновательного обогащения.

Исследовав и оценив обстоятельства дела, имеющиеся в деле доказательства, суд полагает, что исковые требования ООО «Трассервис»  подлежат частичному удовлетворению, а в удовлетворении встречных исковых требований ООО «Квантор-Строй» надлежит отказать, исходя из следующего.

В обоснование исковых требований ООО «Трассервис»  ссылается на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договору № 52 от 05.07.2019.

В силу статьи 632 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору аренды (фрахтования на время) транспортного средства с экипажем арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование и оказывает своими силами услуги по управлению им и по его технической эксплуатации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно пункту 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Согласно статьям 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается.

По утверждению истца, с учетом пояснений от 15.09.2020 (том 7 л.д. 6) было оказано услуг:

- за июль 2019 г. на сумму 448 560 руб.,

- за август 2019 г. на сумму 1 562 520 руб.,

- за сентябрь 2019 г. на сумму 3 140 568 руб.,

- за октябрь 2019 г. на сумму 5 857 698 руб.,

- за ноябрь 2019 г. на сумму 1 207 740 руб.

При этом спор относительно факта и стоимости услуг, оказанных ООО «Трассервис»  ООО «Квантор-Строй» по договору № 52 от 05.07.2019 в июле, августе и сентябре 2019 г. между сторонами отсутствует.

Основные разногласия сторон касаются факта и стоимости услуг, оказанных ООО «Трассервис»  по договору № 52 от 05.07.2019 в октябре и ноябре 2019 г.

Согласно возражениям ответчика, в октябре 2019 по договору № 52 от 05.07.2019 ООО «Трассервис»  были оказаны услуги на общую сумму 3 315 678 руб., а ноябре 2019 г. услуги по договору № 52 от 05.07.2019 ООО «Трассервис» вообще не оказывались, поскольку капитальный ремонта многоквартирных домов в связи с проведением в 2019 году в городе Омске XVI Форума межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации был завершен. Кроме того, ответчик указывает, что представленные в материалы дела акты и справки для расчетов за выполненные работы (услуги) истом в ходе исполнения договора № 52 от 05.07.2019 ООО «Квантор-Строй» не направлялись, оплата оказанных услуг осуществлялась ответчиком по данным оперативного учета, который вел в г. Омске представитель ООО «Квантор-Строй» ФИО27 как единственное лицо, уполномоченное на подписание вышеуказанных справок.

Возражая против предъявленных исковых требований, ответчик также указывает, что в спорный период ООО «Трассервис»  представлены в материалы дела справки по форме ЭСМ-7 с указанием следующих адресов объектов:

1. Карла Маркса, 6.

2. Карла Маркса, 8.

3. Карла Маркса, 26.

4. Карла Маркса, 42.

5. Карла Маркса, 44.

6. Карла Маркса, 47.

7. Карла Маркса, 50.

8. Карла Маркса, 69.

9. Карла Маркса, 73.

10. Карла Маркса, 77.

11. Карла Маркса, 78.

12. Карла Маркса, 79.

13. Карла Маркса, 84.

14. Ленина, 31.

15. Ленина, 39.

16. Ленина, 43.

17. Ленина, 47.

18. Ленинградская площадь, 1.

19. Ленинградская площадь, 2.

20. Ленинградская площадь, 3.

21. Ленинградская площадь, 6.

22. ФИО28, 6.

23. ФИО29, 4.

24. ФИО30, 50.

25. ФИО31, 97.

26. ФИО31, 99.

Однако по ряду указанных объектов работы уже были сданы, что подтверждается следующими доказательствами:

1. Карла Маркса, 6 (т. 6 л.д. 5) - по указанному адресу ООО «Квантор-Строй» никогда не выполняло какие-либо работы.

2. КарлаМаркса,8-поуказанномуадресуработы сданы 04.11.2019, что подтверждается актом выполненных работ по договору № 1/19 от 14.10.2019, заказчик - ТСЖ «Марс».

3. Карла Маркса,26 -по указанному адресу работы сданы 05.10.2019, что подтверждается актом выполненных работ по договору № 03-07/2019-3 от 03.07.2019, заказчик - ООО УО «Универсал».

4. Карла Маркса,42 -по указанному адресу работы сданы29.10.2019, что подтверждается актом выполненных работ по договору № 312-63/19 от 11.10.2019, заказчик - АО «Омскэлектро».

5. КарлаМаркса,44-поуказанномуадресуработы сданы 29.10.2019, что подтверждается актом выполненных работ по договору № 312-64/19 от 11.10.2019, заказчик - АО «Омскэлектро».

6. Карла Маркса, 47 (т.4 л.д. 99) - по указанному адресу ООО «Квантор-Строй» никогда не выполняло какие-либо работы.

7. КарлаМаркса,50-поуказанномуадресуработы сданы 29.10.2019, что подтверждается актом выполненных работ по договору № 312-62/19 от 11.10.2019, заказчик - АО «Омскэлектро».

8. КарлаМаркса,69-поуказанномуадресуработы сданы 01.11.2019,что подтверждается актом выполненных работ по договору № 312 52/19 от 03.10.2019, заказчик - АО «Омскэлектро».

9. КарлаМаркса,73-поуказанномуадресуработы сданы 15.11.2019,что подтверждается актом выполненных работ по договору № 312-85/19 от 30.10.2019, заказчик - АО «Омскэлектро». Вместе с тем, работы по указанному объекту выполнялись спривлечением стороннихорганизаций -обществом с ограниченной ответственностью «Автостройресурс», обществом с ограниченной ответственностью «Профессионал»,обществом с ограниченной ответственностью «Комплектсервис».

10. КарлаМаркса,77-поуказанномуадресуработы сданы15.11.2019,что подтверждается актом выполненных работ по договору         № 312-84/19 от 30.10.2019, заказчик - АО «Омскэлектро». Вместе с тем, работы по указанному объекту выполнялись спривлечением стороннихорганизаций - обществом с ограниченной ответственностью «Автостройресурс», обществом с ограниченной ответственностью «Профессионал»,обществом с ограниченной ответственностью «Комплектсервис».

11. Карла Маркса, 78 - по указанному адресу ООО «Квантор-Строй» никогда не выполняло какие-либо работы.

12. Карла Маркса, 79 - по указанному адресу ООО «Квантор-Строй» никогда не выполняло какие-либо работы.

13. Карла Маркса, 84 - по указанному адресу работы сданы 15.12.2019, что подтверждается актом выполненных работ по договору № 312-83/19 от 28.10.2019, заказчик - АО «Омскэлектро». Вместе с тем, работы по указанному объекту выполнялись с привлечением сторонних организаций - обществом с ограниченной ответственностью «Автостройресурс», обществом с ограниченной ответственностью «Профессионал», обществом с ограниченной ответственностью «Комплектсервис», индивидуальным предпринимателем ФИО13 

14. Ленина, 31 - по указанному адресу работы сданы 05.10.2019, что подтверждается актом выполненных работ по договору № 04-06/2019-10 от 04.06.2019, заказчик - ООО «УК на Рабкоровской».

15. Ленина, 39 - по указанному адресу ООО «Квантор-Строй» никогда не выполняло какие-либо работы.

16. Ленина, 43 - по указанному адресу работы сданы 05.10.2019, что подтверждается актом выполненных работ по договору № 04-06/2019-11 от 04.06.2019, заказчик - ООО «УК на Рабкоровской».

17. Ленина, 47 - по указанному адресу работы сданы 05.10.2019, что подтверждается актом выполненных работ по договору № 04-06/2019-12 от 04.06.2019, заказчик - ООО «УК на Рабкоровской».

18. Ленинградская площадь, 1 - по указанному адресу работы сданы 31.10.2019, что подтверждается актом выполненных работ по договору № 311-66/19 от 11.10.2019, заказчик - АО «Омскэлектро».

19. Ленинградская площадь, 2 - по указанному адресу работы сданы 31.10.2019, что подтверждается актом выполненных работ по договору № 311-47/19 от 25.09.2019, заказчик - АО «Омскэлектро».

20. Ленинградская площадь, 3 - по указанному адресу работы сданы 31.10.2019, что подтверждается актом выполненных работ по договору № 311-49/19 от 25.09.2019, заказчик - АО «Омскэлектро».

21. Ленинградская площадь, 6 - по указанному адресу работы сданы 31.10.2019, что подтверждается актом выполненных работ по договору № 311-65/19 от 11.10.2019, заказчик - АО «Омскэлектро».

22. ФИО28, 6 - по указанному адресу работы выполнялись в период с 16.12.2019 по 20.12.2019, что подтверждается актом выполненных работ по договору № 312-76/19 от 21.10.2019, заказчик - АО «Омскэлектро».

23. ФИО29, 4 - по указанному адресу работы сданы 05.10.2019, что подтверждается актом выполненных работ по договору № 04-06/2019-14 от 04.06.2019, заказчик - ООО «УК на Рабкоровской».

24. ФИО30, 50 (т. 4 л.д.154) - по указанному адресу ООО «Квантор-Строй» никогда не выполняло какие-либо работы.

25. ФИО31, 97 - по указанному адресу работы сданы 05.10.2019, что подтверждается актом выполненных работ по договору № 03-07/2019-4 от 03.07.2019, заказчик - ООО «УК на Рабкоровской».

26. ФИО31, 99 - по указанному адресу работы сданы 05.10.2019, что подтверждается актом выполненных работ по договору № 03-07/2019-5 от 03.07.2019, заказчик - ООО «УК на Рабкоровской».

Таким образом, по утверждению ответчика, исходя из анализа представленных истцом по первоначальному иску документам не подтверждается фактическое оказание услуг по вышеуказанным адресам, так как работы ООО «Квантор-Строй» либо уже были сданы, либо оказывались третьими лицами, либо работы на многоквартирных домах не проводились вовсе (том 9 л.д. 88-93, том 12 л.д. 1-4).

Подробные расчеты и контррасчеты исковых требований с указанием дат, мест и исполнителей услуг представлены сторонами в материалы дела.

Оценивая доводы сторон, суд приходит к следующему.

Основанием для оплаты услуг по договору № 52 от 05.07.2019 является факт их оказания.

 Как следует из материалов дела и установлено судом, ООО «Трассервис» по договору № 52 от 05.07.2019  было привлечено ООО «Квантор-Строй» к выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в г. Омске в связи с исполнением собственных обязательств  ответчика перед заказчиками, обусловленных в свою очередь исполнением последними соглашений о предоставлении из бюджета города Омска субсидий на финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе в связи с проведением в 2019 году в городе Омске XVI Форума межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации.

При этом, согласно условиям договора № 52 от 05.07.2019 стороны согласовали порядок оформления факта, объема и стоимости оказанных путем выставления счетов, оформления актов выполненных работ (оказанных услуг),  справками по форме ЭСМ-7 (пункты 2.3, 5.2, 5.4 договора).

Согласно Постановлению Госкомстата РФ от 28.11.1997 № 78 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте» справка для расчетов за выполненные работы (услуги) (форма № ЭСМ-7)  применяется для производства расчетов организации с заказчиками и для подтверждения выполненных работ (услуг) строительными машинами (механизмами). Составляется в одном экземпляре представителями заказчика и организации - исполнителя работ (услуг) на основании данных путевого листа (форма № ЭСМ-2) или рапортов (формы № № ЭСМ-1, ЭСМ-3). Справка заверяется печатью заказчика, передается в бухгалтерию организации, которая использует ее как приложение к документу, выставляемому заказчику для оплаты. На каждый рапорт (путевой лист) работы строительной машины (механизма) выписывается отдельная справка. Стоимость работ (услуг) указывается в договорных ценах, по которым осуществляются расчеты заказчика с исполнителем (управлением механизации).

Как следует из материалов дела, указанный порядок оформления справок для расчетов за выполненные работы (услуги) (форма № ЭСМ-7) сторонами при исполнении договора № 52 от 05.07.2019 не соблюдался. В представленных в материалы дела справках подписи в строке «заказчик» выполнены преимущественно самими лицами, осуществлявшими оказание соответствующих услуг, и лишь отдельные – представителем ООО «Квантор-Строй» - ФИО27 Дамиром.

Согласно показаниям свидетеля ФИО27, он работал с 01.11.2019 в ООО «Квантор-Строй» мастером строительных работ, до этого с конца августа  2019 года находился на испытательном сроке в указанной организации. Его основной задачей было следить обеспечение на объектах наличия техники и материала. Он устроился на работу в конце августа 2019  года, на служебном автомобиле объезжал объекты, заказывал необходимый материал и технику. Для учета им велся блокнот. Ремонт фасадов выполняли субподрядчики, проверку качества работ производил он, объем работ фиксировался геодезической съемкой. Справки водителям в указанный период подписывал он, фиксировал объем работ в блокноте и на основании этих записей подписывал справки водителям.  В представленных ему на обозрение справках за 04.11-05.11 подпись похожа на принадлежащую ему. Работы на домах были фактически сданы перед приездом глав государств на саммит, все работы были закончены в конце октября, при приемке работ присутствовали заказчики, представитель Администрации, субподрядчики. Отмывка производилась примерно с 18 по 26 октября. В ноябре переда саммитом работы произведены быть не могли, дома были опечатаны. К ноябрю было все сделано, работы на объектах в ноябре со стороны дворов также не могли проводиться (протокол судебного заседания от 22.10.2020). 

Как следует из показаний свидетеля  ФИО32, она работает менеджером в обществе «Алгоритм авто», которым  заключен агентский договор с ООО «Трассервис». Она принимала заявки по заказу техники. Заявки принимались в устной форме, обычно вечером звонил Дамир по телефону и говорил адрес, куда устанавливать вышку. Все устные заявки она записывала в ежедневник.  Водители привозили справки, на основании этих справок бухгалтер проверял счета, она сама проверяла справки. Изначально она общалась с ФИО33. Кроме этого, общалась непосредственно с директором ООО «Квантор-Строй». В ноябре 2019 года был хороший объем работы, работало более 10-15 вышек (протокол судебного заседания от 29.09.2020).

Исследовав и оценив обстоятельства дела, имеющиеся в деле доказательства, в том числе показания свидетелей в их совокупности и взаимной связи, суд полагает, что истцом представлены достоверные и достаточные доказательства оказания услуг по договору  № 52 от 05.07.2019 в октябре 2019 г., в том числе в период с 21.10.2019 по 31.10.2019.

Представленные в материалы дела акты №№ 4884 от 21.10.2019, 4904 от 22.10.2019, 4921 от 23.10.2019, 4940 от 24.10.2019, 4963 от 25.10.2019, 4942 от 26.10.2019, 4977 от 27.10.2019, 4985 от 28.10.2019, 5010 от 29.10.2019, 5036 от 30.10.2019, 5046 от 31.10.2019, и соответствующие справки для расчетов за выполненные работы (услуги), в совокупности с  актом выполненных работ от 04.11.2019 по договору № 1/19 от 14.10.2019 между ответчиком и ТСЖ «Марс», актом выполненных работ от 05.10.2019 по договору № 03-07/2019-3 от 03.07.2019, между ответчиком и  ООО УО «Универсал», актом выполненных работ от 29.10.2019 по договору № 312-64/19 от 11.10.2019 между ответчиком и АО «Омскэлектро»,  актом выполненных работ от 29.10.2019 по договору № 312-64/19 от 11.10.2019 между ответчиком и АО «Омскэлектро», актом выполненных работ от 29.10.2019 по договору № 312-62/19 от 11.10.2019 между ответчиком и АО «Омскэлектро», актом выполненных работ от 01.11.2019 по договору № 312 52/19 от 03.10.2019  между ответчиком и АО «Омскэлектро», актом выполненных работ от  05.10.2019 по договору № 04-06/2019-10 от 04.06.2019 между ответчиком и  ООО «УК на Рабкоровской», актом выполненных работ от 05.10.2019, по договору № 04-06/2019-11 от 04.06.2019 между ответчиком и ООО «УК на Рабкоровской», актом выполненных работ от 05.10.2019 по договору № 04-06/2019-12 от 04.06.2019 между ответчиком и ООО «УК на Рабкоровской», актом выполненных работ от 31.10.2019 по договору № 311-66/19 от 11.10.2019 между ответчиком и АО «Омскэлектро», актом выполненных работ от 31.10.2019 по договору № 311-47/19 от 25.09.2019 между ответчиком и  АО «Омскэлектро», актом выполненных работ  от 31.10.2019 по договору      № 311-49/19 от 25.09.2019 между ответчиком и АО «Омскэлектро», актом выполненных работ от 31.10.2019  по договору № 311-65/19 от 11.10.2019 между ответчиком и АО «Омскэлектро», актом выполненных работ от 05.10.2019 по договору № 04-06/2019-14 от 04.06.2019 между ответчиком и ООО «УК на Рабкоровской», актом выполненных работ от 05.10.2019 по договору № 03-07/2019-4 от 03.07.2019 между ответчиком и ООО «УК на Рабкоровской», актом выполненных работ от 05.10.2019 по договору № 03-07/2019-5 от 03.07.2019 между ответчиком и ООО «УК на Рабкоровской», по мнению суда, подтверждают факт и объем оказанных истцом услуг в спорный период октября 2019 года.

Доводы ответчика о несовпадении дат оформления с одной стороны вышеуказанных актов и справок для расчетов за выполненные работы (услуги), составленных в рамках исполнения договора № 52 от 05.07.2019, и, с другой стороны, актов выполненных работ, подписанных между ответчиком и  его заказчиками, по мнению суда, сами по себе не свидетельствуют о неоказании ООО «Трассервис» спорных услуг, поскольку соответствующие работы заказчиками, состоявшими в договорных отношениях с ООО «Квантор-Строй», приняты; доказательства того, что указанные услуги выполнялись самим ответчиком или иными лицами, материалы дела не содержат.

Поскольку факт оказания услуг в октябре 2019г. подтвержден материалами дела, они имеют для ответчика потребительскую ценность, следовательно, подлежат оплате в порядке и размере, предусмотренных договором  № 52 от 05.07.2019.

По расчету суда, задолженность ООО «Квантор-Строй» по договору № 52 от 05.07.2019 за услуги, оказанные в октябре 2019 года, с учетом произведенных ответчиком платежей, составляет 834 706 руб., которые подлежат взысканию с него в пользу истца.

Вместе с тем, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований истца о взыскании задолженности в остальной части исковых требований, исходя из следующего.

Предъявленная ко взысканию задолженность в сумме 1 207 740 руб. представляет собой стоимость услуг, оказанных по утверждению истца, в рамках договора № 52 от 05.07.2019 в ноябре 2019 г.

Вместе с тем, как указано выше, несмотря на отсутствие в указанном договоре условий о целях оказания услуг, материалами дела подтверждается, что необходимость привлечения ООО «Трассервис» по договору № 52 от 05.07.2019  обусловлена выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в связи с проведением в 2019 году в городе Омске XVI Форума межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации, проходившего 6-7 ноября 2019 года. Как следует из материалов дела, в том числе из показаний свидетеля ФИО27, указанным выше актами выполненных работ между ответчиком и его собственными заказчиками, к концу октября 2019 г. работы по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов были выполнены, приняты заказчиками, в связи с чем продолжение оказания каких-либо услуг не имело для потребительской ценности.

К показаниям свидетеля ФИО32 суд относится критически.

При таких обстоятельствах, в связи с отсутствием достоверных и достаточных доказательств, подтверждающих факты оказания услуг по договору № 52 от 05.07.2019 в ноябре 2019 г., в удовлетворении исковых требований ООО «Трассервис» в данной части следует отказать.

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате оказанных услуг истцом на основании пункта 6.2 договора № 52 от 05.07.2019 начислены пени за период с 03.12.2019 по 17.02.2020 в размере 0,1% от просроченной задолженности за каждый день просрочки, в размере 157 268 руб. 40 коп. 

В связи с тем, что исковые требования в части взыскания основанного долга удовлетворены судом частично, размер подлежащей взысканию неустойки, по расчету суда, составляет 64 272 руб. 36 коп.

Истцом также заявлено о взыскании неустойки, начисляемую на сумму долга, исходя из ставки 0,1% за каждый день просрочки платежа, начиная с 18.02.2020 до момента фактического исполнения обязательства.

Как разъяснено в пункте 65 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма может быть ограниченна (например, пункт 6 статьи 16.1 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (далее - Закон об ОСАГО). Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства. Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ). При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки.

Таким образом, в силу закона и вышеприведенных разъяснений с ООО «Квантор-Строй» также подлежит взысканию неустойка, начисляемая на сумму долга 834 706 руб. (его остаток), исходя из ставки 0,1% за каждый день просрочки платежа, начиная с 18.02.2020 до момента фактического исполнения обязательства.

С учетом вышеизложенного, с ООО «Квантор-Строй» в пользу ООО «Трассервис» следует взыскать 898 978 руб. 36 коп. задолженности, в том числе 834 706 руб. – основной долг, 64 272 руб. 36 коп. – пени за период с 03.12.2019 по 17.02.2020, а также неустойку, начисляемую на сумму долга 834 706 руб. (его остаток), исходя из ставки 0,1% за каждый день просрочки платежа, начиная с 18.02.2020 до момента фактического исполнения обязательства.

В удовлетворении исковых требований ООО «Трассервис» в остальной части следует отказать по изложенным выше основаниям.

В удовлетворении встречных исковых требований ООО «Квантор-Строй» о взыскании неосновательного обогащения в сумме 1 707 314 руб. следует отказать, исходя из следующего.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Согласно статье 1103 ГК РФ поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные настоящей главой, подлежат применению также к требованиям о возврате исполненного по недействительной сделке; одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

В предмет доказывания по данному спору входит установление факта приобретения ООО «Трассервис» имущества за счет истца, отсутствие правовых оснований для приобретения данных денежных средств ответчиком и размер неосновательного обогащения. Удовлетворение иска возможно при доказанности совокупности фактов, подтверждающих неосновательное приобретение или сбережение ответчиком имущества за счет истца.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу указанных норм права истец по встречному иску обязан представить доказательства того, что ответчик приобрел имущество за счет истца, что приобретение имущества осуществлено без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований, а также доказать размер неосновательного обогащения.

По мнению суда, достоверные и достаточные доказательства, свидетельствующие о возникновении на стороне ООО «Трассервис» неосновательного обогащения в виде переплаты, выразившейся в оплате фактически неоказанных услуг, ООО «Квантор-Строй» не представлены.

С учетом неоспоренной ООО «Квантор-Строй» стоимости оказанных услуг по договору № 52 от 05.07.2019 за июль 2019 г. на сумму 448 560 руб., за август 2019 г. на сумму 1 562 520 руб., за сентябрь 2019 г. на сумму 3 140 568 руб., а также признанной судом обоснованной общей суммой оказанных услуг за октябрь 2019 г. в размере  5 857 698 руб., из которых не оплачено 834 706 руб., общая сумма внесенных ответчиком денежных средств в размере 10 174 640 руб. не свидетельствует об образовании на стороне ООО «Трассервис» неосновательного обогащения.

При таких обстоятельствах, правовых оснований для удовлетворения встречных исковых требований ООО «Квантор-Строй» суд не усматривает.

По правилам части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на сторон пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Трассервис» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 620109, 

<

...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Трассервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 644065, 

<

...>, каб. 203)  898 978 руб. 36 коп. задолженности, в том числе 834 706 руб. – основной долг, 64 272 руб. 36 коп. – пени за период с 03.12.2019 по 17.02.2020,  а также 20 980 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 620109, 

<

...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Трассервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 644065, 

<

...>, каб. 203) неустойку, начисляемую на сумму долга 834 706 руб. (его остаток), исходя из ставки 0,1% за каждый день просрочки платежа, начиная с 18.02.2020 до момента фактического исполнения обязательства.

В удовлетворении исковых требований в остальной части – отказать.

В удовлетворении встречных исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй» отказать полностью.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия и может быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                                К.В. Храмцов