РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-99240/22-110-719

г. Москва

28 ноября 2022 г.

Резолютивная часть решения объявлена 03 ноября 2022 года 

Решение в полном объеме изготовлено 28 ноября 2022 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Милкиной К.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙЛИФТСЕРВИС" (125130, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА НАРВСКАЯ, ДОМ 1А, ПОМ I, ЭТ 2, ЧАСТЬ КОМН.№5, ОГРН: 1177746428793) к  обществу с ограниченной ответственностью "ЭНКИ КОНСТРАКШН" (127273, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТРАДНОЕ ВН.ТЕР.Г., НОВОВЛАДЫКИНСКИЙ ПР-Д, Д. 12А, ЭТАЖ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ МАНСАРДЫ, ПОМЕЩ. 35, ОГРН: 1177746658154) о взыскании 1 743 920 руб.,

при участии:

от истца – Коржова Л.В. по дов.  от  04.05.2022,

от ответчика- Джикия  К.В. по дов.  от  06.09.2022,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙЛИФТСЕРВИС" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ЭНКИ КОНСТРАКШН" о взыскании 1 743 920 руб. задолженности по договору субподряда №ТрК3-ПЛС-Л от 12.01.2022.

Ответчик иск не признал, представил пояснения.

Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, 12» января 2022 года между Обществом с ограниченной ответственностью «ПЕРВЫЙЛИФТСЕРВИС» (далее - Субподрядчик, Истец) и Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНКИ КОНТРАКШН» (далее - Подрядчик, Ответчик) был заключен Договор субподряда №ТрКЗ-ПЛС-Л (далее - Договор).

В соответствии с вышеуказанным Договором Субподрядчик обязуется в установленные Договором сроки выполнить по заданию Подрядчика Работы по монтажу лифтового оборудования, в том числе пуско-наладочные работы в соответствии с проектно-сметной документацией собственными и (или) привлеченными силами с использованием своих материалов, а также материалов Подрядчика, указанных в ведомости давальческого материала, а Подрядчик обязуется принять и оплатить результат работ в установленном настоящем Договоре порядке (п. 2.1. Договора).

Цена Договора и порядок оплаты определены разделом 3 Договора.

Стоимость работ по Договору определяется Сметой/Протоколом договорной цены (Приложение №1 к Договору), согласно условиям Договора (пункт 3.1. Договора).

Согласно пункта 3.4.1. Договора оплата выполненных по Договору работ производится

Подрядчиком в течение 20 (двадцать) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком Акта - сдачи приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за отчетный месяц, а также предоставления Субподрядчику Подрядчику документов, в соответствии с п. 8.3.4. Договора, в размере стоимости фактически выполненных Субподрядчиком и принятых к оплате Подрядчиком работ, с учетом 3.4.2, п. 3.4.3., п.3.12 и п. 3.12.1 Договора.

Оплате подлежат только фактически выполненные работы надлежащего качества. Работы, выполненные некачественно, с изменениями или отклонением без согласования с Подрядчиком от условий Договора, проектно-сметной документации, требований нормативных актов, считаются выполненными Субподрядчиком на свой риск и Подрядчик вправе отказаться от их приемки и/или оплаты (пункт 3.9. Договора).

Принятые на себя обязательства ООО «Первыйлифтсервис» выполнены в полном объеме.

Акт приемки выполненных работ от 18.02.2022г. №1, а также справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 18.02.2022г. подписаны Ответчиком по делу без замечаний, при этом оплата за выполненные работы поступила на расчетный счет Истца не в полном объеме.

С учетом отсутствия мотивированных отказов Подрядчика от приемки выполненных Субподрядчиком работ или уведомлений о наличии недостатков в объеме или качестве выполненных Субподрядчиком работ, факт и объем выполненных ООО «ПЕРВЫЙЛИФТСЕРВИС» работ по Договору считается подтвержденным, а работы принятыми и подлежащими к оплате.

Принимая во внимание, что Ответчиком по делу была проведена частичная оплата по вышеуказанному Договору в размере 1 500 000, 00 руб. (п/п №1446 от 02.03.2022г.), остаток по задолженности составляет 1 743 920 руб. 00 коп. 

Указанная задолженность образовалась ввиду отсутствия полной оплаты по Акту сдачи -приемки работ №1 от 18.02.2022г. по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 18.02.2022г. по форме КС-3 за отчетный период с 13.01.2022 по 17.02.2022г.

По заключенному между сторонами Договора подряда, к правоотношениям сторон применяются положения гл. 37 ГК РФ.

Согласно ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки ««выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (ч. 1 ст. 708 ГК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

Как установлено ч. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые! предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

Частью 1 ст. 711 ГК РФ установлено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Из положений статей 702, 740, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что основанием для возникновения у заказчика денежного обязательства по оплате работ по договору является совокупность следующих обстоятельств: выполнение работ и передача их результата заказчику.

Вместе с тем, стоимость работ по Договору определяется сметой / протоколом согласования договорной цены Приложение № 1 к Договору, согласованной сторонами. Согласно п. 3.1. Договора, стоимость работ по Договору составляет 4 344 000,00 (Четыре миллиона триста сорок четыре тысячи рублей 00 копеек).

Срок выполнения работы является существенным условием договора подряда и подлежит изменению только в установленном законом порядке. Соглашение об изменении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное (пункт 1 статьи 452 ГК РФ).

Сроки выполнения работ по Договору, в том числе отдельных этапов (видов) работ, их объем, сроки начала и завершения, согласованы Сторонами в Графике производства работ (Приложение № 2 к Договору), согласно п. 4.1. Договора. Согласно графику производства работ, срок выполнения работ определен с 13.01.2022 по 24.02.2022.

Ответчик осуществил полную оплату по Акту в размере 3 243 920,00 (Три миллиона двести сорок три тысячи девятьсот двадцать рублей 00 копеек), что подтверждается платежными поручениями: № 6629 от «12» августа 2022 г., № 5591 от «30» июня 2022 г., № 3680 от «30» мая 2022 г., № 1446 от «02» марта 2022 г., № 7656 от «28» сентября 2022 г.

Таким образом у Ответчика отсутствует задолженность по Акту в полном объеме.

При указанных обстоятельствах иск не подлежит удовлетворению.

На основании  изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЭНКИ КОНСТРАКШН" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙЛИФТСЕРВИС" 30 439 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:

А.В. Мищенко