32/2018-180323(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

Именем Российской Федерации 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А51-23368/2018

г. Владивосток

13 декабря 2018 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Овчинникова В.В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ОБЩЕСТВА С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ"  к Обществу с ограниченной ответственностью "Ремонтно- эксплуатационный участок 5, 8"  

об обязании устранить недостатки 

 Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно- эксплуатационный участок 5,8» в 30-дневный срок с момента вступления  решения суда в законную силу безвозмездно устранить недостатки  выполненной работы по договору от 11.07.2013 № 29-кр в МКД № 22 по ул.  В.А. Маслакова в г. Большой Камень, а именно: устранить поражение  трубопроводов коррозией, наличие хомутов на магистралях, следы их  ремонта отдельными местами и выборочной заменой трубопровода;  нарушение теплоизоляции трубопровода, произвести смену: трубопровода  Ду 25 – 25м; трубопровода Ду 32 - 32,5 м; трубопровода Ду 40 - 56 м;  трубопровода Ду 50 145 м; трубопровода Дн 76 - 33 м; трубопровода Ду 80  - 37,5 м; трубопровода Ду 100 - 34 м;  

 установить: кран шаровый Ду 20 – 25 штук; кран шаровый Ду 25 –  15 штук; затвор поворотный Ду 50 – 12 штук; затвор поворотный Ду 65 –  4штуки; затвор поворотный Ду 80 – 2штуки; затвор поворотный Ду 100 –  4штуки; фланцевое соединение Ду 50 – 24 штуки; фланцевое соединение Ду  65- 8 штук; фланцевое соединение Ду 80 – 4 штуки; фланцевое соединение  Ду 100 – 8 штук;  

Изготовить и установить: узел врезки № 9 Ду 20 – 25 штук; узел  врезки № 9 Ду 25 – 15 штук;  

очистить трубы от ржавчины и произвести антикоррозионное  покрытие краской БТ-177 в 2 слоя по грунту ГФ-021- 94,7 м;  

восстановить изоляцию трубопровода трубками "Isotec KK-ALC"  толщиной 40мм с вырезами и подгонкой по местам - 403,2 м;  

в тепловом узле: заменить трубопровод Ду 40 *2,5, в том числе  отводы - 3,5, 0, 1 м; установить кран шаровый Ду 40-1 штука; установить  кран шаровый Ду 25 – 1 штука; провести гидравлические испытания366,5 м.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно- эксплуатационный участок 5,8» в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ" судебную  неустойку за неисполнение решения по истечении 30 дневного срока со дня  вступления решения в законную силу в размере 1000 рублей за каждый  день неисполнения обязательства по день фактического исполнения  судебного акта  

Взыскать с Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно- эксплуатационный участок 5,8» пользу Общества с ограниченной  ответственностью «Жилищная компания» расходы по уплате  государственной пошлины в размере 6000 руб.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд  Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый  арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного  округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в  

законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции. 

 Судья Овчинников В.В.