РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Москва

Дело № А40-289791/19-105-1613

02.07.2020 г.

Резолютивная часть решения объявлена 11.06.2020

Текст решения изготовлен в полном объеме 02.07.2020

Арбитражный суд в составе судьи Никоновой О.И.

при ведении протокола секретарем с/з  ФИО1

рассмотрев в судебном заседании  дело по иску

истец: МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (119019, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ЗНАМЕНКА, ДОМ 19, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 27.02.2003, ИНН: 

<

***>)

ответчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" (121357, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 141, , ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 26.03.2014, ИНН: 

<

***>)

О взыскании неустойки в размере 73 304 000 руб. 01 коп.

При участии:

от истца- ФИО2 дов. от 23.04.2019г., диплом

от ответчика- ФИО3 дов. от 06.12.2019г., диплом

УСТАНОВИЛ:

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ обратилось в суд с иском к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" о взыскании неустойки в размере 73 304 000 руб. 01 коп.

Исковые требования заявлены со ссылкой на ст.ст. 309, 310, 330 ГК РФ и мотивированы следующими обстоятельствами.

Между Министерством обороны Российской Федерации (далее -Заказчик) и АО «ОПК» (далее - Исполнитель) заключен государственный контракт от 5 октября 2017 г. № 1720187316661452237001882 на выполнение опытно-конструкторской работы для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2017-2020 годах (далее -Контракт).

Согласно п. 6.11 Контракта Исполнитель обязан перечислить соисполнителям (третьим лицам), заключившим договор (договоры) с Исполнителем, финансовые средства на авансирование договора (договоров) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поступления средств от Заказчика.

В соответствии с п. 8.7 Контракта в случае, если в течение 3 календарных месяцев с момента заключения Контракта или в течение 10 банковских дней с момента поступления средств от Заказчика (в зависимости от того, что наступит позднее), Исполнителем не перечислены соисполнителям (третьим лицам), заключившим договор (договоры) с Исполнителем, финансовые средства на авансирование договора (договоров), Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки Исполнителем исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается Контрактом в размерах, определяемых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, за каждый факт просрочки, но не менее законной неустойки, за каждый факт просрочки.

Заказчиком произведено авансирование Исполнителя в размере 56 108 774,02 руб. (платежное поручение от 7 ноября 2017 г. № 446493).

Вместе с тем, Исполнителем допущена просрочка следующих обязательств.

1.Исполнителем с АО «НПО Базальт» (далее - Соисполнитель) заключен договор от 23 января 2018 г. № 1720187316661452237001882/230118/1.

По состоянию на 12 сентября 2018 г. Исполнитель не перечислил аванс на счет соисполнителя АО «НПО «Базальт» по Контракту.

Просрочка исполнения обязательств с 24 января 2018 г. по 12 сентября 2018 г. составляет 232 дня.

2.Исполнителем     с     АО     «ЦНИИ     «Циклон»     (далее Соисполнитель)     заключен     договор     от     23      января     2018      г. № 1720187316661452237001882/230118/2.

Исполнитель свои обязательства нарушил, что подтверждается платежным поручением от 5 апреля 2018 г. № 959 о перечислении Исполнителем аванса на счет Соисполнителя по Контракту в размере 28 500 000 руб

Просрочка исполнения обязательств с 24 января 2018 г. по 5 апреля 2018 г. составляет 72 дня.

Общая сумма неустойки составляет: 17 705 333,34 руб. + 55 598 666,67 руб. = 73 304 000,01 руб.

Ответчик исковые требования не признает со8гласно доводам, изложенным в отзыве.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основания иска, исследовав и оценив представленные по делу доказательства, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, арбитражный суд установил следующее.

Между Министерством обороны Российской Федерации (далее -Заказчик) и АО «ОПК» (далее - Исполнитель) заключен государственный контракт от 5 октября 2017 г. № 1720187316661452237001882 на выполнение опытно-конструкторской работы для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2017-2020 годах (далее -Контракт).

В соответствии с п. 3.1.3 Контракта Исполнитель вправе привлекать п предварительному согласованию с Заказчиком к выполнению Контракт соисполнителей (третьих лиц).

Согласно п. 6.11 Контракта Исполнитель обязан перечислить соисполнителям (третьим лицам), заключившим договор (договоры) с Исполнителем, финансовые средства на авансирование договора (договоров) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поступления средств от Заказчика.

При этом, в соответствии с п. 3.2.24 Контракта, Исполнитель обязан заключать договор (договоры) с соисполнителями (третьими лицами), если привлечение соисполнителей (третьих лиц) необходимо для выполнения Контракта, с обязательным указанием в них условия об осуществлении расчетов по таким договорам с использованием отдельного счета, открытого соисполнителем (третьим  лицом) в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке, выбранном Исполнителем, при наличии у соисполнителя (третьего лица) с таким уполномоченным банком заключенного  договора о банковском сопровождении.

В соответствии с п.п. 7 п. 1 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (далее - Закон о государственном оборонном заказе) расчеты между головным исполнителем и соисполнителями производятся только с использованием отдельного счета, открытого соисполнителем в уполномоченном банке.

Таким образом, из буквального толкования указанных выше положений Контракта и Закона о государственном оборонном заказе Исполнитель - АО «ОПК» обязан перечислить соисполнителям (третьим лицам), заключившим договор (договоры) с Исполнителем, финансовые средства на авансирование договора ! (договоров) в течении 10-ти банковских дней с момента заключения договора с соисполнителем при одновременном соблюдении двух условий: поступления  денежных средств от Заказчика и открытия соисполнителем  в уполномоченном  банке отдельного счета.

Датой заключения Договора между АО «ОПК» и АО «НПО «Базальт» с учетом урегулирования всех разногласий между сторонами следует читать 26.04.2018.

В соответствии с положениями п. 6.4 Договора, АО «ОПК» производит авансирование   при   наличии   у   АО   «НПО   «Базальт»   заключенного   с уполномоченным банком договора о банковском сопровождении и открытого в соответствии с Законом о государственном оборонном заказе в уполномоченном банке отдельного счета.

АО «ОПК» в целях выполнения условий Контракта по перечислению аванса, неоднократно запрашивало у АО «НПО «Базальт» информацию о заключении уполномоченным банком договора и об открытии отдельного счета (письма О «ОПК» от 16.05.2018 № ОПК-4060; от 04.07.2018 №ОПК-5572).

АО «НПО «Базальт» оформило договор о банковском сопровождении и открыло отдельный счет в уполномоченным банке АКБ «НОВИКОМБАНК» 05.07.2018 (договор о банковском сопровождении и открытии отдельного счета от 05.07.2018 № 18406) и выставило АО «ОПК» счет на оплату аванса № 121 от 05.07.2018.

С учетом положений Контракта, Договора и Закона о государственном оборонном заказе, 10-дневный срок для перечисления аванса АО «НПО «Базальт» истекал 19.07.2018.

АО «ОПК» оплатило аванс АО «НПО «Базальт» платежным поручением от 16.07.2018 № 1846, что подтверждается также выпиской по лицевому счету за 17.07.2018.

Поскольку вина АО «ОПК» в несвоевременном открытии АО «НПО «Базальт» в уполномоченном банке отдельного счета отсутствует, а аванс со стороны АО «ОПК» в пользу АО «НПО «Базальт» перечислен в пределах 10-ти дневного срока, исчисляемого с даты открытия АО «НПО «Базальт» отдельного счета в уполномоченном банке, нарушение обязательств со стороны АО «ОПК» выразившееся в несвоевременном перечислении аванса в пользу АО «НПО «Базальт» отсутствует.

В       соответствии       с       положениями       п.       6.4       Договора В  1720187316661452237001882/230118/2 от 23.01.2018, заключенного между О «ОПК» и АО «ЦНИИ «Циклон», АО «ОПК» производит авансирование при наличии у АО «ЦНИИ «Циклон» заключенного с уполномоченным банком договора банковском   сопровождении   и   открытого   в   соответствии   с   Законом о государственном оборонном заказе в уполномоченном банке отдельного счета.

АО «ОПК» в целях выполнения условий Контракта по перечислению аванса, неоднократно запрашивало у АО «ЦНИИ «Циклон» информацию о заключении с уполномоченным банком договора и об открытии отдельного счета (письма АО «ОПК» от 26.01.2018 № ОПК-718/1; от 13.03.2018 №ОПК-2052).

АО «ЦНИИ «Циклон» оформило договор о банковском сопровождении открыло отдельный счет в уполномоченным банке АКБ «НОВИКОМБАНК» 20.03.2018 (договор о банковском сопровождении и открытии отдельного счета от 20.03.2018 № 18733), выставило АО «ОПК» счет на оплату аванса № 107 от 14.03.2018 и уведомило об этом АО «ОПК» письмом от 22.03.2018 № УП-256 (вх. №4598 от 28.03.2018).

С учетом положений Контракта, Договора и Закона о государственном оборонном заказе, 10-дневный срок для перечисления аванса АО «ЦНИИ «Циклон» истекал 11.04.2018.

АО «ОПК» оплатило аванс АО «ЦНИИ «Циклон» платежным поручением от 05.04.2018 № 959, что подтверждается также выпиской по лицевому счету за 06.04.2018.

Договор между АО «ОПК» и соисполнителем АО «ЦНИИ «Циклон» был заключен сторонами 23.01.2018, а соисполнитель АО «ЦНИИ «Циклон» выполнил условия заключенного с АО «ОПК» Договора по оформлению договора о банковском сопровождении, открыло отдельный банковский счет и уведомил об этом АО «ОПК» только 28.03.2018. В связи с чем АО «ОПК» не имело возможности выплатить аванс 24.01.2018.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Согласно ст. 310 ГК РФ не допускается односторонний отказ от исполнения обязательства.

Согласно пункту 7 части 1 статьи 8 Закона о государственном оборонном заказе головной исполнитель использует для расчетов по контрактам только отдельные счета, открытые исполнителям, с которыми у головного исполнителя заключены контракты, в уполномоченном банке, при наличии у таких исполнителей договора о банковском сопровождении, заключенного с уполномоченным банком. Для этих целей головной исполнитель выбирает уполномоченный банк и заключает с ним договор о банковском сопровождении; уведомляет (до заключения контрактов) исполнителей, входящих в его кооперацию, о необходимости заключения с уполномоченным банком договора о банковском сопровождении, предусматривающего, в том числе обязательное условие об открытии для каждого контракта отдельного счета (пункты 2, 3 и части 1 статьи 8 Закона о государственном оборонном заказе).

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Неустойка как способ обеспечения обязательства должна компенсировать кредитору расходы или уменьшить неблагоприятные последствия, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения должником своего обязательства перед кредитором.

Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (пункт 2 статьи 330 ГК РФ).

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, определив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности суд считает требования истца не обоснованными и не подлежащими удовлетворению.

Судебные расходы распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 8, 12, 309, 310,  330 ГК РФ, ст.ст.  65, 66, 67, 71, 101-103, 110, 112,167-171, 176 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

О.И. Никонова