1148_45743  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 

город Севастополь 

«21» сентября 2018 года Дело № А84-1970/18  

Полный текст судебного акта изготовлен 21.09.2018  

Резолютивная часть судебного акта оглашена 18.09.2018 Арбитражный суд города Севастополя В составе: судьи Архиповой С.Н., При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Колотовой О.В., 

Рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление Федерального казённого  учреждения «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления  Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Севастополю» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, зарегистрировано 20.08.2014, место нахождения:  299011, 

<

...>)  

к индивидуальному предпринимателю ФИО1  (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 318619600093971, зарегистрирована 21.05.2018, ранее  присвоенный ОГРНИП 310619311000019, зарегистрирована 20.04.2010, регистрация  прекращения деятельности 08.06.2017)  

о взыскании неустойки (штрафа) в сумме 3 289,31 руб. по государственному контракту   № 137 от 15.08.2016.  

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО2, у с т а н о в и л : 

14.06.2018 в Арбитражный суд города Севастополя (суд) обратилось  федеральное казенное учреждение «Центра хозяйственного и сервисного обеспечения  Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Севастополю»  (истец) с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ответчик) о взыскании неустойки за неисполнение  обязательств по государственному контракту № 137 от 15.08.2016 в сумме 3 289,31 руб..  

Ответчик, надлежащим образом уведомленный о рассмотрении дела, отзыв на  иск не представил, явку представителя не обеспечил.  

Из материалов дела следует, что 15.08.2018 между истцом как Заказчиком и  ответчиком как Подрядчиком был заключен государственный контракт № 137, по  условиям которого Подрядчик принял обязательство выполнить электромонтажные  работы в помещении общей площадью 48 кв.м., расположенному по адресу: 

<

...>.  

По условиям п.3.2. контракта датой окончания выполнения работ считается  дата подписания двухстороннего акта о приемке выполненных работ, но не позже  25.08.2016.  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по  контракту Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 10% от цены контракта или  3 289,32 руб. (п. 6.3. контракта).  

Истец указывает, что ответчик не приступил к выполнению работ. Ответчик не  представил доказательств, опровергающих данный факт. Акт о приемке выполненных  работ не представлен. Соответственно, суд полагает, что иск подлежит удовлетворению  в полном объеме по правилам ст. 329 ГК РФ.  

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд  

Р Е Ш И Л :

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 318619600093971, зарегистрирована  21.05.2018, ранее присвоенный ОГРНИП 310619311000019, зарегистрирована  20.04.2010, регистрация прекращения деятельности 08.06.2017) в пользу федерального  казённого учреждения «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления  Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Севастополю» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, зарегистрировано 20.08.2014, место нахождения:  299011, 

<

...>) штраф в сумме 3 289,31 руб. по  государственному контракту № 137 от 15.08.2016, а также расходы по оплате  госпошлины в сумме 2 000 руб..  

Решение может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд города Севастополя в установленный срок.  

Судья С.Н. Архипова