Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-14600/2020

24 июля 2020 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  11 июня 2020 года.

Полный текст решения изготовлен  24 июля 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи  О.Н. Сергеевой

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "АТРИУМ" (адрес:  Россия 192012, Санкт-Петербург, пр-кт  ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 271, ЛИТЕР Ж, ПОМЕЩЕНИЕ 10Н, Ч.П. 1, ОГРН:1197847005960);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "КОРПОРАЦИЯ АБН" (адрес:  Россия 188680, д ВБЛИЗИ СТАРАЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл ВСЕВОЛОЖСКИЙ р-н, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАО АГРОФИРМА "ВЫБОРЖЕЦ", ОГРН:  1124703003370);

третье лицо:  

о взыскании 2 136 202 руб. 01 коп.  

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 10.06.20

- от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом

установил:

ООО «Атриум» предъявило иск о взыскании с ООО "КОРПОРАЦИЯ АБН" 1 485 241 руб. 65 коп. задолженности и 650 960 руб. 36 коп. неустойки на основании договоров подряда № 280218-1-А-1 от 01.02.19 и № 280218-1-А-1 от 01.03.19.

Ответчик отзыв не представил, дело рассматривается без участия ответчика на основании  ст. 156 АПК РФ.

Судом установлено:

Между ООО «Атриум» ИНН 

<

***> (далее по тексту - истец), в лице Генерального директора ФИО3, действующего на основании Устава, и ООО «Корпорация АБН» ИНН 

<

***> (далее по тексту - Ответчик), в лице Генерального директора ФИО4, действующего на основании Устава, 01 февраля 2019 года, заключен договор подряда №280218-1-А от 01.02.2019г. (далее по тексту - Договор №1) на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по заданию Генподрядчика (ответчик), согласно которому Подрядчик (истец) принял на себя обязательство выполнить порученный ему комплекс работ, а Генподрядчик (ответчик), в свою очередь, обязался оплатить выполненные надлежащим образом строительно-монтажные работы подрядчиком (истцом).

В соответствии с п. 1.1 договора № 1 подрядчик (истец) обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных работ по заданию генподрядчика (ответчик) на объекте. Комплекс по производству грибов в составе тепличного комплекса для круглогодичного промышленного производства культивируемых грибов площадью до 3,9 га, в том числе компоста для их выращивания объемом производства до 50 тыс. тонн (Цех выращивания 1-я очередь, Цех выращивания 2-я очередь, АБК) своими и/или привлеченными силами и средствами в сроки, установленные Договором №l. в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, утвержденной заказчиком проектной документацией. 

Перечень работ и услуг согласованы сторонами в расчете договорной цены.

Подрядчик (истец) выполнил принятые на себя обязательства по договору №1, а именно:

1. Подрядчик (истец) принял фронт работ, в соответствии с актами приема-передачи.

2. Подрядчик (истец) приступил к выполнению порученного комплекса работ, в соответствии с расчетом договорной цены в течение 3-х календарных дней с момента приемки фронта работ.

3. Подрядчик (истец) выполнил порученный комплекс работ собственными и/или привлеченными силами и средствами в сроки, установленные договором №1, в полном соответствии с утвержденной заказчиком проектной документацией, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Подрядчик (истец) оформил и передал по реестрам с сопроводительными письмами полный пакет исполнительной документации, а также акты о приемке выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, счета-фактур.

5. Генподрядчик (ответчик) принял комплекс выполненных работ и подписал Акты о приемке выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, а также принял к учету переданные счета-фактур.

Претензии по качеству строительно-монтажных работ генподрядчиком (Ответчик) не предъявлялись, технические вопросы решались в рабочем порядке.

В соответствии с п. 2.5 договора генподрядчик (ответчик) обязан оплатить выполненные строительно-монтажные работы в течение двадцати рабочих дней с момента подписаний генподрядчиком документов (форм КС-2 и КС-3), и предоставления подрядчиком исполнительной документации в полном объеме, и получения от подрядчика соответствующего счета, в размере 95% от стоимости выполненных подрядчиком работ, указанных в актах о приемке работ по форме КС-2, справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и с зачетом авансовых платежей, выплаченных подрядчику, пропорционально объему выполненных работ согласно актов о приемке работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Согласно п. 4 ст. 421 Гражданского кодекса РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса РФ. обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствий с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно п. 1 ст. 310 Гражданского кодекса РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ГК РФ. другими законами или иными правовыми актами.

В силу п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пени) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

генподрядчик не выполнил принятые на себя обязательства по договору №1, а именно:

1. Генподрядчик не произвел полную оплату по акту выполненных работ КС-2 №1 от 22.02.2019г. в течение 20 рабочих дней (до 25.03.2019г. включительно) в размере 206 527 руб. 97 коп. (95% от КС-2 №1 от 22.02.2019г. минус пропорциональный зачет аванса относительно объема выполненных работ).

Неустойка в соответствии с договором №1 по данному акту выполненных работ -     3 732 руб. 96 коп.

2. Генподрядчик (ответчик) не произвел полную оплату по акту выполненных работ КС-2 №2 от 12.03.2019  в течение двадцати рабочих дней (до 09.04.2019г. включительно) в размере 1 779 666 руб. 14 коп. (95% от КС-2 №2 от 12.03.2019г. минус пропорциональный зачет аванса относительно объема выполненных работ).

Неустойка в соответствии с договором №1 по данному Акту выполненных работ составляет 6 264 руб. 52 коп. 

3. Генподрядчик не произвел, полную оплату по акту выполненных работ КС-2 №3 от 25.03.2019 в течение 20 рабочих дней (до 23.04.2019 включительно) в размере 2 339 116 руб. 01 коп. (95% от КС-2 от 12.03.2019  минус пропорциональный зачет аванса относительно объема выполненных работ).

Неустойка в соответствии с договором №1 по данному акту выполненных работ -    22 534 руб. 71 коп.

4. Генподрядчик не произвел полную оплату по акту выполненных работ КС-2 №4 от 16.04.2019 в течение 20 рабочих дней (до 22.05.2019 включительно) в размере 3 684 414 руб. 95 коп. (95% от КС-2 №2 от 16.04.2019 минус пропорциональный зачет аванса относительно объема выполненных работ).

Неустойка в соответствии с договором №1 по данному акту- выполненных работ -  333 071 руб. 11 коп.

5. Генподрядчик не произвел полную оплату по акту выполненных работ КС-2 №5 от 15.05.2019 в течение 20 рабочих дней (до 13.06.2019 включительно) в размере 996 118 руб. 99 коп. (95% от КС-2 №5 от 15.05.2019 минус пропорциональный зачет аванса относительно объема выполненных работ). Остаток неоплаченной задолженности в соответствии с договором №1 по данному акту выполненных работ - 669 020 руб. 72 коп. 

Неустойка в соответствии с договором №1 по данному Акту выполненных работ - 88 530 руб. 32 коп. Сумма общей задолженности в соответствии с договором №1 по данному Акту выполненных работ 757 551 руб. 54 коп.

6. Согласно п. 6.6 договора №1 в случае несоблюдения предусмотренных договором №1 сроков оплаты выполненных подрядчиком работ, подрядчик вправе взыскать с генподрядчика неустойку в размере 0,08% (ноль целых восемь сотых процентов) от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы задолженности. Согласно п. 4.2.1 договора №1 подрядчик направил 13.06.2019г. письменное уведомление о выполнении всего объема работ по Договору №1 и готовности объекта к передаче (исх. №0014 от 13.06.2019г.).

Генподрядчик в нарушение п. 4.2.2 проигнорировал данное уведомление и в десятидневный срок не провел необходимый комплекс приемо-сдаточных мероприятий, а также не предоставил подрядчику мотивированный отказ о невозможности проведения данных мероприятий. Исходя из этого подрядчик считает полный комплекс порученных ему работ по договору №1 выполненным и принятым без возражений 30.06.2019.

Согласно п. 2.6 договора №1 сумма удержания в размере 5% от стоимости выполненных строительно-монтажных работ является согласованной сторонами формой обеспечения выполнения подрядчиком своих обязательств по договору №1 - гарантийным фондом, обеспечивающим надлежащее исполнение подрядчиком взятых на себя обязательств по договору №1. Сумма гарантийного фонда выплачивается Подрядчику при окончательном расчете за выполненные работы в течение 10 банковских дней с даты: подписания сторонами акта передачи объекта заказчику (данные мероприятия не проведены безосновательно).

Генподрядчик в нарушение п. 2.6 договора №1 не произвел окончательный расчет по договору №1, не оплатив удержанные 5% от стоимости выполненных строительно-монтажных работ в размере 542 774 руб. 66 коп.

Согласно п. 6.6 подрядчик имеет право взыскать неустойку в размере 54 277 руб. 47 коп. за 217 дней просрочки, за невыполненные обязательства по окончательному расчету по договору №1.

Остаток неоплаченной задолженности в соответствии с договором №1 по выплате гарантийного удержания  542 774 руб. 66 коп.

Неустойка в соответствии с договором №1 по выплате гарантийного удержания - 54 277 руб. 47 коп. Сумма общей задолженности в соответствии с договором №1 по выплате гарантийного удержания - 597 052 руб. 13 коп. Сумма требований по договору № 1 составляет: 1 720 206 руб. 97 коп. 

Между ООО «Атриум» ИНН 

<

***> (далее по тексту - истец), в лице генерального директора ФИО3, действующего на основании устава, и ООО «Корпорация АБН» ИНН 

<

***> (далее по тексту - ответчик), в лице генерального директора ФИО4, действующего на основании устава, 01 марта 2019 года, заключен договор подряда .№2280218-1-А-1 от 01.03.2019 (далее по тексту - договор №2) на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по заданию Генподрядчика (ответчик), согласно которому подрядчик (истец) принял на себя обязательство выполнить порученный ему комплекс работ, а Генподрядчик (ответчик), в свою очередь, обязался оплатить выполненные надлежащим образом строительно-монтажные работы подрядчиком (истцом).

В соответствии с п. 1.1 договора №2 подрядчик (истец) обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных работ но заданию генподрядчика (ответчик) на объекте: комплекс по производству грибов в составе тепличного комплекса для круглогодичного промышленного производства культивируемых грибов площадью до 3.9 га, в том числе компоста для их выращивания объемом производства до 50 тыс. тонн (цех выращивания 1-я очередь. цех выращивания 2-я очередь, АБК) своими и/или привлеченными силами и средствами в сроки, установленные Договором №2, а соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, утвержденной Заказчиком проектной документацией. Перечень работ и услуг согласованы Сторонами в расчете договорной цены.

Подрядчик (истец) выполнил принятые на себя обязательства по Договору №2, а именно:

1. Подрядчик (истец) принял работы, в соответствии с Актами приема-передачи.

2. Подрядчик (истец) приступил к выполнению порученного комплекса работ, в соответствии с расчетом договорной цены (приложение №1 к Договору №2) в течение 3-х календарных дней с момента приемки фронта работ.

3. Подрядчик (истец) выполнил порученный комплекс работ собственными и/или привлеченными силами и средствами в сроки, установленные Договором № 2, в полном соответствии с утвержденной Заказчиком проектной документацией, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Подрядчик (истец) оформил и передал по реестрам с сопроводительными письмами полный пакет исполнительной документации, а также акты о приемке выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, счета-фактур.

5. Генподрядчик (ответчик) принял комплекс выполненных работ и подписал акты о приемке выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, а также принял к учету переданные счета-фактур.

Претензии по качеству строительно-монтажных работ генподрядчиком не предъявлялись, технические вопросы решались в рабочем порядке.

В соответствии с п. 2.5 договора генподрядчик обязан оплатить выполненные строительно-монтажные работы в течение двадцати рабочих дней с момента подписания генподрядчиком документов (форм КС-2 и КС-3), и предоставления подрядчиком исполнительной документации в полном объеме, и получения от подрядчика соответствующего счета, в размере 95% от стоимости выполненных подрядчиком работ, указанных в актах о приемке работ по форме КС-2, справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и с зачетом авансовых платежей, выплаченных подрядчику, пропорционально объему выполненных работ согласно актов о приемке работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Согласно п. 4 ст. 421 Гражданского кодекса РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. 

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных, правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно п. 1 ст. 310 Гражданского кодекса РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ГК РФ. другими законами или иными правовыми актами.

В силу п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пени) признается определенная законом или договором денежная, сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Генподрядчик (ответчик) не выполнил принятые на себя обязательства по договору №2, а именно:

1.  Генподрядчик не произвел полную оплату по акту выполненных работ КС-2 №1 от 21.06.2019 в течение 20 рабочих дней (до 22.07.2019 включительно) в размере 5 468 925 руб 46 коп. (95% от КС-2 №1 от 22.02.2019г. минус пропорциональный зачет аванса относительно объема выполненных работ).

Неустойка в соответствии с Договором №2 по данному Акту выполненных работ - 115 204 руб. 14 коп. 

2. Согласно п. 6.6 договора №2 в случае несоблюдения предусмотренных договором №2 сроков оплаты выполненных подрядчиком работ. Подрядчик вправе взыскать с генподрядчика неустойку в размере 0.08% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности. 

Согласно п. 4.2.1 договора №2 подрядчик направил 13.06.2019 письменное уведомление о выполнении всего объема работ по договору №2 и готовности объекта к передаче (исх. №0014 от 13.06.2019г.).

Генподрядчик в нарушение п. 4.2.2 проигнорировал данное уведомление и в десятидневный срок не провел необходимый комплекс приемо-сдаточных мероприятий, а также не предоставил подрядчику мотивированный отказ о невозможности проведении данных мероприятий. Исходя из этого подрядчик считает полный комплекс порученных ему работ по договору №2 выполненным и принятым без возражений 30.06.2019.

Согласно п. 2.6 договора №2 сумма удержания в размере 5% от стоимости выполненных строительно-монтажных работ является согласованной сторонами формой обеспечения выполнения подрядчиком своих обязательств по договору №2 - гарантийным фондом, обеспечивающим надлежащее исполнение подрядчиком взятых на себя обязательств по Договору №2.

 Сумма гарантийного фонда выплачивается подрядчику при окончательном расчете за выполненные работы в течение 10 банковских дней с даты подписания сторонами акта передачи объекта заказчику (данные мероприятия не проведены безосновательно).

Генподрядчик в нарушение п. 2.6 договора №2 не произвел окончательный расчет по договору №2, не оплатив удержанные 5% от стоимости выполненных строительно-монтажных работ в размере 273 446 руб. 27 коп.

Согласно п. 6.6 подрядчик имеет право взыскать неустойку в размере 27 344 руб. 63 коп. за 217 дней просрочки, за невыполненные обязательства но окончательному расчету по договору №2.

Остаток неоплаченной задолженности в соответствии с договором №2 по выплате гарантийного удержания - 273 446 руб. 27 коп.

Неустойка в соответствии с договором №2 по выплате гарантийного удержания - 27 344 руб. 63 коп. Сумма общей задолженности в соответствии с договором №2 по выплате гарантийного удержания - 300 790 руб. 90 коп. Сумма требований по договору №2: 415 995 руб. 04 коп. 

Ответчик направил истцу гарантийное письмо по оплате работ, однако своего обязательства не исполнил.

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по госпошлине на ответчика.

 Руководствуясь статьями 309, 310, 330, 711 Гражданского Кодекса РФ, статьями 110, 156 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "КОРПОРАЦИЯ АБН" в пользу общества с ограниченной ответственностью "АТРИУМ" 2 136 руб. 202 руб. 01 коп, из них: 1 485 241 руб. 65 коп. основного долга и 650 960 руб. 36 коп. неустойки, а также 33 681 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

Выдать исполнительный лист в порядке ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья                 Сергеева О.Н.