АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-136/2022

14 июня 2024 года

город Омск

 

Резолютивная часть решения объявлена 30 мая 2024 года

Полный текст решения изготовлен 14 июня 2024 года

 

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Луговика С.В., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Бердиной А.И., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «Поликон» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛ-ДОМ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «ВМУ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 4 361 100 руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца - ФИО1 по доверенности от 04.09.2023 сроком по 31.12.2024;

от ответчика - ФИО2 по доверенности от 15.01.2024 сроком по 31.12.2024.

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество «Поликон» обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛ-ДОМ» о взыскании 4 361 100 руб.

Определением суда от 28.04.2022 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «ВМУ».

Определением суда от 06.07.2022 производство по делу № А46-136/2022 приостановлено до вступления в законную силу итогового судебного акта по делу № А75-20949/2021.

Определением суда от 07.03.2024 производство по делу № А46-136/2022 возобновлено.

В судебном заседании, истец исковые требования поддержал, ответчик иск не признал.

Рассмотрев и оценив материалы дела, суд полагает, что заявленные требования удовлетворению не подлежат, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, между АО "Поликон" (заказчик, генподрядчик) и ООО "Капитал-Дом" (исполнитель, субподрядчик) заключен контракт N Б55/20-2 от 05.11.2020 на проектирование, модернизацию, демонтаж, монтаж и пуско-наладку оборудования (л.д. 14-23 т. 1, далее - договор, контракт), по условиям которого исполнитель по поручению заказчика обязуется в установленные контрактом сроки осуществить работы по проектированию, модернизации, демонтажу, монтажу и пуско-наладке комплекта имеющегося у ООО "БПО Сервис" (реорганизовано путем присоединения к ООО "ВМУ") оборудования и комплекта изготовленного для ООО "БПО Сервис" оборудования АО "Поликон" проекта модернизации цеха по ремонту труб проект N 51-20 (далее - оборудование) на территории ООО "БПО Сервис" по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, Центральная 8/5.; оказать услуги по приемо-сдаточным испытаниям; в свою очередь заказчик обязуется принять выполненные работы (услуги) и оплатить их на условиях настоящего контракта (пункт 1.1 контракта).

Проектирование, модернизация, демонтаж, монтаж и пуско-наладка оборудования производится в соответствии с Приложением N 1 к настоящему контракту, а также иными нормами и правилами, действующими на территории РФ.

Работы осуществляется силами и средствами исполнителя по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, Центральная 8/5.

Имеющееся у ООО "БПО Сервис" оборудование считается комплектной единицей. Под комплектной единицей понимается объем оборудования, предполагаемого к модернизации, демонтажу, монтажу и вводу в эксплуатацию.

Количество, сроки поставки, сроки и этапы работ, цена, условия модернизации и комплектации оборудования (а также условия, касающиеся техдокументации, маркировки и других услуг) оговариваются сторонами в Спецификации по форме Приложения N 2 и в Приложении N 3 "Наименование оборудования, этапы и виды Работ" к настоящему контракту. Цена в Спецификации включает в себя стоимость упаковки, маркировки и проведения работ и устанавливается в рублях. Цена на работы является фиксированной на весь период проведения работ, указанной в Спецификации, и изменению не подлежит.

Выполнение работ производится исполнителем в виде технических работ в соответствии с условиями, изложенными в настоящем контракте, а также в Приложении N 3 "Наименование оборудования, этапы и виды Работ" (пункты 1.2 - 1.6 контракта).

Стоимость металлоконструкций, материалов и комплектующих (далее - изделия) и предоставляемых работ (услуг) исполнителем определяется на основании согласованной сторонами Спецификации по форме Приложения N 2 к настоящему контракту и согласованного Приложения N 3 "Наименование Изделий, этапы и виды Работ" и составляет 14 537 000 руб. без НДС.

Так, согласно приложению N 3 в состав работ входят:

- Комплекс работ по ремонту бетонных полов и монтаж фундаментов под новый и существующий комплекты оборудования проект N 51-20 согласно ТЗ стоимостью 7 000 000 руб.;

- комплекс работ по модернизации подкрановых путей мостового крана проект N 51-20 согласно ТЗ стоимостью 4 237 000 руб.;

- Комплекс работ по монтажу комплекта нового оборудования АО "Поликон", а также демонтажу, переносу и монтажу существующего комплекта оборудования ООО "БПО Сервис" проект N 51-20 согласно ТЗ стоимостью 3 300 00 руб.

Оплата по контракту осуществляются следующими этапами:

- 40% - первый авансовый платеж в сумме 5 814 800 руб. без НДС в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами контракта и выставления счета на предоплату исполнителем, но не позднее 25.11.2020;

- 30% - второй авансовый платеж в сумме 4 361 100 руб. без НДС после сдачи 1-го и 2-го этапов работ, не позднее 14.05.2021;

- 15% - третий авансовый платеж в сумме 2 180 550 руб. без НДС после сдачи 3-го этапа Работ, не позднее 03.11.2021;

- 8% - четвертый авансовый платеж в сумме 1 162 960 руб. без НДС в течение 4-го этапа работ, не позднее 22.11.2021.

Оставшийся платеж в виде 7% в сумме 1 017 590 руб. без НДС за выполненные работы в соответствии с условиями настоящего контракта осуществляются на основании оригиналов счетов-фактур, спецификации, товарной накладной формы N ТОРГ-12, актов выполненных работ по форме КС2 и КС-3, сметных расчетов не ранее 30 (тридцати) и не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты выполнения работ исполнителем, предусмотренных пунктом 7.1.5. контракта, но не позднее 25.02.2022 (пункты 2.1, 2.2 контракта).

В случае просрочки оплаты за поставленные изделия или выполненные работы, заказчик должен уплатить исполнителю пеню в размере 0,05% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательств в течение первых 7 (семи) дней; и 0,08% за каждый последующий день просрочки исполнения обязательств по оплате, но не более 3% от стоимости заключенного контракта (пункт 9.12 контракта).

Комплекс работ, подлежащий выполнению по условиям контракта, состоит из 5 этапов, которые подлежат выполнению в следующие сроки:

1 этап "Разработка и согласование проекта строительной части цеха. Разработка и согласование проекта модернизации крановой эстакады. Финальное согласование планировки и режимов работы цеха" в течение 30 дней, не позднее 11.01.2021;

2 этап "Выполнение работ: фундаменты и бетонные работы, прокладка кабельных линий, пневмооборудования, изготовление и монтаж металлоконструкций крановой эстакады. Монтаж нового оборудования АО "Поликон": трубонарезные станки (2 шт.), ЛЗЛ (люнетно-загрузочные линии, 2 шт.), стеллажи и накопители для труб (1 компл.)" в течение 140-150 дней, не позднее 10.05.2021;

3 этап "Приемка и подготовка к монтажу нового комплекта оборудования АО "Поликон": стеллаж механизированный для накопления и передачи труб (1 шт.), установка фосфатирования, стеллажи и накопители для труб (1 компл.), упоры подъемные (2 компл.), упоры стационарные (5 шт.), рольганговая линия (1 комплект из 22 шт.), система автоматизации транспортных линий (1 компл.). Выполнение уточненных работ после завершения этапа проектирования комплекта оборудования АО "Поликон": фундаменты и бетонные работы, прокладка кабельных линий, пневмооборудования, изготовление и монтаж металлоконструкций крановой эстакады" в течение 170-180 дней, не позднее 29.10.2021;

4 этап "Демонтаж, перенос и монтаж существующего оборудования ООО "БПО Сервис": установка мойки, УРАН-3000, БУРАН-5000, трубонарезные станки (2 шт.), ЛЗЛ (люнетно-загрузочные линии, 2 шт.), комплект модернизированных стеллажей для трубонарезных станков РТ 220, входные и выходные рольганги установок УРАН и БУРАН. Монтаж нового оборудования АО "Поликон": стеллаж механизированный для накопления и передачи труб (1 шт.), установка фосфатирования, стеллажи и накопители для труб (1 компл.), упоры подъемные (2 компл.), упоры стационарные (5 шт.), рольганговая линия (1 комплект из 22 шт.), система автоматизации транспортных линий (1 компл.)" в течение 70 дней, не позднее 15.12.2021;

5 этап "Пуско-наладочные работы" в течение 10 дней, не позднее 25.12.2021.

Поручение обществом "Поликон" выполнения работ обществу "Капитал-Дом" было обусловлено заключением основного контракта N Б55/20 от 05.11.2020 с ООО "БПО Сервис" (правопредшественник ООО "ВМУ") (л.д. 91-144 т. 2, л.д. 1-44 т. 3).

В данном случае контракт N Б55/20-2 от 05.11.2020 является субподрядным, фактически имеет место зеркальное перенесение условий подрядного договора, заключенного между АО "Поликон" и ООО "БПО Сервис", на субподрядный, за исключением обязанности по изготовлению нового комплекта оборудования.

Факт выполнения работ на сумму 11 237 000 рублей (комплекс работ по ремонту бетонных полов и монтаж фундаментов под новый и существующий комплекты оборудования проект N 51-20 согласно ТЗ; комплекс работ по модернизации подкрановых путей мостового крана проект N 51-20 согласно ТЗ) сторонами не оспаривается.

Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2023 решение суда первой инстанции по делу № А75-20949/2021 изменено; резолютивная часть изложена в другой редакции. Признаны правомерными требования истца к ответчику в размере 977 468 рублей 11 копеек, в том числе основной долг в размере 875 005 рублей, неустойка в сумме 102 463 рубля 11 копеек. По итогам сальдирования с ответчика в пользу истца взыскано 846 738 рублей 11 копеек. Распределены судебные расходы.

Таким образом, рамках дела № А75-20949/2021 установлено ненадлежащее исполнение обязательств сторонами и произведено сальдировани с учетом фактически исполненных сторонами обязательств.

В рамках дела № А46-136/2022, истец указывает на то, что Исполнителем не был подготовлен и не передан на согласование АО «Поликон» проект монтажа демонтируемого оборудования на новом Участке согласно п. 3.1.5. Приложения № 1 Контракта. Также Исполнитель отказывается выполнить работы в рамках пунктов 3.2.1, 3.2.10, 3.2.11 Приложения №1 к Контракту, а именно:

- разработка проекта трасс для укладки силовых кабелей электропитания и управляющих кабелей АСУ Участка;

- монтаж коробов для прокладки линий электропитания и управления;

- установка ШУ и ПУ.

АО «Поликон» исходящим письмом № ПК-21-373 от 05.10.2021г. направило перечень рекомендованных к закупке материалов для своевременного выполнения вышеуказанных работ. Письмом от 01.11.2021г. № 201 Ответчик отказался приобретать рекомендованную кабельную продукцию в связи с тем, что, по его мнению, при расчете стоимости Контракта он не закладывал сумму на приобретение новой кабельной продукции.

В своем письме № 224 от 22.11.2021г. ООО «Капитал-Дом» явным образом сформулировало отказ от выполнения вышеуказанных работ в связи с отказом приобретать за свой счет необходимые материалы, в том числе кабельную продукцию.

При этом наличие или отсутствие кабельной продукции, на которую ссылается Ответчик, не препятствовало ему осуществить разработку проекта монтажа демонтируемого оборудования на новом Участке, а также проекта трасс для укладки силовых кабелей электропитания и управляющих кабелей АСУ Участка в соответствии с ТЗ.

Разработка проектов (п.3.1.5.,3.2.1.) является неотъемлемым условием, предшествующим проведению демонтажных/монтажных работ, так как дальнейшее выполнение работ должно осуществляться только строго в соответствии с проектной документацией.

Отказ от выполнения проектов, а также выполнения вышеуказанных работ АО «Поликон» расценивает как односторонний отказ от исполнения Контракта в данной части, что является прямым нарушением Ответчиком пункта 13.2 Контракта, согласно которого односторонний отказ от Исполнения Контракта полностью или частично не допускается.

Согласно п. 13.2. Контракта в случае одностороннего отказа от исполнения Контракта полностью  или  частично  Исполнителя,  Исполнитель  компенсирует  Заказчику убытки, связанные с таким отказом и уплачивает неустойку в размере 30% от общей стоимости Контракта, что составляет 4 361 100 (четыре миллиона триста шестьдесят одна тысяча сто) руб. без НДС Уведомление с приложением счета № 243 от 22.11.2021г. об уплате неустойки было направлено Исполнителю 22 ноября 2021г. (исх. № ПК-21-437 от 22.11.2021г.). На данный момент указанный платеж так и не поступил на расчетный счет Заказчика.

В силу пункта 1 статьи 329 ГК РФ, исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе неустойкой, предусмотренной законом или договором.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Из представленных в материалы доказательств и переписки не следует, что ответчик в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта.

Таким образом, учитывая отсутствие одностороннего отказа от контракта, оснований для взыскания штрафных санкций на основании п. 13.2. Контракта не имеется.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу о отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований.

Согласно ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований акционерного общества «Поликон» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) отказать.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Омской области разъясняет, что в соответствии со статьёй 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия и может быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд.

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Судья                                                                                                         С.В. Луговик