Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-132590/2022

28 апреля 2023 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  25 апреля 2023 года.

Полный текст решения изготовлен  28 апреля 2023 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Виноградовой Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "БАЛТСТРОЙ"; 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "АЛЬБА СТРОЙ СПБ" 

о взыскании, 

при участии

- от истца: ФИО2 (доверенность от 27.12.2022)

- от ответчика: не явился, извещен, 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТСТРОЙ" (далее – истец, ООО "БАЛТСТРОЙ" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "АЛЬБА СТРОЙ СПБ" (далее – ответчик, ООО "АЛЬБА СТРОЙ СПБ") о взыскании 15 196 227 руб. 03 коп. задолженности, 3 079 761 руб. 92 коп. неустойки рассчитанной по состоянию на 08.12.2022, 423 845 руб. 28 коп. неосновательного обогащения.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание своих представителей не направил, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие. 

Суд завершил предварительное судебное заседание и на основании статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) открыл судебное заседание арбитражного суда первой инстанции.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Истец в исковом заявлении указывает, что между обществом с ограниченной ответственностью «БалтСтрой» (далее – Подрядчик, Истец) и обществом с ограниченной ответственностью «АЛЬБА СТРОЙ СПБ» (далее – Субподрядчик, Ответчик) были заключены следующие договоры, идентичные по своему содержанию и предмету (далее при совместном упоминании – Договоры):

Договор № 1/15/2022 Комплексный ремонт отделения почтовой связи формата "Сельское ОПС" УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (ОПС 188525) от 22.04.2022 (далее – Договор №1/15/2022), по условиям которого субподрядчик обязался выполнить комплексный ремонт отделения почтовой связи формата «Сельское ОПС» УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. (ОПС 188525).

Цена Договора №1/15/2022 составила 2 100 000 руб., в т.ч. НДС. 

В порядке предоплаты Подрядчик уплатил Субподрядчику 1 000 000 руб., что подтверждается платежным поручением №421 от 27.04.2022. Так же Подрядчиком переданы Субподрядчику давальческие материалы на сумму 836 215,70 руб., что подтверждается актом №1 приема-передачи давальческого материала от 03.08.2022.

Договор № 1/16/2022 Комплексный ремонт отделения почтовой связи формата "Сельское ОПС" УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (ОПС 188850) от 25.04.2022 (далее – Договор №1/16/2022), по условиям которого субподрядчик обязался выполнить комплексный ремонт отделения почтовой связи формата «Сельское ОПС» УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. (ОПС 188850).

Цена Договора №1/16/2022 составляет 3 601 060,80 руб., в т.ч. НДС.

В порядке предоплаты Подрядчик уплатил Субподрядчику 1 500 000 руб., что подтверждается платежным поручением №459 от 04.05.2022. Так же Подрядчиком переданы Субподрядчику материалы на сумму 1 524 444,92 руб., что подтверждается актом №1 приема-передачи давальческого материала от 02.08.2022.

Договор № 1/17/2022 Комплексный ремонт отделения почтовой связи формата "Сельское ОПС" УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (ОПС 187414) от 25.04.2022 (далее – Договор №1/17/2022), по условиям которого субподрядчик обязался выполнить комплексный ремонт отделения почтовой связи формата «Сельское ОПС» УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. (ОПС 187414).

Цена Договора №1/17/2022 составляет 1 969 881,60 руб., в т.ч. НДС.

В порядке предоплаты Подрядчик уплатил Субподрядчику 1 000 000 руб., что подтверждается платежным поручением №573 от 30.05.2022. Так же Подрядчиком переданы Субподрядчику материалы на сумму 1 088 567,37 руб., что подтверждается актом №1 приема-передачи давальческого материала от 01.08.2022.

Договор № 1/18/2022 Комплексный ремонт отделения почтовой связи формата "Сельское ОПС" УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (ОПС 187442) от 25.04.2022 (далее – Договор №1/18/2022), по условиям которого субподрядчик обязался выполнить комплексный ремонт отделения почтовой связи формата «Сельское ОПС» УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. (ОПС 187442).

Цена Договора №1/18/2022 составляет 1 940 079,60 руб., в т.ч. НДС.

В порядке предоплаты Подрядчик уплатил Субподрядчику 900 000 руб., что подтверждается платежным поручением №503 от 16.05.2022. Так же Подрядчиком переданы Субподрядчику материалы на сумму 773 350,73 руб., что подтверждается актом №1 приема-передачи давальческого материала от 01.08.2022.

Договор № 1/19/2022 Комплексный ремонт отделения почтовой связи формата "Сельское ОПС" УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (ОПС 187461) от 25.04.2022 (далее – Договор №1/19/2022), по условиям которого субподрядчик обязался выполнить комплексный ремонт отделения почтовой связи формата «Сельское ОПС» УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. (ОПС 187461).

Цена Договора №1/19/2022 составляет 1 940 079,60 руб., в т.ч. НДС. 

В порядке предоплаты Подрядчик уплатил Субподрядчику 900 000 руб., что подтверждается платежным поручением №495 от 12.05.2022. Так же Подрядчиком переданы Субподрядчику материалы на сумму 1 111 598,56 руб., что подтверждается актом №1 приема-передачи давальческого материала от 28.07.2022.

Договор № 1/20/2022 Комплексный ремонт отделения почтовой связи формата "Сельское ОПС" УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (ОПС 187530) от 25.04.2022 (далее – Договор №1/20/2022), по условиям которого субподрядчик обязался выполнить комплексный ремонт отделения почтовой связи формата «Сельское ОПС» УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. (ОПС 187530).

Цена Договора №1/20/2022 составляет 5 995 325,20 руб., в т.ч. НДС. 

В порядке предоплаты Подрядчик уплатил Субподрядчику 2 514 890,16 руб., что подтверждается платежным поручением №421 от 27.04.2022. 

Также Подрядчиком переданы Субподрядчику материалы на сумму 1 697 974,84 руб., что подтверждается актом №1 приема-передачи давальческого материала от 02.08.2022.

О недостатках принятых материалов Подрядчика Субподрядчик не заявлял.

Срок окончания работ по всем Договорам истёк 15.06.2022. При этом Субподрядчик был обязан выполнить весь комплекс работ по Договорам надлежащего качества и в сроки, установленные Договорами.

К выполнению работ на объектах Ответчик не приступил.

Истец уведомлением исх. №288 от 08.12.2022 уведомил Ответчика о расторжении Договоров и потребовал возврата сумм неотработанного аванса.

В адрес ООО «Альба Строй СПб» 13.07.2022  был ошибочно осуществлен перевод денежных средств в размере 423 845,28 руб. 

Факт перевода подтверждается платежным поручением №922 от 13.07.2022 с назначением платежа «Аванс по договору №7СП/2022 от 12.07.2022 (текущий ремонт ГБДОУ детский сад №42 Пушкинского района Санкт-Петербурга)», однако такой договор между сторонами заключен не был.

25.05.2022 ООО «БалтСтрой» продало ООО «Альба Строй СПб» товарно-материальные ценности «Радиаторы биметаллические EXPERT РБС-500/100 8 секций 463110» в количестве 35 штук на общую сумму 346 185,00 руб.

Факт реализации подтверждается УПД №20 от 25.05.2022. Однако оплата за поставленные радиаторы так и не поступила. 

За нарушение сроков выполнения работ по Договорам Субподрядчик уплачивает Подрядчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Субподрядчиком обязательства. Размер пени составляет 0,1% от стоимости обязательств, исполнение которых просрочено, за каждый день просрочки. 

Истцом заявлена к взысканию неустойка, рассчитанная по состоянию на 08.12.2022, в размере 3 079 761 руб. 92 коп.

В нарушение статьи 65 и части 1 статьи 131 АПК РФ ответчик не представил допустимые и достоверные доказательства, опровергающие исковые требования, а также отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований и доводов о несогласии с расчетами истца. 

Согласно части 3? статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Иск подлежит удовлетворению.

Расходы по уплате государственной пошлины в силу части 1 статьи 110 АПК РФ подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АЛЬБА СТРОЙ СПБ" (ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "БАЛТСТРОЙ" (ИНН: 

<

***>) 15 196 227 руб. 03 коп. задолженности, 3 079 761 руб. 92 коп. неустойки рассчитанной по состоянию на 08.12.2022, 423 845 руб. 28 коп. неосновательного обогащения, а также 116 499 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                                        Виноградова Л.В.