Арбитражный суд Волгоградской области  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Волгоград Дело № А12-19507/2018  «19» апреля 2019 года  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Напалковой Л. В. при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гостевой З.Б.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению по исковому заявлению  государственного казенного учреждения Волгоградской области "Управление  капитального строительства" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью "БалтСтройСервис" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) о признании исполненными обязательств по оплате по государственному  контракту № 2209/14 от 22.09.2014 г., об обязании устранить недостатки работ по  государственному контракту № 2209/14 от 22.09.2014 г  

и по встречному иску о взыскании денежных средств, внесении изменений в  государственный контракт № 2209/14 от 22.09.2014 г.  

с привлечением к участи в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных  требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью  "Модулор", Комитета строительства Волгоградской области, государственного  автономного учреждения Волгоградской области "Управление государственной  экспертизы проектов", инспекции государственного строительного надзора  Волгоградской области, конкурсного управляющего общества с ограниченной  ответственностью "БалтСтройСервис" ФИО1  

при участии в судебном заседании:  

от ГКУ «УКС» – ФИО2, представителя по доверенности от 01.03.2019 г. ; 

от ООО "БалтСтройСервис", конкурсного управляющего ФИО1  – ФИО3, представителя по доверенности от 15.10.2018 г.;  

от ООО "Модулор" – ФИО4, директора, протокол от 01.04.2017 г. № 8; 

от Комитета строительства Волгоградской области – ФИО5, представителя по  доверенности от 18.01.2019 г.;  

от инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области – ФИО6, представителя по доверенности от 29.10.2018 г. № 18; 

от государственного автономного учреждения Волгоградской области "Управление  государственной экспертизы проектов" – ФИО7, представителя по доверенности от  09.01.2019 г.;  

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

Принять отказ государственного казенного учреждения Волгоградской области  "Управление капитального строительства" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) от  требований о признании исполненными обязательств со стороны государственного  

казенного учреждения Волгоградской области "Управление капитального строительства"  по оплате государственного контракта от 22.09.2014 г. № 2209/14.  

Производство по делу в указанной части прекратить. 

Остальные исковые требования казенного учреждения Волгоградской области  "Управление капитального строительства" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью "БалтСтройСервис" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в соответствии с государственным контрактом №  2209/14 от 22.09.2014 г. за счет собственных сил и средств в тридцатидневный срок со дня  вступления в законную силу решения суда выполнить следующие работы: сливные  воронки ливневой канализации на крыше здания на отметке +25,50 в осях Г-Д/Зи11  подключить к греющему кабелю; смонтировать надлежащим образом узел выхода  фановых стояков на крышу в осях А- Е/1-24 на отметке +25.50; обеспечить примыкание  кровельного ковра к трубе; на кровле машинного отделения первой секции обеспечить  уклон кровли 1.5%; устранить протечку в местах крепления анкеров кран-балки,  обеспечить примыкании кровли к парапету третьей секции; на кровле машинного  отделения второй секции обеспечить уклон кровли 1,5%; на всех балконах выполнить  железнение цементной стяжки согласно требованиям проекта 3201/ГК-2013-АР;  выполнить цементную стяжку на балконах толщиной 20 мм, согласно условиям  контракта; в районе парапета устранить отслоение облицовочного кирпича; на девятом  этаже второй секции устранить деформацию облицовочного кирпича вверху балконной  пары; устранить в квартире № 1,1 секция 8 этаж трещину в стеклопакете; устранить следы  отслоения окрасочного слоя на третьей секции цокольной части здания; устранить со  стороны фасада просадку отмостки, устранить обратный уклон в сторону дома со стороны  дворового фасада в месте прохода электротехнических коммуникаций; устранить  отслоение штукатурки и кирпича на входных группах и их посадки; устранить течь  кровельного покрытия в помещении машинного отделения третьей секции в местах  крепления кран балки, а также устранить затечные пятна на потолке, восстановить  (отремонтировать) покрытие пола (цементно-песчаная стяжка основания и линолеум) в  помещениях коридора (8,4 кв.м.), жилой комнаты (14, 8 кв.м.), кухни (8,9 кв.м) квартиры   № 146 дома № 2 в пер. Удмуртский г. Волгограда путем замены теплоизолирующего слоя,  устройства выравнивающего слоя (стяжки) из цементно-песчаной смеси толщиной 50 мм,  укладки покрытия пола из линолеума на вспененной утепляющей основе одним ковром  каждое помещение.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "БалтСтройСервис" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 6 000 руб.  

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью  "БалтСтройСервис" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о внесении изменений в  государственный контракт № 2209/14 от 22.09.2014 г. оставить без рассмотрения.  

Остальные исковые требования общества с ограниченной ответственностью  "БалтСтройСервис" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) удовлетворить в части.  

Взыскать с государственного казенного учреждения Волгоградской области  "Управление капитального строительства" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  пользу общества с ограниченной ответственностью "БалтСтройСервис" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) денежные средства в размере 15 875 613 руб. 80 коп., а  также 125 734 руб. 52 коп. в счёт возмещения судебных расходов, из которых 56 291 руб.  40 коп. по оплате государственной пошлины, 69 443 руб. 12 коп. судебных издержек по  проведению судебной экспертизы.  

В удовлетворении остальной части иска общества с ограниченной  ответственностью "БалтСтройСервис" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) оказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "БалтСтройСервис" (ОГРН  1037700004210, ИНН 7702333268) в доход федерального бюджета государственную  пошлину 7 365 руб. 33 коп.  

Путём произведённого судом сложения взыскать с общества с ограниченной  ответственностью "БалтСтройСервис" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 13 365 руб. 33 коп.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.  

Решение в полном объёме будет изготовлено в установленный законом срок.  

Судья Л.В. Напалкова