ДВЕНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 74; тел: (8452) 74-90-90, 8-800-200-12-77; факс: (8452) 74-90-91,

http://12aas.arbitr.ru; e-mail: info@12aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело №А12-71394/2016

г. Саратов

07 июня 2017 года

Резолютивная часть постановления объявлена 31 мая 2017 года

Полный текст постановления изготовлен 07 июня  2017 года

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Цуцковой М.Г.,

судей Клочковой Н.А., Лыткиной О.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Сенар» г. Волгоград, на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 22 марта 2017 года по делу №А12-71394/2016, (судья Сейдалиева А.Т.),

по иску унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (400074, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), 

к обществу с ограниченной ответственностью «Сенар» (400069, г. Волгоград, 

<

...>,  ИНН 3446009990ОГРН, 1023404242168), о взыскании неустойки,

при участии в судебном заседании:

от общества с ограниченной ответственностью «Сенар» - ФИО2 по доверенности от 9 января 2016 года, директор ФИО3,  

без участия: унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»,

У С Т А Н О В И Л:

Унитарная некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее – УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов», истец) обратилась в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Сенар»  (далее - ООО «Сенар», ответчик) неустойки за нарушение сроков выполнения работ  в сумме 2 608 515 руб., расходов по оплате государственной пошлины в размере 36 043 руб.   

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 22 марта 2017 года по делу №А12-71394/2016 с ООО «Сенар» в пользу УНО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" взыскана  неустойка в сумме 285 864 руб. 65 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 18 022 руб., в остальной части иска отказано.

Не согласившись с вынесенным решением, ООО «Сенар» обратилось в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе.

Письменного отзыва на апелляционную жалобу в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не поступило.  

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал свою позицию по рассматриваемому делу.  

Апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие представителя унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»,  надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания (п.1 ст. 123, п.3 ст.156 АПК РФ).

Законность и обоснованность принятого решения проверена арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке ст.ст. 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении апелляционной жалобы установлены следующие обстоятельства.

05.09.2016 между УНО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" (заказчик) и ООО «Сенар» (подрядчик) заключен договор №199-В-СНР-2016, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> (капитальный ремонт: систем холодного водоснабжения, подвальных помещений (отмостка), системы теплоснабжения, водоотведения, сетей электроснабжения), ул. 64-й Армии, д. 24 (капитальный ремонт: системы холодного водоснабжения, подвальных помещений (отмостка), системы теплоснабжения, водоотведения, сетей электроснабжения), в соответствии с условиями договора, действующими требованиями национальных стандартов и сводов правил, проектно-сметной документации, предоставленной заказчиком, в соответствии с техническим, экономическим и другими требованиями проектно-сметной документации, ТУ, СНиП и других нормативов, а также условиями заказчика, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную договором цену.

В силу пункта 1.2. договора весть комплекс работ осуществляется подрядчиком до 05.10.2016.

Согласно пункту 3.1. договора стоимость работ составляет 8 281 000 руб.

В соответствии с пунктом 5.1. договора подрядчик обязан выполнить все работы по капитальному ремонту надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные договором.

В случае нарушения срока выполнения работ подрядчик обязан уплатить неустойку в размере 0,5% от стоимости невыполненных работ и не сданных заказчику работ за каждый день просрочки (пункт 9.8. договора). 

По мнению истца, подрядчик выполнил работы с нарушением установленного срока производства работ, в связи с чем, истец предъявил требование о взыскании неустойки.

С целью досудебного урегулирования спора истцом в адрес ответчика была направлена претензия от 18.10.2016.

Неисполнение данного требования послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском. 

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу, что ответчик ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по договору. 

Судебная коллегия не усматривает оснований для переоценки выводов суда по доводам апелляционной жалобы  в силу следующего.  

В  силу положений статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением  случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

В соответствии со статьей 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Судом первой инстанции установлено, что работы не выполнены, заказчику не сданы.

Согласно статье 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

При проверке требований о взыскании неустойки, суд обязан проверить и установить факт наличия просрочки исполнения обязательств и размер просроченной к уплате задолженности.

В соответствии с пунктом 9.8 договоров в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств начисляется пени в размере 0,5 % от стоимости не выполненных и не сданных заказчику работ за каждый день просрочки.

В связи с допущенной просрочкой выполнения работ истцом произведен расчет неустойки за период с 06.10.2016 по 07.12.2016 в сумме 2 608 515 руб.

Судом первой инстанции заявленный ко взысканию размер неустойки проверен и обоснованно признан верным.

При этом суд первой инстанции пришел к выводу о наличии обоюдной вины в нарушении сроков выполнения работ.

В силу пункта 1 статьи 404 Гражданского кодекса Российской Федерации, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника. Суд также вправе уменьшить размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению.

В материалы дела представлены письма ответчика от 14.09.2016, 26.09.2016 с предложением о внесении изменений в проект в части замены некоторых материалов.

Заказчик данные вопросы адресовал проектировщику, который дал пояснения  подрядчику в письмах от 03.10.2016 и 10.10.2016.

Таким образом, несвоевременное принятие заказчиком мер  необходимых подрядчику разъяснений порядка исполнения работ также привело к увеличению сроков работ.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанций, обоснованно пришел к выводу об обоюдной вине сторон, участвующих в деле и уменьшению размера неустойки ответчика в соответствии со статьей 404 Гражданского кодекса Российской Федерации до 1 304 257 руб. 50 коп. 

Доводы заявителя апелляционной жалобы о полном освобождений ответчика от ответственности по статье 401 Гражданского кодекса Российской Федерации отклоняются судом апелляционной инстанции по следующим основаниям.

Как обоснованно указал суд первой инстанции иные письма подрядчика (от 30.09.2016) о необходимости согласования дополнительных работ и внесения каких либо изменений в проектно-сметную документацию датированы уже за пределами срока выполнения работ.

Письмо ответчика от 30.09.2016 о необходимости выполнения дополнительных работ не содержит указаний, какие именно работы необходимо дополнительно произвести, и необходимость их выполнения,  мотивированный ответ дан истцом (письмо от 12.10.2016).

Необходимость выполнения дополнительных работ и замены материалов требовали  согласия заказчика, между тем, в нарушение требований ст. 719, 719 ГК РФ и условий договора п.п. 5.26, 5.27,  ответчик не приостановил работы, а посчитал возможным их исполнить без данных согласований, что подтверждается представленным журналом производства работ, из которого видно, что работы выполнялись ежедневно за период с 08.09.2016 по 30.12.2016. Кроме этого, подрядчик самостоятельно осуществил замену труб, что подтверждается  проведенной прокурорской проверкой (письмо №2996/16 от 17.01.17).         

Ссылки ответчика на наличие затруднений доступа в квартиры со стороны жильцов также не принимаются судом, поскольку о наличии данной проблемы подрядчик уведомил заказчика в последний день срока выполнения работ 05.10.2016, иные письма адресованы ненадлежащим сторонам (не заказчику). 

Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Ответчик в силу добровольно принятых на себя обязательств по договору должен был выполнить работы в срок, в том числе с учетом проживания в домах граждан, поскольку данная информация была размещена в аукционной документации, указание на выполнение работ с учетом проживания в данных домах жильцов, не относятся к числу тех проблем, возникновение которых нельзя было предвидеть.

Принимая решение об участии в таком аукционе, ответчик был вправе обратиться к заказчику с разъяснениями информации о проектной и технической документации, необходимых для производства работ, что им сделано не было. В связи с чем, ответчик, заключая договор, посчитал достаточной ту информацию, которую содержало техническое задание заказчика, для производства работ, при этом судом учтено, что согласно акту от 05.09.2016 проектно-сметная документация передана подрядчику своевременно в момент заключения договора.

Представленные ответчиком документы, не могут быть расценены судом, как обстоятельства отсутствия вины в неисполнении обязательств и принятия всех мер для надлежащего исполнения обязательств, при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота.

В ходе рассмотрения дела судом первой инстанции ответчиком было заявлено о снижении неустойки в порядке статьи  333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации  суд по заявлению ответчика вправе уменьшить неустойку, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Учитывая заявление ответчика о применении положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации  при исчислении размера неустойки, суд первой инстанции, исходя из фактических обстоятельств дела, явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства страховщиком, пришел к обоснованному выводу о наличии оснований для применения положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации  и уменьшению размера взыскиваемой неустойки.

Действующее гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения размера неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств независимо от того, является неустойка законной или договорной.

Таким образом, определив соотношение размера неустойки с последствиями нарушения обязательства, суды должны учитывать компенсационную природу неустойки, а также принцип привлечения к гражданско-правовой ответственности только за ненадлежащим образом исполненное обязательство.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 65 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.01.2015 № 2 "О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" уменьшение судом неустойки возможно в случаях, когда подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушенного обязательства, и допускается по заявлению ответчика и с указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение ее размера является допустимым.

В соответствии с пунктом 78 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" правила о снижении размера неустойки на основании статьи 333 ГК РФ применяются также в случаях, когда неустойка определена законом, в том числе пунктом 21  статьи 12 Закона об ОСАГО.

Суд первой  инстанции, исходя из того, что неустойка как мера ответственности должна носить компенсационный, а не карательный характер и не может служить мерой обогащения, а также  учитывая обстоятельства дела, размер просроченной к выплате суммы,  отсутствие сведений о реальных убытках, понесенных истцом в связи с нарушением обязательств ответчиком,   обоснованно снизил размер неустойки до 285 864 руб. 65 коп., исходя из двукратной ставки рефинансирования.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу ч. 4 ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены решения первой инстанции судом апелляционной инстанции не установлено.

Оснований для отмены обжалуемого судебного акта по приведенным в апелляционной жалобе доводам не имеется.

Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 22 марта 2017 года по делу №А12-71394/2016 подлежит оставлению без изменения, апелляционная жалоба общества с ограниченной ответственностью «Сенар» – без удовлетворения.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 3000 руб.00 коп. по платежному поручению № 65 от 17.04.2017 суд апелляционной инстанции относит на проигравшую сторону.

Руководствуясь статьями 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 22 марта  2017 года по делу № А12-71394/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через  арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий     М.Г. Цуцкова

Судьи:     Н.А. Клочкова

 О.В. Лыткина