Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-21781/2023

г. Хабаровск

02 мая 2024 года

Резолютивная часть судебного акта объявлена 18 апреля 2024 года.

         Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи С.М. Курносовой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лунау И.А.,

рассмотрев в заседании суда дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Карьер Известковый» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 694020, 

<

...> зд. 131А, помещ. 3; фактический адрес: 693020, 

<

...>)

к краевому государственному казенному учреждению «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680021, 

<

...>)

о признании незаконным требования от 27.12.2023 № 7757 об оплате пени по контракту № 0322200000121000002-ЗП от 14.05.2021 в размере 35 743 480 руб. 59 коп., об обязании не совершать действие

        при участии в судебном заседании:

от истца (в режиме «онлайн») - ФИО1, представитель, доверенность от 01.12.2023,  

от ответчика - ФИО2, представитель, доверенность № 15/2024 от 15.01.2024, 

 

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Карьер Известковый» (далее - ООО «Карьер известковый», истец) обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к краевому государственному казенному учреждению «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» (далее - КГКУ «Служба заказчика Минстроя края», учреждение) о признании незаконным требования краевого государственного казенного учреждения «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» от 27.12.2023 № 7757 об оплате пени по контракту № 0322200000121000002-ЗП от 14.05.2021 в размере 35 743 480 руб. 59 коп., об обязании не совершать действие.

Краевым государственным казенным учреждением «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» для приобщения к материалам дела представлено письмо от 06.02.2024 № 03-07-669 направленное в адрес истца об отзыве спорного требования от 27.12.2023 № 7757 об оплате пени по контракту. 

Представитель истца в судебном заседании подтвердил отзыв ответчиком спорного требования от 27.12.2023 № 7757, отказ от иска не заявил.

Представитель ответчика в судебном заседании просил отказать в удовлетворении иска, в связи с отсутствием предмета спора, так как истец просит признать незаконным требование от 27.12.2023 № 7757 об оплате пени по контракту № 0322200000121000002-ЗП от 14.05.2021 в размере 35 743 480 руб. 59 коп., об обязании не совершать действие. В свою очередь  указанное требование ответчиком отозвано, в связи с чем, требование об оплате неустойки в размере 35 743 480 руб. 59 коп., не подлежит исполнению ООО «Карьер Известковый». 

Заслушав представителей сторон, исследовав представленные сторонами в материалы настоящего дела доказательства, заслушав пояснения представителей сторон, арбитражный суд установил следующие обстоятельства. 

Между КГКУ «Служба заказчика Минстроя края» (заказчик) и ООО «Карьер известковый» (подрядчик) 14.05.2021 заключен контракт № 0322200000121000002-ЗП, согласно пункту 1.1 которого предметом контракта является выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Защита от затопления территории Южного округа г. Хабаровск на участке ул. Пионерская от Дендрария до ул. Союзная» (далее - Работы, объект). Заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в соответствии с Технической частью (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, в сроки, предусмотренные контрактом в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение 4), а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом. 

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта является твердой, определена на весь срок выполнения контракта и включает в себя прибыть подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена обязательств по контракту составляет 494 147 875 рублей. 

В силу пункта 5.1 контракта срок выполнения работ: начало выполнения работ: с даты заключения контракта, окончание выполнения работ 10.11.2022. 

Приемка выполненных работ по объекту производится заказчиком поэтапно, по каждому выполненному этапу работ, в соответствии со сроками выполнения этапов работ, установленными контрактом. По окончании выполнения соответствующего этапа работ подрядчик обязан сообщить заказчику о готовности к сдаче результата выполненного этапа работ и представить заказчику в срок не позднее 2 рабочих дней с момента окончания срока выполнения соответствующего этапа работ два экземпляра отчетной и исполнительной документации, включающей: акт о приемке выполненных работ (форма N КС-2); справку о стоимости выполненных работ н затрат (форма N КС-3); акты освидетельствования скрытых работ; документы, подтверждающие надлежащее качество и безопасность материалов, которые были применены в ходе выполнения работ по контракту; исполнительные схемы (пункты 6.2 - 6.4.1 контракта). 

Пунктом 10.3 контракта предусмотрено, что в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик уплачивает заказчику неустойку (штраф, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, в том числе просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 4.4.36 настоящего контракта, начиная со дня, после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены настоящего контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком (пункт 10.3.1 контракта). 

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 10.9 контракта). 

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств то настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок (пункты 11.1 - 11.2 контракта). 

Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде н возможной продолжительности действия (пункт 11.3 контракта). 

В дополнительном соглашении № 2 от 27.04.2022 к контракту стороны определили цену контракта 501 607 388 руб. 20 коп. 

Приложение № 4 «График производства работ» к Приложению № 1 «Техническая часть» контракта изменен и изложен в редакции Приложения № 2 к Соглашению. 

Приложение № 4 «График выполнения строительно-монтажных работ» контракта изменен и изложен в редакции Приложения № 3 к соглашению». 

КГКУ «Служба заказчика Минстроя края» в адрес ООО «Карьер Известковый» направлено требование от 27.12.2023 № 7757 о нарушении сроков выполнения отдельных этапов работ за период с 01.08.2023 по 27.12.2023 (с 16 по 20 этапы), произведен расчет неустойки в размере 35 743 480 руб. 59 коп., а также требование об уплате указанной неустойки. 

Подрядчик, не согласившись с начислением неустойки, обратился в арбитражный суд с иском о признании незаконным требования от 27.12.2023 № 7757 об оплате пени по контракту № 0322200000121000002-ЗП от 14.05.2021 в размере 35 743 480 руб. 59 коп., об обязании не совершать действие. 

В пункте 1 статьи 329 ГК РФ установлено, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

Статьей 330 ГК РФ предусмотрено, что неустойкой (пеней, штрафом) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Частью 6 статьи 34 Закона о контрактной системе установлено, что в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени (часть 7 указанной статьи). 

Статьей 2 АПК РФ предусмотрено, что задачами судопроизводства в арбитражных судах являются защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В ходе рассмотрения настоящего дела, ответчик письмом от 06.02.2024 № 03-07-669 отозвал спорное требование от 27.12.2023 № 7757 об оплате пени по контракту. Указав, что в расчет неустойки в предъявленном требовании включены работы, выполнение которых не должно входить в расчет неустойки, в связи с чем, неустойка в размере 35 743 480 руб. 59 коп. не подлежит взысканию, а требование от 27.12.2023 № 7757 исполнению ООО «Карьер Известковый».

Истец просил признать незаконным именно требование от 27.12.2023 № 7757 об оплате пени по контракту № 0322200000121000002-ЗП от 14.05.2021 в размере 35 743 480 руб. 59 коп., об обязании не совершать действие, в виде удержания пени.

Суд, изучив материалы, заслушав представителей сторон, приходит к выводу, что в рамках рассматриваемого дела отсутствует предмет спора, в связи с чем, в иске отказывает. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

 

         Судья                                                                                      С.М. Курносова