ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-26137/20-15-190

10 июня 2020 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 8 июня 2020 года.

Решение в полном объеме изготовлено 10 июня 2020 года.

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе: судьи Ведерникова М.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Министерства обороны Российской Федерации (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к Акционерному обществу "Государственный научно-исследовательский химико-аналитический институт" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании неустойки по государственному контракту от 23.06.2017 № 1719187313311452237000942 

и приложенные к исковому заявлению документы,

при участии представителей сторон:

от истца: ФИО2 по дов. №207/4/217д от 26.06.2019

от ответчика: не явился, извещен 

 

УСТАНОВИЛ:

Министерство обороны Российской Федерации (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к Акционерному обществу "Государственный научно-исследовательский химико-аналитический институт" (далее – ответчик) о взыскании неустойки по государственному контракту от 23.06.2017 № 1719187313311452237000942 в размере 7 678 140,55 руб.

Представитель истца требования поддержал в полном объеме по доводам, изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства в судебное заседание не явился, представил отзыв, согласно которому возражает против удовлетворения требований, а также просит применить нормы ст. 333 ГК РФ.

Суд, с учетом мнения Истца, считает возможным рассмотреть спор в отсутствие представителя ответчика в порядке ст.ст. 123, 136, 156 АПК РФ по имеющимся в материалах дела доказательствам.

Суд, исследовав материалы дела, изучив доказательства в их совокупности и взаимосвязи, считает, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, Между Министерством обороны Российской Федерации (далее -Заказчик) и АО «Государственный научно-исследовательский химико-аналитический институт» (далее - Исполнитель) заключен государственный контракт от 23 июня 2017г. №1719187313311452237000942 на выполнение опытно-конструкторской работы для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2017-2019 годах (далее - Контракт).

Согласно пункту 1.1 Контракта Исполнитель обязуется в установленный Контрактом срок выполнить опытно-конструкторскую работу (далее - ОКР) в объеме, соответствующую качеству, результату и иным требованиям, установленным Контрактом и своевременно сдать Заказчику ее результат.

Этап №1 ОКР должен быть выполнен - 14 августа 2017г. (пункт 2.2 Контракта).

Датой исполнения обязательств по отдельным этапам ОКР является дата подписания Заказчиком (Представителем Заказчика) акта сдачи-приемки выполненного этапа ОКР (пункт 4.3 Контракта).

Этап №1 ОКР не выполнен, что подтверждается Актом комиссии по приёмке этапа № 1 ОКР от 11 августа 2017г., по итогам которого этап №1 ОКР не принят.

Работы по этапу №1 не сданы до настоящего времени.

Срок исполнения обязательств этапа № 1 ОКР по Контракту с 23 июня 2017г. по 14 августа 2017г. составляет 53 дня.

Просрочка исполнения обязательств с 15 августа 2017г. по 28 января 2018г. составляет 167 дней.

В соответствии с пунктом 8.3 Контракта, в случае нарушения сроков выполнения этапов ОКР, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки Исполнителем исполнения данного обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размерах, определяемых в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063, за каждый факт просрочки, но не менее законной неустойки, за каждый факт просрочки.

Расчет неустойки за просрочку исполнения обязательств по Контракту складывается из следующих показателей: (Цена Контракта - стоимость фактически исполненных обязательств) х размер ставки рефинансирования (ключевой ставки), установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени, определенной с учетом коэффициента х количество дней просрочки.

При этом, расчет коэффициента (К) складывается из следующих показателей:

К = количество дней просрочки/срок исполнения обязательства по Контракту х 100%, что составляет:

К= 53дн./167дн. х Ю0% = 31,7%.

При К, равном 0-50 % и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.

Цена Контракта - 49 552 375,28 руб. (пункт 6.1 Контракта).

Ключевая ставка ЦБ РФ с 15 августа 2017г. - 9 %.

Ключевая ставка ЦБ РФ с 29 октября 2017г. - 8,5%).

Ключевая ставка ЦБ РФ с 17 декабря 2017 г. - 8,25%.

Ключевая ставка ЦБ РФ с 28 января 2018 г. - 7,75%.

Размер неустойки за просрочку выполнения этапа № 1 ОКР составляет:

(49 552 375,28 руб. - 0 руб.) х 0,01 х 9% х 34 дня (с 15 августа 2017г. по 17 сентября 2017г.) = 1 516 302,68 руб.

(49 552 375,28 руб. - 0 руб.) х 0,01 х 8,5% х 42 дня (с 18 сентября 2017г. по 29 октября 2017г.) =1 769 019,80 руб.

(49 552 375,28 руб. - 0 руб.) х 0,01 х 8,25% х 49 дней (с 30 октября 2017г. по 17 декабря 2017г.) =2 003 154,77 руб.

(49 552 375,28 - 0 руб.) х 0,01 х 7,75% х 42 дня (с 18 декабря 2017г. по 28 января 2018г.) = 1 612 929, 82 руб.

Общая сумма неустойки составляет:

1 516 302, 68 руб. +1 769 019,80 руб. +2 003 154,77 руб.+ 1 612 929, 82 = 6 901 407,07 руб.

Согласно пункту 1.1 Контракта Исполнитель обязуется в установленный Контрактом срок выполнить опытно-конструкторскую работу (далее - ОКР) в объеме, соответствующую качеству, результату и иным требованиям, установленным Контрактом и своевременно сдать Заказчику ее результат.

Этап № 2 ОКР должен быть выполнен - 11 ноября 2017г. (п. 2.2 Контракта).

Датой исполнения обязательств по отдельным этапам ОКР является дата подписания Заказчиком (Представителем Заказчика) акта сдачи-приемки выполненного этапа ОКР (п. 4.3 Контракта).

Фактически этап №2 ОКР выполнен 30 ноября 2017г., что подтверждается Актом сдачи-приёмки выполненных работ по этапу №2 ОКР от 30 ноября 2017 г. № б/н.

Срок исполнения обязательств этапа №2 ОКР по Контракту с 23 июня 2017г. по 11 ноября 2017г. составляет 142 дня.

Просрочка исполнения обязательств с 12 ноября 2017г. по 30 ноября 2017г. составляет 19 дней.

В соответствии с пунктом 8.3 Контракта, в случае нарушения сроков выполнения этапов ОКР, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки Исполнителем исполнения данного обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размерах, определяемых в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063, за каждый факт просрочки, но не менее законной неустойки, за каждый факт просрочки.

Расчет неустойки за просрочку исполнения обязательств по Контракту складывается из следующих показателей: (Цена Контракта – стоимость фактически исполненных обязательств) х размер ставки рефинансирования (ключевой ставки), установленной ЦБ РФ, определенной с учетом коэффициента х количество дней просрочки.

При этом, расчет коэффициента (К) складывается из следующих показателей:

К = количество дней просрочки/срок исполнения обязательства по Контракту х 100%, что составляет:

К= 19дн./142дн. х 100%= 13%.

При К, равном 0-50 % и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.

Цена Контракта - 49 552 375,28 руб. (пункт 6.1 Контракта).

Ключевая ставка ЦБ РФ на 30 ноября 2017г. - 8,25%.

Размер неустойки за просрочку выполнения этапа № 2 ОКР составляет: (49 552 375,28 руб. - 0 руб.) х 0,01 х 8,25% х 19 дней (с 12 ноября 2017г. по 30 ноября 2017г.) = 776 733,48 руб.

Истцом в адрес Ответчика были направлены претензии №212/6/363 от 31 января 2018г., №212/6/1796 от 20 апреля 2018г., которые оставлены Ответчиком без удовлетворения.

На основании изложенного, истец обратился в суд с настоящим иском.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом, а при исполнении обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, договором (ст. 310 ГК РФ).

Статьей 329 ГК РФ предусмотрены способы обеспечения исполнения обязательств, в том числе такой способ, как неустойка.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

Как установлено в ходе судебного разбирательства по делу, срок исполнения обязательств этапа № 1 ОКР по Контракту с 23 июня 2017г. по 14 августа 2017г. составляет 53 дня.

Просрочка исполнения обязательств с 15 августа 2017г. по 28 января 2018г. составляет 167 дней.

Как пояснил истец в ходе судебного разбирательства по делу Этап №1 ОКР не выполнен, что подтверждается Актом комиссии по приёмке этапа № 1 ОКР от 11 августа 2017г., по итогам которого этап №1 ОКР не принят, в связи с чем истец исчисляет неустойку за просрочку исполнения обязательств по этапа № 1 ОКР в размере 6 901 407,07 руб. за период с 15 августа 2017г. по 28 января 2018г., что составляет 167 дней.

Между тем, в ходе судебного разбирательства судом установлено, что этап № 1 ОКР выполнен Исполнителем и принят Заказчиком 29 сентября 2017 г., что подтверждается Актом приемки этапа №1 Форма 16 ГОСТ 15.203-2001 и Актом сдачи-приемки выполненных работ по этапу 1 ОКР.

Кроме того, Истцом полностью оплачены выполненные работы по этапу № 1 ОКР, что подтверждается платежными поручениями №205550 от 22.08.2017г. и № 438262 от 30.10.2017.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что истцом не верно произведен расчет исчисляемой неустойки, в связи с чем суд, произведя самостоятельный расчет считает верным период просрочки по 1-му этапу с 15.08.2017 по 29.09.2017, что составляет 45 дней (дата подписания акта приемки этапа).

Таким образом, расчет неустойки за просрочку выполнения этапа № 1 ОКР будет иметь следующий вид:

(49 552 375,28 руб. – 3 500 000 руб.) х 0,01 х 9% х 34 дня (с 15 августа 2017г. по 17 сентября 2017г.) = 1 516 302,68 руб.

(49 552 375,28 руб. - 3 500 000 руб.) х 0,01 х 8,5% х 11 дней (с 18 сентября 2017г. по 29 сентября 2017г.) =505 434,27 руб.

Итого общая сумма неустойки за просрочку выполнения этапа № 1 ОКР составляет: 1 516 302, 68 руб. + 505 434,27 руб. = 2 021 136,95 руб.

Как установлено в ходе судебного разбирательства по делу, срок исполнения обязательств этапа №2 ОКР по Контракту с 23 июня 2017г. по 11 ноября 2017г. составляет 142 дня.

Как пояснил истец в ходе судебного разбирательства по делу, фактически этап № 2 ОКР выполнен 30 ноября 2017г., что подтверждается Актом сдачи-приёмки выполненных работ по этапу №2 ОКР от 30 ноября 2017 г. № б/н, в связи с чем истец исчисляет неустойку за просрочку исполнения обязательств по этапа № 2 ОКР в размере 776 733,48 руб. за период с 12 ноября 2017г. по 30 ноября 2017г., что составляет 19 дней.

Между тем, что истцом также не верно произведен расчет исчисляемой неустойки за просрочку исполнения обязательств по этапа № 2 ОКР, а именно истец при расчете неустойки исчисляет неустойку от всей суммы контракта, без учета выполненных работ, а именно цены этапа № 1 ОКР,  в связи с чем суд, произведя самостоятельный расчет считает правильным расчет в следующем виде: (49 552 375,28 руб. - 3 500 000 руб.) х 0,01 х 8,25% х 19 дней (с 12 ноября 2017г. по 30 ноября 2017г.) = 721 870,98 руб.

Итого общая сумма неустойки за просрочку выполнения этапов № 1 ОКР и № 2 ОКР составляет:  2 021 136,95 руб. + 721 870,98 руб. = 2 743 607,93 руб.

На основании вышеизложенного, суд удовлетворяет требования истца частично, а именно в размере 2 743 607,93 руб.,

Таким образом, суд считает, что требования истца о взыскании с ответчика неустойки за просрочку исполнения этапов № 1 ОКР и № 2 ОКР подлежат удовлетворению в установленном размере в сумме 2 743 607,93 руб..

Принимая во внимание положения вышеназванных норм материального права, а также учитывая конкретные обстоятельства по делу, суд взыскивает с ответчика в пользу истца сумму пени в размере 2 743 607,93 руб., поскольку ответчик не исполнил свои обязательства в установленный контрактом срок, хотя должен был это сделать в силу ст.ст. 309 - 310, 314 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета в соответствии с ч. 3 ст. 110 АПК РФ и п. 4 ч. 1 ст. 333.22 НК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 156, 167-171 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с Акционерного общества "Государственный научно-исследовательский химико-аналитический институт" в пользу Министерства обороны Российской Федерации пени в размере 2 743 607,93 руб.

В остальной части в удовлетворении заявленных исковых требований отказать.

Взыскать с Акционерного общества "Государственный научно-исследовательский химико-аналитический институт" в федеральный бюджет РФ государственную пошлину в размере 36 718 руб.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.

 

СУДЬЯ:                                                                                                      М.А. Ведерников