Арбитражный суд Хабаровского края

<

...>, www.khabarovsk.arbitr.ru

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Дело № А73-19075/2024

г. Хабаровск

23 декабря 2025 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Л.А. Збарацкой

рассмотрев материалы дела в связи с поступившим заключением эксперта по делу А73-19075/2024

по иску общества с ограниченной ответственностью «Вандербилд» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680042, Хабаровский карай, 

<

...>)

к акционерному обществу «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680011, Хабаровский карай, 

<

...>)

о взыскании 19 487 550 руб. 50 коп.

по встречному исковому заявлению акционерного общества «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680011, Хабаровский карай, 

<

...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Вандербилд» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680042, Хабаровский карай, 

<

...>)

о взыскании 31 512 797 руб. 48 коп.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Вандербилд» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к акционерному обществу «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» о взыскании 19 487 550 руб. 50 коп., составляющих долг в размере 17 270 675 руб. 29 коп., неустойку в размере 2 216 875 руб. 21 коп. за периоды с 01.01.2024 по 09.10.2024.

Определением от 25 февраля 2025 судом принят встречный иск акционерного общества «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» к обществу с ограниченной ответственностью «Вандербилд» о взыскании неустойки в размере 31 512 797 руб. 48 коп., составляющих пени в размере 3 590 110 руб. 57 коп. за периоды с 09.01.2023 по 27.11.2023 за просрочку выполнения этапов работ в срок по п.1, п.4, п.5, пени в размере 26 041 276 руб. 91 коп. за периоды с 13.05.2023 по 01.09.2023, с 02.09.2023 по 24.12.2024 за просрочку выполнения работ в части начала и окончания выполнения работ.

Определением от 07 апреля 2025 судом принято уменьшение первоначального иска до 17 517 272 руб. 96 коп., составляющих по договору от 30.12.2022 № 24-2022 долг в размере 8 378 690 руб. 30 коп., пени в размере 380 323 руб. 24 коп. за периоды с 04.11.2023 по 25.02.2025, начислении открытой пени с 26 февраля 2025, по договору от 26.09.2022 № ХНЗ-02692 долг в размере 8 466 984 руб. 96 коп., пени в размере 291 274 руб. 46 коп. за периоды с 10.01.2024 по 25.02.2025, начислении открытой пени с 26 февраля 2025.

Определением от 07 апреля 2025 по делу назначена судебная строительно-техническая экспертиза, проведение которой поручено автономной некоммерческой организации «Комплексная экспертиза».

Определением от 08.07.2025 продлен срок производства судебной строительно-технической экспертизы до 01 сентября 2025.

10.11.2025 в суд поступило заключение эксперта от 07.11.2025 № 161.

Определением от 12 ноября 2025 производство по делу № А73-19075/2024 возобновлено.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 109 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации денежные суммы, причитающиеся экспертам, выплачиваются по выполнении ими своих обязанностей с депозитного счета арбитражного суда.

На основании изложенного с депозитного счета Арбитражного суда Хабаровского края автономной некоммерческой организации «Комплексная экспертиза» следует выплатить денежные средства в размере 200 000 руб., перечисленные закрытым обществом с ограниченной ответственностью «Нарвал» за общество с ограниченной ответственностью «Вандербилд» платежным поручением от 20.03.2025 № 58 на сумму 200 000 руб.

Руководствуясь статьей 109 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л

Выплатить автономной некоммерческой организации «Комплексная экспертиза» с депозитного счета Арбитражного суда Хабаровского края денежные средства в размере 200 000 руб., перечисленные платежным поручением от 20.03.2025 № 58.

Судья Л.А. Збарацкая