479/2024-48060(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-33810/2023

город Саратов

22 февраля 2024 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» - удовлетворить. 

Внести изменения в государственный контракт № 0860500000223000031 от 10.07.2023  изложив пункт 3.2. контракта в следующей редакции: «Дата окончания выполнения работ:  30.04.2024; пункт 12.3. контракта в следующей редакции: «Контракт вступает в силу со дня  его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих  обязательств по Контракту, но не позднее 30 декабря 2024 года, а по гарантийным  обязательствам до полного их исполнения».  

Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по  истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  апелляционную или кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35  раздела VI Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Направить копии судебного акта лицам, участвующим в деле, в соответствии с  требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Судья арбитражного суда 

Саратовской области ФИО1