4473/2018-516414(2) 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 http://www.spb.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-30254/2018

07 сентября 2018 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена 30 августа 2018 года. Полный текст решения изготовлен 07 сентября 2018 года. 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:  судьи Сергеева О.Н.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-ВЕРТИКАЛЬ" (адрес:  Россия 192236, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>/1-Н ОФИС 252, ОГРН: 

<

***>);  

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ДВЕРНАЯ  КОМПАНИЯ" (адрес: Россия 193315, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>);  

о взыскании 2 473 229 руб. 00 коп. 

при участии - от истца: ФИО2 по доверенности от 03.07.18, - от ответчика: не явился, о времени и месте извещен надлежащим образом, 

установил:

ООО "СТРОЙ-ВЕРТИКАЛЬ" обратилось с иском о взыскании с ООО  

"ФЕДЕРАЛЬНАЯ ДВЕРНАЯ КОМПАНИЯ" 1 500 000 руб. 00 коп. неотработанного  

аванса, 743 904 руб. 00 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ, 200 000  

руб. 00 коп. штрафа на основании договора № 1509-90373/14 от 15.09.17 и 29 325 руб.  

00 коп. процентов за пользование коммерческим кредитом. 

Ответчик отзыв не представил. Дело рассматривается без участия ответчика на  

основании см.156 АПК РФ. Судом установлено: 

Между сторонами был заключен договор строительного подряда № 1509-90373/14  

от 15.09.17. Стоимость работ составляет 4 428 000 руб. 00 коп. Срок окончания работ 23.10.17. 

Истец – генподрядчик перечислил ответчику – подрядчику 1 500 000 руб. 00 коп.  

авансового платежа. Ответчик к работам не приступил. 

Истец уведомлением от 18.12.17 исх. № 244 отказался от договора и потребовал  возврата уплаченного аванса. До настоящего времени средства не возвращены.  

В соответствии с п.6.3 договора ответчику начислены пени за нарушение сроков  выполнения работ в размере 0.3% за каждый день просрочки в сумме 743 904 руб. 00  коп.  

В соответствии с п.6.4 договора в случае нарушения подрядчиком любого из  сроков выполнения работ более чем на 10 рабочих дней, генподрядчик вправе  потребовать уплаты штрафа в размере 200 000 руб. 00 коп.  

В соответствии с п.6.18 договора ответчику начислены проценты за пользование  коммерческим кредитом в размере 29 325 руб. 00 коп.  

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по  государственной пошлине на ответчика.  

Руководствуясь статьями 309, 310, 330, 823, 1102 Гражданского кодекса  Российской Федерации, статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области  

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ФЕДЕРАЛЬНАЯ  ДВЕРНАЯ КОМПАНИЯ" в пользу общества с ограниченной ответственностью  "СТРОЙ-ВЕРТИКАЛЬ" 2 473 229 руб. 00 коп., из них: 1 500 000 руб. 00 коп.  неосновательного обогащения, 743 904 руб. 00 коп. неустойки, 29 325 руб. 00 коп.  процентов за пользование коммерческим кредитом и 200 000 руб. 00 коп. штрафа, а  также 35 366 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине.  

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия Решения.  

Судья Сергеева О.Н.