Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-30883/2020

28 сентября 2020 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  10 сентября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен  28 сентября 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи  Сергеевой О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: открытое акционерное общество  энергетики и электрификации "Ленэнерго" (адрес:  Россия 196247, Санкт  -  Петербург, площадь Конституции дом 1, ОГРН:  

<

***>);

ответчики: 1) общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОФОНД" Россия 625062, ТЮМЕНЬ, ФЕДЮНИНСКОГО, ДОМ/12, КОРПУС 1, ОФИС 2, ОГРН:  

<

***>); 

        2) общество с ограниченной ответственностью «Электрострой» (адрес:  Россия 454087, Челябинск, ул. Полетаевская 2А; Россия 625062, ТЮМЕНЬ, ФЕДЮНИНСКОГО, ДОМ/12, КОРПУС 1, ОФИС 2

третье лицо: 

о взыскании 2 871 174 руб. 11 коп.

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 09.12.19

- от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом 

установил:

ООО «"Ленэнерго" предъявило иск о взыскании с ООО "ЭНЕРГОФОНД" и ООО «Электрострой» в солидарном порядке 2 871 174 руб. 11 коп. неустойки по договору №19-9894 от 30.07.19.

Определением от 01.09.20 истец заменен на ПАО «Россети Ленэнерго».

ООО "ЭНЕРГОФОНД" иск отклонило

ООО «Электрострой» отзыв не представило.

Судом установлено:

В соответствии с заключенным между ПАО «Ленэнерго» (далее - Заказчик / Истец) и Коллективным участником: ООО «Энергофонд» (Лидер); ООО «ЭлектроСтрой» (Участник) (далее - Подрядчик /Ответчик) договором подряда от 30.07.2019 № 19-9894 (далее - Договор), Подрядчик обязался выполнить комплекс проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС-Кикерино на участках от опоры 7-361 (отпайка от оп. 7), оп.95-102 (отпайка в сторону ТП-883, 8204), оп.5-31 (магистраль) в части замены неизолированного провода на СИП ориентировочной протяженностью 6,7 км., с установкой автоматических коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. и установкой индикаторов короткого замыкания в количестве 7 шт.

В соответствии с п. 1.3 Договора результатом выполнения работ по Договору является объект, введенный в эксплуатацию, подтвержденный актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии (форма № PC-14) согласно требованиям, установленным пунктом 3 Технического задания (Приложение № 1 к Договору).

Согласно п. 2.2. Договора и Календарному плану (приложение № 2 к Договору) срок завершения работ по Договору - не позднее 30.12.2019.

Стоимость работ по договору составляет 15 283 482, 20 руб. (п. 3.1. Договора).

03.02.2020 Заказчиком приняты работы на общую сумму 14 516 664 руб. 36 коп., что подтверждается актом КС-3 № 1 от 03.02.2020, актом № 1 сдачи-приемки проектной документации от 03.02.2020.

31.03.2020 Заказчиком приняты работы на общую сумму 766 817 руб. 84 коп., что подтверждается актом КС-3 № 2 от 31.03.2020.

По состоянию на 09.04.2020 объект не введен в эксплуатацию, акт PC-14 не подписан, следовательно, на стороне Подрядчика имеется просрочка в исполнении обязательств по Договору.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии с п. 8.1.1 Договора, за нарушение сроков выполнения работ по Договору, Заказчик имеет право начислить пени в размере 0,1 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства (но не более 50 % от стоимости работ), что составляет 578 630 руб. 50 коп.

В соответствии с п. 8.1.2 Договора, за превышение сроков выполнения работ свыше 30 дней Заказчик вправе требовать от Подрядчика в дополнение к п. 8.1.1. Договора, уплаты штрафа в размере 10% от стоимости невыполненных работ, штраф составляет 1 528 348 руб. 22 коп.

В соответствии с п. 8.1.3 в случае превышения сроков выполнения работ свыше 60 дней Заказчик вправе требовать от Подрядчика в дополнение к п. 8.1.1, 8.1.2 Договора, уплаты штрафа в размере 5% от стоимости работ. Штраф составляет 764 174 руб. 11 коп.

Общий размер пени (штрафов) согласно расчету составляет 2 871 174 руб. 11 коп.

Согласно п. 3.1 соглашения о совместной деятельности между ООО «Энергофонд» и ООО «Электрострой» от 07.05.2019 участники соглашения несут солидарную ответственность за своевременное и полное исполнение Договора.

Пунктом 1 ст. 323 ГК РФ установлено, что при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.

Истец направлял в адрес Ответчика претензию от 11.02.2020 № ЛЭ/06-21/31 с требованием перечислить пени (штрафы) по Договору.

Однако Ответчик требования, содержащиеся в претензии, добровольно в установленный срок не исполнил.

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по оплате государственной пошлины на ответчика. 

Руководствуясь статьями 309, 310, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Энергофонд" и общества с ограниченной ответственностью «Электрострой» солидарно в пользу публичного акционерного общества  «Россети Ленэнерго» 2 871 174 руб. 11 коп. неустойки и 37 356 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

Выдать исполнительный лист в порядке ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                                                    Сергеева О.Н.