АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Казань                                                                                          Дело №А65-29784/2022 

 

Дата принятия решения – 16 февраля 2023 года 

Дата объявления резолютивной части – 09 февраля 2023 года.

 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Абульхановой Г.Ф., при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Селена", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Трубострой", г.Набережные Челны, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании задолженности в размере 2 848 805,58 руб. за выполненные субподрядные работы, пени в размере 124 440,28 руб. за просрочку платежа,

в судебном заседании участвуют представители:

от истца –  ФИО2 по доверенности, диплом представлен, 

от ответчика – ФИО3 по доверенности, диплом представлен,

от третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, акционерного общества «Транснефть-Урал» - не явился, извещен. 

 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Селена" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Трубострой" (далее - ответчик) о взыскании  задолженности в размере 2 848 805,58 руб. за выполненные субподрядные работы, пени в размере 124 440,28 руб. за просрочку платежа.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица Акционерное общество «Транснефть-Урал» (далее – третье лицо).

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал, по доводам, изложенным в заявлении и дополнениях к нему,  также поддержав  ходатайство о назначении судебной экспертизы. 

Представитель ответчика в судебном заседании просил в удовлетворении заявленных требований отказать, по доводам, изложенным в отзыве и дополнениях к нему, поддержав возражение относительно ходатайства истца о проведении судебной экспертизы.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом объявлен перерыв до 09 февраля 2023 года до 16 час. 15 мин. 

После перерыва судебное заседание было продолжено в присутствии представителя истца и ответчика.

Ответчик посредством «Мой Арбитр» представил акт от 31.10.2019 №11-ТПР.

Третье лицо – заказчик извещено о времени и месте проведения судебного заседания в соответствии со статьями 123, 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, явку представителя на судебное заседание не обеспечил. При этом, представлен отзыв с указанием, что истец в качестве субподрядной организации ответчиком с заказчиком  не согласовывался, соответственно  представит информации о фактическим объеме, выполненных истцом работ на объекте  и взаимоотношениям между истцом и ответчиком, не представляется возможным. Вместе с тем, проанализировав перечень работ, указанный в приложении к иску отраженный в акте выполненных работ от 31.10.2019 № 6 с фактическими объемами работ, принятых от ответчика, следует, что не весь объем работ , значащийся в акте, выполнен и сдан ответчиком заказчику – не выполнены работы по позиции 5310,5313, данные работы выполнены в объеме 680,50 м3, что значительно меньше объемов, указанных в акте.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил рассмотреть дело в отсутствии представителя третьего лица.

Исследовав материалы дела, оценив в совокупности имеющиеся в деле доказательства, арбитражный суд с учетом статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, 01.07.2019г. между истцом (субподрядчик) и ответчиком (подрядчик) заключен контракт № ТС-01 10712019-64 на выполнение СМР по объекту 09-ТПР-001-011561 МНПП «Салават-Уфа» Dn 500 на участке 115-14 км. Вынос за городскую черту г. Уфа. «Реконструкция», в соответствии с которым подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ и услуг по объектам: 09-ТПР-001-011561 МНПП «Салават-Уфа» Dn 500 на участке 115-14 км. Вынос за городскую черту г. Уфа. «Реконструкция, в соответствии с контрактом и рабочей документацией, включая:

- выполнение строительно-монтажных работ, в том числе сооружение/демонтаж временных зданий и сооружений;

- поставку материалов и оборудования (за исключением материалов и оборудования поставки подрядчика согласно графику поставки, являющегося неотъемлемой частью контракта) с обязательным предварительным согласованием с подрядчиком заводов-изготовителей и графика поставки указанных материалов и оборудования;

- осуществление раскредитования железнодорожных вагонов и их последующую передачу ближайшему подразделению железных дорог РФ при приемке от Грузоперевозчнка Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, а также проведение погрузочно-разгрузочпых работ, вывозка согласно проект) организации строительства до мест складирования, складирование Материалов и Оборудования поставки Подрядчика;

- доставку автомобильным транспортом или иным видом транспорта на Объект МТР поставки Подрядчика, находящихся на ближайших к строительной площадке железнодорожных станциях;

- хранение МТР поставки Подрядчика па собственных складах и площадках складирования;

- приведение технического состояния конструкций дорог, задействованных Субподрядчиком п транспортных операциях строительства к состоянию соответствующему начал; строительства объектов трубопроводной системы в организации системы «Транспефть». отраженному в соответствующих актах и приложениях к ним. разработанных при соответствующем обследовании;:

- иных неразрывно связанных со строящимся Объектом работ;

- проведение испытаний и пропуск профилемера;

- выполнение пуско-наладочных работ, включая индивидуально-функциональное опробование, согласно Рабочей документации;

- устранение дефектов;

- выполнение работ по рекультивации нарушенных земель в соответствии с их целевым назначением на всей площади представленных Подрядчиком участков, в том числе по обращению (согласно фактической потребности) Субподрядчика, для приведения Работ в соответствии с проектом организации строительства;

- передача, совместно с Подрядчиком, рекультивированных на всей площади проведения Работ участков стороне, предоставившей данные участки, с оформлением Акта приема-передачи рекультивированных земель в порядке. установленном Основными положениями о рекультивации земель, снятии. сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы;

- сдачу Объекта Подрядчику по Акту приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

-  сдачу Объекта Подрядчику по Акту приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (КС-14) и выполнение обязательств в течение Гарантийного срока.

В соответствии с пунктом 3.1 контракта с учетом дополнительного соглашения № 2 от 01.11.2019г. контрактная цена работ и услуг, подлежащая оплате субподрядчику ориентировочно составляет 23 842 437,05 руб. в том числе НДС 20% в размере 3 973 739,51 руб.

Согласно п. 21.2 контракта в течение 5 рабочих дней, следующих за датой получения от Субподрядчика журнала учета выполненных работ и акта 6 приемке выполненных работ, Подрядчик обязан направить Субподрядчику подписанный журнал учета выполненных работ и акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Субподрядчиком работ в - письменной форме. При не предоставлении Подрядчиком отказа от подписания Субподрядчику в течение пяти календарных дней акты о приемке выполненных работ КС-2 и КС-3 считаются подписанными сторонами.

Также ранее между сторонами заключен предварительный договор субподряда от 19.06.2019 на выполнение работ на вышеуказанном объекте строительства. 

Так за весь период отношений между сторонами по контракту ТС-01 10712019-64 от 01.07.2019г., с учетом предварительного договора субподряда от 19.06.2019г., ООО «Селена» было выполнено работ на общую сумму 23 770 609,92 руб., из которых ООО «Трубострой» оплачено лишь 20 786 854,02 руб.

Истцом указывает, что неоднократно в адрес ответчика предоставлялись все необходимые документы, в том числе акты и справки о выполненных работах КС-2 и КС-3 от 25.10.2019г. на сумму выполненных и неоплаченных работ в размере 2 848 805,58 руб., в том числе письмом от 12.09.2022 исх. № 16.

Также указывает, что 30.09.2022 истцом в адрес ответчика согласно трек № 60304475005426 направлена претензия с приложением акта сверки расчетов между сторонами, которая до настоящего времени ответчиком оставлена без внимания и удовлетворения.

Поскольку в досудебном порядке требования  не были удовлетворены, истец обратился в суд с настоящим иском. 

Возражая на исковые требования, ответчик представил отзыв на исковое заявление, в соответствии с которым объем работ, который был предусмотрен контрактом, а также дополнительным соглашением к контракту, и выполнен истцом, был принят и оплачен ответчиком в полном объеме. Объем работ, указанный в приложении №2 к контракту, а также в приложениях к дополнительным соглашениям к контракту, не содержит перечень работ, указанных в предъявленных ответчиком в исковом заявлении акте о приемке выполненных работ (КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) за период с 26.10.2019 по 31.10.2019  на сумму 2 848 805,58 руб. 

Следовательно, суд считает правомерными доводы ответчика о том, что  перечисленные истцом работы не входили в перечень работ, согласованных условиями контракта от 01.07.2019 № ТС-01/07/2019-64 за период с 26.10.2019 г. по 31.10.2019 г. на сумму 2 848 805,58 руб. не выполнялись, соответственно не могут быть приняты ответчиком.

Кроме этого, представитель истца в порядке статьи 68 АПК РФ допустимых доказательств в подтверждение факта  реальности выполнения работ, оказание услуг по вышеназванной сделке в октябре 2019 г. на объекте третьего лица  наличие необходимых работников, использование (наличие) спецтехники, товарно-материальных ценностей в арбитражный суд суду не представил. Истец пояснить относительно предъявления вышеназванных требований к ответчику в октябре 2022 г.(дата поступления в арбитражный суд иска 28.10.2022, принятие судом 02.11.2022)  по сделке, совершенной в октябре 2019 года, подлежавшей отражению в документах бухгалтерского учета, регистрах бухгалтерского учета (книга продаж), налоговых декларациях в отчетный (4 квартал 2019 г.) и налоговый период 2019 года с уплатой налога на добавленную стоимость в спорном периоде, что увеличило бы налогооблагаемую базу,  соответственно  предъявление требований за пределами  трехгодичный срока, исключает  внесение истцом изменений в налоговую декларацию за 2019 г. с представлением уточненной декларации увеличивающей налогооблагаемую базу и налоговые обязательства последнего  до принятия судом настоящего решения и проведение налоговым органом камеральной выездной проверки за спорный период.

  Истец не предъявлял перечень работ в рамках контракта №ТС-01/07/2019-64 от 01.07.2019 г. за период с 26.10.2019 г. по 31.10.2019 г. на сумму 2 848 805,58 руб. почти 3 года.

Истцом в рамках настоящего дела  заявлено ходатайство о назначении судебной экспертизы.

В силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, а также может назначить экспертизу по своей инициативе, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором, необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства или проведения дополнительной либо повторной экспертизы.

Норма статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не носит императивного характера, а предусматривает рассмотрение ходатайства и принятие судом решения об удовлетворении либо отклонении ходатайства.

Рассмотрев ходатайство истца, арбитражный суд  в силу вышеназванных обстоятельств не находит оснований для его удовлетворения.

Кроме этого, заключение экспертизы является средством доказывания обстоятельств, имеющих существенное значение для разрешения спора, назначение экспертизы необходимо в целях проверки допустимости и достоверности представленных доказательств. 

В свою очередь, обстоятельством, являющимся основанием для назначения судебной экспертизы, является то, что представленные сторонами доказательства являются противоречивыми и в силу этого не позволяющими суду установить истину путем их самостоятельного исследования и оценки судом.

Строительно-техническая экспертиза заключается в анализе представленных сторонами документов, подтверждающих объем выполненных работ. Это проектная, рабочая документация, на основании которой выполняются работы, и исполнительная документация, оформляемая при выполнении работ. 

Изучение в ходе экспертного исследования указанных документов позволяет в заключении сделать вывод о подтвержденности либо неподтвержденности факта выполнения спорного объема работ стороной, претендующей на их оплату. При этом исполнительная документация и журналы общестроительных и специальных работ подлежат оформлению стороной, выполняющей работы.

Соответственно, условием назначения судебной экспертизы может являться, например, представление исполнительной документации, не соотносящейся с позицией ответчика и представляемыми им доказательствами. 

Между тем, истцом, на котором лежит бремя представления документации, подлежащей исследованию судом либо экспертом, в материалы дела не представлены надлежащие  доказательства, подтверждающие факт выполнения работ в 2019 году и наличие необходимых средств для исполнения контракта,  в связи с чем ходатайство о назначении судебной экспертизы подлежит отклонению. 

Согласно абзацу 6 пункта 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда", если подрядчик не известил заказчика о завершении работ по договору и не вызвал его для участия в приемке результата работ, подрядчик не может ссылаться на отказ заказчика от исполнения договорного обязательства по приемке работ и требовать их оплаты на основании одностороннего акта сдачи результата работ.

В соответствии с пунктом 4.2 контракта оплата выполненных согласно графику выполнения работ и принятых подрядчиком работ осуществляется подрядчиком в течение 30 рабочих дней (при этом по объекту программы ТПР и КР оплата производится в первые 3 рабочих дня соответствующего месяца), следующих за датой получения подрядчиком оригинала счета-фактуры, оформленной субподрядчиком на основании при условии поступления оплаты со стороны заказчика: акта о приемке выполненных работ, принятым (подписанным) полномочным сотрудником/работником представителя подрядчика; справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); ведомости переработки давальческих материалов поставки подрядчика за отчетный месяц;  отчет о ходе поставки субподрядчиком оборудования и материалов, в размере цены выполненных работ и услуг, уменьшенной на сумму зачитываемых авансовых платежей и сумму гарантийного удержания.

В соответствии с пунктом 4.11 контракта оплата поставленного подрядчиком оборудования, не требующего монтажа, материалов и оборудования, передаваемых в резерв, согласно приложению 8 «Спецификация на поставку субподрядчиком оборудования, не требующего монтажа (ОНМ), материалов и оборудования, предаваемых в резерв» осуществляется заказчиком в течение 30 рабочих дней (при этом по объекту программы ТПР и КР оплата производится в первые 3 рабочих дня соответствующего месяца), следующих за датой получения подрядчиком оригинала счета-фактуры, оформленных подрядчиком на основании подписанных уполномоченными представителя сторон: товарной накладной (форма ТОРГ-12, приложение 41); ведомости учета поставленных подрядчиком оборудования, не требующего монтажа (ОНМ), материалов и оборудования, предаваемых в резерв, за отчетный месяц.

В соответствии с пунктом 17.1. контракта субподрядчик обязан вести и предоставлять подрядчику, не позднее 25  числа каждого месяца, учетную документацию, которая включает в себя: акт приемки выполненных работ по форме КС-2 — 3 экз.; согласованную и подписанную Подрядчиком ведомость переработки давальческих материалов и монтажа оборудования - 3 экз.; справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - 3 экз.; счет и счет-фактуру на выполненные работы (услуги) - по 1 экз.; отчет о ходе поставки МТР Субподрядчиком; ведомость оборудования Подрядчика, монтаж которого начат.

Однако, в нарушении условий контракта, истцом предоставлены акт о приемке выполненных работ (КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в рамках контракта №ТС-01/07/2019-64 от. 01.07.2019г. за период с 26.10.2019 г. по 31.10.2019 г. только 10.08.2022 фактически по истечении длительного периода – 2 года 10 месяцев.   Ранее данный объем работ не предъявлялся истцом к ответчику, доказательств обратного истцом не представлено.

Таким образом, истцом не представлены доказательства предъявления работ к приемке в соответствии с условиями договора, что согласуется с вышеназванными обстоятельствами, пояснениями ответчика и третьего лица.

Кроме того, согласно подписанному между истцом и ответчиком акту сверки за 1 квартал 2020 г. по контракту № ТС-01/07/2019-64 от 01.07.2019 г. по состоянию на 31.03.2020 г. в пользу истца имелась задолженность только в размере 523 045,21 руб., которая была погашения ответчиком двумя платежами: 30.06.2020      г. на сумму 134 950,22 руб. и 29.12.2021 г. на сумму 388 094,99 руб.

Указанное подтверждает, что ранее у истца не возникало требований к ответчику по принятию и оплате объема работ за период с 26.10.2019 г. по 31.10.2019 г. на сумму 2 848 805,58 руб.

Заказчиком строительства объекта (09-ТПР-001-011561) «МН11И «Салават-УФа» Рп 500 на участке 115-174км. Вынос за городскую черту г.Уфа. Реконструкция» является АО «Транснефть-Урал», между ООО «Трубострой» (Подрядчик) и АО «Транснефть-Урал» (Заказчик) заключен Контракт на выполнения работ.

Однако, объемы работ, указанные истцом в исковом требовании, не были предъявлены ответчиком заказчику. Кроме того, они были исключены из перечня работ, что подтверждается дополнительным соглашением №5 от 25.01.2021 г. и приложением к нему.

При таких обстоятельствах, суд приходит  к выводу, что истец не доказал выполнение работ с предоставлением допустимых доказательств, предусмотренных статьей 68 АПК РФ, равно как не доказал факт надлежащего предъявления работ к приемке, в связи с чем исковые требования не подлежат удовлетворению.

Поскольку основное требование оставлено судом без удовлетворения, требования о взыскании с ответчика пени удовлетворению также не подлежат.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  судебные расходы по уплате государственной пошлины  относятся на истца.

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 170,176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

Р Е Ш И Л :

В иске отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Селена", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 37 956 руб. госпошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

 

Председательствующий судья                                                              Г.Ф. Абульханова