АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А05-9570/2023

г. Архангельск

30 ноября 2023 года

 

Резолютивная часть решения объявлена 29 ноября 2023 года  

Полный текст решения изготовлен 30 ноября 2023 года 

Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Тюпина А.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шумиловой С.В.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску территориального органа министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области - Управление лесничествами (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>; адрес: Россия 164501, г.Северодвинск, Архангельская область, ул.Бойчука, дом 3, офис 10)

к акционерному обществу "Группа Илим" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>; адрес: Россия 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.17)

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (163069, 

<

...>), Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) (115184, 

<

...>) и Федерального государственного бюджетного учреждения "Рослесинфорг" (109316, 

<

...>; 163062, Архангельск, ул.Никитова, д.13)

об обязании совершить действия и о взыскании неустойки,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - ФИО1 (доверенность от 26.12.2022),

от ответчика - ФИО2 (доверенность от 10.01.2022),

установил:

территориальный орган министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области - Управление лесничествами (далее - истец) обратился в арбитражный суд с иском к акционерному обществу "Группа Илим" (далее - ответчик), в котором просит:

- обязать ответчика выполнить в полном объеме мероприятия по противопожарному обустройству лесов на арендованном участке – устройство (создание) противопожарных минерализованных полос в объеме 15,7 км, прочистку противопожарных минерализованных полос и их обновление (уход) в объеме 32,46 км,  согласно договору аренды лесного участка от 24.09.2008 № 405;

- обязать ответчика выполнить в полном объеме мероприятия по противопожарному обустройству лесов на арендованном участке – устройство (создание) противопожарных минерализованных полос в объеме 12,0 км, прочистку противопожарных минерализованных полос и их обновление (уход) в объеме 62,85 км, согласно договору аренды лесного участка от 21.05.2013 № 1534;

- обязать ответчика выполнить в полном объеме мероприятия по противопожарному обустройству лесов на арендованном участке – прочистку противопожарных минерализованных полос и их обновление (уход) в объеме 1,5 км, согласно договору аренды лесного участка от 30.10.2020 №2622.

- взыскать с ответчика 29 710 руб. 04 коп. неустойки, начисленной за невыполнение противопожарных мероприятий по договору аренды лесного участка от 30.10.2020 № 2622.

Определением от 30.10.2023 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) и Федеральное государственное бюджетное учреждение "Рослесинфорг".

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования.

Представитель ответчика с исковыми требованиями не согласился, по доводам, изложенным в отзыве. Ходатайствует о вызове в качестве свидетеля ФИО3, участкового лесничего Северного участкового лесничества управления лесничествами Котласского обособленного подразделения, для поставки перед ним следующего вопроса: в связи с чем контролирующим органом перестали приниматься мероприятия по созданию минерализованных полос, учитывая неизменность технологии и подхода арендатора к их созданию, а также принимая во внимание неизменность требований в законодательстве?

Заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, учитывая возражения истца, суд не усматривает оснований для удовлетворения указанного ходатайства ответчика.

Представитель ответчика ходатайствует о проведении по делу судебной экспертизы. Просит поручить проведение экспертизы федеральному бюджетному учреждению Северный научно-исследовательский институт лесного хозяйства ФБУ "СевНИИЛХ" 

<

...>. Поставить перед экспертом следующие вопросы: что такое минерализованная полоса, каковы требования к ней и её функции? соответствует ли лесная дорога требованиям к минерализованной полосе и может ли лесная дорога выполнять функции минерализованной полосы? соответствуют ли оспариваемые лесные дороги АО "Группа "Илим" требованиям Р 57972-2017 "Объекты противопожарного обустройства лесов" ГОСТ? выполняют ли оспариваемые объекты функционал минерализованных полос?

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, судом, в порядке статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), не усматривается оснований для удовлетворения заявленного ходатайства ответчика, поскольку правовую оценку указанным вопросам, которые Общество предлагает поставить перед экспертом в случае назначения судом судебной экспертизы, даёт суд, а не эксперт.

Третьи лица, извещенные по правилам статьи 123 АПК РФ надлежащим образом о месте и времени проведения судебного заседания, своих представителей для участия в нем не направили. Представили в суд отзывы на иск, в которых поддержали исковые требования Управления лесничествами.

Дело рассмотрено в порядке статьи 123, части 3 статьи 156 АПК РФ в отсутствие представителей третьих лиц.

Заслушав представителей истца и ответчика, принявших участие в судебном заседании, исследовав письменные доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, 24.09.2008 между Департаментом лесного комплекса Архангельской области (арендодатель, правопредшественник Министерства) и обществом с ограниченной ответственностью "Удимское лесное предприятие Котласского ЦБК" (арендатор) заключен договор аренды лесного участка №405, по условиям которого арендодатель обязуется предоставить, а арендатор обязуется принять в аренду лесной участок, находящийся на землях лесного фонда, определенный в пункте 1.2. договора для заготовки древесины, в объемах согласно приложению №3.

Арендатору переданы лесные участки, расположенные на территории Котласского лесничества Архангельской области для использования лесов в целях заготовки древесины.

Срок договора с 24.09.2008 по 08.07.2052 (пункт 7.1. договора).

Лесной участок передан арендатору в аренду по акту приема-передачи лесного участка в аренду.

15.01.2009 между арендодателем и арендатором подписано дополнительное соглашение №1, согласно условиям которого произведена замена арендатора на общество с ограниченной ответственностью "ИлимСеверЛес".

06.12.2010 между арендодателем и арендатором подписано соглашение о внесении изменений и дополнений №6 в договор аренды лесных участков, согласно условиям которого изменено наименование арендатора на открытое акционерное общество "Группа Илим".

21.05.2013 между Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (арендодатель) и ответчиком (арендатор) заключен договор аренды лесных участков, предоставляемых для реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов №1534.

Арендатору переданы в аренду лесные участки общей площадью 194959 га расположенные на территории Котласского лесничества Архангельской области для использования лесов в целях заготовки древесины, характеристики которых указаны в пункте 1.2. договора №1534.

30.10.2020 между министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (арендодатель) и ответчиком (арендатор) заключен договор аренды лесного участка для заготовки древесины, заключаемый в целях реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов №2622.

Арендатору переданы в аренду лесные участки общей площадью 23876,0412 га расположенные на территории Котласского лесничества Архангельской области для использования лесов в целях заготовки древесины, характеристики которых указаны в пункте 1.2. договора №2622.

В соответствии с проектом освоения лесов арендатор обязан ежегодно до 01 июня выполнять мероприятия по противопожарному обустройству лесов на арендованном участке, а именно устройство противопожарных минерализованных полос, уход за ранее созданными минерализованными полосами.

Мероприятия по устройству противопожарных минерализованных полос и противопожарных разрывов регламентированы Лесным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 №1614 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах", ГОСТ Р 57972-2017 "Объекты противопожарного обустройства лесов".

В соответствии с письмами арендатора о выполнении работ от 15.05.2023 №ЛфК/55162-б/н, от 29.05.2023 № ЛфК/55162-б/н, отчетом об охране лесов от пожаров (форма 1-ОЛ) арендатором выполнены мероприятия по созданию противопожарных минерализованных полос, уходу за противопожарными минерализованными полосами.

29.05.2023 участковым лесничим ГКУ Архангельской области "Котласское лесничество" ФИО4 произведен осмотр лесного участка арендованного ответчиком по договору №405 с целью оценки качества выполнения лесохозяйственного мероприятия (работ). Согласно докладной ФИО4 мероприятия по созданию противопожарных минерализованных полос не проведены, так как заявленные к приемке минерализованные полосы представляют собой лесовозные усы внутри лесосек.

В связи с установленными нарушениями арендатору направлена претензия от 23.06.2023 №942 с требованием в срок до 31 июля 2023 года выполнить в полном объеме мероприятия по противопожарному обустройству лесов на арендованном участке - устройство (создание) противопожарных минерализованных полос в объеме 15,7 км, прочистку противопожарных минерализованных полос и их обновление (уход) в объеме 32,46 км.

Также участковыми лесничими ГКУ Архангельской области "Котласское лесничество" ФИО3 и ФИО5 произведены осмотры лесных участков арендованных ответчиком по договору №1534, с целью оценки качества выполнения лесохозяйственного мероприятия (работ). Согласно докладных ФИО3 и ФИО5 мероприятия по созданию противопожарных минерализованных полос, по прочистке противопожарных минерализованных полос и их обновлению (уходу) не проведены.

Арендодателем арендатору направлена претензия от 23.06.2023 №941 с требованием в срок до 31 июля 2023 года выполнить в полном объеме мероприятия по противопожарному обустройству лесов на арендованном участке - устройство (создание) противопожарных минерализованных полос в объеме 12,0 км, прочистку противопожарных минерализованных полос и их обновление (уход) в объеме 62,85 км.

Участковым лесничим ГКУ Архангельской области "Котласское лесничество" ФИО6 01.06.2023 проведен осмотр лесного участка переданного ответчику по договору №2622, с целью оценки качества выполнения лесохозяйственного мероприятия (работ), в ходе которого установлен факт невыполнения работ по уходу за противопожарными минерализованными полосами. Согласно докладной записки ФИО6, мероприятия по созданию противопожарных минерализованных полос, по прочистке противопожарных минерализованных полос и их обновлению (уходу) не выполнены.

В связи с установленными нарушениями арендатору направлена претензия от 17.07.2023 №1020 с требованием в срок до 31 июля 2023 года выполнить в полном объеме мероприятия по противопожарному обустройству лесов на арендованном участке - прочистку противопожарных минерализованных полос и их обновление (уход) в объеме 1,5 км, уплатить неустойку в размере 29 710 руб. 04 коп.

Поскольку указанные претензии оставлены ответчиком без удовлетворения, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Ответчик с исковыми требованиями не согласился, сообщив суду, что Общество является ответственным лесопользователем и ежегодно выполняет противопожарные мероприятия по договорам аренды №405, №1534 и №2622 в объемах, установленных проектами освоения лесов. В 2023 году работы по созданию минерализованных полос и уходу за минерализованными полосами по указанным договорам аренды выполнены в полном объеме, согласно проектов освоения лесов, прошедших государственную экспертизу и в соответствии с требованиями нормативно правовых актов лесного законодательства, а именно "Правила пожарной безопасности в лесах", утвержденные постановлением Правительства РФ №1614 от 07.10.2020, ГОСТ Р 57972-2017 "Объекты противопожарного обустройства лесов".

Ведущим инженером по лесному хозяйству Лесного филиала АО "Группа "Илим" в г.Коряжме ФИО7 на имя директора ГКУ Архангельской области "Котласское лесничество" направлены письма №ЛфК/55162-б/н от 29.05.2023, №ЛфК/55162-б/н от 15.05.2023 с перечнем мест выполнения работ и приложения со схемами.

В соответствие с приказом МЧС от 25.12.2012 № 804, минерализованная полоса: искусственно созданная полоса на поверхности земли, очищенная от горючих материалов или обработанная почвообрабатывающими орудиями либо иным способом до сплошного минерального слоя почвы.

Согласно требованиям п. 5.13 ГОСТ Р 57972-2017 "Объекты противопожарного обустройства лесов", минерализованная полоса является линейным участком территории, очищенным от растительных горючих материалов до минерального слоя почвы, обработанные почвообрабатывающими орудиями или иным способом, могут быть самостоятельными противопожарными барьерами или входить в состав более сложного противопожарного барьера в качестве его элемента. В п. 5.12 ГОСТ Р 57972-2017 указано, что к искусственным противопожарным барьерам, специально создаваемым в лесах, в целях ограничения лесных (природных) пожаров относятся минерализованные полосы, противопожарные разрывы, противопожарные заслоны, пожароустойчивые опушки, противопожарные канавы. В п. 5.13 ГОСТ Р 57972-2017 прописаны следующие требования: ширина противопожарных минерализованных полос составляет 0,3-9 м, основными показателями качества противопожарных минерализованных полос являются минерализация и степень заделки грунтом.

Частично в качестве минерализованных полос ответчик использует собственные лесовозные дороги. Лесничество отказалось принимать у Общества выполненные противопожарные работы, поскольку посчитало, что "критерии, определенные ГОСТ Р 57972-2017 не учитывают, что дороги различного назначения относятся к критериям оценки противопожарной минерализованной полосы".

С указанным ответчик не согласен, поскольку лесовозные дороги по всем признакам соответствуют минерализованным полосам: очищена от горючих материалов, представляет собой минеральный слой почвы, расположена в соответствие с планом, препятствует распространению пожара. То есть, по своей сути, такая дорога имеет все характеристики минерализованной полосы, а по некоторым даже превосходит ее (например, ширина дороги значительно больше). В исковом заявлении Лесничество указывает, что заявленные к приемке минерализованные полосы представляют собой вновь созданные или ранее раскорчеванные до минерального слоя лесовозные дороги.

Все требования и критерии, предъявляемые к минерализованным полосам, были соблюдены Обществом при выполнении в 2023 году работ по созданию минерализованных полос и уходу за минерализованными полосами по договорам аренды №405, №1534 и №2622. Минерализованные полосы входят в состав сложного противопожарного барьера для предотвращения распространения огня.

В 2023 году изменений в технологии выполнения работ по созданию минерализованных полос и уходу за минерализованными полосами ответчиком не произошло. Работы выполнены по той же технологии, что и в предыдущие года. Ранее такие работы принимались участковыми лесничими ГКУ Архангельской области "Котласское лесничество" без замечаний и нареканий.

Оценив материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают из договоров.

В силу статьи 12 ГК РФ, одним из способов защиты гражданских прав является присуждение к исполнению обязанности в натуре.

Статьей 12 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - ЛК РФ) определено, что освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, непрерывного, не истощительного использования, а также развития лесной промышленности.

Освоение лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций.

При освоении лесов на основе комплексного подхода осуществляются: организация использования лесов; создание и эксплуатация объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры; проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов; проведение мероприятий по охране, использованию объектов животного мира, водных объектов.

В соответствии с частью 3 статьи 23.1 ЛК РФ, порядок осуществления рубок лесных насаждений определяется правилами заготовки древесины, правилами пожарной безопасности в лесах, правилами санитарной безопасности в лесах, правилами лесовосстановления и правилами ухода за лесами.

   Статьей 51 ЛК РФ предусмотрено, что леса подлежат охране от пожаров.

Согласно части 1, пункту 3 части 2 статьи 53.1 ЛК РФ, предупреждение лесных пожаров включает в себя противопожарное обустройство лесов в виде прокладки просек, противопожарных разрывов, устройства противопожарных минерализованных полос.

В силу части 3 статьи 53.1 ЛК РФ, указанные меры противопожарного обустройства лесов на лесных участках, предоставленных в аренду, осуществляются лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов.

Перечень соответствующих мер дополнен постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2011 №281 "О мерах противопожарного обустройства лесов".

Согласно статьям 309 и 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с пунктом 3 состава проекта освоения лесов и порядка его разработки, утвержденного приказом Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) от 29.02.2012 №69 "Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки", проект освоения лесов содержит сведения о разрешенных видах и проектируемых объемах использования лесов, мероприятиях по охране, защите и воспроизводству лесов, по созданию объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, по охране объектов животного мира и водных объектов, а в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации, также о мероприятиях по строительству, реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры.

Как указано в текстовой части каждого из проектов освоения лесов, выполненных Архангельским филиалом ФГБУ "Рослесинфорг" по арендуемым ответчиком лесным участкам:

"...Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Лесным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности", постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 №417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах", а также в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) от 05.07.2011 №287 "Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды".

Характеристика территории по классам природной пожарной опасности выполнена для каждого выдела в отдельности программным путем. Итог формируется как сумма площадей выделов соответствующих классов пожарной опасности.

Распределение территории арендного участка по классам природной пожарной опасности приведено на тематической лесной карте "Классы пожарной опасности и противопожарные мероприятия" (приложение к проекту освоения лесов).

Устройство минерализованных полос (минерализованная полоса - полоса поверхности земли определенной ширины, очищенная от лесных горючих материалов или обработанная почвообрабатывающими орудиями либо иным способом до сплошного минерального слоя почвы) необходимо в хвойных насаждениях I-III классов пожарной опасности, на вырубках, вдоль лесовозных дорог и автомобильных дорог общего пользования (за пределами полосы отвода) и вокруг молодняков хвойных пород. Ширину минерализованных полос и способы их создания устанавливают с учетом характера и интенсивности распространения возможных пожаров, почвенных и лесорастительных условий.

Крупные участки хвойных молодняков естественного и искусственного происхождения рекомендуется разделять минерализованными полосами на части площадью до 20-30 га.

Предусмотрено производить уход за ранее созданными минерализованными полосами, чтобы не допускать их зарастания или захламления, в течение двух лет после создания.

Места рубки (лесосеки) в хвойных равнинных лесах на сухих почвах с оставленной на период пожароопасного сезона заготовленной древесиной, а также с оставленными на перегнивание порубочными остатками окаймляются минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. Места рубок (лесосеки) площадью свыше 25 гектаров должны быть, кроме того, разделены минерализованными полосами указанной ширины на участки, не превышающие 25 гектаров...".

В соответствии с "ГОСТ Р 57938-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Лесное хозяйство. Термины и определения", противопожарное обустройство лесов представляет собой комплекс мероприятий по созданию инфраструктуры, обеспечивающей пожарную безопасность в лесах.

Согласно пункту 4.2 "ГОСТ Р 57972-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Объекты противопожарного обустройства лесов. Общие требования", к объектам противопожарного обустройства лесов относятся дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров, дороги противопожарного назначения.

Классификация и категории лесных дорог определены в разделе 4 "СП 288.1325800.2016. Свод правил. Дороги лесные. Правила проектирования и строительства" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 №952/пр), который предусматривает следующее: Лесные дороги по назначению подразделяются на лесовозные лесные дороги и лесохозяйственные лесные дороги. Лесовозные лесные дороги предназначены для вывозки заготовленной древесины с мест заготовки, перевозки лесозаготовительной техники, технических грузов и доставки персонала к местам работы и обратно, а также для лесохозяйственных целей (охраны, защиты и воспроизводства лесов). Лесовозные лесные дороги строят в эксплуатирующихся лесах. По срокам действия выделяют лесовозные лесные дороги постоянного действия и временные. Лесовозные лесные дороги постоянного действия являются объектами капитального строительства и подразделяются на грузосборочные (лесовозные магистрали), лесовозные ветки - ответвления от лесовозной магистрали и лесовозные усы - ответвления от лесовозных веток. Временные лесные дороги не являются объектами капитального строительства и создаются без разработки проекта, соответствующего требованиям настоящего свода правил и правил заготовки древесины. Временные лесные дороги подразделяются на лесные дороги летнего действия и зимнего (зимники). Лесохозяйственные лесные дороги предназначены для доставки людей, лесохозяйственной и специальной техники и грузов к местам производства работ и лесным пожарам, а также для патрулирования лесных массивов. Лесохозяйственные лесные дороги строят в защитных и резервных лесах и не используют для вывозки древесины.

Исходя из анализа вышеуказанных норм, лесные дороги не относятся к объектам противопожарного обустройства и являются отдельным мероприятием по охране лесов от пожара, выполняются на основании проекта строительства дорог, технического задания и проекта освоения лесов.

Кроме того, из представленных в материалы дела актуальных разъяснений Федерального агентства лесного хозяйства от 29.03.2022 №АВ-09-27/7324 следует, что дороги различного назначения не относятся к критериям оценки противопожарной минерализованной полосы.

Оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных истцом исковых требований.

Следовательно исковые требования Управления лесничествами об обязании ответчика выполнить мероприятия по противопожарному обустройству лесов подлежат удовлетворению.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика 29 710 руб. 04 коп. неустойки, начисленной за невыполнение противопожарных мероприятий по договору аренды лесного участка от 30.10.2020 № 2622.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ, исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

            Пунктом 1 статьи 330 ГК РФ предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно подпункту "о" пункта 4.2. договора №2622, за нарушение условий договора арендатор уплачивает арендодателю неустойку за невыполнение и несвоевременное выполнение противопожарных мероприятий - 3-кратная стоимость затрат, необходимых для выполнения этих мероприятий по нормативам в области лесного хозяйства, предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, а при отсутствии таких нормативов - согласно калькуляции арендодателя.

Как видно из материалов дела, 01.06.2023 в результате проверки выполненных работ истцом установлен факт некачественного выполнения работ по уходу за минерализованными полосами, работы не приняты.

Исходя из расчета истца следует: 1,5 км х 6602,23 руб. х 3 = 29 710,04 руб.,

где:

- 1,5 км - объем не выполненных работ;

- 6602,23 руб. - себестоимость работ за 1 км, согласно Расчетов технологической себестоимости работ на 2023 год, утвержденных и.о. министра Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области 09.02.2023;

- 3-кратная стоимость затрат.

Ответчик не представил документального опровержения доводов истца, доказательств оплаты заявленной к взысканию суммы неустойки и обоснованный контррасчет взыскиваемой суммы.

Проверив правильность расчета неустойки, представленного истцом, суд находит заявленное им требование подлежащим удовлетворению в сумме 29 710 руб. 04 коп. При рассмотрении заявленного требования судом не установлено оснований для применения статьи 333 ГК РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 174 АПК РФ, при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Статьей 12 ГК РФ предусмотрено, что защита гражданских прав осуществляется, в частности, путем присуждения к исполнению обязанности в натуре. Присуждение к исполнению обязанности в натуре как способ защиты гражданских прав заключается в понуждении должника выполнить действия, которые он должен совершить в силу связывающего стороны обязательства (договора).

С учетом удовлетворения требования истца об обязании ответчика выполнить в полном объеме мероприятия по противопожарному обустройству лесов, учитывая, что данные мероприятия не могут быть проведены Обществом в зимний период, суд считает возможным установить ответчику срок исполнения настоящего решения до 01 августа 2024 года.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на ответчика относятся расходы по уплате государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области

РЕШИЛ:

Обязать акционерное общество "Группа Илим"  (ОГРН 

<

***>)  в  срок  до   01 августа 2024 года:

- выполнить в полном объеме мероприятия по противопожарному обустройству лесов на арендованном участке – устройство (создание) противопожарных минерализованных полос в объеме 15,7 км, прочистку противопожарных минерализованных полос и их обновление (уход) в объеме 32,46 км, согласно договору аренды лесного участка от 24.09.2008 № 405;

- выполнить в полном объеме мероприятия по противопожарному обустройству лесов на арендованном участке – устройство (создание) противопожарных минерализованных полос в объеме 12,0 км, прочистку противопожарных минерализованных полос и их обновление (уход) в объеме 62,85 км, согласно договору аренды лесного участка от 21.05.2013 № 1534;

- выполнить в полном объеме мероприятия по противопожарному обустройству лесов на арендованном участке – прочистку противопожарных минерализованных полос и их обновление (уход) в объеме 1,5 км, согласно договору аренды лесного участка от 30.10.2020 №2622.

Взыскать с акционерного общества "Группа Илим" (ОГРН 

<

***>) в бюджет Архангельской области 29 710 руб. 04 коп. неустойки.

Взыскать с акционерного общества "Группа Илим" (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 8000 руб. государственной пошлины.

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

 

Судья

 

А.Н. Тюпин