38/2020-113867(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-11873/2019

город Саратов

25 июня 2020 года

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Мещеряковой И.В., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску общества с ограниченной  ответственностью «Передвижная механизированная колонна № 1» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>), Саратовская область, г. Энгельс, к обществу с ограниченной  ответственностью «Балаковагропромэнерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>,  Саратовская область, г. Балаково, третье лицо – общество с ограниченной ответственностью  «Орбита-М», г. Саратов, о взыскании задолженности и по встречному иску о взыскании  неустойки за нарушение сроков выполнения работ  

При участии: от ООО «ПМК № 1» – ФИО2, представитель по доверенности от  22.04.2019 г.; от ООО «Балаковоагропромэнерго» – ФИО3, представитель по  доверенности от 10.01.2019 г.; от ООО «Орбита- М»-ФИО4, представитель по  доверенности от 15.01.2020 г.  

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении первоначального иска общества с ограниченной ответственностью  «Передвижная механизированная колонна № 1» к обществу с ограниченной ответственностью  «Балаковагропромэнерго» о взыскании задолженности по договору субподряда в размере  2626903 руб. 16 коп. отказать.  

Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Передвижная  механизированная колонна № 1» в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Балаковагропромэнерго» неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору  субподряда № 09/01/19 от 09.01.2019 г. за период с 22.01.2019 г. по 27.02.2019 г. в размере  49130 руб. 94 коп., расходы на оплату экспертизы в размере 38000 руб. и расходы по уплате  государственной пошлины в размере 2899 руб.  

В остальной части встречного иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в арбитражные суды апелляционной и кассационной  инстанций в сроки и порядке, установленные ст.ст. 181, 257-260, 273-277 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации путем подачи жалобы через Арбитражный  суд Саратовской области.  

Судья Арбитражного суда 

Электронная подпись действительна.

Саратовской области И.В. Мещерякова 

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

 департамента

Дата 16.09.2019 6:18:19

 Кому выдана Мещерякова Ирина Владимировна