АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-22393/2021

10 марта 2022 года

город Омск

 

Резолютивная часть решения объявлена 02 марта 2022 года.

В полном объеме решение изготовлено 10 марта 2022 года.

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Чекурды Е.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению бюджетного учреждения города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ГРИАР Холдинг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании,

в судебном заседании приняли участие:

от истца – ФИО2 по доверенности от 18.02.2022 (личность удостоверена паспортом гражданина РФ, диплом о высшем юридическом образовании  на обозрение суда представлен),

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 10.01.2022 № 01-22 (личность удостоверена паспортом гражданина РФ, диплом о высшем юридическом образовании  на обозрение суда представлен);

УСТАНОВИЛ:

бюджетное учреждение города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» (далее - БУ г. Омска «УДХБ», истец) обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ГРИАР Холдинг» (далее - ООО «ГРИАР Холдинг», ответчик) об обязании в срок до 01.05.2022 за счет собственных средств выполнить работы по устранению дефектов по договору на выполнение подрядных работ от 15.08.2017 № Ф.2017.341396 в рамках гарантийных обязательств в городе Омске, а именно: 

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 2 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 1 подъезда;

- устранить занижение люка возле 1 подъезда и установить на один уровень с асфальтобетонным покрытием автомобильной дороги, устранить разрушение асфальтобетонного покрытия.

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 1, 2 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия с торца дома возле  1 подъезда;

- устранить разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг колодца возле 3 подъезда.

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия у колодца возле 5 подъезда;

- устранить трещину асфальтобетонного покрытия между 3 и 4 подъездом;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 1, 3 подъезда. 

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещину асфальтобетонного покрытия на тротуаре;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 1 подъезда. 

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия напротив 1, 2, 3, 7 подъездов.

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия на дворовой территории 

<

...>.

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия на дворовой территории 

<

...>.

Дворовая территория д. 194/2 по ул.24 Северная:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия у 2 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия между 2 и 1 подъездами;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия у 1 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия на парковке дворовой территории д. 194/2 по ул.24 Северная.

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить  трещины асфальтобетонного покрытия на тротуаре и автомобильной дороге у 8 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 3, 5, 6 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия между 4 и 5 подъездами;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия на тротуаре между 2 и 3 подъездами;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия на тротуаре и автомобильной дороге между 1 и 2 подъездами.

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 1 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия между 2 и 3 подъездом;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия между 4 и 5 подъездом;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 6 подъезда;

Дворовая территория д. 7 А по ул. 2-я Челюскинцев:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 4 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 6 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 5 подъезда. 

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 1 подъезда. 

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины  асфальтобетонного  покрытия на тротуаре дворовой территории 

<

...>;

- устранить занижение люка возле 4 подъезда и установить на один уровень с асфальтобетонным покрытием автомобильной дороги.

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить разрушение асфальтобетонного покрытия возле 1 подъезда вокруг

колодца;

- устранить разрушение примыкания к бордюру возле 1 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия дворовой территории 

<

...>.

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 5, 6, 7, 10 подъездов.

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 4 и 5 подъездов;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия между 3 и 4 подъездами;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия между 1 и 2 подъездами;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия у 1 подъезда. Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия вдоль 5 и 6 подъездов;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия у 3 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия на тротуаре между 2 и 3 подъездом;

- устранить просадку асфальтобетонного покрытия между 1 и 2 подъездами. Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия у 1, 2, 3, 4, 5 подъездов;

- устранить разрушение асфальтобетонного покрытия на примыкании к бетонной поверхности у 1 подъезда.

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить разрушение асфальтобетонного покрытия с торца дома у 1 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия на тротуаре дворовой территории 

<

...>;

- Трещины асфальтобетонного покрытия у 1, 2, 3 подъездов;

- устранить разрушение асфальтобетонного покрытия возле 5 подъезда.

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия у 1 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия с торцов дом у 1 подъезда. Дворовая территория 

<

...>:

- устранить разрушение асфальтобетонного покрытия у 1 подъезда;

- устранить разрушение асфальтобетонного покрытия с торца дома у 1 подъезда дворовой территории 

<

...>.

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия у 1 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия между 2 и 3 подъездами;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия у 4 подъезда;

- устранить разрушение асфальтобетонного покрытия у 1 подъезда.

Определением Арбитражного суда Омской области от 15.12.2021 настоящее исковое заявление принято, возбуждено производство по делу. Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом путем направления судебного акта по почте  и размещением информации на сайте арбитражного суда (сервис «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет). 

Определением (протокольным) Арбитражного суда Омской области от 12.01.2022 рассмотрение дела назначено к судебному разбирательству.

В судебном заседании истец поддержал исковые требования.

Ответчик иск не признал, при этом пояснил, что ООО «ГРИАР Холдинг» готово исполнить исковые требования в срок до 15.06.2022, поскольку исполнение заявленных требований в срок до 01.05.2022 невозможно с учетом погодных и технических условий.

Представитель истца пояснил, что изменение срока исполнения обязательств оставляет на усмотрение суда.

Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения лиц, участвующих в деле, суд установил следующие обстоятельства.

15.08.2017 между БУ г. Омска «УДХБ» (заказчик) и ООО «ГРИАР Холдинг» (подрядчик) заключен договор на выполнение подрядных работ (далее - договор) № Ф.2017.341396, согласно предмету которого подрядчик обязуется по заданию заказчика в установленный настоящим договором срок выполнить работы по ремонту дворовых территорий в городе Омске (далее - работы) и сдать их результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с настоящим договором. Место выполнения работ - участки дворовых территорий в городе Омске в соответствии с адресным перечнем (Приложение № 4 к настоящему договору) (далее - объекты). Срок (период) выполнения работ: начало - день, следующий за календарной датой заключения договора; окончание срока выполнения работ – 15.09.2017. Цена договора составляет 8 038 651 руб. 70 коп., в том числе НДС 18% (пункты 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 договора).

Согласно пунктам 4.1.3, 4.1.23 договора подрядчик обязуется обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями СП 82.13330.2016, строительными нормами и правилами, локальным сметным расчетом, с гарантируемым соответствием качества и безопасности выполненных работ требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим договором. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке результата работ, а также обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, определенного настоящим договором, в сроки, установленные актом о выявленных недостатках.

В пункте 7.1 договора стороны согласовали, что подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим договором, с гарантируемым соответствием выполненных работ требованиям по качеству, предусмотренным настоящим договором, законодательством РФ.

Гарантийный срок на выполненные работы с момента подписания акта о приемке выполненных работ заказчиком составляет - 4 года (пункт 7.2 договора).

Согласно пунктам 7.3, 7.4 договора гарантии качества в течение гарантийного срока распространяются на результат выполненных подрядчиком по настоящему договору работ, а также на используемые материалы. Подрядчик обязуется за свой счет устранить дефекты и (или) недостатки выполненных им в соответствии с настоящим договором работ, обнаруженные в течение установленного настоящим договором гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков.

При обнаружении заказчиком в течение гарантийного срока дефектов и (или) недостатков, заказчик обязан сообщить об этом подрядчику в письменной форме, а подрядчик обязан не позднее 5-ти дней со дня получения письменного извещения либо устранить выявленные дефекты и (или) недостатки либо направить своего полномочного представителя для составления и подписания двустороннего акта о выявленных дефектах и (или) недостатках, в котором указываются сроки их устранения (не более 15 дней) (пункт 7.5 договора).

В пункте 7.6 договора предусмотрено, что в случае неявки представителя подрядчика в установленный заказчиком срок, заказчик самостоятельно в отсутствие представителя подрядчика составляет и подписывает акт о выявленных недостатках и (или) дефектах с указанием сроков их устранения. Один экземпляр акта направляется подрядчику и является основанием для устранения подрядчиком дефектов и (или) недостатков.

Как указывает истец, в ходе комиссионного обследования дворовых территорий по договору от 15.08.2017 № Ф.2017.341396 в г. Омске были выявлены следующие дефекты:

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 2 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 1 подъезда;

- устранить занижение люка возле 1 подъезда и установить на один уровень с асфальтобетонным покрытием автомобильной дороги, устранить разрушение асфальтобетонного покрытия.

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 1, 2 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия с торца дома возле  1 подъезда;

- устранить разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг колодца возле 3 подъезда.

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия у колодца возле 5 подъезда;

- устранить трещину асфальтобетонного покрытия между 3 и 4 подъездом;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 1, 3 подъезда. 

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещину асфальтобетонного покрытия на тротуаре;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 1 подъезда. 

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия напротив 1, 2, 3, 7 подъездов.

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия на дворовой территории 

<

...>.

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия на дворовой территории 

<

...>.

Дворовая территория д. 194/2 по ул.24 Северная:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия у 2 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия между 2 и 1 подъездами;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия у 1 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия на парковке дворовой территории д. 194/2 по ул.24 Северная.

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить  трещины асфальтобетонного покрытия на тротуаре и автомобильной дороге у 8 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 3, 5, 6 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия между 4 и 5 подъездами;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия на тротуаре между 2 и 3 подъездами;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия на тротуаре и автомобильной дороге между 1 и 2 подъездами.

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 1 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия между 2 и 3 подъездом;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия между 4 и 5 подъездом;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 6 подъезда;

Дворовая территория д. 7 А по ул. 2-я Челюскинцев:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 4 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 6 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 5 подъезда. 

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 1 подъезда. 

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины  асфальтобетонного  покрытия на тротуаре дворовой территории 

<

...>;

- устранить занижение люка возле 4 подъезда и установить на один уровень с асфальтобетонным покрытием автомобильной дороги.

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить разрушение асфальтобетонного покрытия возле 1 подъезда вокруг

колодца;

- устранить разрушение примыкания к бордюру возле 1 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия дворовой территории 

<

...>.

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 5, 6, 7, 10 подъездов.

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 4 и 5 подъездов;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия между 3 и 4 подъездами;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия между 1 и 2 подъездами;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия у 1 подъезда. Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия вдоль 5 и 6 подъездов;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия у 3 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия на тротуаре между 2 и 3 подъездом;

- устранить просадку асфальтобетонного покрытия между 1 и 2 подъездами. Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия у 1, 2, 3, 4, 5 подъездов;

- устранить разрушение асфальтобетонного покрытия на примыкании к бетонной поверхности у 1 подъезда.

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить разрушение асфальтобетонного покрытия с торца дома у 1 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия на тротуаре дворовой территории 

<

...>;

- Трещины асфальтобетонного покрытия у 1, 2, 3 подъездов;

- устранить разрушение асфальтобетонного покрытия возле 5 подъезда.

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия у 1 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия с торцов дом у 1 подъезда. Дворовая территория 

<

...>:

- устранить разрушение асфальтобетонного покрытия у 1 подъезда;

- устранить разрушение асфальтобетонного покрытия с торца дома у 1 подъезда дворовой территории 

<

...>.

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия у 1 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия между 2 и 3 подъездами;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия у 4 подъезда;

- устранить разрушение асфальтобетонного покрытия у 1 подъезда.

Указанные дефекты зафиксированы в актах от 01.07.2021, 22.09.2021.

Данные обстоятельства ответчиком не оспариваются.

Истцом в адрес  ООО «ГРИАР Холдинг» была направлены претензия от 21.07.2021 № исх-УДХБ/2186 с требованием устранить выявленные дефекты в срок 14 дней от даты получения претензии. 

Отсутствие действий со стороны ответчика, послужило основанием для обращения БУ г. Омска «УДХБ» с настоящим иском в суд.

Статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей указаны основания, предусмотренные законом и иными правовыми актами, а также действия граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии со статьей 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Кодексе.

В силу части 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

На основании части 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.

На основании части 1 статьи 763 ГК РФ подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

Отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, регулирует Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу части 1 статьи 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода (часть 1 статьи 721 ГК РФ).

Частью 1 статьи 722 ГК РФ предусмотрено, что в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.

По условиям части 1 статьи 754 ГК РФ подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства.

По условиям частей 1, 2 статьи 755 ГК РФ подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Установленный законом гарантийный срок может быть увеличен соглашением сторон. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Таким образом, действующим законодательством предусмотрена презумпция вины подрядчика в недостатках, обнаруженных в пределах гарантийного срока. Бремя доказывания обстоятельств того, что выявленные дефекты не явились следствием ненадлежащего качества выполненных работ, а появились вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, лежит на подрядчике.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на выявленные в результатах выполненных ответчиком работ недостатки поименованные выше.

Указанные недостатки зафиксированы в актах от 01.07.2021, 22.09.2021.

В пункте 7.1 договора стороны согласовали, что подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим договором, с гарантируемым соответствием выполненных работ требованиям по качеству, предусмотренным настоящим договором, законодательством РФ.

Гарантийный срок на выполненные работы с момента подписания акта о приемке выполненных работ заказчиком составляет - 4 года (пункт 7.2 договора).

Согласно пунктам 7.3, 7.4 договора гарантии качества в течение гарантийного срока распространяются на результат выполненных подрядчиком по настоящему договору работ, а также на используемые материалы. Подрядчик обязуется за свой счет устранить дефекты и (или) недостатки выполненных им в соответствии с настоящим договором работ, обнаруженные в течение установленного настоящим договором гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков.

При обнаружении заказчиком в течение гарантийного срока дефектов и (или) недостатков, заказчик обязан сообщить об этом подрядчику в письменной форме, а подрядчик обязан не позднее 5-ти дней со дня получения письменного извещения либо устранить выявленные дефекты и (или) недостатки либо направить своего полномочного представителя для составления и подписания двустороннего акта о выявленных дефектах и (или) недостатках, в котором указываются сроки их устранения (не более 15 дней) (пункт 7.5 договора).

В силу части 5 статьи 720 ГК РФ при возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть проведена экспертиза.

Таким образом, в пределах гарантийного срока действует презумпция вины подрядчика за недостатки (дефекты) выполненных работ.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 АПК РФ арбитражный суд на основании представленных доказательств устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. 

Из части 1 статьи 66 АПК РФ следует, что лица, участвующие в деле, обязаны представлять доказательства. Эта обязанность основана на статье 65 АПК РФ, в соответствии с которой каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Часть 1 статьи 9 АПК РФ гласит, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументировано, со ссылкой на конкретные документы, указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения. Правовая позиция об этом сформулирована в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 № 12505/11, от 08.10.2013 № 12857/12.

Принцип диспозитивности, характерный для гражданских правоотношений, распространяет свое действие и на процессуальные отношения; в арбитражном процессе диспозитивность означает, что процессуальные отношения возникают, изменяются и прекращаются, главным образом, по инициативе непосредственных участников спорных правоотношений, которые имеют возможность с помощью суда распоряжаться процессуальными правами и спорным материальным правом.

Арбитражным судом при рассмотрении настоящего дела были созданы условия для установления фактических обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора (часть 3 статьи 9, статья 66 АПК РФ).

Согласно части 3.1 статьи 70 АПК РФ, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

ООО «ГРИАР Холдинг» доказательств в нарушение статьи 65 АПК РФ в материалы дела не представлено, ходатайство о назначении по настоящему делу судебной экспертизы не заявлялось.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, установив факт наличия недостатков в выполненных работах в отсутствие доказательств освобождающих ООО «ГРИАР Холдинг» от ответственности по их устранению, суд пришел к выводу об удовлетворении иска в части обязания ООО «ГРИАР Холдинг» безвозмездно устранить недостатки некачественно выполненных работ по договору от 15.08.2017 № Ф.2017.341396.

При этом в отсутствие возражений истца, исходя из обстоятельств дела, с учетом позиции ответчика суд усматривает основания для установления предложенного ответчиком срока на устранение недостатков – до 15.06.2022, ввиду отсутствия доказательств того, что устранение недостатков будет обеспечено в указанный истцом срок, учитывая климатические условия и особенности Омской области.

Согласно пункту 23 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» при частичном удовлетворении требования неимущественного характера, в том числе имеющего денежную оценку (например, требования о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок), расходы по уплате государственной пошлины в полном объеме взыскиваются с противоположной стороны по делу.

В порядке статьи 110 АПК РФ в связи с удовлетворением иска судебные расходы по оплате государственной пошлины возлагаются на сторону.

Руководствуясь статьями 110, 123, 156, 163, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

обязать общество с ограниченной ответственностью «ГРИАР Холдинг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в срок до 15.06.2022 за счет собственных средств выполнить работы по устранению дефектов по договору на выполнение подрядных работ от 15.08.2017 № Ф.2017.341396 в рамках гарантийных обязательств в городе Омске, а именно: 

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 2 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 1 подъезда;

- устранить занижение люка возле 1 подъезда и установить на один уровень с асфальтобетонным покрытием автомобильной дороги, устранить разрушение асфальтобетонного покрытия.

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 1, 2 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия с торца дома возле  1 подъезда;

- устранить разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг колодца возле 3 подъезда.

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия у колодца возле 5 подъезда;

- устранить трещину асфальтобетонного покрытия между 3 и 4 подъездом;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 1, 3 подъезда. 

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещину асфальтобетонного покрытия на тротуаре;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 1 подъезда. 

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия напротив 1, 2, 3, 7 подъездов.

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия на дворовой территории 

<

...>.

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия на дворовой территории 

<

...>.

Дворовая территория д. 194/2 по ул.24 Северная:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия у 2 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия между 2 и 1 подъездами;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия у 1 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия на парковке дворовой территории д. 194/2 по ул.24 Северная.

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить  трещины асфальтобетонного покрытия на тротуаре и автомобильной дороге у 8 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 3, 5, 6 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия между 4 и 5 подъездами;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия на тротуаре между 2 и 3 подъездами;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия на тротуаре и автомобильной дороге между 1 и 2 подъездами.

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 1 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия между 2 и 3 подъездом;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия между 4 и 5 подъездом;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 6 подъезда;

Дворовая территория д. 7 А по ул. 2-я Челюскинцев:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 4 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 6 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 5 подъезда. 

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 1 подъезда. 

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины  асфальтобетонного  покрытия на тротуаре дворовой территории 

<

...>;

- устранить занижение люка возле 4 подъезда и установить на один уровень с асфальтобетонным покрытием автомобильной дороги.

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить разрушение асфальтобетонного покрытия возле 1 подъезда вокруг

колодца;

- устранить разрушение примыкания к бордюру возле 1 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия дворовой территории 

<

...>.

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 5, 6, 7, 10 подъездов.

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия возле 4 и 5 подъездов;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия между 3 и 4 подъездами;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия между 1 и 2 подъездами;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия у 1 подъезда. Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия вдоль 5 и 6 подъездов;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия у 3 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия на тротуаре между 2 и 3 подъездом;

- устранить просадку асфальтобетонного покрытия между 1 и 2 подъездами. Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия у 1, 2, 3, 4, 5 подъездов;

- устранить разрушение асфальтобетонного покрытия на примыкании к бетонной поверхности у 1 подъезда.

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить разрушение асфальтобетонного покрытия с торца дома у 1 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия на тротуаре дворовой территории 

<

...>;

- Трещины асфальтобетонного покрытия у 1, 2, 3 подъездов;

- устранить разрушение асфальтобетонного покрытия возле 5 подъезда.

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия у 1 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия с торцов дом у 1 подъезда. Дворовая территория 

<

...>:

- устранить разрушение асфальтобетонного покрытия у 1 подъезда;

- устранить разрушение асфальтобетонного покрытия с торца дома у 1 подъезда дворовой территории 

<

...>.

Дворовая территория 

<

...>:

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия у 1 подъезда;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия между 2 и 3 подъездами;

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия у 4 подъезда;

- устранить разрушение асфальтобетонного покрытия у 1 подъезда.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ГРИАР Холдинг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу бюджетного учреждения города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Омской области в порядке апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд (644024, 

<

...> Октября, д. 42) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а после проверки законности решения в апелляционном порядке также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (625010, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайтах Восьмого арбитражного апелляционного суда: http://8aas.arbitr.ru и Арбитражного суда Западно-Сибирского округа: http://faszso.arbitr.ru.

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья                                                                                                 Е.А. Чекурда