ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-51333/24-67-398

г. Москва

11 июля 2024 г.

Резолютивная часть решения оглашена 24 июня 2024 г.

Полный текст решения изготовлен 11 июля 2024 г.

Арбитражный суд в составе:

Судья В.Г. Джиоев (единолично)

при ведении протокола помощником судьи Н.С. Будько,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011

дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРАНССЕРВИС" (123060, 

<

...>, ЭТ 6 ПОМ 603, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.05.2019, ИНН: 

<

***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РУСЮНИОН" (143912, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАЛАШИХА ГОРОД, ПАРКОВАЯ УЛИЦА, ДОМ 3, ПОМ 9, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 14.12.2016, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 8 638 351,89 руб.

при участии:

от истца:   ФИО1 по дов-ти от 08.01.2023

от ответчика: неявка, извещен

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРАНССЕРВИС" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РУСЮНИОН" (далее – ответчик) о взыскании задолженности договору от 15.09.2022 №1420/4-2ис в размере 8 638 351 руб. 89 коп.

Заявленные требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате выполненных работ.

Истец заявленные требования поддержал в полном объеме.

Ответчик, извещенный надлежащим образом, в судебное заседание не явился, отзыв не представил.

Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме, на основании следующего.

Как усматривается из материалов дела, между ООО «СтройТрансСервис» (Субподрядчик) и ООО «ПСК «РусЮнион» (Подрядчик) 15.09.2022 заключен договор №1420/4-2ис на выполнение работ по объекту «Многоуровневая транспортная развязка с прилегающей улично-дорожной сетью в районе станции метро Мамыри». (далее- Договор).           Вышеназванный договор, по правовым признакам, является договором строительного подряда и регулируется нормами материального права, содержащимися в параграфах 1, 3 главы 37 ГК РФ (ст. ст. 702 - 729, 740 - 757).

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с п. 2.1. Договора По настоящему Договору Субподрядчик обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных работ по строительству путепровода в объеме согласно Сметы цены Договора (далее- Работы) при выполнении подрядных работ по строительству объекта «Многоуровневая транспортная развязка с прилегающей улично-дорожной сетью в районе станции метро Мамыри» (далее- Объект), в соответствии с проектной документацией соблюдая установленный Договром срок выполнения Работ, а Подрядчик- принять и оплатить Работы, выполненные Субподрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.             Согласно п. 3.5. Договора Оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком Работ производится Подрядчиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) и предоставления Субподрядчиком счета на оплату, счета-фактуры и полного комплекта исполнительной документации на выполненный в отчетном периоде объем работ, Отчет об использовании давальческих материалов (по форме установленной в приложении № 5 к Договору) и при условии поступления оплаты за данный вид работ от Генерального подрядчика.                  В соответствии с абз. 4 п. 5.1. Договора Субподрядчик производит сдачу Работ на основании Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), составленных в соответствии со Сметой цены Договора и полного комплекта исполнительной документации на указанный в КС-2 объем работ и Отчета об использовании давальческих материалов (по форме, установленной в приложении № 5 к Договору).                        В соответствии с п. 5.1.1. Договора Субподрядчик представляет Подрядчику не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), подписанные Субподрядчиком, а также Исполнительную документацию на выполненный в отчетном периоде объеме Работ в пяти экземплярах на бумажном носителе в оригинальных экземплярах, а также в электронном виде на флэш накопителе, технические паспорта и сертификаты на оборудование, материалы и изделия, использование при выполнении Работ в отчетном периоде, Отчет об использовании давальческих материалов (по форме, установленной в приложении № 5 к Договору) счет на оплату выполненных работ, счет-фактуру.                    В соответствии с 5.1.2. Договора Подрядчик обязан в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня представления в порядке, установленном п. 5.1.1. Договора, Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (Форма № КС-3), рассмотреть их в случае наличия замечаний направить Субподрядчику мотивированный отказ в их подписании с указанием соответствующих причин. При отсутствии замечаний подписание представленных в соответствии с настоящим пунктом документов осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня после подписания Генеральным подрядчиком первичных документов о сдаче-приемке выполненных работ Подрядчиком за отчетный период.                 27.07.2023 в адрес ООО «ПСК «РусЮнион» письмом Исх. № 2707-1 была направлена документация на выполненные работы на сумму 10 215 855,90 руб. за период с 24.06.2023 по 20.07.2023 с просьбой подписать и вернуть в адрес                                                               ООО «СтройТрансСервис» по одному экземпляру. В составе переданных документов были следующие документы:         1. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №7 от 20.07.2023.           2. Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 №7 от 20.07.2023.         3. Счёт-фактура №83 от 20.07.2023.          4. Счёт на оплату №19 от 20.07.2023.                   Данные документы были переданы в адрес ООО «ПСК «РусЮнион» нарочно с сопроводительным письмом Исх. №2707-1 от 27.07.2023, о чём свидетельствует штамп с входящим номером № 932 от 27.07.2023. Необходимая исполнительная документация, предусмотренная п. 5.1.1 договора, была принята ООО «ПСК «РусЮнион» без замечаний 19.06.2023 в соответствии с реестром приема-передачи № /2023.            Акт формы КС-2 №7 от 20.07.2023 и справка формы КС-3 №7 от 20.07.2023 были направлены в адрес ООО «ПСК «РусЮнион» 27.07.2023, то есть более 4-х месяцев назад. До настоящего времени каких-либо возражений по объемам, срокам и стоимости выполненных работ от Ответчика не поступало, вышеуказанные Акты также в наш адрес не возвращены. Таким образом, в соответствии со ст.753, работы по Актам формы КС-2 №7 от 20.07.2023 и формы КС-3 №7 от 20.07.2023 считаются принятыми ООО «ПСК «РусЮнион» без замечаний.                      С учетом оплаченного аванса в сумме 811 314,82 руб. и генподрядных услуг в сумме 766 189,19 руб. задолженность ООО «ПСК «РусЮнион» перед ООО «СтройТрансСервис» по выполненным работам по договору №1420/4-2ис от 15.09.2022 за период с 24.06.2023 по 20.07.2023 составляет 8 638 351,89 руб. (из расчёта 10 215 855,90 - 811 314,82 - 766 189,19).

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно пункту 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Из положений статей 702, 740, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что основанием для возникновения у заказчика денежного обязательства по оплате работ по договору является совокупность следующих обстоятельств: выполнение работ и передача их результата заказчику.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате обусловленных договором работ является сдача работ заказчику путем подписания акта выполненных работ (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 №51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» (далее - информационное письмо №51).

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

С учетом изложенного, истец доказал факт наличия у ответчика задолженности представленными в материалы дела доказательствами, требование о взыскании задолженности договору от 15.09.2022 №1420/4-2ис в размере 8 638 351 руб. 89 коп. признается судом обоснованным и подлежащим удовлетворению.

 

В силу ч. 4 ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Согласно п. 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11.07.2014  N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах" в тех случаях, когда до окончания рассмотрения дела государственная пошлина не была уплачена (взыскана) частично либо в полном объеме ввиду действия отсрочки, рассрочки по уплате госпошлины, увеличения истцом размера исковых требований после обращения в арбитражный суд, вопрос о взыскании неуплаченной в федеральный бюджет государственной пошлины разрешается судом исходя из следующих обстоятельств.

Если суд удовлетворяет заявленные требования, государственная пошлина взыскивается с другой стороны непосредственно в доход федерального бюджета применительно к части 3 статьи 110 АПК РФ. При отказе в удовлетворении требований государственная пошлина взыскивается в федеральный бюджет с лица, увеличившего размер заявленных требований после обращения в суд, лица, которому была дана отсрочка или рассрочка в уплате государственной пошлины.

Истцу при подаче искового заявления была предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлины. Таким образом, в соответствии с п. 3 ст. 110 АПК РФ с ответчика подлежит взысканию в доход федерального бюджета государственная пошлина в размере 66 192 рубля.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РУСЮНИОН" (ИНН: 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРАНССЕРВИС" (ИНН: 

<

***>) задолженность договору от 15.09.2022 №1420/4-2ис в размере 8 638 351 (восемь миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч триста пятьдесят один) руб. 89 коп.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РУСЮНИОН" (ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 66 192 (шестьдесят шесть тысяч сто девяносто два) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья:                                                                                                              В.Г. Джиоев