АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-10557/2020

г. Оренбург

05 февраля 2025 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Александрова А.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания Тимощенко А.В., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строительная корпорация «Ликос», г. Оренбург ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>  

к Муниципальному учреждению Администрация города Медногорска, Оренбургская область г.Медногорск, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Медногорский медно-серный комбинат», Оренбургская область, г. Медногорск,  

ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, 

третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора на стороне ответчиков:  

- общество с ограниченной ответственностью "Фундаментстройпроект", г.Оренбург, ОГРН: 

<

***>,  

ИНН: 

<

***>, 

- общество с ограниченной ответственностью "Техстромпроект" г.Оренбург, ОГРН: 

<

***>, ИНН:

<

***>,  

- общество с ограниченной ответственностью "ДИОС-2-Геострой", г.Оренбург, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>,  

об обязании Муниципального учреждения администрация г.Медногорска принять дополнительные работы по устройству фундаментов и бетонной подготовки и предоставить для оплаты ООО «Медногорский медно-серный комбинат» копии актов о приемке выполненных работ (КС-2) от 20.03.2020 № 27, от 20.03.2020 № 28., от 31.08.2020 № 172 по договору генерального подряда от 31.07.2019 № 10/1287-19,  

о взыскании с Муниципального учреждения Администрация г. Медногорска и ООО «Медногорский медно-серный комбинат»  

7 248 760 руб. 80 коп., составляющих стоимость дополнительных работ по Договору генерального подряда от 31.07.2019 № 10/1287;  

о взыскании с Муниципального учреждения Администрация города Медногорска в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная корпорация «Ликос» стоимости дополнительных работ по Договору генерального подряда № 10/1287-19 от 31.07.2019 г., в части, не исполненной за счет Общества с ограниченной ответственностью «Медногорский медносерный комбинат»;  

о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Медногорский медно-серный комбинат» суммы уплаченной государственной пошлины в размере 88 927 (восемьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 00 коп.;  

о взыскании с Муниципального учреждения администрация города Медногорска в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная корпорация «Ликос» государственной пошлины в размере  

6 000 (шесть тысяч) рублей 00 коп. 

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Строительная корпорация «Ликос» к обществу с ограниченной ответственностью «Медногорский медно-серный комбинат» удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Медногорский медно-серный комбинат» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная корпорация «Ликос» основной долг в размере 1 147 736 руб. 60 коп., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 9 380 руб. 00 коп.  

В удовлетворении оставшейся части исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Строительная корпорация «Ликос» к обществу с ограниченной ответственностью «Медногорский медно-серный комбинат» отказать.  

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Строительная корпорация «Ликос» к Муниципальному учреждению Администрация города Медногорска отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная корпорация «Ликос» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Медногорский медно-серный комбинат» судебные издержки в сумме 109 408 руб. 00 коп.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительная корпорация «Ликос» из Федерального бюджета государственную пошлину в сумме 39 063 руб. 00 коп., уплаченную на основании платежного поручения № 59741 от 11.02.2021.  

Обеспечительные меры, принятые на основании определения Арбитражного суда Оренбургской области от 27.10.2021 по данному делу, отменить после вступления решения в законную силу.  

 Решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба.  

 Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Челябинск) путем подачи жалобы через Арбитражный суд Оренбургской области.  

 Судья А.А. Александров