АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

25 сентября 2025 года

Дело № А33-35665/2024

Красноярск

Резолютивная часть решения вынесена в судебном заседании 12 сентября 2025 года.

В полном объёме решение изготовлено 25 сентября 2025 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Толстых А.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Вудлайн» (ИНН 

<

***>,                  ОГРН 

<

***>)

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета:

- КГБУ «Кодинское лесничество»,

об устранении нарушений

в отсутствие лиц, участвующих в деле,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания      Щепаняк П.Н.,

установил:

министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Вудлайн» (далее – ответчик) об обязании выполнить в течение трёх месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, выполнить за 2023 год по договору аренды лесного участка от 02.12.2009 № 330-з, следующие лесовосстановительные мероприятия, а именно: естественное лесовосстановление - 68,4 га; агротехнический уход за лесными культурами – 32,6 га.

Определением от 28.11.2024 исковое заявление принято к производству суда, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета, привлечено КГБУ «Кодинское лесничество». Предварительное судебное заседание назначено на 28.01.2025.

Предварительное судебное заседание откладывалось.

На основании статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 04.06.2024 № 12 «О подготовке дела к судебному разбирательству в арбитражном суде», при отсутствии возражений лиц, участвующих в деле, арбитражным судом завершено предварительное судебное заседание, рассмотрение дела продолжено в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции, о чем вынесено протокольное определение от 23.05.2025.

Судебное заседание откладывалось.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, для участия в судебном заседании не явились, представителей не направили. На основании статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в их отсутствие.

Суд исследовал письменные материалы дела.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между агентством лесной отрасли Красноярского края (арендодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «АЛПК плюс» (арендатор) подписан договор аренды лесного участка от 02.12.2009 № 330-з (далее – договор аренды), в соответствии с пунктом 1 которого арендодатель, действующий в соответствии со статьями 72 н 74 Лесного кодекса Российской Федерации, обязуется предоставить, а арендатор обязуется принять во временное пользование лесные участки, находящиеся в государственной собственности, определенные пунктом 2 настоящего договора (далее - лесные участки).

В соответствии с пунктом 2 договора аренды лесные участки, общей площадью 13942,194 га, расположены: Красноярский край, Кежемский район, Кодинское лесничество, Ковинское участковое лесничество, кварталы №№ 156-159, 279, 280, 318, 345, 348-352, 357, 381, 416, 417.

Лесные участки переданы по акту приема-передачи.

Согласно подпункту «ж» пункта 13 договора арендатор обязан осуществлять мероприятия по лесовосстановлению на лесном участке на условиях, в объемах и сроки, которые указаны в проекте освоения лесов и приложении № 6 за счет собственных средств.

04.10.2010 между агентством лесной отрасли Красноярского края и обществом с ограниченной ответственностью «Лесное» подписано дополнительное соглашение № 1 к договору аренды лесного участка, в соответствии с пунктом 1 которого, в преамбуле и по тексту договора слова «ООО АЛПК плюс» заменить словами ООО «Лесное».

05.04.2013 между агентством лесной отрасли Красноярского края (арендодатель), обществом с ограниченной ответственностью «Лесное» (арендатор) и обществом с ограниченной ответственностью «СевероЛес» (перенаниматель) подписано дополнительное соглашение № 2 к договору аренды лесного участка, в соответствии с пунктом 1 которого арендатор с согласия арендодателя уступает перенанимателю, а перенаниматель, соответственно, принимает на себя все права и обязанности по договору аренды лесного участка от 02.12.2009 № 330-з.

28.08.2015 между ООО «СевероЛес» и ответчиком подписан договор передачи прав и обязанностей к договору аренды лесного участка, согласно которому ООО «СевероЛес» передает ООО «ВудЛайн» в полном объеме все права и обязанности по договору.

К договору аренды лесного участка разработан проект освоения лесов, получивший положительное экспертное заключение № 926, утвержденное приказом министерства от 09.08.2019 № 2248-РЛР/Э. Разделами 4.8 - 4.9 проекта освоения лесов к договору аренды лесного участка установлены виды лесовосстановительных мероприятий, среднегодовые объемы и сроки их осуществления. В соответствии с таблицей 22 проекта освоения лесов ответчик ежегодно обязан выполнять следующие мероприятия по лесовосстановлению на территории Кодинского лесничества Ковинского участкового лесничества: искусственное лесовосстановление – 21,1 га; естественное лесовосстановление - 157 га, установлены нормы агротехнического ухода. Согласно примечаниям к таблице 22 проект освоения лесов ежегодные объемы лесовосстановительных мероприятий могут корректироваться в зависимости от факта освоения расчетной лесосеки за предшествующий год, мест проведения рубок и наличия доступного фонда лесовосстановления.

Согласно письму Министерства от 10.11.2023 № 86-15126 «О корректировке плана» ООО «ВудЛайн», скорректированы объемы лесовосстановительных работ на 2023 год. С учетом корректировки ответчик обязан в 2023 году выполнить следующие лесовосстановительные мероприятия:

- искусственное лесовосстановление – 0  га.;

- подготовка почвы по искусственное лесовосстановление – 14,6 га;

- в том числе будущего года — 14,6 га;

- естественное лесовосстановление – 68,4 га.;

- агротехнический уход за лесными культурами путем ручной оправки – 32,6 га.;

- заготовка лесных семян (сосна) - 0 кг.

Согласно справке выполнению лесовосстановительных работ и сводному акту по воспроизводству лесов КГБУ «Кодинское лесничество» ответчик не в полном объеме выполнил в 2023 году лесовосстановительные мероприятия на лесном участке, переданном по договору аренды лесного участка от 02.12.2009 № 330-з. В частности, ответчиком не выполнено следующее мероприятие: естественное лесовосстановление - 68,4 га; агротехнический уход за лесными культурами – 32,6 га (в том числе согласно справке лесничества от 11.09.2025). В материалы дела представлены справки о фактической заготовке древесины и проведении лесовосстановления.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец обратился в суд с настоящим иском.

Возражая против заявленных требований, ответчик указал, что лесовосстановительные мероприятия фактически выполнены, однако КГБУ «Кодинское лесничество» не была проведена натурная проверка работ.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 76 Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» (далее - Закон № 7-ФЗ) споры в области охраны окружающей среды разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.

Согласно части 2 статьи 4 Лесного кодекса Российской Федерации, от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в лесных отношениях участвуют соответственно органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий, установленных нормативными правовыми актами.

Распоряжением Правительства Красноярского края от 13.07.2016 № 560-р образовано Министерство лесного хозяйства Красноярского края, действующее на основании Положения о министерстве лесного хозяйства Красноярского края утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 26.07.2016 № 374-п.

Министерство является органом исполнительной власти Красноярского края, осуществляющим надзор (контроль) в области лесных отношений.

Постановлением Правительства Красноярского края от 28.12.2023 № 1103-п внесены изменения в Положение о министерстве лесного хозяйства Красноярского края, в частности наименование министерства изменено на министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края.

15.01.2024 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об изменении наименования министерства лесного хозяйства Красноярского края на министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края.

В силу норм статьи 74  Лесного кодекса Российской Федерации (далее также – ЛК РФ)  заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, осуществляется соответственно органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса.

Таким образом, истец осуществляет полномочия арендодателя по договору аренды лесного участка, уполномочен на предъявление иска о понуждении к исполнению обязанности по выполнению мероприятий. Следовательно, министерство является надлежащим истцом по настоящему иску.

В соответствии со статьями 42, 58 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации.

В статье 1 Лесного кодекса Российской Федерации (далее также – ЛК РФ) изложены принципы лесного законодательства, содержание которых охватывает отношения по управлению, сохранению, воспроизводству, охране, защите, использованию лесов, в том числе по обеспечению многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного лесопользования для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Статьей 5 ЛК РФ установлено, что использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются исходя из понятия о лесе как об экологической системе или как о природном ресурсе.

В соответствии с пунктом 4 статьи 23.5 ЛК РФ осуществление сплошных рубок на лесных участках, предоставленных для заготовки древесины, допускается только при условии проектирования и последующего осуществления мероприятий по воспроизводству лесов на указанных лесных участках.

Согласно части 1 статьи 62 ЛК РФ, пункту 3 Правил лесовосстановления, утвержденных Приказом Минприроды от 29.12.2021 №1024 (далее - Правила лесовосстановления) лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов.

В соответствии с частью 5 статьи 62 ЛК РФ лесовосстановление проводится лицами, осуществляющими рубки лесных насаждений в соответствии с настоящим Кодексом, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 29.1, статьей 30 и частью 4.1 статьи 32 настоящего Кодекса.

С учетом положений статей 61, 62 ЛК РФ, а также указанных выше пунктов Правил лесовосстановления, лесовосстановительные мероприятия осуществляется лицами, использующими леса в соответствии с проектом освоения лесов, который содержит детализированные условия исполнения договора аренды лесного участка для арендаторов.

Согласно части 6 статьи 62 ЛК РФ лесовосстановление проводится в соответствии с проектом лесовосстановления, который разрабатывается в соответствии со статьей 89.1 настоящего Кодекса.

Пунктом 3 Правил лесовосстановления предусмотрено, что лесовосстановление осуществляется естественным, искусственным или комбинированным способом в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов, а также сохранения полезных функций лесов, их биологического разнообразия.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 Правил лесовосстановление осуществляется на основании проекта лесовосстановления лицами, осуществляющими рубки лесных насаждений в соответствии с ЛК РФ, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 29.1, статьей 30, частью 4.1 статьи 32 ЛК РФ.

Таким образом, арендатор обязан выполнять мероприятия по лесовосстановлению в соответствии с Правилами лесовосстановления с учетом проводимых им рубок.

Как следует из материалов дела и установлено судом, ответчик является арендатором по договору аренды лесного участка от 02.12.2009 № 330-з из состава земель лесного фонда, находящихся в государственной собственности, для заготовки древесины сроком на 49 лет общей площадью 13942,194 га, расположенных на территории: Красноярский край, Кежемский район, Кодинское лесничество, Ковинское участковое лесничество, кварталы №№ 156-159, 279, 280, 318, 345, 348-352, 357, 381, 416, 417.

По условиям договора ответчик обязан осуществлять мероприятия по лесовосстановлению на лесном участке на условиях, в объемах и сроки, которые указаны в проекте освоения лесов и приложении № 6 за счет собственных средств.

К договору аренды лесного участка разработан проект освоения лесов. Разделами 4.8 - 4.9 проекта освоения лесов установлены виды лесовосстановительных мероприятий, среднегодовые объемы и сроки их осуществления.

В соответствии с таблицей 22 проекта освоения лесов ответчик ежегодно обязан выполнять следующие мероприятия по лесовосстановлению на территории Кодинского лесничества Ковинского участкового лесничества: искусственное лесовосстановление – 21,1 га; естественное лесовосстановление - 157 га, установлены нормы агротехнического ухода. Согласно примечаниям к таблице 22 проект освоения лесов ежегодные объемы лесовосстановительных мероприятий могут корректироваться в зависимости от факта освоения расчетной лесосеки за предшествующий год, мест проведения рубок и наличия доступного фонда лесовосстановления.

С учетом корректировки ответчик обязан в 2023 году выполнить следующие лесовосстановительные мероприятия: искусственное лесовосстановление – 0 га.; подготовка почвы по искусственное лесовосстановление – 14,6 га; в том числе будущего года – 4,6 га; естественное лесовосстановление – 68,4 га.; агротехнический уход за лесными культурами путем ручной оправки – 32,6 га.; заготовка лесных семян (сосна) - 0 кг.

При этом согласно справке выполнению лесовосстановительных работ (в том числе по состоянию на 11.09.2025) и сводному акту по воспроизводству лесов КГБУ «Кодинское лесничество» ответчик не в полном объеме выполнил в 2023 году лесовосстановительные мероприятия на лесном участке, переданном по договору аренды лесного участка от 02.12.2009 № 330-з. В частности, ответчиком не выполнено следующее мероприятие:

- естественное лесовосстановление - 68,4 га;

- агротехнический уход за лесными культурами – 32,6 га.

Таким образом, материалами дела подтвержден и ответчиком не оспорен факт нарушения арендатором норм лесного законодательства и условий договора аренды.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Суд неоднократно предлагал ответчику представить доказательства выполнения мероприятий (определение от 28.01.2025, протокольные определения от 06.03.2025, от 23.05.2025, от 04.07.2025).

Доводы ответчика о том, что лесовосстановительные мероприятия фактически были выполнены лесопользователем, материалами дела не подтверждаются.

На момент рассмотрения спора ответчик доказательства устранения допущенных нарушений в материалы дела не представил, представленные истцом документы не оспорил. Исковые требования подтверждаются представленными истцом доказательствами.

Учитывая изложенное, заявленные требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

В силу части 1 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

При установлении указанного срока, суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства (пункт 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»).

Заявленный ответчиком срок исполнения решения – три месяца со дня вступления решения суда в законную силу, суд полагает обоснованным и достаточным для выполнения указанных работ.

При этом суд полагает необходимым разъяснить, что в случае наличия обстоятельств, объективно препятствующих исполнению судебного акта о понуждении к исполнению в натуре в установленный судом срок (пункт 3 статьи 401 ГК РФ), ответчик вправе подать заявление об отсрочке или о рассрочке исполнения судебного акта (статья 324 АПК РФ) (пункт 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»).

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

На основании статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации истец освобождён от уплаты государственной пошлины.

Учитывая результат рассмотрения дела, государственная пошлина в размере 50 000 руб. подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа. По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Вудлайн» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда по настоящему делу выполнить за 2023 год по договору аренды лесного участка от 02.12.2009 № 330-з, следующие лесовосстановительные мероприятия, а именно: естественное лесовосстановление - 68,4 га; агротехнический уход за лесными культурами – 32,6 га.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вудлайн» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 50 000 руб. государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

А.С. Толстых