107_35508863 

 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(в порядке статьи 176 АПК РФ) 

 

Дело № А40-201018/21-107-1290

25 апреля 2023 года

г. Москва

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Ларина М.В., единолично, при  ведении протокола секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в  открытом судебном заседании дело № А40-201018/21-107-1290 по иску ООО  "Синтерра Констракшн" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к ответчику ООО  "Энергокомплекс" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), третье лицо: ИФНС  России № 25 по г. Москве о взыскании суммы неустойки за нарушение сроков  производства работ по договору № 214/П/2017 от 15.11.2017 и дополнительным  соглашениям № 2, 3, 5, 8, 9 на сумму 33 307 042,66 р., встречному иску ООО  "Энергокомплекс" к ООО "Синтерра Констракшн" о взыскании задолженности по  оплате за поставленное оборудование по дополнительному соглашению № 4 от  14.11.2018 в размере 1 772 051,28 р., неустойки за период с 26.01.2019 по 30.10.2021 в  размере 1 787 999,74 р., процентов за период с 31.10.2021 по 25.04.2023 в размере  153 852,89 р., проценты с 26.04.2023 по дату фактического исполнения обязательств,  при участии представителя истца: не явился, извещен, представителей ответчика:  ФИО2, доверенность от 14.07.2021, паспорт, диплом,  

РЕШИЛ:

Удовлетворить исковые требования ООО "Синтерра Констракшн" к ООО  "Энергокомплекс" частично.  

Взыскать с ООО "Энергокомплекс" в пользу ООО "Синтерра Констракшн" сумму  неустойки за нарушение сроков производства работ по договору № 214/П/2017 от  15.11.2017 и дополнительным соглашениям № 3, 5, 8, 9 в размере 16 030 586,64 р.,  государственную пошлину в размере 112 622 р.  

В остальной части отказать в удовлетворении иска. 

Удовлетворить встречные исковые требования ООО "Энергокомплекс" к ООО  "Синтерра Констракшн" полностью.  

Взыскать с ООО "Синтерра Констракшн" в пользу ООО "Энергокомплекс" сумму  задолженности по оплате за поставленное оборудование по дополнительному  соглашению № 4 от 14.11.2018 в размере 1 772 051,28 р., неустойки за период с  26.01.2019 по 30.10.2021 в размере 1 787 999,74 р., процентов за пользование чужими  денежными средствами за период с 31.10.2021 по 25.04.2023 в размере 153 852,89 р.  (всего задолженность, неустойка и проценты в размере 3 713 903,91 р.), проценты с  26.04.2023 на сумму задолженности исходя из учетной ставки ЦБ РФ за каждый день  просрочки по дату фактического исполнения обязательств, государственную пошлину  в размере 41 570 р.  

Произвести зачет первоначальных и встречных требований. 

Взыскать с ООО "Энергокомплекс" в пользу ООО "Синтерра Констракшн" сумму  неустойки за нарушение сроков производства работ по договору № 214/П/2017 от  15.11.2017 и дополнительным соглашениям № 3, 5, 8, 9 в размере 12 316 682,73 р.,  государственную пошлину в размере 71 052 р.  

Возвратить ООО "Энергокомплекс" из федерального бюджета государственную  пошлину в размере 158 430 р., уплаченную по платежному поручению № 663 от  10.10.2022.  

Решение подлежит исполнению после вступления в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течении месяца со дня принятия.  

СУДЬЯ М.В. Ларин